Арбитражный суд Московской области 107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-46574/2023

г. Москва

08 августа 2023 года

Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-46574/2023 по иску ООО "Т-СТРОЙ"  (ОГРН 

<

***>) к Администрации Богородского городского округа Московской области  (ОГРН 

<

***>) об обязании внести изменения в муниципальный контракт от 15.12.2022.   № 1309,  

при участии в судебном заседании: согласно протоколу, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Обязать Администрацию Богородского городского округа Московской области внести  изменения в муниципальный контракт от 15.12.2022 № 1309, путем подписания с ООО "Т- СТРОЙ" дополнительного соглашения к нему, в редакции Приложения № 9 к исковому  заявлению, на следующих условиях:  

«Администрация Богородского городского округа Московской области, именуемое(ая,ый)  в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя главы администрации Богородского городского  округа ФИО2, действующего на основании Распоряжения  администрации Богородского городского округа от 22.08.2019 № 765-лс, с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «Т-строй», именуемое(ая,ый) в дальнейшем  «Подрядчик», в лице Генерального директора ФИО3,  действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и каждый  в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской  Федерации (далее - Гражданский кодекс), Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  

муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных правовых актов Российской  Федерации и Московской области, на основании в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 44 ФЗ,  заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Дополнительное соглашение) к  муниципальному контракту от 15.12.2022 № 1309 на Выполнение работ и оказание услуг,  связанных с выполнением инженерных изысканий, разработкой проектной и рабочей  документации, выполнением строительно-монтажных работ, по строительству многоквартирных  жилых домов по адресу: Московская область, Богородский городской округ, г. Старая Купавна,  ул. Горького (далее - Контракт) о нижеследующем:  

1. На основании ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд Стороны пришли к соглашению о внесении изменений:  

1.1. Изменить п. 1.1 Контракта и изложить его в следующей редакции: «1.1. Подрядчик  обязуется выполнить инженерные изыскания, осуществить подготовку проектной и рабочей  документации, выполнить работы по строительству объекта капитального строительства:  «выполнение работ и оказание услуг, связанных с выполнением инженерных изысканий,  разработкой проектной и рабочей документации, выполнением строительно-монтажных работ, по  строительству многоквартирных жилых домов по адресу: Московская область, Богородский  городской округ, 

<

...>» (далее - работы, объект соответственно) и  передать результат выполненной работы по Контракту Заказчику в обусловленные Контрактом  сроки, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненной работы по Контракту в  порядке и в соответствии с условиями, предусмотренными Контрактом.  

1.2. По тексту Контракта и Приложений к нему читать адрес: «Московская область,  Богородский городской округ, 

<

...>». Кадастровый номер участка  50:16:0602003:8955.  

1.3. Изменить срок начала исполнения вида работ Подрядчиком с момента заключения  настоящего Соглашения, без увеличения общего срока по этапам.  

1.4. Изложить График выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к  Контракту) в редакции Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 1 к  настоящему Соглашению).  

2. Срок выполнения работ по Контракту продлевается без предъявления к Подрядчику  требования об уплате неустоек (штрафов, пеней), в связи с просрочкой исполнения обязательств  по Контракту, а также без изменения цены Контракта.  

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

4. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Дополнительного  соглашения, Стороны руководствуются положениями Контракта.  

5. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную  юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

Приложение: 

1. Приложение № 1 к Соглашению «График выполнения строительно-монтажных работ»  (Приложение № 2 к Контракту)».  

Взыскать с Администрации Богородского городского округа Московской области в пользу  ООО "Т-СТРОЙ" 6000 руб. 00 коп. государственной пошлины по иску.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный  апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия если не  подана апелляционная жалоба.  

Судья П.И. Машин