АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.(3852) 29-88-01, http://www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А03-5741/2016

г. Барнаул

01 июня 2017 года.

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Сайчука А.В. рассмотрев в порядке  упрощенного производства дело по исковому заявлению Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11», г. Барнаул, к обществу с ограниченной  ответственностью «БЗСК-СТРОЙ», г. Горно-Алтайск Республики Алтай, о безвозмездном  устранении недостатков выполненных работ,  

руководствуясь ст.ст. 110, 167 – 171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «БЗСК-СТРОЙ» безвозмездно  устранить недостатки, выявленные в пределах гарантийного срока эксплуатации чердачной  крыши над актовыми и спортивнымм залами здания Гимназии № 11 но адресу: 

<

...> не позднее 45 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную  силу. Привести в соответствие с условиями гражданско-правового договора № 2013.149324  на выполнение работ по капитальному ремонту чердачной крыши над актовыми и  спортивными залами здания Гимназии № 11 по адресу: 

<

...> от  09.09.2013 путем выполнения работ, соответствующих строительным нормам и правилам и  заключению судебной строительно-технической экспертизы № 12-17-03-06 от 30.03.2017  выполнив следующие виды работ:  

- выполнить стяжку из цементно-песчаного раствора по утеплителю покрытий на всей  площади в полном объеме согласно проектной документации 96-97-2012-КР, локальной  смете № 1-1;  

- выполнить работы по укреплению влагоизоляционной пленки в соответствии со  СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;  

- устранить дефекты - видимые просветы в соответствии со СНиП 3.04.01-87  изоляционные и отделочные покрытия», проектной документации 96-97-2012- КР, по всей  кровле в коньковых узлах ( узел № 11):  

- установить нащельник; -  установить гребенку; -  установить фасонные заглушки. 

- установить фасонный пристенный элемент согласно проектной документации 96-972012 (узел № 13).  

- переделать узел ендовы слухового окна в соответствии с проектной документацией  96-97-2012-КР с установкой верхней и нижней планки ендовы из кровельной стали с  полимерным покрытием толщиной 0,7 мм на силиконовом герметике с использованием  комбинированных заклепок;  

- произвести герметизацию силиконовыми герметиками продольных и поперечных  стыком между листами;  

- Установить защитный фартук из стальных листов с полимерным покрытием  выполненный на заклепках на одной ветшахте в соответствии с проектной документацией  

96-97-2012-КР. На остальных вентшахтах установить дополнительные фартуки с загибом на  волну;  

- произвести расчистку некачественного огнезащитного покрытия несущих стальных  конструкций с последующей окраской огнезащитным составом в полном объеме.  

- дополнительно установить стычный профиль в соответствии с вылетом 200 м  согласно проектной документации (узел № 12).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «БЗСК-СТРОЙ» в пользу  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11» 6 000 руб.  в возмещение расходов по уплате государственной пошлины и 28 612 руб. в возмещение  расходов по оплате судебной экспертизы.  

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию – Седьмой  арбитражный апелляционный суд (г. Томск), путем подачи апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Алтайского края в срок, не превышающий месяца со дня принятия  решения.  

Судья А.В. Сайчук