1111111233_6437004  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99  

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, 

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск Дело № А19-14781/2023  

25.10.2023 г. 

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Кириченко С.И., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению КОМИТЕТА ПО  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, ТРАНСПОРТУ И  СВЯЗИ АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (далее - КЖКХ  АДМИНИСТРАЦИИ АГО) (адрес: 665830, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, АНГАРСК ГОРОД,  КВ-Л 59, ДОМ 4, ПОМЕЩЕНИЕ 1, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "СТРОЙДОРХОЛДИНГ" (далее - ООО "СТРОЙДОРХОЛДИНГ") (адрес: 664013,  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСК ГОРОД, ТЕЛЬМАНА УЛИЦА, ДОМ 120, ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки, о взыскании 823 512 руб. 34 коп.,  

руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "СТРОЙДОРХОЛДИНГ" в рамках гарантийных обязательств устранить безвозмездно  недостатки результата выполненных работ, в соответствии с пунктом 1 статьи 723 ГК РФ,  а именно произвести восстановительный ремонт автомобильной дороги М-53 «Байкал» от  Челябинска через Курган. Омск. Новосибирск. Кемерово. Красноярск. Иркутск. Улан-Удэ  до Читы па участке от 1843 км + 000 м до 1852 км + 990 м, в полном соответствии с  условиями муниципального контракта № 2000019041 от 06.05.2019г. в течение 15  календарных дней с момента вынесения решения суда, а именно устранить на участке  автомобильной дороги от 1 849 км + 600 м до 1 843 км +000 м:  

1) Продольные и поперечные трещины на поверхности проезжей части на всем  протяжении участка автомобильной дороги;  

2) Разрушение асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги в виде выбоины  выявлено на следующих участках (ремонт картами):  

- в районе пересечения с улицей Карла Маркса под трубопроводом: - в 150 метрах от дорожного знака 6.22 «11ачало населенного пункта» «Ангарск»; 

- перед путепроводом по направлению движения от улицы Карла Маркса до улицы  Шоссейная;  

3) Просадку асфальтобетонного покрытия в районе стойки с дорожными знаками 2.3.3  «Примыкание второстепенной дороги» и 1.22 «Пешеходный переход» по направлению  движения от улицы Карла Маркса до улицы Шоссейная.  

4) Разрушение асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги выявлено  на следующих участках:  

- в 30 м от начала барьерного металлического ограждения по оси проезжей части со  стороны улицы Карла Маркса;  

- в 100 м от Холодного Канала в двух направлениях движения; 

5) Выкрашивание и выбоины асфальтобетонного покрытия на участке от спуска  с виадука до барьерного ограждения (ремонт картами);  

6) Выбоины и провалы на обочинах на всем протяжении (грейдирование и  отсыпка).  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "СТРОЙДОРХОЛДИНГ" в пользу КОМИТЕТА ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ  ХОЗЯЙСТВУ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ АДМИНИСТРАЦИИ  АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 20 714 руб. 07 коп. – пени, 16 483 руб. 34 коп. –  штраф.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "СТРОЙДОРХОЛДИНГ" в доход федерального бюджета РФ государственную пошлину в  размере 8 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия, и по истечении этого срока вступает в законную силу. 

Судья С.И. Кириченко