АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Краснодар                                                                                            Дело № А32-60434/2021

Резолютивная часть решения объявлена   21.04.2022

Полный текст судебного акта изготовлен  22.04.2022

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Баганиной С.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мысак О.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску администрация муниципального образования Тихорецкий район (352120, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН, ТИХОРЕЦК ГОРОД, ОКТЯБРЬСКАЯ УЛИЦА, 38, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к   ООО «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РУСПРОЕКТ» (300026, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТУЛА ГОРОД, РЯЗАНСКАЯ 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании 5 973,82 руб.

УСТАНОВИЛ:

Администрация муниципального образования Тихорецкий район  обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РУСПРОЕКТ»  о взыскании 5 973,82 руб. неустойки.Стороны  в заседание не явились, извещены надлежащим образом по правилам ст.ст. 121-124 АПК РФ. Ответчика отзыв на иск не представил, по существу и сумме заявленные требования не оспорил.

Поскольку на стадии подготовки дела к судебному разбирательству установлен характер спорного правоотношения и определены обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела по существу, доказательства извещения ответчика о времени и месте судебного заседания имеются, возражения против перехода в судебное заседание от ответчика не поступили, суд завершил подготовку дела к судебному разбирательству в порядке п.4 ст. 137 АПК РФ и открыл судебное заседание арбитражного суда первой инстанции.Дело рассматривается в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, между администрацией муниципального образования Тихорецкий район (заказчик) и ООО «ПСК «Руспроект» (исполнитель) заключен муниципальный контракт № 03183000107200002150001 от 01.06.2020на оказание услуг по разработке проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района

Выполнение работ по контракту предусматривает последовательную этапность.

В соответствие с пунктом 2.1 контракта под этапом исполнения контракта понимается выполнение работы, приемка выполненных работ, оплата выполненных работ.

В соответствии с пунктом 3.2 контракта, приложением № 2 к контракту дата завершения работ по контракту: 1  этапа - 20 февраля 2021 года; 2 этапа - 20 июня 2021 года; 3 этапа- 30 октября 2021 года.

Общая цена контракта составила 240617,94 руб., из которых: стоимость первого этапа – 100 000  руб.; стоимость второго этапа – 100 000 руб., стоимость третьего этапа- 40617,94руб.

В порядке  требованиям пункта 4.3.5 контракта заказчик обязан требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом.

Результат работ по первому этапу выполнению работ принят заказчиком 29.10.2021, по второму этапу – 12.11. 2021, что подтверждается актами приемки-сдачи оказанных услуг: № 03183000107200002150001-А1 от 29.10.2021 и № 03183000107200002150001-А2 от 12.11.2021.  Работы, предусмотренные третьим этапом, находятся в стадии исполнения и не приняты заказчиком.

Истцом в адрес ответчика направлялись претензии (исх.№ 1395 от 24.02.021, № 9814 от 16.11.2021, № 5715 от 13.07.2021) с требованием произвести оплату образовавшейся задолженности. Претензия оставлена без удовлетворения, что  явилось причиной обращения   с иском в   суд.

Исследовав и оценив представленные в дело доказательства по правилам ст.71 АПК РФ, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Правоотношения сторон регулируются положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ).

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Абзацем 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Пунктом 1 статьи 766 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что государственный или муниципальный контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

На основании части 8 статьи 3 Закона № 44-ФЗ под государственным или муниципальным контрактом понимается договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.

В соответствии с пунктом 6.5 контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, в том числе за просрочку исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 4.1.8 контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статьи 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об оплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации должник обязан уплатить кредитору неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Представленными истцом в материалы дела актами формы КС-2 подтверждается факт просрочки выполнения работ по контракту. В связи с чем, истец начислил неустойку в общей сумме 5973,82 руб., требования истца о взыскании   пени заявлены правомерно.

В соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 65, 110, 156, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  суд       

РЕШИЛ:

Взыскать с  ООО «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РУСПРОЕКТ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Администрации муниципального образования Тихорецкий район (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 5 973,82 рублей неустойки.

Взыскать с  ООО «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РУСПРОЕКТ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 2000 рублей государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд,  вынесший решение.

Судья                                                                                                         С.А. Баганина