Арбитражный суд Чукотского автономного округа 

улица Ленина, дом 9а, Анадырь, 689000, 

www.chukotka.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А80-172/2023

г. Анадырь

29 марта 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 22 марта 2024 года.

Арбитражный суд Чукотского автономного округа в составе судьи Козловой Л.Д., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассматривая в судебном заседании дело по исковому заявлению от 29.03.2023 № 9/89/2023-иск

акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в лице филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция» 

к обществу с ограниченной ответственностью «Формула 78» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании аванса, неустойки и стоимости груза, 

при участии путем использования системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел»:

от истца – представитель ФИО2 по доверенности от 06.11.2019, диплом,

установил:

акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» в лице филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция» (далее – АО «Концерн Росэнергоатом», истец) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Формула 78» (далее – ООО «Формула 78», ответчик) о взыскании суммы выплаченного по договору транспортной экспедиции от 29.09.2021 № 9/176370-Д аванса в размере 4933500 руб., неустойки за период с 01.04.2022 по 10.02.2023 в размере 1644500 руб. и стоимости переданного для доставки и не доставленного груза в размере 79144289,35 руб. 

Определением от 04.04.2023 исковое заявление оставлено без движения до 04.05.2023 в связи с несоблюдением истцом требований, установленных частью 3 статьи 125, пунктом 1 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Определением от 05.05.2023 исковое заявление принято к производству суда, предварительное судебное заседание назначено на 09 часов 30 минут 18.07.2023.

В материалах дела имеются доказательства надлежащего извещения сторон о возбуждении производства по делу и начавшемся процессе, времени и месте судебного заседания в порядке статей 121, 123 АПК РФ.

В отзыве от 14.06.2023 ответчик просил оставить иск без рассмотрения в связи с несоблюдением истцом обязательного досудебного порядка разрешения спора (т. 5 л.д. 64).

В дополнениях к отзыву ответчик, не отрицая получение груза с площадки Калининской АЭС в г. Удомле, указал на нарушение истцом пунктов 2.1 – 2.3 Договора, а именно передачу груза без каких-либо документов (товарная накладная, поручение экспедитору, экспедиторские расписки), которые до настоящего времени по вине истца не оформлены, таким образом исполнение Договора не началось до настоящего времени по вине истца. Кроме того, ответчик указал на то, что им были приняты все надлежащие меры по исполнению Договора, и напротив, неисполнение Договора произошло исключительно в результате неправомерных действий истца, связанных с неисполнением пункта 2 Договора (т. 7 л.д. 129-131). 

Определением от 18.07.2023 дело назначено к судебному разбирательству на 09 часов 30 минут 17.10.2023.

Истец представил возражения от 10.10.2023 № 9/Ф0301/167089 на дополнения к отзыву (т. 8 л.д. 1-2).

В дополнениях к отзыву (т. 8 л.д. 21) ответчик подтвердил факт получения аванса по договору транспортной экспедиции от 29.09.2021 № 9/176370-Д, подписания указанного договора и дополнительного соглашения к нему, указал на то, что аванс израсходован на выполнение обязательств по договору транспортной экспедиции от 29.09.2021 № БиАЭС/16/174-2021. Относительно места нахождения принятого от истца по экспедиторским распискам груза ответчик пояснил, что груз находится в г. Артеме и по экспедиторским распискам от 06.10.2021, 07.10.2021, 11.10.2021 №№ 1-67 груз не принимался. Ответчиком в рамках заключенного договора транспортной экспедиции от 29.09.2021 № БиАЭС/16/174-2021 проведен цикл транспортно-экспедиторских работ: доставка груза из г. Удомля в г. Санкт-Петербург, перетарка в контейнеры, доставка ж/д в г. Владивосток, доставка в г. Артем на площадку хранения ООО «Солдис».

Определением от 17.10.2023 истцу отказано в привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «Солдис»; судебное заседание по делу отложено на 14 часов 30 минут 07.11.2023.

Протокольным определением судебное разбирательство по делу № А80-172/2023 отложено на 14 часов 30 минут 05.12.2023. 

Исходя из представленной между сторонами внесудебной переписки (от 26.10.2022 № 9/Ф03/171315 от 22.05.2023 № 9-Ф03/82178, от 04.06.2023 № 38 – т.5 л.д. 74, т. 6 л.д. 112-113) определением от 07.11.2023 суд предложил сторонам провести совместную инвентаризацию груза, перевозимого ООО «Формула 78» по договору от 29.09.2021 № 9/176370-Д, на площадке грузового терминала в г. Артем Приморского края, результаты инвентаризации представить суду. Инвентаризация сторонами не проведена.

Протокольным определением от 05.12.2023 по ходатайству истца судебное разбирательство по делу отложено на 11 часов 15 минут 16.01.2024.

Определением суда от 16.01.2024 приняты уточнения исковых требований, в которых истец просил взыскать с ответчика аванс в размере 4933500 руб., неустойку в размере 1644500 руб. и стоимость груза в общем размере 71134938,33 руб.; сторонам отказано в удовлетворении ходатайств о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, ООО «Газодизельные системы», ООО «Петербургская Логистическая компания», ООО «Терминал» и ООО «Солдис»; по ходатайству ответчика у ООО «Газодизельные системы» истребованы сведения о местонахождении контейнеров с грузом: TDRU6726116, SGCU4209002, PRGU9398155, PRGU4222712, PRGU4220031, PRGU4219560, GSTU9175659; судебное разбирательство по делу отложено на 11 часов 15 минут 13.02.2024.

Определением от 13.02.2024 в удовлетворении ходатайств ответчика об истребовании доказательств и о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельного требования относительно предмета спора, ООО «Петербургская Логистическая Компания» отказано. По ходатайству ответчика судебное разбирательство по делу отложено на 11 часов 15 минут 12.03.2024. 

В ответ на определение от 16.01.2024 ООО «Газодизельные системы» письмом от 04.03.2024 № 0403-0 сообщило, что контейнеры: TDRU6726116, SGCU4209002, PRGU9398155, PRGU4222712, PRGU4220031, PRGU4219560, GSTU9175659 по договору от 27.09.2021 № 2709/2021 транспортной экспедиции, заключенному между ООО «Газодизельные системы» (экспедитор) и ООО «Формула 78» (Клиент), в адрес ООО «Газодизельные системы» ООО «Формула 78» не передавало, данные контейнеры принадлежат на праве собственности ООО «Газодизельные системы» и в настоящий момент находятся на хранении у ООО «ПЛК»; представило подтверждающие документы.

Истцом заявлены возражения от 07.03.2024 № 9/ф0309/38231 на письмо от 04.03.2024 ООО «Газодизельные системы». 

Ответчик, ознакомившись с материалами дела, позицию по представленным ООО «Газодизельные системы» сведениям и документам не выразил.

Определением от 12.03.2024 и протокольным определением от 19.03.2024 в целях предоставления дополнительных доказательств в судебном заседании объявлялся перерыв до 09 часов 30 минут 19.03.2024 и до 14 часов 30 минут 22.03.2024 соответственно.

Истец представил в материалы дела письменные пояснения и дополнительные доказательства, в том числе имеющиеся в его распоряжении доверенности на водителей ООО «Формула 78», перевозивших в спорный период груз со склада Калининской АЭС. Ответчик дополнительные документы не представил.

В судебное заседание обеспечена явка представителя истца. Ответчик явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил. Ходатайство об отложении судебного заседания лицами, участвующими в деле, не заявлено. На основании части 3 статьи 156 АПК РФ судебное заседание проводится в отсутствие надлежащим образом извещенного о дате и времени судебного заседания ответчика.

Исследовав материалы дела, заслушав представителя истца, оценив представленные доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, суд находит исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между АО «Концерн Росэнергоатом» (Клиент) и ООО «Формула 78» (Экспедитор) заключен договор транспортной экспедиции от 29.09.2021 № 9/176370-Д (далее – Договор, т. 1 л.д. 11-32).

 По условиям пункта 1.1 Договора Клиент обязался оплатить оказанные услуги, а Экспедитор обязался выполнить определенные пунктом 1.2 Договора услуги доставки ТМЦ на Билибинскую АЭС г. Билибино с площадки Калининской АЭС г. Удомля в 2021 г. в установленном пунктом 2.2 Технического задания (приложения № 11 к Договору) объеме и номенклатуре с площадки Калининской АЭС в адрес Клиента: 689450, г. Билибино, Чукотский автономный округ, склад Билибинской АЭС в соответствии с условиями, перечисленными в пункте 2.5 Договора.

В соответствии с пунктом 1.2 Договора Экспедитор в течение срока действия Договора оказывает следующие транспортно-экспедиционные услуги:

- обеспечивает перевозку грузов по территории РФ в пункт назначения, указанный Клиентом в Поручении экспедитору (Приложение № 3), транспортом и по маршруту, выбранному Экспедитором;

- обеспечивает перевозку грузов исправным транспортом и контейнерами, соответствующими установленным договором перевозки назначению, типу и грузоподъемности, а также оснащенные соответствующим оборудованием;

- обеспечивает подготовку груза, упаковку и затаривание в соответствии со стандартами, техническими условиями и иными нормативными документами на груз, тару, упаковку и контейнер:

- обеспечивает нанесение маркировочных надписей и манипуляционных знаков для характеристики способов обращения с грузом при транспортировке, хранении, перевозке, и определения способов обращения с грузовым местом при погрузке и выгрузке, перевозке и хранении груза (в случае требования грузополучателя, отраженного в поручении);

- обеспечивает отправку и/или получение груза;

- обеспечивает погрузку и/или выгрузку груза на всем пути его следования;

- обеспечивает передачу груза в пункте назначения Клиенту или уполномоченному им Грузополучателю;

- проверяет количество и состояние груза;

- получает необходимые для импорта/экспорта документы;

- выполняет таможенное оформление груза;

- уплачивает таможенные пошлины, сборы и другие расходы, возлагаемые на Клиента, связанные со следованием груза;

- обеспечивает хранение груза;

- обеспечивает страхование груза;

- оказывает иные услуги, заказанные в рамках Договора, необходимые для сохранности и доставки груза.

В пункте 2.5 Договора, кроме прочего, установлена обязанность Экспедитора:

- загрузить в присутствии представителей Калининской АЭС и/или Билибинской АЭС Груз в соответствии с полученными от Клиента Поручениями (Приложение № 3) в контейнеры с учетом товарного соседства, объема загрузки (пункт 3.2 Технического задания, приложение № 11 к Договору) на площадке Калининской АЭС, расположенной по адресу: 171841, Тверская область, г. Удомля, склад Калининской АЭС, филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция», после чего произвести внутренний осмотр контейнеров совместно с представителями Калининской АЭС и/или Билибинской АЭС и обеспечить взвешивание контейнера;

- опломбировать контейнеры своим представителем, оттиск пломбы должен иметь контрольные знаки либо уникальный номер;

- составить на каждый контейнер опись загрузки и предоставить ее Клиенту по электронной почте bilnpp@chukotka.ru до начала оказания услуг по доставке груза в адрес Клиента в г. Билибино. Форма описи загрузки установлена в Приложении № 8 к Договору;

- доставить груз в соответствии с Поручениями (Приложение № 3) в место назначения не позднее 31.03.2022;

- предоставить Клиенту информацию о процессе перевозки груза;

- при приеме груза к перевозке и хранению Экспедитор обязан выдать Клиенту Экспедиторскую расписку и Складскую расписку.

В силу пунктов 2.1, 2.2 Договора основанием для оказания услуг является Поручение экспедитору (Приложение № 3), заполненное в двух экземплярах Клиентом и рассмотренное Экспедитором с отметкой о согласовании (отказе в согласовании с указанием причин). 

Факт получения Экспедитором для перевозки груза от Клиента либо от указанного им грузоотправителя подтверждается Экспедиторской распиской (Приложение № 4), которая выдается Экспедитором при приеме груза, подписывается в двух экземплярах и предоставляет ему право распоряжаться грузом во время перевозки (пункт 2.3 Договора).

Складская расписка (Приложение № 5) используется тогда, когда Экспедитор оказывает услуги по хранению груза Клиента (пункт 2.3 Договора).

Согласно пункту 1.3 Договора объявленная ценность груза равна его фактической стоимости по Договорам на его приобретение Клиентом.

Пунктом 4.5 Договора определено, что действительная (документально подтвержденная договорами поставки ТМЦ/Оборудования, платежными поручениями об оплате договоров поставки) стоимость груза определяется исходя из цены, указанной в договоре или счете продавца, а при ее отсутствии исходя из средней цены на аналогичный товар, существовавшей в том месте, в котором груз подлежал выдаче, в день добровольного удовлетворения такого требования или, если требование добровольно удовлетворено не было, в день принятия судебного решения.

Размер оплаты за транспортно-экспедиционные услуги установлен в пункте 3.1 Договора и составляет всего 16445000 руб., включая НДС (20%) в размере 2740833,33 руб., и формируется из тарифов, ставок и иных сборов, указанных в Приложении № 6 к Договору.

Расходы Экспедитора, связанные с осуществлением транспортно-экспедиционных услуг, перечисленных в пункте 1.2 Договора, полностью включены в тарифы, ставки и иные сборы Экспедитора и его вознаграждение (пункт 3.3 Договора).

В соответствии с пунктом 3.4 Договора услуги Экспедитора оплачиваются Клиентом по факту их оказания и на основании подписанного со стороны Клиента акта сдачи-приемки оказанных услуг и счета-фактуры Экспедитора в течение 15 рабочих дней.

Расчеты по Договору осуществляются путем перечисления денежных средств с расчетного счета Клиента на расчетный счет Экспедитора. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Клиента (пункты 3.5, 3.6 Договора).

Пунктом 2.4 Договора предусмотрено, что возложение обязанностей на третье лицо не освобождает Экспедитора от ответственности перед Клиентом за исполнение Договора.

В соответствии с пунктом 2.6 Договора Экспедитор обязан предоставить Клиенту (Грузополучателю) в день доставки Груза оригиналы следующих документов:

- товарно-транспортной накладной / транспортной накладной;

- сопроводительной ведомости по форме Приложения № 10 к Договору;

- Акта сдачи-приемки оказанных транспортно-экспедиционных услуг;

- счета-фактуры, оформленного в соответствии со статьей 169 п. 5, 6 НК РФ.

Разделом 4 Договора стороны предусмотрели ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей сторон по Договору.

Согласно пункту 4.1 Договора в случае нарушения Экспедитором сроков доставки Груза, объема доставленного Груза по настоящему Договору либо нарушения целостности пломб на контейнерах и/или сроков предоставления отчетной документации согласно пункту 2.6 Договора, равно как и оригинала самого договора, последний обязан выплатить Клиенту:

- неустойку в размере 0,04 % от стоимости Груза, доставленного Клиенту с просрочкой, за каждый день просрочки, но не более 10% от цены Договора; настоящий пункт не касается возмещения реального ущерба за утрату, недостачу или повреждения груза.

- неустойку за нарушение сроков и порядка предоставления сопроводительных документов, указанных в пункте 2.6 Договора, в размере 0,03% от стоимости Груза, доставленного с просрочкой, за каждый день просрочки.

Пунктом 4.2 Договора предусмотрено, что в случае если в результате нарушения Экспедитором условий Договора Клиент в соответствии с законодательством Российской Федерации расторгнет настоящий договор или настоящий договор будет расторгнут по решению суда, даже если расторжение будет иметь место за пределами срока действия настоящего договора, а Груз не будет доставлен Клиенту (частично или в полном объеме) к моменту расторжения договора, Экспедитор обязан оплатить Клиенту пени и штрафы, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 4.1 Договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения договора.

В соответствии с пунктом 4.3 Договора Экспедитор, кроме прочего, несет ответственность перед Клиентом в виде возмещения реального ущерба за утрату, недостачу или повреждение груза после принятия его Экспедитором и до выдачи груза Клиенту или уполномоченному им лицу – Грузополучателю:

- за утрату или недостачу груза, принятого Экспедитором для перевозки с объявлением ценности, в размере объявленной ценности или части объявленной ценности, пропорционально недостающей части груза;

- за утрату или недостачу груза, принятого Экспедитором для перевозки без объявления ценности, - в размере действительной (документально подтвержденной договорами поставки ТМЦ/Оборудования, платежными поручениями об оплате договоров поставки) стоимости груза или недостающей его части.

В силу пункта 4.6 Договора груз считается утраченным, если он не был выдан по истечении 30 (тридцати дней) со дня истечения срока доставки, определенного договором транспортной экспедиции, или, если такой срок договором не определен, в течение разумного срока, необходимого для доставки груза и исчисляемого со дня принятия Экспедитором груза для перевозки. 

Договор вступил в силу с момента его заключения (подписания) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств (пункт 8.4 Договора).

Приложением № 13 к Договору является заключенное между сторонами соглашение об обмене электронными документами.

Договор подписан сторонами, скреплен печатями организаций, содержит все существенные условия для договоров данного вида.

В целях исполнения Договора в г. Удомля, склад Калининской АЭС, Клиент передал, а Экспедитор принял груз на экспедицию.

Письмом от 25.11.2021 № 29/21 Экспедитор сообщил Клиенту, что в настоящее время ТМЦ в семи 40-футовых контейнерах находятся в терминале РЖД станция Мыс ФИО3, ориентировочное прибытие в порт Владивосток 27.11-28.11.2021, отправление ориентировочно 01.12.2021, время в пути до порта Певек 10-15 дней в зависимости от погодных условий. Просил рассмотреть возможность перечисления предоплаты в размере 30 % от суммы Договора.

По инициативе Экспедитора в связи с необходимостью своевременной доставки ТМЦ для обеспечения безопасной эксплуатации в период ремонтной компании Билибинской АЭС в 2022 году дополнительным соглашением от 14.12.2021 № 9/176370-Д-1 к Договору стороны включили в Договор условие по выплате аванса, изложив пункты 3.1 и 3.4 Договора в новой редакции.

Размер оплаты за транспортно-экспедиционные услуги установлен в общем размере 16445000 руб., с учетом НДС (20%) 2740833,33 руб., и сформирован из тарифов, ставок и иных сборов, указанных в приложении № 6 к Договору.

Авансовый платеж предусмотрен в размере 30 % от суммы Договора. Аванс учитывается при расчетах и отражается в актах сдачи-приемки оказанных транспортно-экспедиционных услуг и счете-фактуре (пункт 3.1 Договора).

Оплата оказанных услуг производится Клиентом в следующем порядке:

Первый платеж – Клиент производит выплату аванса на основании счета Экспедитора в течение 15 рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора с учетом Соглашения, но не ранее 5 дней с даты предоставления обеспечения возврата аванса и исполнения основных обязательств по Договору, в размере 30 % от стоимости Договора, что составляет 4933500 руб. с учетом НДС 20%;

Окончательная оплата оказанных услуг в сумме 11511500 руб., в том числе НДС 20%, производится Клиентом по факту их оказания и на основании подписанного со стороны Клиента акта сдачи-приемки оказанных транспортно-экспедиционных услуг и счета-фактуры Экспедитора в течение 15 рабочих дней с даты подписания документов, подтверждающих факт оказания услуг.

Указанным Соглашением Договор дополнен приложением № 14 – «График платежей» и приложением № 15 – «Банковская гарантия (возврата аванса)».

Иных изменений условий Договора, доказательств расторжения, прекращения его действия материалы дела не содержат.  

Как следует из материалов дела, Клиент поручил Экспедитору выполнить услуги по доставке груза с погрузочно-разгрузочными работами за счет Экспедитора не позднее 30.03.2022 с г. Удомля, склад Калининской АЭС в пункт назначения: 689450, Чукотский АО, г. Билибино, Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция». 

На основании Договора в редакции Соглашения Клиент платежным поручением от 27.12.2021 № 683781 выплатил аванс Экспедитору в размере 30 % от стоимости Договора в сумме 4933500 руб. (т. 1 л.д. 36).

В ходе досудебной переписки Экспедитор сообщил Клиенту о месте нахождения груза на ответственном хранении в г. Артем Приморского края, ссылаясь на сложные финансовые обстоятельства, вновь просил осуществить дополнительное финансирование, в свою очередь, Клиент предложил Экспедитору провести инвентаризацию груза (т.5 л.д. 72-74). Между тем инвентаризация не проведена, дополнительное финансирование не выделено, груз в место назначения (Чукотский автономный округ, г. Билибино, Билибинская АЭС) в срок до 31.03.2022 не доставлен. Складские расписки в материалы дела не представлены.

С целью урегулирования спора в досудебном порядке АО «Концерн Росэнергоатом» направило 14.02.2023 в адрес ООО «Формула 78» претензию от 10.02.2023 № 9/121/2023-прет с требованием о возврате суммы уплаченного по Договору аванса, неустойки за нарушение срока оказания услуг транспортной экспедиции и возмещении стоимости переданного для доставки груза. Претензия получена ООО «Формула 78» 02.03.2023, но оставлена без ответа и исполнения (т. 1 л.д. 37-38, 39, 40).

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения АО «Концерн Росэнергоатом» в арбитражный суд с заявленными требованиями.

Отношения, связанные с осуществлением транспортно-экспедиционной деятельности, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.06.2003 № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности» (далее - Закон № 87-ФЗ), Правилами транспортно-экспедиционной деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2006 № 554 (далее - Правила № 554).

Заключив договор на оговоренных в нем условиях, стороны приняли на себя взаимные обязательства, которые согласно статьям 309, 310 ГК РФ должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

На основании статьи 801 ГК РФ по договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента-грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза.

Согласно пункту 3 статьи 801 ГК РФ условия выполнения договора транспортной экспедиции определяются соглашением сторон, если иное не установлено законом о транспортно-экспедиционной деятельности, другими законами или иными правовыми актами. 

Закон № 87-ФЗ определяет порядок оказания услуг по организации перевозок грузов любыми видами транспорта и оформлению перевозочных документов, документов для таможенных целей и других документов, необходимых для осуществления перевозок грузов.

Из положений пункта 5 Правил № 554 следует, что экспедиторскими документами являются:

- поручение экспедитору (определяет перечень и условия оказания экспедитором клиенту транспортно-экспедиционных услуг в рамках договора транспортной экспедиции);

- экспедиторская расписка (подтверждает факт получения экспедитором для перевозки груза от клиента либо от указанного им грузоотправителя);

- складская расписка (подтверждает факт принятия экспедитором у клиента груза на складское хранение).

При этом в соответствии с пунктом 7 Правил № 554 экспедиторские документы являются неотъемлемой частью договора транспортной экспедиции, составляются в письменной форме, порядок оформления и формы экспедиторских документов утверждаются Министерством транспорта Российской Федерации.

Для оказания транспортно-экспедиционных услуг клиентом выдается заполненное и подписанное им поручение экспедитору. Оформленное в установленном порядке поручение экспедитору должно содержать достоверные и полные данные о характере груза, его маркировке, весе, объеме, а также о количестве грузовых мест. Поручение экспедитору представляется ему клиентом на бумажном носителе, если иной способ не предусмотрен договором транспортной экспедиции (пункт 8 Правил № 554).

В соответствии с пунктом 9 Правил № 554 экспедитор рассматривает поручение экспедитору в сроки, определенные в договоре транспортной экспедиции, и направляет его клиенту с отметкой о согласовании либо с отказом в согласовании подлежащих оказанию транспортно-экспедиционных услуг с указанием причин отказа. 

На основании пункта 10 Правил № 554 поручение экспедитору подлежит исполнению с момента получения клиентом письменного подтверждения его согласования экспедитором. Клиент на любом этапе исполнения договора транспортной экспедиции имеет право отозвать ранее выданное поручение экспедитору с обязательным возмещением ему фактических расходов, связанных с исполнением поручения. Отзыв выданного поручения экспедитору производится клиентом в письменной форме.

Экспедиторская расписка выдается экспедитором клиенту при приеме груза и предоставляет экспедитору право владения грузом до момента передачи груза клиенту либо указанному им грузополучателю по окончании перевозки (пункт 12 Правил № 554).

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Закона № 87-ФЗ при приеме груза экспедитор обязан проверить достоверность представленных клиентом необходимых документов, а также информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной информации, необходимой для исполнения экспедитором обязанностей, предусмотренных договором транспортной экспедиции, после чего выдать клиенту экспедиторский документ и представить клиенту оригиналы договоров, заключенных экспедитором в соответствии с договором транспортной экспедиции от имени клиента на основании выданной им доверенности.

На основании пункта 2 статьи 5 Закона № 87-ФЗ клиент, в порядке, предусмотренном договором транспортной экспедиции, обязан уплатить причитающееся вознаграждение, а также возместить понесенные им расходы в интересах клиента.

В соответствии с пунктом 1 статьи 803 ГК РФ и статьей 6 Закона № 87-ФЗ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных договором транспортной экспедиции и настоящим Федеральным законом, экспедитор и клиент несут ответственность по основаниям и в размере, которые определяются в соответствии с главой 25 ГК РФ и настоящим Федеральным законом.

В силу подпунктов 1-2 пункта 1 статьи 7 Закона № 87-ФЗ экспедитор несет ответственность перед клиентом в виде возмещения реального ущерба за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза после принятия его экспедитором и до выдачи груза получателю, указанному в договоре транспортной экспедиции, либо уполномоченному им лицу, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело, в следующих размерах:

- за утрату или недостачу груза, принятого экспедитором для перевозки с объявлением ценности, в размере объявленной ценности или части объявленной ценности, пропорциональной недостающей части груза;

- за утрату или недостачу груза, принятого экспедитором для перевозки без объявления ценности, в размере действительной (документально подтвержденной) стоимости груза или недостающей его части.

В договоре транспортной экспедиции может быть установлено, что наряду с возмещением реального ущерба, вызванного утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза, экспедитор возвращает клиенту ранее уплаченное вознаграждение, если оно не входит в стоимость груза, в размере, пропорциональном стоимости утраченного, недостающего или поврежденного (испорченного) груза (пункт 3 статьи 7 Закона № 87-ФЗ).

Действительная (документально подтвержденная) стоимость груза определяется исходя из цены, указанной в договоре или счете продавца, а при ее отсутствии исходя из средней цены на аналогичный товар, существовавшей в том месте, в котором груз подлежал выдаче, в день добровольного удовлетворения такого требования или, если требование добровольно удовлетворено не было, в день принятия судебного решения (пункт 6 статьи 7 Закона № 87-ФЗ).

Согласно пункту 7 статьи 7 Закона № 87-ФЗ груз считается утраченным, если он не был выдан по истечении тридцати дней со дня истечения срока доставки, определенного договором транспортной экспедиции, или, если такой срок договором не определен, в течение разумного срока, необходимого для доставки груза и исчисляемого со дня принятия экспедитором груза для перевозки.

Факт утраты груза является свидетельством о ненадлежащем исполнении экспедитором своих обязательств по договору, что является основанием для применения к экспедитору мер гражданско-правовой ответственности, предусмотренных Законом № 87-ФЗ и договором.

Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства (статья 393 ГК РФ).

Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 настоящего Кодекса.

В силу пункта 1 статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В соответствии с пунктом 2 статьи 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Для взыскания убытков в судебном порядке истцу необходимо доказать совокупность следующих условий: факт неправомерного поведения причинителя убытков (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств), причинно-следственную связь между противоправными действиями (бездействием) ответчика и возникшими у истца убытками, наличие и размер понесенных убытков.

Указанные в названной статье принцип полного возмещения вреда, а также состав подлежащих возмещению убытков обеспечивают восстановление имущественной сферы потерпевшего в том виде, который она имела до правонарушения.

 Вместе с тем по общему правилу исключается как неполное возмещение понесенных убытков, так и обогащение потерпевшего за счет причинителя вреда.

 Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 7 Закона № 87-ФЗ экспедитор несет ответственность за утрату или недостачу груза, принятого экспедитором для перевозки с объявлением ценности, в размере объявленной ценности или части объявленной ценности, пропорциональной недостающей части груза.

Таким образом, ответственность экспедитора перед клиентом ограничивается объявленной стоимостью груза, возможность увеличения указанного ограниченного размера ответственности экспедитора на сумму иных расходов клиента Законом № 87-ФЗ не предусмотрена.

В соответствии с пунктом 1.3 Договора объявленная ценность Груза равна его фактической стоимости по Договору на его приобретение.

По уточненному расчету истца (т.7 л.д. 2-5) фактическая стоимость переданного Экспедитору и недоставленного груза (товара, ТМЦ) составляет 71134938,33 руб.

Судом проверен расчет истца с представленными в обоснование иска документами  и установлено, что: 

- Поручением экспедитора от 06.10.2021 № 1 (т.2 л.д. 11) передана и принята Экспедитором по расписке от 06.10.2021 № 1 кабельная продукция стоимостью 2682480 руб. (т. 7 л.д. 11), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/145-2020 от 31.08.2020, платежными поручениями от 26.10.2020 № 566547, от 19.10.2020 № 564413 и от 26.10.2020 № 566184 на общую сумму 2682480 руб. (т. 1 л.д. 73-82, т. 5 л.д. 109, 110, 112). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 2682480 руб.;

- Поручением экспедитора от 06.10.2021 № 3 (т.2 л.д. 13) согласована передача товара - ламп осветительных стоимостью 158525 руб.,  передана Экспедитору по расписке  от 01.10.2021 № 3 продукция стоимостью 190230 руб. (т. 7 л.д. 12), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/141-2020 от 27.08.2020, платежным поручением от 23.11.2020 № 574009 на сумму 190230 руб., включая НДС (20%) в размере 31705 руб. (т. 1 л.д. 94-103, т. 5 л.д. 114). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 190230 руб.;

- Поручением экспедитора от 06.10.2021 № 4 (т.2 л.д. 14) переданы и приняты Экспедитором по расписке от 01.10.2021 № 4 химреактивы стоимостью 115407 руб. (т. 7 л.д. 13), размер которой подтверждается договором поставки № УХ00-010868 от 20.08.2020, платежным поручением от 03.12.2020 № 576457 на сумму 115330,68 руб. (т. 1104-115, т. 5 л.д. 115). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 115330,68 руб.;

- Поручением экспедитора от 06.10.2021 № 5 (т.2 л.д. 15) переданы и приняты Экспедитором по расписке от 06.10.2021 № 5 насосы стоимостью 237734 руб. (т. 7 л.д. 14), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/152-2020 от 09.09.2020, платежным поручением от 14.12.2020 № 580277 на сумму 237734,40 руб. (т. 1 л.д. 116-126, т. 5 л.д. 116). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 237734,40 руб.;

- Поручением экспедитора от 07.10.2021 № 7 (т. 2 л.д. 17) передан и принят Экспедитором по расписке № 7 от 01.10.2021 товар - газы, баллоны стоимостью 178320 руб. (т. 7 л.д. 16), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/154-2020 от 07.10.2020, платежным поручением от 30.11.2020 № 576047 (т. 1 л.д. 127-136, т. 5 л.д. 119). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 178320 руб.;

- Поручением экспедитора от 06.10.2021 № 6 (т. 2 л.д. 16) передан и принят Экспедитором по расписке № 6 от 01.10.2021 товар – аргон стоимостью аргон стоимостью 88800 руб. (т. 7 л.д. 15), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/182-2020 от 19.10.2020, платежным поручением от 02.11.2020 № 568392 (т. 1 л.д. 137-141, т. 5 л.д. 117). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 88000 руб.;

- Поручением экспедитора от 07.10.2021 № 8 (т. 2 л.д. 18) передан и принят Экспедитором по расписке № 8 от 01.10.2021 товар - химпродукция стоимостью 183120 руб. (т. 7 л.д. 17), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/186-2020 от 05.11.2020, платежным поручением от 17.12.2020 № 581413 (т. 1 л.д.142-150, т. 5 л.д. 120). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 183120 руб.;

- Поручениями экспедитора от 07.10.2021 № 9 и от 07.10.2021 № 10 (т. 2 л.д. 19, 20) передан и принят Экспедитором по распискам от 07.10.2021 № 9 и № 10 товар - кабельная продукция для СБ общей стоимостью 2803967 руб. (т. 7 л.д. 18, 19), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/41/200-2020 от 11.11.2020, платежным поручением от 24.12.2020 № 583632 (т. 2 л.д. 1-10, т. 5 л.д. 121). Клиент просит взыскать по данным документам 2803967,40 руб. Вместе с тем совокупность представленных доказательств подтверждается факт передачи Экспедитору груза на сумму 2803967 руб.; 

- Поручением экспедитора от 07.10.2021 № 11 (т. 2 л.д. 21) передан и принят Экспедитором товар - трубы стоимостью 13737427,84 руб. по акту об отгрузке от 14.10.2021 (водитель ФИО4) с указанием на поручение экспедитору № 11, с товарными накладными от 25.12.2020 № 118, от 02.02.2021 № 5 и от 19.03.2021 № 7 на общую сумму 13740030,70 руб., с учетом НДС (20%) (т. 7 л.д. 62-65), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/107-2020 от 27.07.2020, платежными поручениями от 25.02.2021 № 600722, от 24.05.2021 № 62615 и от 15.02.2021 № 598119 (т. 2 л.д. 22-48, т. 5 л.д. 122-124). Клиент просит взыскать по данным документам 13790958,70 руб. Вместе с тем совокупность представленных доказательств подтверждается факт передачи Экспедитору груза на сумму 13740030,70 руб.; 

 - Поручением экспедитора от 07.10.2021 № 13 (т. 2 л.д. 50) согласована передача товара – офисной мебели стоимостью 889999,20 руб., Экспедитору по расписке № 13-14 от 01.10.2021 передан товар на сумму 741666 руб. (т. 7 л.д. 21). Стоимость продукции подтверждена договором поставки № БиАЭС/16/112-2020 от 17.08.2020, платежными поручениями от 14.09.2020 № 555249, от 21.09.2020 № 556578 и от 28.09.2020 № 558316  на сумму 889999,20 руб., включая НДС (20%) в размере 148333,20 руб. (т. 2 л.д. 66-75, т. 5 л.д. 126, 128, 130). С учетом пояснений, данных в судебном заседании 19.03.2024, о выделении НДС (20%) согласно договору поставки указанного товара и передаче его Экспедитору с указанием стоимости без учета НДС (20%), а также документальным подтверждением оплаты товара, истец просит взыскать по данным документам 834165,60 руб. Таким образом, согласованным и принятым на экспедицию является груз на сумму 834165,60  руб.

- Поручением экспедитора от 07.10.2021 № 14 (т. 2 л.д. 51) передан и принят Экспедитором по расписке № 14 от 07.10.2021 товар – спецавтобус УАЗ стоимостью 1146800 руб. (т. 2 л.д. 22), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/41/161-2021 от 05.08.2021, платежным поручением от 22.11.2021 № 672887 (т. 2 л.д. 76-84, т. 5 л.д. 132). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 1146800 руб.;

- Поручением экспедитора от 07.10.2021 № 15 (т. 2 л.д. 52) передан и принят Экспедитором по расписке № 16 от 01.10.2021 товар - пакет индивидуальный ИПП стоимостью 35700 руб. (т. 7 л.д. 23), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/09-2021 от 20.01.2021, платежным поручением от 08.02.2021 № 596642 (т. 2 л.д. 85-89, т. 5 л.д. 133). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 35700 руб.;

- Поручением экспедитора от 07.10.2021 № 16 (т. 2 л.д. 53) передан и принят Экспедитором по расписке № 17 от 01.10.2021 товар - ленты противоскользящие, стойки оградительные стоимостью 623880 руб. (т. 7 л.д. 24), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/23-2021 от 09.02.2021, платежным поручением от 19.04.2021 № 614384 (т. 2 л.д. 90-99, т. 5 л.д. 134). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 623880 руб.;

- Поручением экспедитора от 07.10.2021 № 17 (т. 2 л.д. 54) согласован и передан Экспедитору по акту об отгрузке от 15.10.2021 (водитель ФИО5) с УПД от 01.03.2021 № 00000134  товар - сульфонол стоимостью 139200 руб. (т. 7 л.д. 66), размер которой подтвержден договором поставки № БиАЭС/16/18-2021 от 29.01.2021, платежным поручением от 22.03.2021 № 606897 (т. 2 л.д. 100-107, т. 5 л.д. 135). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 139200 руб.;

- Поручением экспедитора от 07.10.2021 № 18 (т. 2 л.д. 119) согласован и передан Экспедитору с товарной накладной от 01.04.2021 № 5 (водитель ФИО6) и с товарной накладной от 12.04.2021 № 8 (водитель ФИО7) товар - автоматические выключатели общей стоимостью 4824840 руб. (т. 7 л.д. 67-69), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/207-2020 от 30.11.2020, платежным поручением от 29.04.2021 № 618585 (т. 2 л.д. 108-118, т. 5 л.д. 136). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 4821840 руб.;

- Поручением экспедитора от 07.10.2021 № 19 (т. 2 л.д. 120) передан и принят Экспедитором по расписке № 22 от 01.10.2021 товар - лампы освещения стоимостью 112140 руб. (т. 7 л.д. 25), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/1-2021 от 18.01.2021, платежным поручением от 19.04.2021 № 614382 (т. 2 л.д. 125-134, т. 5 л.д. 137). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 112140 руб.;

- Поручением экспедитора от 07.10.2021 № 20 (т. 2 л.д. 121) передан и принят Экспедитором по расписке № 23 от 01.10.2021 товар - СИЗ для ЗКД стоимостью 6799685,52 руб. (т. 7 л.д. 26), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/03-2021 от 25.01.2021, платежным поручением от 19.04.2021 № 614415 (т. 2 л.д. 135-156, т. 5 л.д. 138). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 6799685,52 руб.;

- Поручением экспедитора от 07.10.2021 № 21 (т. 2 л.д. 122) передан и принят Экспедитором по расписке № 24 от 01.10.2021 товар - гигиенические средства стоимостью 463200 руб. (т. 7 л.д. 27), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/54-2021 от 05.04.2021, платежным поручением от 30.04.2021 № 618620 (т. 3 л.д. 1-96, т. 5 л.д. 139). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 463200 руб.;

- Поручением экспедитора от 07.10.2021 № 22 (т. 2 л.д. 123) передан и принят Экспедитором по расписке № 25 от 01.10.2021 товар - линолеум стоимостью 957600 руб. (т. 7 л.д. 30), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/60-2021 от 06.04.2021, платежным поручением от 29.04.2021 № 617730 (т. 3 л.д. 10-16, т. 5 л.д. 140). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 957600 руб.;

- Поручением экспедитора от 07.10.2021 № 23 (т. 2 л.д. 124) передан и принят Экспедитором по расписке № 26 от 01.10.2021 товар - прокладочные и уплотнительные материалы стоимостью 1409470,33 руб. (т. 7 л.д. 31), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/15-2021 от 04.02.2021, платежным поручением от 16.11.2021 № 671414 (т. 3 л.д. 17-27, т. 5 л.д. 141). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 1409470,33 руб.;

-  Поручением экспедитора от 07.10.2021 № 24. (т. 3 л.д. 28) передан и принят Экспедитором по расписке № 24 от 07.10.2021 товар - стиральное оборудование стоимостью 5164499,17 руб. (т. 7 л.д. 29), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/48-2021 от 05.04.2021, платежным поручением от 13.05.2021 № 621236 (т. 3 л.д. 33-38, т. 5 л.д. 142). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 5164499,17 руб.;

- Поручением экспедитора от 07.10.2021 № 26 (т. 3 л.д. 30) передан и принят Экспедитором по расписке № 29 от 01.10.2021 товар – трихлорэтилен стоимостью 90720 руб. (т. 7 л.д. 32), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/80-2021 от 22.04.2021, платежным поручением от 13.05.2021 № 621224 (т. 3 л.д. 46-48, т. 5 л.д. 143). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 90720 руб.;

- Поручением экспедитора от 07.10.2021 № 28 (т. 3 л.д. 32) передан и принят Экспедитором по расписке № 31 от 01.10.2021 товар - комплект индивидуальный медицинский стоимостью 2069100 руб. (т 7 л.д. 35), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/94-2021 от 24.05.2021, платежным поручением от 29.07.2021 № 642122 (т. 3 л.д. 54-58, т. 5 л.д. 150). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 2069100 руб.;

- Поручением экспедитора от 07.10.2021 № 29 (т. 3 л.д. 59) передан и принят Экспедитором по расписке № 29 от 07.10.2021 товар - сварочное оборудование стоимостью 140706 руб. (т. 7 л.д. 33), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/77-2021 от 04.05.2021, платежным поручением от 25.10.2021 № 665274 (т. 3 л.д. 66-69, т. 5 л.д. 151). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 140706 руб.;

- Поручением экспедитора от 07.10.2021 № 30 (т. 3 л.д. 60) передан и принят Экспедитором по распискам № 33 от 01.10.2021 и № 42 от 01.10.2021 товар - постельное белье, наматрасник общей стоимостью 538800 руб. (т. 7 л.д. 38, 43), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/56-2021 от 22.04.2021, платежными поручениями от 30.09.2021 № 658118 и от 11.10.2021 № 661650 (т. 3 л.д. 70-74, т. 5 л.д. 152-153). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 538800 руб.;

- Поручением экспедитора от 07.10.2021 № 31 (т. 3 л.д. 61) передан и принят Экспедитором по расписке № 31 от 07.10.2021 товар – пенообразователь стоимостью 272944,80 руб. (т 7 л.д. 36), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/45-2021 от 06.04.2021, платежным поручением от 02.08.2021 № 642692 (т. 3 л.д. 75-84, т. 6 л.д. 1). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 272944,80 руб.;

- Поручением экспедитора от 07.10.2021 № 32 (т. 3 л.д. 62) передан и принят Экспедитором по расписке № 32 от 07.10.2021 товар - шкафы для одежды металлические стоимостью 974001,60 руб. (т 7 л.д. 37), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/57-2021 от 19.04.2021, платежным поручением от 10.06.2021 № 628797 (т. 3 л.д. 85-89, т. 6 л.д. 2). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 974001,60 руб.;

- Поручением экспедитора от 07.10.2021 № 33 (т. 3 л.д. 63) передан и принят Экспедитором по расписке № 33 от 07.10.2021 товар - станок вертикально-сверлильный стоимостью 630000 руб. (т. 7 л.д. 39), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/105-2021 от 18.06.2021, платежным поручением от 23.09.2021 № 656752 (т. 3 л.д. 90-95, т. 6 л.д. 3). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 630000 руб.;

- Поручением экспедитора от 07.10.2021 № 34 (т. 3 л.д. 64) передан и принят Экспедитором по расписке № 48 от 01.10.2021 товар – огнетушители стоимостью 506728,91 руб. (т. 7 л.д. 46), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/68-2021 от 13.05.2021, платежным поручением от 20.09.2021 № 655753 (т. 3 л.д. 96-101, т. 6 л.д. 4). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 506728,91 руб.;

-  Поручением экспедитора от 07.10.2021 № 35 (т. 3 л.д. 65) передан и принят Экспедитором по расписке № 45 от 01.10.2021 товар - средства «Защита» стоимостью 90720 руб. (т. 7 л.д. 44), размер которой подтвержден договором поставки № БиАЭС/16/119-2021 от 17.06.2021, платежным поручением от 16.09.2021 № 655035 на сумму 99720 руб. (т. 3 л.д. 102-104, т. 6 л.д. 5). Клиент просит взыскать по данным документам 99720 руб. Вместе с тем совокупность представленных доказательств подтверждается факт передачи Экспедитору груза на сумму 90720 руб.; 

- Поручением экспедитора от 08.10.2021 № 36 (т. 3 л.д. 105) передан и принят Экспедитором по расписке № 59 от 01.10.2021 товар - преобразователь Метран-150 стоимостью 950400 руб. (т. 7 л.д. 55), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/83-2021 от 06.05.2021, платежным поручением от 11.11.2021 № 670176 (т. 3 л.д. 106-118, т. 6 л.д. 6). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 950400 руб.;

- Поручением экспедитора от 08.10.2021 № 37 (т. 3 л.д. 119) передан и принят Экспедитором по расписке № 58 от 01.10.2021 товар - элементы питания, аккумуляторы стоимостью 146864,56 руб. (т. 7 л.д. 53), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/08-2021 от 03.06.2021, платежным поручением от 06.06.2022 № 727550 (т. 3 л.д. 123-128, т. 6 л.д. 7). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 146864,56 руб.;

- Поручением экспедитора от 08.10.2021 № 38 и от 08.10.2021 № 42 (т. 3 л.д. 120, 145) передан и принят Экспедитором по расписке № 47 от 01.10.2021 и акту об отгрузке от 14.10.2021 с товарной накладной от 15.07.2021 № 96 (водитель ФИО8)  товар - бумага офисная общей стоимостью 1408681,20 руб. (т. 7 л.д. 45, 75-76), размер которой подтвержден договором поставки № БиАЭС/16/104-2021 от 21.06.2021, платежными поручениями от 02.09.2021 № 650907 и от 04.10.2021 № 659070 (т. 3 л.д. 129-133, т. 6 л.д. 8-9). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 1408681,20 руб.;

- Поручением экспедитора от 08.10.2021 № 39 (т. 3 л.д. 121) передан и принят Экспедитором товар - хладоновые огнетушители стоимостью 837900 руб.  по акту об отгрузке от 11.10.2021 (водитель ФИО9) с товарной накладной от 18.05.2021 № 97 стоимостью 837900 руб. (т. 7 оборот л.д. 70), размер которой подтвержден договором поставки № БиАЭС/16/74-2021 от 29.04.2021, платежным поручением от 17.06.2021 № 630267 (т. 3 л.д. 134-138, т. 6 л.д. 10). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 837900 руб.;

- Поручением экспедитора от 08.10.2021 № 40 (т. 3 л.д. 122) передан и принят Экспедитором товар - фильтры мешочные стоимостью 324000 руб.  по акту об отгрузке от 08.10.2021 (водитель ФИО10) с товарной накладной № 27 от 31.03.2021 стоимостью 324000 руб. (т. 7 л.д. 71-72), размер которой подтвержден договором поставки № БиАЭС/16/16-2021 от 01.02.2021, платежным поручением от 13.12.2021 № 679642 (т. 3 л.д. 139-143, т. 6 л.д. 11). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 324000 руб.      

- Поручением экспедитора от 08.10.2021 № 41 (т. 3 л.д. 144) передан и принят Экспедитором товар - материалы для пропусков стоимостью 119860 руб. по акту об отгрузке от 14.10.2021 (водитель ФИО8) с товарной накладной № 24 от 17.05.2021 на сумму 119860 руб. (т. 7 л.д. 73-74), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/69-2021 от 19.04.2021, платежным поручением от 02.08.2021 № 642685 (т. 3 л.д. 147-153, т. 6 л.д. 12). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 119860 руб.;

- Поручением экспедитора от 08.10.2021 № 43 (т. 3 л.д. 146) передан и принят Экспедитором по расписке № 50 от 01.10.2021 товар - тумбы, столы стоимостью 784018,80 руб. (т. 7 л.д. 47), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/41/146-2021 от 22.07.2021, платежными поручениями от 20.09.2021 № 655756 и от 20.09.2021 № 655757 (т. 4 л.д. 11-21, т. 6 л.д. 13-14). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 784018,80 руб.;  

- Поручением экспедитора от 08.10.2021 № 44 (т. 4 л.д. 22) передан товар - пленка промышленная и принят Экспедитором по расписке № 62 от 01.10.2021 стоимостью 24504 руб., по акту об отгрузке транспорта с ТМЦ от 14.10.2021 (водитель ФИО11) с товарной накладной от 16.07.2021 № 1194/21 на сумму 322582,80 руб., общей стоимостью 347086,80 руб. (т. 7 л.д. 59, л.д. 77-78), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/122-2021 от 18.06.2021, платежным поручением от 18.11.2021 № 671622 (т. 4 л.д. 26-30, т. 6 л.д. 15). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 347086,80 руб.;

- Поручением экспедитора от 08.10.2021 № 45 передан товар – рукавицы (т. 4 л.д. 23) и принят Экспедитором по расписке № 60 от 01.10.2021, по акту об отгрузке от 08.10.2021 (водитель ФИО12) с УПД от 21.09.2021 № 1106, УПД от 30.08.2021 № 939, УПД от 23.08.2021 № 893, УПД от 24.09.2021 № 1140 на сумму 1130201,46 руб. и по акту об отгрузке от 14.10.2021 (водитель ФИО8) с УПД от 07.1.2021 № 1270 на сумму 73755 руб., общей стоимостью 1203956,46 руб. (т. 7 л.д. 57, 79-82), размер которой подтвержден договором поставки № БиАЭС/16/151-2021 от 27.07.2021, платежными поручениями от 03.03.2022 № 702262 и от 03.03.2022 № 702263 (т. 4 л.д. 31-37, т. 6 л.д. 16-17). Клиент просит взыскать по данным документам 1204019,96 руб. При этом стоимость переданного Экспедитору по расписке от 01.10.2021 № 60 товара включена в общую стоимость, отраженную в УПД от 08.10.2021 с УПД от 21.09.2021 № 1106, УПД от 30.08.2021 № 939, УПД от 23.08.2021 № 893, УПД от 24.09.2021 № 1140, УПД от 07.1.2021 № 1270, то есть расписка по стоимости дублирует УПД от 23.08.2021 № 893. Совокупность представленных доказательств подтверждается факт передачи Экспедитору груз на сумму 1203956,46 руб.;

- Поручением экспедитора от 11.10.2021 № 46 согласован на экспедицию товар - бытовая техника стоимостью 1755080,32 руб. (т. 4 л.д. 24), товар передан Экспедитору по расписке № 36 от 01.10.2021 на сумму 11950 руб., по акту об отгрузке от 11.10.2021 с товарной накладной № 77 от 02.06.2021 на сумму 1916708,48 руб. (водитель ФИО13) ( т. 7 л.д. 40, л.д. 85-86). Стоимость продукции подтверждена договором поставки № БиАЭС/16/92-2021 от 24.05.2021, платежными поручениями от 05.08.2021 № 643179 и от 05.08.2021 № 643205 об оплате товара в общем размере 1928658,48 руб. (т. 4 л.д. 38-51, т. 6 л.д. 18-19). Истец просит взыскать по данным документам 1716949,92 руб. Таким образом, согласованным и принятым на экспедицию является груз на сумму 1716949,92 руб.

- Поручением экспедитора от 11.10.2021 № 47 (т. 4 л.д. 25) согласован на экспедицию товар - клапаны, термостатный элемент, который передан Экспедитору по расписке № 24 от 01.10.2021 на сумму 399530,40 руб. и по расписке № 39 от 01.10.2021 на сумму 599580,40 руб., а также по акту об отгрузке от 14.10.2021 (водитель ФИО8) с УПД от 27.05.2021 № УТ-116, УПД от 22.06.2021 № УТ-139, УПД № УТ-230 от 19.09.2021 общей стоимостью 1674350,40 руб. (т. 7 л.д. 28, 41, 88-91), размер которой подтвержден договором поставки № БиАЭС/10/22-2021 от 17.02.2021, платежным поручением от 13.12.2021 № 679806 (т. 4 л.д. 52-57, т. 6 л.д. 20). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 1674350,40 руб.;

- Поручением экспедитора от 11.10.2021 № 48 (т. 4 л.д. 58) согласован и передан  Экспедитору товар - тканевые изделия стоимостью 1129397,84 руб. по акту об отгрузке от 12.10.2021 (водитель ФИО11) с УПД от 29.01.2021 № 10 на сумму 1185023,84 руб. (т. 7 л.д. 92-93), размер которой подвержен договором поставки № БиАЭС/16/228-2020 от 11.01.2021, платежным поручением от 25.02.2021 № 600721 (т. 4 л.д. 62-66, т. 6 л.д. 21). Истец просит взыскать по данным документам 1071893,84 руб. Таким образом, согласованным и принятым на экспедицию является груз на сумму 1071893,84 руб.;

- Поручением экспедитора от 11.10.2021 № 49 согласован и передан  Экспедитору товар - шины автомобильные стоимостью 750000 руб. (т. 4 л.д. 59) по акту об отгрузке от 12.10.2021 (водитель ФИО11) с УПД от 04.02.2021 № 76 стоимостью 850938 руб. (т. 7 л.д. 94-95). Стоимость продукции подтверждена договором поставки № № БиАЭС/16/02-2021 от 2021 на сумму 850937,85 руб. и платежным поручением от 15.04.2021 № 614012 об оплате товара на сумму 850937,85 руб. (т. 4 л.д. 67-72, т. 6 л.д. 22). Истец просит взыскать по данным документам 673265,89 руб. Таким образом, согласованным и принятым на экспедицию является груз на сумму 673265,89 руб.;

- Поручением экспедитора от 11.10.2021 № 50 (т. 4 л.д. 60) передан и принят Экспедитором по расписке № 50 от 11.10.2021 товар - ЗИП к МТЛБУ стоимостью 164060,02 руб. (т. 7 л.д. 48), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/05-2021 от 26.01.2021, платежным поручением от 11.03.2021 № 604201 (т. 4 л.д. 73-76, т. 6 л.д. 23). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 164060,02 руб.;

- Поручением экспедитора от 11.10.2021 № 51 (т. 4 л.д. 61) передан и принят Экспедитором по расписке № 63 от 01.10.2021 товар - источники питания с защитным покрытием стоимостью 173280 руб. (т. 7 л.д. 61), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/143-2021 от 09.07.2021, платежным поручением от 18.10.2021 № 663683 (т. 4 л.д. 77-81, т. 6 л.д. 24). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 173280 руб.;

- Поручением экспедитора от 11.10.2021 № 52 (т. 4 л.д. 92) передан и принят Экспедитором по расписке № 61 от 01.10.2021 товар - картриджи, ламинатор и тд. стоимостью 729466,89 руб. (т. 7 л.д. 58), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/08/148-2021 от 28.07.2021, платежными поручениями от 27.10.2021 № 666246, от 27.10.2021 № 667117 и от 27.10.2021 № 666944 (т. 4 л.д. 85-90, т. 6 л.д. 24-25, т.9 л.д. 102). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 729466,89 руб.;

- Поручением экспедитора 11.10.2021 № 53 (т. 4 л.д. 83) передан и принят Экспедитором по расписке № 52 от 01.10.2021 товар - идентификатор, адаптер, веб-камера стоимостью 1110567,55 руб. (т. 7 л.д. 49), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/39-2021 от 30.03.2021, платежным поручением от 27.10.2021 № 666258 (т. 6 л.д. 26, т.9 л.д. 103-115). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 1110567,55 руб.

- Поручением экспедитора от 11.10.2021 № 54 (т. 4 л.д. 94) передан и принят Экспедитором товар - коммутационная аппаратура стоимостью 610156,56 руб. по акту об отгрузке от 12.10.2021 (водитель ФИО11) с товарной накладной № УТ-443 от 18.07.2021 на сумму 350606,40 руб. (т. 7 л.д. 96-97), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/133-2021 от 12.07.2021, платежным поручением от 27.12.2021 № 683783 (т. 4 л.д. 97-103, т. 6 л.д. 27). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 350606,40 руб.;

-  Поручением экспедитора от 12.10.2021 № 55 (т. 4 л.д. 104) передан и принят Экспедитором по расписке № 55 от 12.10.2021 товар - ЗИП Toyota стоимостью 145584,65 руб. (т. 7 л.д. 51), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/134-2021 от 21.07.2021, платежным поручением от 27.10.2021 № 666936 (т. 4 л.д. 108-113, т. 6 л.д. 28). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 145584,65 руб.;

 - Поручением экспедитора от 12.10.2021 № 56 (т. 4 л.д. 105) передан и принят Экспедитором по расписке № 56 от 12.10.2021 товар - ЗИП УАЗ стоимостью 248750,40 руб. (т. 7 л.д. 52), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/149-2021 от 29.07.2021, платежным поручением от 27.10.2021 № 666270 (т. 4 л.д. 114-120, т. 6 л.д. 29). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 248750,40 руб.;

- Поручением экспедитора от 12.10.2021 № 57 (т. 4 л.д. 106) передан и принят Экспедитором по распискам № 30 от 01.10.2021 и № 40 от 01.10.2021 товар - офисная мебель, кресла, стулья общей стоимостью 1090020 руб. (т. 7 л.д. 34, 42), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/87-2021 от 20.05.2021, платежными поручениями от 03.09.2021 № 651181 и от 30.09.2021 № 658111 (т. 4 л.д. 121-125, т. 6 л.д. 30-31). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 1090020 руб.;

- Поручением экспедитора от 12.10.2021 № 58 (т. 4 л.д. 107) передан и принят Экспедитором по расписке № 58 от 12.10.2021 товар - ЗИП к автобусам стоимостью 335571 руб. (т. 7 л.д. 54), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/121-2021 от 28.06.2021, платежным поручением от 27.10.2021 № 666935 (т. 4 л.д. 126-131, т. 6 л.д. 32). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 335571,07 руб.;

- Поручением экспедитора от 12.10.2021 № 59 (т. 4 л.д. 132) передан и принят Экспедитором по расписке № 59 от 12.10.2021 товар - ЗИП к Volkswagen стоимостью 846259,20 руб. (т. 7 л.д. 56), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/145-2021 от 20.07.2021, платежным поручением от 06.12.2021 № 676806 (т. 4 л.д. 136-141, т. 6 л.д. 33). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 846259,20 руб.;

- Поручением экспедитора от 12.10.2021 № 60 (т. 4 л.д. 133) передан товар – электрика стоимостью 309865,78 руб. и принят Экспедитором по расписке № 54 от 01.10.2021 и акту об отгрузке от 12.10.2021 с УПД от 21.07.2021 и УПД от 21.07.2021 № УТ-7 (водитель ФИО11) на общую сумму 309865,77 руб., размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/144-2021 от 21.07.2021, платежным поручением от 18.11.2021 № 671623 (т. 4 л.д. 142-148, т. 6 л.д. 34). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 309865,77 руб.;

- Поручением экспедитора от 12.10.2021 № 61 (т. 4 л.д. 134) согласован и передан  Экспедитору по акту об отгрузке от 14.10.2021 с товарной накладной № 3 от 05.02.2021 (водитель ФИО8) товар – хозтовары стоимостью 846840 руб. (т. 7 л.д. 101-102), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/11-2021 от 25.01.2021, платежным поручением от 11.03.2021 № 604817 (т. 5 л.д. 1-9, т. 6 л.д. 35). Истец просит взыскать по данным документам 412512 руб. Таким образом, согласованным и принятым на экспедицию является груз на сумму 412512 руб.;

- Поручением экспедитора от 12.10.2021 № 62 (т. 4 л.д. 135) согласован на экспедицию товар – преобразователи Метран стоимостью 2349600 руб., передан Экспедитору по расписке № 12 от 01.10.2021 товар – Сапфиры стоимостью 2349600 руб. (т. 7 л.д. 20). Истец в пояснениях от 15.03.2024 № 9/ф0309/42190 в части разночтений в наименовании товара по Поручению экспедитора и Экспедиторской расписке указал на то, что преобразователи давления «Сапфир» и «Метран» в соответствии с Руководством по использованию указанных преобразователей предназначены для непрерывного преобразования измеряемой величины в системах автоматического управления и являются аналогами. Указанные обстоятельства проверены и приняты судом. Стоимость продукции подтверждена договором поставки № БиАЭС/16/174-2020 от 19.10.2020, платежным поручением от 18.01.2021 № 589634 (т. 2 л.д. 55-65, т. 5 л.д. 125). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 2349600 руб.;

- Поручением экспедитора от 12.10.2021 № 63 (т. 5 л.д. 16) передан и принят Экспедитором по расписке № 63 от 12.10.2021 товар – автофильтры стоимостью 34421,57 руб. (т. 7 л.д. 60), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/82-2021 от 20.05.2021, платежным поручением от 18.11.2021 № 671620 (т. 5 л.д. 21-25, т. 6 л.д. 36). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 34421,57 руб.;

- Поручением экспедитора от 12.10.2021 № 64 (т. 5 л.д. 17) передан и принят Экспедитором товар - диаграммная бумага по акту об отгрузке от 12.10.2021 (водитель ФИО11) с товарной накладной от 14.09.2020 № 229 стоимостью 311400 руб. (т. 7 л.д. 104-105), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/148-2020 от 05.10.2020, платежным поручением от 19.10.2020 № 564415 (т. 5 л.д. 26-31, т. 6 л.д. 37-39). Истец просит взыскать по данным документам 231720,29 руб. Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 231720,29 руб.;

- Поручением экспедитора от 12.10.2021 № 65 (т. 5 л.д. 18) передан и принят Экспедитором по товарной накладной от 18.01.2021 № 2 (водитель ФИО11) товар - моющие средства стоимостью 285120 руб. (т. 7 л.д. 106), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/222-2020 от 28.12.2020, платежным поручением от 08.02.2021 № 595625 (т. 5 л.д. 32-36, т. 6 л.д. 40). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 285120 руб.;

- Поручением экспедитора от 12.10.2021 № 66 (т. 5 л.д. 19) передан и принят Экспедитором по акту об отгрузке от 14.10.2021 (водитель ФИО8) с УПД от 19.02.2021 № 12 товар - материалы для переплета (обложки) на сумму 568590 руб. (т. 7 л.д. 107-108, размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/17-2021 от 01.02.2021, платежным поручением от 05.04.2021 № 609917 (т. 5 л.д. 37-43, т. 6 л.д. 41). Истец просит взыскать по данным документам 473190 руб. Таким образом, согласованным и принятым на экспедицию является груз на сумму 473190 руб.;

- Поручением экспедитора от 12.10.2021 № 67 (т. 5 л.д. 20) передан товар - перчатки латекс стоимостью 200000 руб., принят Экспедитором по акту об отгрузке от 12.10.2021 (водитель ФИО11) с актом о приеме-передаче ТМЦ на хранение от 07.10.2020 № 10-20С товар стоимостью 724200 руб. (т. 7 л.д. 109 и оборот л.д. 109), размер которой подтвержден договором поставки № 9/131485-Д от 02.09.2020, платежным поручением от 24.09.2020 № 4837 (т. 5 л.д. 44-55, т. 6 л.д. 42). Клиент просит взыскать по данным документам 869040 руб. Вместе с тем совокупность представленных доказательств подтверждается факт передачи Экспедитору груза на сумму 724200 руб.; 

- Товар - моющая продукция и бытовая химия принят Экспедитором по актам об отгрузке от 12.10.2021 и от 14.10.2021 (водители ФИО11 и ФИО8) с товарной накладной от 25.02.2021 № 18 на сумму 712157,76 руб. (т. 7 л.д. 113-114), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/10-2021 от 03.02.2021, платежным поручением от 24.05.2021 № 623609 (т. 6 л.д. 114, 118-126, 127-129). Истец просит взыскать по данным документам 492620,38 руб. Таким образом, согласованным и принятым на экспедицию является груз на сумму 492620,38 руб.;

- Товар - сварочные материалы принят Экспедитором с товарными накладными от 20.02.2021 № 629 и № 630 (водитель ФИО11) на сумму 234136,63 руб. (т. 7 л.д. 117-118), размер которой подтверждается договором поставки № № БиАЭС/16/14-2021 от 08.02.2021, платежным поручением от 28.10.2021 № 667552 (т. 6 л.д. 115, 130-138, 139-140). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 234136,63 руб.;

- Товар - вентили игольчатые принят Экспедитором по акту об отгрузке от 08.10.2021 (водитель ФИО12) с товарной накладной от 29.03.2021 № 11 на сумму 72000 руб. (т 7 л.д. 119-121), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/37-2021 от 22.03.2021, платежным поручением от 13.05.2021 № 621232 (т. 6 л.д. 117, 141-151). Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 72000 руб.;

- Товар - дезинфицирующие средства защиты принят Экспедитором по акту об отгрузке транспорта с ТМЦ от 15.10.2021 (водитель ФИО14) с товарной накладной от 30.11.2020 № 529 на сумму 979488 руб. (т. 7 л.д. 111-112), размер которой подтверждается договором поставки № БиАЭС/16/210-2020 от 04.12.2020, платежным поручением от 28.12.2020 № 584113 (т. 6 л.д. 116, т. 7 л.д. 1-10). Истец просит взыскать по данным документам 815411,03 руб. Таким образом, Экспедитор принял груз на сумму 815411,03 руб.

Таким образом, материалами дела подтверждено получение Экспедитором в рамках рассматриваемого Договора груза Клиента на общую стоимость 70930106,43 руб. 

Контррасчет объема и стоимости полученного Экспедитором груза ответчиком не представлен.

Документов, подтверждающих отказ Экспедитора в согласовании подлежащих оказанию транспортно-экспедиционных услуг с указанием причин отказа, материалы дела не содержат.

Поскольку обязанность по составлению Экспедиторских расписок и представлению документов, подтверждающих полномочия водителей, прибывших для принятия груза, возложена на Экспедитора, в отсутствие в отдельных случаях указанных документов, суд признает в качестве доказательства принятия груза акты об отгрузке, товарные накладные и УПД, содержащие подписи водителей, направленных ООО «Формула 78» для принятия груза.

Аналогичным образом, в отсутствие в отдельных случаях представленных Поручений экспедитора, с учетом принятия груза представителями Экспедитора и проставлением соответствующих отметок на актах об отгрузке, товарных накладных и УПД, содержащих сведений о стоимости и объеме переданного груза, суд принимает данные документы как доказательства подтверждения принятия груза на экспедицию по рассматриваемому Договору.

Кроме того, Экспедитор в порядке статьи 65 АПК РФ не оспорил содержание указанных документов, стоимость и объем полученного груза, полномочия водителей, прибывших под загрузку в место и сроки, определенные Договором.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 2 статьи 401 ГК РФ). Бремя доказывания своей невиновности лежит на лице, нарушившем обязательство или причинившем вред. Вина в нарушении обязательства или в причинении вреда предполагается, пока не доказано обратное.

В силу подпункта 2 пункта 2 статьи 7 Закона № 87-ФЗ экспедитор несет ответственность перед клиентом в виде возмещения реального ущерба за утрату груза без объявления ценности после принятия его экспедитором и до выдачи груза получателю, указанному в договоре транспортной экспедиции, либо уполномоченному им лицу в размере действительной (документально подтвержденной) стоимости груза, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.

При установлении причинной связи между нарушением обязательства и убытками необходимо учитывать, в частности, к каким последствиям в обычных условиях гражданского оборота могло привести подобное нарушение. Если возникновение убытков, возмещения которых требует кредитор, является обычным последствием допущенного должником нарушения обязательства, то наличие причинной связи между нарушением и доказанными кредитором убытками предполагается.

Должник, опровергающий доводы кредитора относительно причинной связи между своим поведением и убытками кредитора, не лишен возможности представить доказательства существования иной причины возникновения этих убытков.

ООО «Формула 78» не представило доказательств того, что неисполнение Договора и утрата груза произошли вследствие обстоятельств, которые ответчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.

Ссылки Экспедитора на действия его контрагента, отклоняются в силу следующего.

Пунктом 2.4 Договора предусмотрено, что возложение обязанностей на третье лицо не освобождает Экспедитора от ответственности перед Клиентом за исполнение Договора.

Самостоятельно осуществив выбор перевозчика, Экспедитор тем самым взял на себя ответственность перед Клиентом за надлежащее исполнение обязательств указанным перевозчиком.

Принятие на себя исполнителем функции по подбору перевозчика соответствует правомочиям экспедитора, оговоренным в статье 805 ГК РФ, однако согласно этой норме влечет сохранение ответственности экспедитора перед клиентом (определение Верховного Суда Российской Федерации от 29.06.2020 № 307-ЭС19-27146).

Согласно позиции, изложенной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 27.01.2020 № 307-ЭС19-14725, в ситуации отсутствия необходимого в силу договора мотивированного отказа от исполнения поручения клиента, а принятия, как предусмотрено договором, поручения к исполнению с сообщением клиенту информации о перевозящем груз водителе и транспортном средстве, экспедитор не вправе ссылаться на перевозку и утрату груза сторонним лицом и не наступление ответственности за действия привлеченного им к оказанию услуги лица. 

Выявление сторонами деловых просчетов, которые не были учтены на стадии заключения договора, при его исполнении на определенных в нем условиях, являются рисками предпринимательской деятельности.

Обстоятельств, освобождающих ответчика от ответственности, судом не установлено. 

Вместе с тем при наличии соответствующих доказательств экспедитор не лишен права предъявления требований в порядке регресса.

Исходя из доказанности всей совокупности условий, необходимых для привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков, в том числе факта причинения убытков, вины ответчика, причинно-следственной связи, а также размера убытков, суд полагает возможным удовлетворить требования истца о взыскании стоимости утраченного груза в размере 70930106,43 руб.

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 

Лицо, нарушившее обязательство, несет ответственность установленную законом или договором (статья 401 ГК РФ).

Пунктом 4.1 Договора установлено, что в случае нарушения Экспедитором сроков доставки Груза, объема доставленного Груза по настоящему Договору либо нарушения целостности пломб на контейнерах и/или сроков предоставления отчетной документации согласно пункту 2.6 Договора, равно как и оригинала самого договора, последний обязан выплатить Клиенту:

- неустойку в размере 0,04 % от стоимости Груза, доставленного Клиенту с просрочкой, за каждый день просрочки, но не более 10% от цены Договора; настоящий пункт не касается возмещения реального ущерба за утрату, недостачу или повреждения груза.

- неустойку за нарушение сроков и порядка предоставления сопроводительных документов, указанных в пункте 2.6 Договора, в размере 0,03% от стоимости Груза, доставленного с просрочкой, за каждый день просрочки.

Пунктом 4.2 Договора предусмотрено, что в случае если в результате нарушения Экспедитором условий Договора Клиент в соответствии с законодательством Российской Федерации расторгнет настоящий договор или настоящий договор будет расторгнут по решению суда, даже если расторжение будет иметь место за пределами срока действия настоящего договора, а Груз не будет доставлен Клиенту (частично или в полном объеме) к моменту расторжения договора, Экспедитор обязан оплатить Клиенту пени и штрафы, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 4.1 Договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения договора.

Из содержания указанных положений усматривается достигнутое сторонами соглашение о начислении неустойки за просрочку доставки груза исходя из его объема.

Истец произвел расчет неустойки за 316 дней просрочки (01.04.2022 по 10.02.2023) исходя из стоимости утраченного груза в размере 71134938,33 руб., с учетом уставленного ограничения в 10 % от цены договора в размере 1644500 руб. 

Расчет неустойки ответчиком не оспорен, контррасчет суду не представлен.

При этом судом установлено, что истец в расчете неустойки определил количество дней без учета мораторного периода, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами», что не повлияло на итоговую сумму заявленных требований.

Поскольку груз не доставлен на сумму 70930106,43 руб., неустойка за период с 01.10.2022 по 10.02.2023 составляет 3773481,66 руб. (70930106,43*0,04%*133 дня), но с учетом уставленного ограничения в 10 % от цены договора не может превышать 1644500 руб. 

Ходатайство о снижении размера неустойки в порядке статьи 333 ГК РФ ответчиком не заявлено, судом соответствующих обстоятельств не установлено, в связи с чем требование истца о взыскании неустойки за период с 01.10.2022 по 10.02.2023 в размере 1644500 руб. подлежит удовлетворению. 

В отношении требования о взыскании аванса в размере 4933500 руб. суд исходит из следующего. 

В соответствии со статьей 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего) обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ.

Статья 1103 ГК РФ предусматривает возможность применения правил главы 60 ГК РФ к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством, если иное не установлено законом и не вытекает из существа соответствующих отношений.

Факт перечисления платежным поручением от 27.12.2021 № 683781 аванса в размере 4933500 руб. подтвержден материалами дела (т. 1 л.д. 36), ответчиком по существу не оспорен, доказательств исполнения Договора либо возврата суммы неосновательного обогащения не представлено.

При таких обстоятельствах с ответчика в пользу истца подлежит взысканию выплаченный аванс в размере 4933500 руб.

Довод ответчика о том, что указанный истцом в исковом заявлении договор транспортной экспедиции от 29.09.2021 № 9/176370-Д ответчик не заключал, между сторонами заключен договор от 29.09.2021 № БиАЭС/16/174-2021, отклоняется судом. 

Как пояснил истец, регистрационный номер № 9/176370-Д - номер в Единой отраслевой системе электронного документооборота Госкорпорации «Росэнергоатом» (ЕОСДО), № БиАЭС/16/174-2021 - внутренний номер регистрации в отделе договорной деятельности Билибинской АЭС при составлении проекта к закупочной документации до оформления договора в ЕОСДО.

Из представленной сторонами переписки, в том числе писем ООО «Формула 78» от 13.07.2022 № 66/2022, от 20.07.2022 № 75/2022, напрямую следует, что ответчик был осведомлен о реквизитах договора транспортной экспедиции от 29.09.2021 № 9/176370-Д.  

Ссылка ответчика о несоблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора опровергается материалами дела, а именно направлением ответчику претензии от 10.02.2023 № 9/121/2023-прет и ее получения последним 02.03.2023 (т. 1 л.д. 37-38, 39, 40).

Таким образом, заявление ответчика об оставлении иска без рассмотрения в связи с несоблюдением досудебного порядка урегулирования спора удовлетворению не подлежит.

С учетом фактических обстоятельств дела и переписки сторон, в частности письма Экспедитора от 20.07.2022 № 75/2022 о планируемых сроках доставки груза на Билибинскую АЭС, шестимесячный срок, установленный пунктом 6.5 Договора, не считается пропущенным.

Довод ответчика о том, что он не принимал груз по экспедиторским распискам, опровергается материалами дела, в том числе подписью директора общества и печатью на представленных истцом экспедиторских расписках (т. 7 л.д. 11-61), а также доверенностями на водителей и актами об отгрузке, товарными накладными, УПД, содержащими подписи представителей Экспедитора, свидетельствующие о принятии груза и его стоимости (т. 7 л.д. 121, т. 9 л.д. 125-128).

При этом сам Экспедитор во внесудебной переписке указывает Клиенту на совершение действий по доставке груза с г. Удомля Тверской области через г. Санкт-Петербург до г. Артем Приморского края, сообщает дату планируемой доставки груза на Билибинскую АЭС, что свидетельствует о принятии груза на экспедицию. Неисполнение договора связывает с несением дополнительных финансовых затрат, связанных с передержкой контейнеров в г. Артем, значительным повышением цен на услуги морского фрахта и автомобильных перевозок, отсутствием кредитного финансирования со стороны банков, просит Клиента рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании (т. 5 л.д. 72-73). 

Вместе с тем указанные ответчиком обстоятельства не являются основанием для освобождения от исполнения принятых на себя договорных обязательств и относятся к рискам предпринимательской деятельности.

Ссылки ответчика на то, что груз был выдан без каких-либо документов, Экспедитор принял все возможные меры по исполнению Договора, а его неисполнение произошло исключительно в результате неправомерных действий истца, не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства.

Представленные ответчиком договор транспортной экспедиции, заключенный с ООО «Газодизельные системы», первичные документы по взаимоотношениям с ООО «Газодизельные системы» за 2021-2022 годы, а также договоры, заключенные между ООО «Газодизельные системы» и ООО «Петербургская Логистическая компания», ООО «Петербургская Логистическая компания» и ООО «Солдис», не являются относимыми доказательствами исполнения рассматриваемого Договора, заключенного ООО «Формула 78» и АО «Концерн Росэнергоатом». 

По общим правилам, установленным статьями 65, 66 АПК РФ объем доказательств в подтверждение того или иного обстоятельства самостоятельно определяется лицами, участвующими в деле. 

Согласно части 1 статьи 8 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон (часть 3 статьи 8 АПК РФ). 

Суд также отмечает, что поскольку разрешение спора производится судом путем сопоставления и анализа представленных сторонами доказательств, то на результат рассмотрения дела влияет процессуальное поведение сторон, каждая из которых вправе либо активно доказывать свои доводы и возражения, представляя суду доказательства их обоснованности, либо, заняв пассивную позицию, ограничиться общим непризнанием правильности позиции оппонента. 

В последнем случае сторона в силу части 2 статьи 9 АПК РФ принимает на себя риски наступления негативных последствий собственного процессуального бездействия. 

Суд неоднократно откладывал судебное разбирательство, предлагая ответчику представить доказательства в обоснование своей позиции.

Вместе с тем доказательств надлежащего исполнения условий Договора или наличие непреодолимых обстоятельств, препятствующих его исполнению, ответчиком не представлено.

При указанных обстоятельствах требования истца в части взыскания выплаченного по договору аванса в размере 4933500 руб., стоимости переданного для доставки и не доставленного груза в размере 70930106,43 руб., неустойки за период с 01.10.2022 по 10.02.2023 в размере 1644500 руб., являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Требования в части взыскания стоимости груза в размере 204831,90 руб. удовлетворению не подлежат.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

Истец при обращении в суд платежным поручением от 30.03.2023 № 813320 (т. 1 л.д. 69) уплатил в федеральный бюджет государственную пошлину в размере 200000 руб. 

После снижения суммы исковых требований до 77712938,33 руб. размер государственной пошлины, подлежащей уплате в бюджет, не изменился.

В связи с удовлетворением иска на 99,74% расходы по уплате государственной пошлины в размере 199473 руб. в силу части 1 статьи 110 АПК РФ подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Формула 78» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) выплаченный по договору транспортной экспедиции от 29.09.2021 № 9/176370-Д аванс в размере 4933500 руб., стоимость переданного для доставки и не доставленного груза в размере 70930106,43 руб., неустойку за период с 01.10.2022 по 10.02.2023 в размере 1644500 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 199473 руб., а всего взыскать 77707579 (семьдесят семь миллионов семьсот семь тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 43 копейки. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также в Арбитражный суд Дальневосточного округа в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 181, статьей 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Жалоба на решение суда подается через Арбитражный суд Чукотского автономного округа.

 

Судья                                                                                                                        Л.Д. Козлова