АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

г. Воронеж Дело № А14-12890/2017  «27» февраля 2018 г.  

Судья Арбитражного суда Воронежской области Стеганцев А.И.,  

при ведении протокола помощником судьи Ефименко Е.П., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

отдела по образованию, молодежной политики, культуре и спорту Администрации  Хохольского муниципального района Воронежской области, Воронежская область,  р.п. Хохольский (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Развитие», г. Воронеж  (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)  

о взыскании штрафа и обязании исполнить гарантийные обязательства 

Руководствуясь статьями 65, 110, 167-171, 174, 176, 180, 181 АПК РФ,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление отдела по образованию, молодежной политики, культуре и  спорту Администрации Хохольского муниципального района Воронежской области,  Воронежская область, р.п. Хохольский (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)  удовлетворить полностью.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Развитие», г.  Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в течение одного месяца с  момента вступления в законную силу решения суда исполнить гарантийные  обязательства по муниципальному контракту № 0131300035714000029-0069149-02 от  25.06.2014 года, а именно:  

Недостатки 

Устранение 

1.Ржавчина на металлическом ограждении  внешней территории стадиона и  

автостоянки. Общ. длина – 800 п.м.  

Произвести зачистку, огрунтовку и  покраску масляными составами ранее  

окрашенных металлических решеток и  оград: художественных с рельефом за 2  раза.  

2.Входная группа. Протекание 

атмосферных осадков через кровлю из  поликарбоната. Общ.пл – 72кв.м.  

 Демонтаж оконных фонарных покрытий  из поликарбонатных и акриловых плит с  боковыми планками, профилями и  

резиновыми прокладками.  Монтаж оконных фонарных покрытий из  

поликарбонатных и акриловых плит с  боковыми планками, профилями и  

резиновыми прокладками.  

3.Входная группа. Ржавчина 

металлоконструкций козырька входной  группы ( прогоны, балки, ригели).  

Зачистка, грунтовка и покраска  масляными составами ранее окрашенных  

металлических кровель за 2 раза. 

4.Трещины в стене в помещениях  КПП и кассы с раскрытием до 3 мм.  

Перетирка штукатурки внутренних  помещений и окрашивание  

водоэмульсионными составами  поверхностей стен, ранее окрашенных:  

водоэмульсионной краской с расчисткой  старой краски до 35%.  

5.Отсутствует расфазировка кабеля  электроснабжения КПП и кассы.  

 Произвести разбивку 

линий отдельно по фазам. 

6.Выход из строя силового кабеля,  осуществляющий электропитание  отопительной системы общественного  

туалета и пункта охраны. 

Заменить муфтовое соединение перед  пунктом охраны  

7.Частичное разрушение креплений  анкерных болтов ограждения теннисного  

корта. 

Сверление новых отверстий большего  диаметра с установкой новых анкерных  болтов.  

8.Разноуровневая установка столбов  по вертикали и горизонтали ограждения из  

профлиста. Длина ограждения – 120м.  

Перебурить и выровнять по линии.  Возможно выполнить отдельный участок  уступом по вертикали.  

9.Ржавчина на металлоконструкциях  входа в общественный туалет.  

Произвести зачистку, грунтовку и  

покраску масляными составами ранее  окрашенных больших металлических  

поверхностей (кроме крыш) за 2 раза.  

10.Протекание атмосферных осадков через  мягкую кровлю общественного туалета  

(примыкание кровли с выходом естеств.  вентиляцией.)  

Вскрыть кровлю, произвести 

герметизацию, уложить и приклеить  мягкую кровлю.  

11.Теннисный корт. Отслоение и трещины в 

покрытии площадки. Площадь площадки –  661 кв.м.  

Демонтаж теннисного корта. Устройство  покрытий: из релина на клее КН-2.  

12.Разрыв и короткое замыкание силового  электрокабеля, идущего от ТП до  

общественного туалета. Отсутствует  расфазировка кабеля электроснабжения  

туалета. 

Устранить обрыв кабеля (установить  муфту), идущего от ТП до  

общественного туалета, произвести  соединение и изоляцию кабеля согласно  требованиям ПУЭ.  

13.Просадка в грунт накопительных  емкостей, очистных сооружений с  смотровыми колодцами ливневой  канализации, обрыв перепускной трубы  

между емкостями. 

Восстановить соединительную трубу  

между накопительными емкостями в  сети канализации К2, смонтировать  

удлинительную горловину с люками на  смотровых колодцах емкостей засыпать  грунтом, уложить и соединить сбросную  

трубу накопительной емкости.  

14.Незаделано отверстие примыкания  металлической и бетонной площадок в  верхней части лестничного марша трибуны  

– 7 площадок. 

Выполнить примыкание 

металлоконструкций трибуны с бетонной  площадкой в верхней части лестничного  марша трибуны – 7 площадок.  

15.Протекание атмосферных осадков через  кровлю из сотового поликарбоната  

трибуны. Имеются вмятины в покрытии  из поликарбоната.  

Общ. площадь – 870 кв.м. 

Демонтаж- монтаж поликарбонатного  покрытия кровли трибуны, с  

устройством дополнительных прогонов-  702,5 кв.м. (имеется провисание  

покрытия), уменьшив шаг между прогонами. 

16.Неокрашены металлоконструкции  трибуны.  

Произвести окраску масляными  составами ранее окрашенных больших  

металлических поверхностей (кроме  крыш) за 2 раза.  

17.На осветительной мачте футбольного  поля не горит один прожектор.  

Заменить прожектор на осветительной  мачте футбольного поля.  

18.Не выдержан уклон на промежуточных  площадках центрального лестничного  

марша, имеется застой воды, частично  разрушена тротуарная плитка.  

Разобрать и переложить плитку с учетом  уклона для воды на промежуточных  площадках центрального лестничного  марша (18 кв. м.).  

19. Нет разметки на городошной площадке.  

Выполнить разметку согласно правилам  (70 м.п.)  

20. Оголен кабель по видеонаблюдению.  

Восстановить изоляцию кабеля  видеонаблюдения.  

21. В туалете имеются трещины в плитке.  

Устранить причину возникновения 

трещин в плитке в туалете с заменой 10  кв.м.  

22. Неисправны две камеры наружного  видеонаблюдения  

Заменить на новые. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Развитие»,  

г. Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в пользу отдела по  образованию, молодежной политики, культуре и спорту Администрации Хохольского  муниципального района Воронежской области, Воронежская область, р.п.  Хохольский (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) штраф в размере 515 883,99  руб., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 17 313,68 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Развитие»,  

г. Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в доход федерального  бюджета 2 004,33 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд в месячный срок со дня принятия, через Арбитражный суд  Воронежской области.  

Судья А.И. Стеганцев