44/2019-101914(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть) 

город Омск  № дела  13 августа 2019 года А46-9393/2019  

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Распутиной Л.Н., при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Прокопьевой М.В., рассмотрев в  судебном заседании исковое заявление федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный аграрный  университет имени П.А. Столыпина» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «Югорский инновационный центр» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) об обязании устранить недостатки работ  

при участии в заседании суда:  

от истца - ФИО1 по доверенности от 09.01.2019 № 0170/2 сроком по 31.12.2019  (личность удостоверена паспортом);  

от ответчика - не явились, извещены. 

РЕШИЛ:

Исковые требования федерального государственного бюджетного образовательного  учреждения высшего образования «Омский государственный аграрный университет имени  П.А. Столыпина» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Югорский инновационный  центр» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) с течение тридцати дней с даты вступления  решения суда по настоящему делу в законную силу безвозмездно устранить недостатки  подрядных работ по капитальному ремонту спортивного зала № 2 по адресу: 

<

...>, по контракту № А-ОГ-046/17 следующие виды и объемы работ:  

 № п/п 

Наименование работ 

Ед. 

Объём  

измер.  

1 

Демонтаж наружной облицовки поверхности стен в 

100м2  

3,276  

горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его  

разборкой): металлопрофилем с пароизоляционным слоем из  

пленки ЮТАФОЛ 

2 

Демонтаж облицовки: оконных проемов в наружных стенах  

м2  

111,1  

откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным  

покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной  

стали с полимерным покрытием  

3 

Снятие изоляции изделиями из пенопласта насухо холодных  

м3 

32,76  

поверхностей покрытий и перекрытий 

4 

Изоляция изделиями из каменной ваты насухо холодных  

м3 

32,76  

поверхностей покрытий 

5 

Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном  

100м2  

3,276  

исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):  

6 

Омбелтиацлолвокса:й одкионнгноым хс ппраореомиозво лвя цниароунжнынымх с слтоеенма хи зо птклоесннкоий  

м2 

111,1  

планкой из оцинкованнойЮ сТтаАлФи Ос Лпо лимерным покрытием с  

7 

уОсбтрлиойцсотввкоам: д ввоедроноытхл ипврао еомкоонвн во нгоа риузж онцыихн ксотвеаннанх оойт ксотаслниой с  

м2 

1,1 

планкой из оцинкопвоалнинмоейр нстыамли п со кпроылтиимеемр н ым покрытием с  

установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным  

 покрытием 

8 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до  

100м2  

3,276 

16 м: трубчатых для прочих отделочных работ  

9 

Погрузка строительного мусора в а/самосвалы вручную  

т 

до 1,5 

10 

Вывоз строительного мусора а/самосвалами на расстояние 30 км  

т 

до 1,5 

По контракту № А-ОГ-047/17 следующие виды и объемы работ:  

 №  п/п  

Наименование работ 

Ед. 

Объём  

измер.  

1 

Соскабливание набело: потолка (зал) (до 30% от общей площади)  

100 м2  

3,8 

2 

Шпаклевание по штукатурке и сборным конструкциям: потолков,  

100 м2  

3,8 

подготовленных под окраску (до 30% от общей площади)  

3 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами  

100м2  

12,67  

улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным  

под окраску 

4 

Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов:  

100 м2  

7,546  

при высоте помещений до 6 м  

5 

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1  

100м2  

1,58  

раз стен (до 30% от общей площади)  

6 

Шпаклевание по штукатурке и сборным конструкциям: стен,  

100м2  

1,58  

подготовленных под окраску (до 30% от общей площади)  

7 

Улучшенная окраска масляными составами по сборным  

100м2  

6,964  

конструкциям: стен, подготовленных под окраску  

8 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами  

100м2  

5,256  

высококачественная: по сборным конструкциям стен,  

подготовленным под окраску  

9 

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза  

100 м2  

7,546  

с расчисткой старой краски до 10%  

10  

Улучшенная окраска масляными составами по дереву  

100м2  

0,75 

(разметка) 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Югорский инновационный  центр» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)) в пользу федерального государственного  бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный  аграрный университет имени П.А. Столыпина» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

6 000 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия и может  быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой  арбитражный апелляционный суд.  

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека арбитражных  дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья Л.Н. Распутина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 31.05.2019 11:12:42Кому выдана Распутина Лариса Николаевна