Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-125772/2018

25 декабря 2018 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  12 декабря 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  25 декабря 2018 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНТА" (адрес:  197374, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. САВУШКИНА 112/Б, ОГРН:  

<

***>)

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФАСТРОЙГРУППА" (адрес:  123060, МОСКВА, ул. МАРШАЛА РЫБАЛКО, 2/6/I-13, ОГРН:  

<

***>)

о взыскании

при участии

- от истца: ФИО1, по доверенности от 17.04.2018

- от ответчика: не явился, извещен

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНТА» (далее – ООО «ЛЕНТА») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «АЛЬФАСТРОЙГРУППА» (далее – ООО «АЛЬФАСТРОЙГРУППА») о взыскании 5 111 091,28 руб. задолженности по Соглашению о расторжении договора от 30.09.2017.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание своих представителей не направил, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие. Отзыв с возражениями по заявленным требованиям ответчик не представил.

Исследовав материалы настоящего дела, оценив собранные по делу доказательства в порядке, арбитражный суд установил следующее.

Как следует из материалов дела ООО «ЛЕНТА» (заказчик) и ООО «АЛЬФАСТРОЙГРУППА» (подрядчик) заключили договор от 15.02.2017 № Л-42, по условиям которого заказчик поручает подрядчику, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса необходимых работ и услуг, по согласованию, строительству и вводу в эксплуатацию ул. Углеуральской от ул. Подлесной до ул. Переселенческой в Дзержинском районе г. Перми и внеплощадному благоустройству ул. Крупской, включая:

Продление технических условий на вынос тепловых сетей и иных инженерных коммуникаций, либо получение новых технических условий, внесение изменений в Проектную документацию (в случае необходимости)

Строительство ул. Углеуральской от ул. Подлесной до ул. Переселенческой в Дзержинском районе г. Перми в соответствии с проектной документацией (Приложение № 1 к договору) (пункт 1.1.2 договора).

Внеплощадное благоустройство ул. Крупской в соответствии с проектной документацией (Приложение №1 к договору) (пункт 1.1.3 договора).

Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и/или с привлечением субподрядчиков весь объём работ согласно составу проектной документации (Приложение №1 договору), в соответствии с условиями договора и действующим законодательством (пункт 1.2 договора).

В силу пункта 2.1. договора работы по договору должны быть начаты, завершены и производиться в соответствии с договором и Графиком производства работ (Приложение № 3 к договору), утверждённым заказчиком.

По пунктам 2.1.1, 2.1.2 договора срок начала выполнения работ: с момента заключения договора, срок окончания выполнения работ – не позднее 30.09.2017.

К указанному сроку подрядчик обязан завершить выполнение всех работ в соответствии с условиями договора, оформить и передать заказчику всю документацию на выполненные работы, и сдать результат выполненных работ заказчику по актам по форме КС-2, справкам по форме КС-3.

Согласно пункту 3.1. договора стоимость подлежащих выполнению работ составляет 131 356 655, 17 руб. 

В пункте 4.1 договора заказчик перечисляет на расчётный счёт подрядчика аванс в размере 30% от суммы договора, что составляет 39 406 996,55 руб., в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты передачи подрядчиком оригинала счета. Оплата аванса производится только после предоставления Банковской гарантии возврата авансового платежа в соответствии с пунктом 4.11 договора.

Дальнейшая (промежуточная) оплата работ и услуг производится за фактически выполненные за отчетный период объемы работ и услуг в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента получения оригиналов документов (актов по форме КС-2, справок по форме КС-3, счета, счет-фактуры), подтверждающих объемы выполненных работ и/или оказанных услуг за отчётный период, в соответствии с условиями п.4.3 настоящего договора, исходя из согласованной сторонами стоимости определенного вида работ, с зачетом в счет промежуточной оплаты работ суммы аванса, подлежащей списанию в соответствующем отчетном периоде. Списание аванса осуществляется пропорционально отношению стоимости выполненных в отчетном периоде работ к общей цене работ по договору. При наличии у заказчика замечаний по предоставленным актам подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней урегулировать разногласия и передать заказчику откорректированный акт (пункт 4.2 договора).

Согласно пункту 4.5 договора заказчик осуществляет приемку фактически выполненных объемов работ и услуг, и передаёт подрядчику подписанные документы (акты по форме КС-2, справки по форме КС-3) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения от подрядчика документации, указанной в п. 4.2. договора, либо в указанный срок направляет подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки с указанием в нем выявленных недостатков.

Между сторонами 30.09.2017 заключено Соглашение о расторжении договора от 15.02.2017 № Л-42 с 30.09.2017.

Общая сумма выполненных подрядчиком по договору работ на момент его расторжения составляет 67 090 816,98 руб.

Задолженность заказчика перед подрядчиком по договору на момент его расторжения составляет 26 007 618,52 руб. (пункт 2.2 соглашения).

Между сторонами произведен зачет взаимных однородных требований.

По пункту 7 соглашения взаиморасчеты сторон в части задолженности подрядчика перед субподрядчиком (ООО «ТЕХДОРГРУПП») по договору от 18.04.2017 № Л-42/Суб в размере 11 832 607,78 руб. производится в следующем порядке: 

– путем зачета задолженности заказчика перед подрядчиком на сумму 5 083 136,83 руб. и 1 638 379,32 руб., а также путем оплаты подрядчиком 5 111 091,28 руб. на расчетный счет не позднее 31.03.2018 (в редакции дополнительного соглашения от 30.11.2017 к соглашению о расторжении договора). 

ООО «ЛЕНТА» перечислило ООО «ТЕХДОРГРУПП» 11 832 607,78 руб. платежным поручением от 02.10.2017 № 70836.

Задолженность ООО «АЛЬФАСТРОЙГРУППА» перед ООО «ЛЕНТА» составляет 5 111 091,28 руб., что подтверждается актом сверки взаимных расчетов от 10.07.2018, подписанный сторонами без возражений.

Отказ ООО «АЛЬФАСТРОЙГРУППА» удовлетворить данное требование послужил основанием для обращения ООО «ЛЕНТА» в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии  со статьей 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в полном объеме после приемки объекта заказчиком.

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Суд, оценив представленный в материалы дела акт сверки взаимных расчетов от 10.07.2018, подписанный подрядчиком без возражений, соглашение о расторжении договора и дополнительное соглашение к нему, письмо ответчика от 18.12.2017 № 215-12/17, пришел к выводу о наличии на стороне ответчика задолженности по соглашению о расторжении договора.

Доказательств оплаты 5 111 091,28 руб. ответчик не представил. 

Принимая во внимание, что суду не представлены документы, опровергающие исковые требования истца, в деле отсутствуют доказательства оплаты долга, исковые требования истца являются обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

р е ш и л :

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АЛЬФАСТРОЙГРУППА» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЛЕНТА» 5 111 091,28 руб. задолженности и 48 555 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

 

Судья                                                                            Косенко Т.А.