АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А57-17806/2024

09 октября 2024 года

город Саратов

Резолютивная часть решения объявлена 26 сентября 2024 года. 

Полный текст решения изготовлен 09 октября 2024 года.

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Каштановой Н.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кочановой Е.Ю., рассмотрев в судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу: 

<

...> арбитражное дело по исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью «Сети», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 443124, Самарская область, г. Самара, просека 5-Я, д. 101а, помещ. н6,

к обществу с ограниченной ответственностью «ПКП «Теплосфера», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 410005, 

<

...>,

о взыскании задолженности по договору № 11/ПД 2023 от 03.04.2023 работ в размере 2 271 255,14 руб., пени в соответствие с пунктом 20.8 договора № 11/ПД 2023 от 03.04.2023 в размере 113 562,76 руб.,  

при участии: 

представители сторон не явились в судебное заседание, извещены надлежащим образом,  

 

У С Т А Н О В И Л:

В Арбитражный суд Саратовской области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Сети» (далее – ООО «Сети») с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ПКП «Теплосфера» (далее – ООО «ПКП «Теплосфера») о взыскании задолженности по договору № 11/ПД 2023 от 03.04.2023 в размере 2 271 255 руб. 14 коп., пени в соответствие с пунктом 20.8 договора № 11/ПД 2023 от 03.04.2023 в размере 113 562 руб. 76 коп.

Истец, ответчик в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом. 

Ответчик в материалы дела отзыв на исковое заявление не представил.

Информация о принятых по делу судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных в судебном заседании перерывах размещена на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru, в информационных киосках, расположенных в здании арбитражного суда.

В силу положений статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства.

Дело рассматривается в порядке статей 153-166 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Заявлений в соответствии со статьями 24, 47, 48, 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не имеется.  

В соответствии со статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основание своих требований и возражений.

Арбитражному суду представляются доказательства, отвечающие требованиям статей 67, 68, 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд рассматривает дело по имеющимся в деле доказательствам.

Исследовав доказательства, следуя закрепленному статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также статьей 123 Конституции Российской Федерации, принципу состязательности сторон, суд приходит к следующему.

Как следует из материалов дела, между ООО «СЕТИ» (далее – Субподрядчик, Истец) и ООО «ПКП «Теплосфера» (далее – Подрядчик, Ответчик) заключен договор № 11/ПД 2023 от 03.04.2023 на выполнение работ по объекту «75-СТН/ТПР-10/-04.2023 Работы по техническому перевооружению котельной СВ ПТУС» (далее – Договор).

Согласно п. 3.1. договора Субподрядчик в установленные договором сроки и в счет договорной цены выполнит за свой риск, своими силами и силами привлеченных Субподрядных организаций все работы и услуги в объеме, определенном настоящим договором и рабочей документацией.

В соответствии с п. 4.2 договора с учетом дополнительного соглашения № 1 к договору от 31.07.2023 договорная цена работ и услуг, подлежащая оплате Субподрядчику, составляет 6 825 472,90 руб., в том числе  НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством 1 137 578,81 руб. 

Согласно п. 5.1 договора работы, предусмотренные договором по объекту, должны быть начаты Субподрядчиком в сроки согласно Приложению 2 «График выполнения работ» и полностью завершены не позднее 15 июля 2023 года

Согласно п. 6.3. договора выплата Субподрядчику аванса для выполнения работ по Договору осуществляется в следующем порядке:

6.3.1. По письменному запросу Субподрядчика. Подрядчик перечисляет Субподрядчику аванс в размере 5% (пяти процентов) от договорной цены с учетом НДС, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления Субподрядчиком Подрядчику следующих документов:

- безусловной и безотзывной банковской гарантии в обеспечение исполнения условий договора (по форме Приложения 14), или заверенной банком копии платежного поручения, подтверждающего перечисление Субподрядчиком на расчетный счет Подрядчика обеспечительного платежа.

- счета на оплату на сумму аванса.

Субподрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поступления на расчетный счет аванса предоставляет Подрядчику оригинал счет-фактуры на сумму полученного аванса.

В соответствии с п.6.4. договора зачет выплаченного Субподрядчику аванса в счет оплаты выполненных Субподрядчиком работ по договору осуществляется ежемесячно при каждой сдаче-приемке выполненных работ по договору пропорционально объему принятых Работ начиная с месяца, следующего за месяцем выплаты аванса, и завершается в последний месяц выполнения Работ по Договору.

Зачет аванса за текущий месяц производится датой подписания справки по форме КС-3. Сумма зачтенного аванса за текущий месяц указывается в справке по форме КС-3.

Согласно п. 6.5. договора оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком Работ производится Подрядчиком в пользу Субподрядчика с учетом зачета суммы аванса в порядке, указанном в пункте 6.4 Договора.

В соответствии с п.6.6. договора оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ осуществляется Подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней (за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, регламентирующим закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц или положением о закупке товаров, работ, услуг Подрядчика), следующих за датой получения Подрядчиком оригинала счета, счета-фактуры, оформленных на основании учетной документации, подписанной уполномоченными представителями Сторон.

Согласно п.6.7. договора Подрядчик вправе исполнить свои обязательства по выплате Субподрядчику аванса и оплате стоимости выполненных Работ используя неденежные формы расчетов (в том числе исполнение обязательств путем взаимозачетов, уступки прав требования, перевода долга и пр.), непротиворечащие нормам и требованиям законодательства Российской Федерации.

В соответствии с п. 6.8. договора Субподрядчик обязан возвратить Подрядчику незачтенный аванс в течение 10 (десяти) календарных дней с момента наступления Даты завершения Работ на Объекте (по Приложению «График выполнения работ»), но в любом случае не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до даты окончания срока действия безусловной и безотзывной банковской гарантии в обеспечение исполнения условий Договора или в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты расторжения Договора и/или с даты получения письменного уведомления Подрядчика.

В случае, если Субподрядчик не завершил работы на дату завершения работ на объекте, установленную Приложением «График выполнения работ», и стороны не заключили Дополнительное соглашение, предусматривающее перенос срока завершения работ Субподрядчик по согласованию с Подрядчиком и при условии наличия представленной Субподрядчиком безусловной и безотзывной банковской гарантии в обеспечение исполнения условий договора со сроком ее действия, соответствующим требованиям договора, вправе не исполнять обязанность по возврату незачтенного аванса, установленную настоящим пунктом Договора. При этом Субподрядчик не освобождается от обязанности зачесть аванс в счет оплаты выполненных Работ по Договору в полном объеме до даты фактического подписания Акта сдачи-приемки объекта.

Согласно п.6.9. договора датой платежа по договору является дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего Сторону по Договору. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

В соответствии с п. 6.10. договора стороны в период действия договора ежеквартально по состоянию на последний день каждого квартала проводят сверку расчетов. При этом, соответствующие акты сверки составляются с отдельным указанием задолженности Субподрядчика по полученным, но не зачтенным в счет оплаты выполненных работ авансам, а также с отдельным указанием задолженности Подрядчика за выполненные, но не оплаченные работы. Субподрядчик составляет проект акта сверки и не позднее 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным, направляет его Подрядчику.

В течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения акта сверки, Подрядчик обязан надлежащим образом подписать акт сверки, скрепить печатью и направить Субподрядчику или в тот же срок представить возражения.

Согласно п. 6.11. договора Субподрядчик обязан по требованию Подрядчика и по направленной Подрядчиком форме представления информации представить отчет о фактическом использовании аванса, полученного по Договору, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего письменного запроса Подрядчика.

Буквальное толкование условий договора позволяет сделать вывод о том, что по своей правовой природе заключенный сторонами договор является договором подряда. Взаимоотношения сторон по договору подряда регулируются положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (пункт 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При этом договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (пункт 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, с учетом положений статей 702, 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, существенными условиями договора подряда являются его предмет и начальный и конечный сроки выполнения работ.

В судебном заседании установлено, что в договоре № 11/ПД 2023 от 03.04.2023 определены все существенные условия договора подряда.

Согласно части 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с пунктом 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации, Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Пунктом 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

В силу части 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Истцом в материалы дела представлены акты о приемке выполненных работ: 

акт по форме КС-2 от 29.04.2023 № 1 на сумму 598 321,45 руб., в т.ч. НДС; 

акт по форме КС-2 от 31.05.2023 № 2 на сумму 891 391,63 руб., в т.ч. НДС; 

акт по форме КС-2 от 30.06.2023 № 3 на сумму 2 520 357,78 руб., в т.ч. НДС; 

акт по форме КС-2 от 31.07.2023 № 4 на сумму 2 824 402,04 руб., в т.ч. НДС.

Акты подписаны сторонами. Согласно актам работы ООО «СЕТИ» выполнены в полном объеме, претензий по объему, качеству и срокам выполнения у заказчика не имеется.

Таким образом, суд приходит к выводу, что работы на спорную сумму выполнены истцом, результат работ используется ответчиком, следовательно, подрядчик был заинтересован в выполнении работ, а последний имеет для него потребительскую ценность.

Согласно п. 8.14 договора Подрядчик обязался произвести оплату выполненных работ в порядке, предусмотренном разделом 6 Договора. 

Соответственно, срок оплаты акта по форме КС-2 от 31.07.2023 № 4 на сумму 2 824 402,04 руб., в т.ч. НДС, составляет – 21.08.2023. 

Между тем, по состоянию на 19.06.2024 на расчетный счет ООО «СЕТИ» в установленный срок поступила оплата за выполненные работы в размере 4 554 217,76 руб. в т.ч. НДС (с учетом акта взаимозачета № 3 от 01.08.2023). 

Таким образом, задолженность ООО «ПКП «Теплосфера» перед ООО «СЕТИ» по Договору составляет: 6 825 472,90 – 4 554 217,76 = 2 271 255,14 руб. в т.ч. НДС.

23.05.2024 истцом в адрес ответчика была направлена претензия исх. № 23/1  с требованием оплатить образовавшуюся задолженность. Указанная претензия получена ответчиком 31.05.2024, оставлена без ответа и удовлетворения.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с частью 1 статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Ответчиком доказательств уплаты задолженности в размере 2 271 255,14 руб. в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в суд не представлено.

На основании изложенного, требования истца в части основного долга подлежат удовлетворению.

Истцом также заявлено требование о взыскании пени в соответствие с пунктом 20.8 договора в размере 113 562,76 руб. 

В соответствии с п. 20.8 договора в случае, если Подрядчик нарушил условия оплаты, оговоренные договором, на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней, Субподрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 1/360 двойной ключевой ставки, установленной Банком России на дату предъявления требования от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5 % (пяти процентов) от суммы задержанного/просроченного платежа. 

В силу статьи 329 ГК РФ исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Факт ненадлежащего исполнения обязательств ответчика установлен материалами дела и не оспорен ответчиком, в связи с чем, требования о взыскании с ответчика суммы пени по договору заявлены обоснованно.

Ответчиком не заявлено ходатайство об уменьшении пени, доказательств несоразмерности размера неустойки последствиям нарушения обязательства суду не представлено.

Суд, проверив расчет пени, считает его верным, соответствующим условиям договора (ограничен 5%). 

На основании изложенного, требование истца о взыскании пени в размере 113 562,76 руб. подлежит удовлетворению.

Согласно статье 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражным судом суд решает вопрос о распределении судебных расходов.

В силу статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.

Решая вопрос о распределении расходов по государственной пошлине по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд относит их на ответчика в размере 34 924 руб. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПКП «Теплосфера», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Саратов, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сети», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Самара, задолженность по договору от 03.04.2023 № 11/ПД 2023 в размере 2 271 255 руб. 14 коп., пени в соответствие с пунктом 20.8 договора в размере 113 562 руб. 76 коп.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя. 

Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме через Арбитражный суд Саратовской области.

 

Судья Арбитражного суда 

Саратовской области                                                                                              Н.А. Каштанова