АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

 

 

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-2858/2023

г. Чебоксары

15 августа 2023 года

Резолютивная часть решения вынесена 14.08.2023

Полный текст решения изготовлен 15.08.2023

 

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Манеевой О.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании 

дело по иску

акционерного общества «Чебоксарский электроаппаратный завод» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), 428020, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, проспект И. Яковлева д. 5

к обществу с ограниченной ответственностью «Нижнекамская электромонтажная организация» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, 423570, г. Нижнекамск, нижнекамский район, 

<

...>,

о взыскании 941 104 руб. 31 коп.

при участии

от истца: ФИО2 –доверенность №211-Д-211 от 01.01.2023 (сроком действия по 31.12.2023), 

установил

акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод» (далее истец, АО  «Чебоксарский электроаппаратный завод») обратилось в арбитражный суд с  иском к обществу с ограниченной ответственностью «Нижнекамская электромонтажная организация» (далее ответчик, ООО  «Нижнекамская электромонтажная организация») о взыскании 486 951 руб. 39 коп. сумму неотработанного аванса по договорам  №ДР-873/20 от 25.08.2020 и №ДР-302/21 от 18.06.2021, а также неосновательного обогащения за счет   стоимости давальческого сырья, переданного ответчику  по договорам  №ДР-873/20 от 25.08.2020 и №ДР-302/21 от 18.06.2021 в сумме  454 152 руб. 92 коп.. Доводы мотивированы положениями  статей   309, 310,  1102,  740, 713,  1105, 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель истца    требования поддержал в полном объеме по основаниям,  изложенным в исковом заявлении. Пояснил, что предложенные ответчиком  условия мирового соглашения истца не устраивают, в связи с чем   настаивал на рассмотрении спора по существу.

Ответчик представителя в заседание суда не направил, письменный мотивированный отзыв не представил. В заседании суда 30.06.2023 размер задолженности не оспаривал, просил отложить рассмотрение дела в целях принятия мер по урегулированию спора. В связи с чем, заседание было отложено на 14.08.2023. В данное заседание отзыв, какие-либо пояснения, ходатайства, дополнения ответчиком не представлены.

Согласно части 6 статья 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получении информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе. Первым судебным актом для лица, участвующего в деле, является определение о принятии искового заявления (заявления) к производству и возбуждении производства по делу.

Кроме того, суд в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации   размещал информацию о совершении процессуальных действий по делу на сайте Арбитражного суда Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.chuvashia.arbitr.ru, и на сайте   www.arbitr.ru в разделе «Картотека арбитражных дел».

Дело в соответствии со статьями 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц.

 Изучив материалы дела, выслушав пояснения представителя истца, суд установил следующее.

Между истцом (генподрядчик) и ответчиком  (субподрядчик) заключен договор от 25.08.2020 №ДР-873/20, по условиям которого субподрядчик своим иждивением обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами работы согласно разделам проектной документации, поименованным в пункте 1.15. настоящего договора и иные неразрывно связанные с объектом работы, в том числе и в течение гарантийного срока, выполняемые в соответствии с условиями договора, включая любые работы согласно требованиям законодательства или подразумеваемые в договоре, или вытекающие из какого-либо обязательства субподрядчика, а также все возможные работы, определенно не упомянутые в договоре, но необходимые для обеспечения устойчивости, завершения объекта и (или) безопасной, надежной и эффективной эксплуатации объекта, а генподрядчик обязуется принять результат работы и оплатить обусловленную настоящим договором цену согласно пункту 4.1 раздела I настоящего договора. Требования генподрядчика к работам, выполняемым субподрядчиком в рамках настоящего договора, оговорены в настоящем договоре и приложениях к настоящему договору, являющихся его неотъемлемой частью. Объём работ субподрядчика соответствует рабочему проекту объект строительства «124/84, Распределительно-трансформаторная подстанция», передаваемому субподрядчику по мере выхода рабочей документации по акту приема-передачи и графиками, процедурам, чертежам, правилам и любым документам, являющимся приложением к договору (пункты 2.1., 2.2., 2.3. договора от 25.08.2020).

В пункте 3.1. договора  от 25.08.2020 сторонами согласовано, что виды работ и сроки выполнения по видам работ устанавливаются в «Графике выполнения Работ» (Приложение №12), при этом дата завершения всех работ по договору  30.09.2020.

Цена договора прописана в разделе 4 договора.

Цена настоящего договора является ориентировочной и составляет 2 873 998 руб. 01 коп., включая НДС (20%) в сумме 478 999 руб. 67 коп. (пункт 4.1. договора от 25.08.2020).

В течение 5 (пяти) календарных дней с момента письменного обращения подрядчика, заказчик перечисляет на расчётный счёт подрядчика авансовый платеж в размере 10 (десять) % от общей цены выполнения работ, указанных в пункте  4.1. настоящего договора. Субподрядчик обязуется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения первого письменного требования заказчика вернуть авансовый платеж в следующих случаях: а)   в случае, если субподрядчик по своей вине не приступает к выполнению работ в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора; б)            в случае задержки субподрядчиком по своей вине сроков выполнения работ на 60 (шестьдесят) календарных дней относительно сроков, указанных в графике выполнения работ (приложение №12) (пункт 4.2. договора от 25.08.2020).

Генподрядчик оплачивает принятые работы за вычетом генподрядных услуг в размере 7 % от стоимости принятых работ на основании подписанных форм № КС-2, № КС-3 (пункт 4.9.2. договора от 25.08.2020).

В целях выполнения подрядных работ по настоящему договору генподрядчик при необходимости передает субподрядчику, а последний принимает давальческое сырье (материалы, комплектующие), а также оборудование для монтажа по накладной на отпуск материалов на сторону формы М-15 с пометкой «Передается на давальческих условиях». Давальческое сырье является собственностью генподрядчика и в стоимость работ субподрядчика не включаются. По мере фактического использования материалов субподрядчик представляет генподрядчику «Акт (отчет) о расходе давальческого сырья, материалов, комплектующих» и документы, подтверждающие монтаж оборудования субподрядчика (пункт 4.9.3. договора от 25.08.2020).

В пункте 17.1 договора от 25.08.2020  прописано действие договора – с момента подписания и до 30.09.2020.

Во исполнение обязательств по договору от 25.08.2020 истец перечислил ответчику 2 965 000 руб. платежными поручениями от 28.12.2020 №30430, от 09.02.2021 №2416,  от 09.03.2021 №4389, от 06.04.2021 №6471, от 20.04.2021 №7805.

Ответчик, в свою очередь выполнил работы на общую сумму 2 440 324 руб. 80 коп. согласно справке по форме КС-3 от 30.12.2022.

Согласно пункту 4.9.2. договора от  25.08.2020 сторонами произведен  зачет услуг генерального подряда на сумму 170 822 руб. 74 коп..

По данным истца, ответчиком  по договору от 25.08.2020 не отработан аванс на сумму 695 497 руб. 94 коп..

Между истцом (генподрядчик) и ответчиком  (субподрядчик) заключен договор от 18.05.2021 №ДР-302/21, по условиям которого субподрядчик своим иждивением обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами работы согласно разделам проектной документации, поименованным в пункте  1.15. настоящего договора и иные неразрывно связанные с объектом работы, в том числе и в течение гарантийного срока, выполняемые в соответствии с условиями договора, включая любые работы согласно требованиям законодательства или подразумеваемые в договоре, или вытекающие из какого-либо обязательства субподрядчика, а также все возможные работы, определенно не упомянутые в Договоре, но необходимые для обеспечения устойчивости, завершения объекта и (или) безопасной, надежной и эффективной эксплуатации объекта, а генподрядчик обязуется принять результат работы и оплатить обусловленную настоящим договором цену согласно пункту 4.1 раздела I настоящего договора. Требования генподрядчика к работам, выполняемым субподрядчиком в рамках настоящего договора, оговорены в настоящем договоре и приложениях к настоящему договору, являющихся его неотъемлемой частью. Объём работ субподрядчика соответствует рабочему проекту объект строительства «Распределительно-трансформаторная подстанция 124/63 ,УЗК-2, тит.1015, секция 5102, этап 2.13», передаваемому субподрядчику, по мере выхода рабочей документации, по акту приема-передачи и графиками, процедурам, чертежам, правилам и любым документам, являющимся приложением к договору (пункты 2.1., 2.2., 2.3. договора от 18.05.2021).

Виды работ и сроки выполнения по видам работ устанавливаются в «Графике выполнения работ» (приложение №12), при этом дата завершения всех работ по договору - 20.07.2021 (пункт 3.1. договора от 18.05.2021.

Цена настоящего договора от 18.05.2021 является ориентировочной предельной и составляет 9 000 000 руб., включая НДС (20%) в сумме 1 500 000 руб. (пункт 4.1. договора от 18.05.2021).

В течение 5 (пяти) календарных дней с момента письменного обращения подрядчика, заказчик перечисляет на расчётный счёт подрядчика авансовый платеж в размере 10 (десять) % от общей цены выполнения работ, указанных в п. 4.1. настоящего договора. субподрядчик обязуется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения первого письменного требования заказчика вернуть авансовый платеж в следующих случаях: а) в случае, если субподрядчик по своей вине не приступает к выполнению работ в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения Договора; б)            в случае задержки субподрядчиком по своей вине сроков выполнения работ на 60 (шестьдесят) календарных дней относительно сроков, указанных в графике выполнения работ (приложение №12) (пункт 4.2. договора от 18.05.2021).

Генподрядчик оплачивает принятые работы за вычетом генподрядных услуг в размере 5% (пять) от стоимости принятых работ на основании подписанных форм № КС-2, № КС-3 (пункт 4.9.2. договора от 18.05.2021).

В целях выполнения подрядных работ по настоящему договору генподрядчик при необходимости передает субподрядчику, а последний принимает давальческое сырье (материалы, комплектующие), а также оборудование для монтажа по накладной на отпуск материалов на сторону формы М-15 с пометкой «Передается на давальческих условиях». Давальческое сырье является собственностью генподрядчика и в стоимость работ субподрядчика не включаются. По мере фактического использования материалов субподрядчик представляет генподрядчику «Акт (отчет) о расходе давальческого сырья, материалов, комплектующих» и документы, подтверждающие монтаж оборудования субподрядчика (пункт 4.9.3. договора от 18.05.2021).

В пункте 17.1 договора от 18.05.221  прописано действие договора – с момента подписания и до 20.07.2021.

Во исполнение обязательств по договору от 18.05.2021 истец перечислил ответчику 2 630 000 руб. платежными поручениями от 25.08.2020 №18627, от 24.11.2020 №25567, от 01.06.2021 №10373, от 27.07.2021 №14996, от 10.08.2021 №16019, от 14.09.2021 №18455.

Ответчик, в свою очередь выполнил работы на общую сумму 2 987 943 руб. 74  коп. согласно справкам по форме КС-3 от 30.11.2021, от 31.01.2022, от 15.12.2022.

Согласно пункту 4.9.2. договора от  18.05.2021 сторонами произведен  зачет услуг генерального подряда на сумму 149 397 руб. 19 коп..

По данным истца, его задолженность перед ответчиком по договору от 18.05.2021 составляет 208 546 руб. 55 коп..

Кроме того, во исполнение пунктов 4.9.3 договоров от 25.08.2020 и от 18.05.2021 истец передал ответчику давальческое сырье по накладным №492, 507 – по договору от 25.08.2020 (на сумму 11 493 руб. 72 коп.) и по накладным №№115, 153, 391, 277, 280, 385 – по договору от 18.05.2021 (на сумму 442 659 руб. 20 коп.). Отчеты об использовании указанных  материалов, полученных от истца как давальческое сырье, ответчиком не представлены.

Таким образом, ссылаясь на наличие на стороне ответчика переплаты по договорам от 25.08.2020 и от 18.05.2021  на общую сумму 486 951 руб. 39 коп. и неосновательного обогащения  за счет сырья на сумму 454 152 руб. 92 коп., истец обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно пункту 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса (пункт 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала (пункт 1 статьи 713 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 714 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса (пункт 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Объем, стоимость выполненных работ, сумма перечисленного аванса, размер услуг генерального подряда, сведения об использовании переданного сырья в полном объеме, а также наличие задолженности в заявленном истцом размере ответчиком в ходе рассмотрения дела не оспаривались. Иное из материалов дела не следует.

На основании вышеизложенного, с ответчика подлежат взысканию в пользу истца 941 104 руб. 31 коп. долга, как законные, обоснованные материалами дела и ответчиком по существу не оспоренные.

Расходы по уплате государственной пошлины суд относит на ответчика по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с   общества с ограниченной ответственностью «Нижнекамская электромонтажная организация» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу акционерного общества «Чебоксарский электроаппаратный завод» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), сумму долга   941 104 (Девятьсот сорок одна тысяча сто четыре)  руб. 31 коп., а также 21 822 (Двадцать одна тысяча восемьсот двадцать два) руб. в возмещение понесенных истцом расходов по  оплате государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

 

Судья

О.В. Манеева