14/2020-64200(1) 

Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 http://www.amuras.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

резолютивная часть

Дело № А04-6981/2020

г. Благовещенск

26 ноября 2020 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Сутыриной М.В., при ведении протокола и аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление 

акционерного общества «Строительная компания № 1» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) к муниципальному общеобразовательному автономному учреждению  гимназии № 9 города Свободного (ОГРН 

<

***> , ИНН 

<

***>) о внесении  изменений в договор,  

третьи лица: Администрация города Свободного (ИНН 

<

***>), управление  образования администрации города Свободного (ИНН 

<

***>) Министерство  образования и науки Амурской области (ИНН 

<

***>), Министерство строительства и  архитектуры Амурской области (ИНН 

<

***>), Федеральное государственное  бюджетное учреждение «ДИРЕКЦИЯ "ШКОЛА-2025"(ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>),  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

решил:

иск удовлетворить. 

Внести изменения в условия договора № 0123300007919000144 на выполнение работ  по строительству объекта: «Школа на 528 мест в г. Свободный» от 07.08.2019.  

Изложить в пункт 5.1 договора в следующей редакции: «Работы, предусмотренные  настоящим договором, выполняются Подрядчиком в следующие сроки: - начало работ: с  даты подписания договора; - окончание работ: не позднее 20.12.2021. Этапы выполнения  работ не устанавливаются. Работы по настоящему договору выполняются Подрядчиком в  соответствии с проектной документацией, Графиком выполнения строительно-монтажных  работ (Приложение № 3)».  

Изложить в Приложении № 3 «График выполнения строительно-монтажных работ»,  подлежащих выполнению по договору № 0123300007919000144 на выполнение работ по  объекту: «Школа на 528 мест в г. Свободный» от 07.08.2019 окончательный срок  выполнения работ 20 декабря 2021 года».  

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству  направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Для направления исполнительного листа на взыскание денежных средств в доход  бюджета ходатайство взыскателя не требуется.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не  подана апелляционная жалоба.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой  арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской  области.  

Судья М.В. Сутырина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 11.08.2020 7:04:28

Кому выдана Сутырина Марина Владимировна