83/2020-11271(1) 

Арбитражный суд Тамбовской области 

392020 г. Тамбов, ул. Пензенская, 67/12 http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А64-9248/2018

26 февраля 2020 года

г. Тамбов

 

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Н.Ю. Макаровой  

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи  

помощником судьи О.И. Долгополовым 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску  

Администрации Знаменского района Тамбовской области, Тамбовская область,  

Знаменский район, р.п.Знаменка к ООО «ГлавПромСтрой», г.Москва об обязании исполнить обязательства по контракту при участии в судебном заседании: от истца: ФИО1, доверенность от 10.01.2020; от ответчика: ФИО2, доверенность от 05.06.2019 № 001. от ООО «Строй НЭС-АБ»: ФИО3, доверенность от 09.01.2020 № 1; 

от Казенного предприятия Тамбовской области «Капиталстрой»: не явился,  

извещен. 

Руководствуясь статьями 102, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

СУД РЕШИЛ: 

Обязать ООО «ГлавПромСтрой» исполнить обязательство по муниципальному  контракту № 105211 от 03.09.2012г на выполнение подрядных работ по объекту:  «Реконструкция автодороги «Каспий»-Кузьминский-Алексеевка-«Воронеж-Тамбов» на  участках км 0+000-км 3+870; км 8+121 – км 20+046 к свиноводческому комплексу  «Саюкинский», Знаменского района Тамбовской области путем разборки устроенного  асфальтобетонного покрытия и основания автодороги на участках, имеющих  повреждения: ПК 1+250, ПК 1+260, ПК 1+675, ПК 9+630, ПК 10+023, ПК 10+546, ПК  10+580, ПК 10+595, ПК 10+920, ПК 11+320, ПК 11+440, ПК11+500, ПК 11+610, ПК  11+680 ПК 11+730, ПК 11+740, на участке ПК 14+110-ПК 14+31, на участке ПК 15+590 -  ПК 19+180, ПК 19+41, ПК 19+830, на участке ПК 19+900 - ПК 20+046, с последующим  устройством выравнивающих и подстилающих слоев основания и покрытия из  асфальтобетона в соответствии с требованиями проектной документации на исследуемый  объект, а также действующими нормативными требованиями в объеме – 22 766 м2 в срок  до 01 июля 2020 года.  

Взыскать с ООО «ГлавПромСтрой», 

<

...>, помещение II  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 01.09.2010) в доход  федерального бюджета госпошлину в размере 6000руб.  

26 февраля 2020 года 

Истцу по заявлению и налоговому органу выдать исполнительные листы после  вступления решения в законную силу.  

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тамбовской  области.  

Судья Макарова Н.Ю.