25_2625829  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

г. Барнаул 13.10.2023. Дело № А03-12767/2022 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Сосина Е.А., при ведении  протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по иску муниципального казенного учреждения «Управление  жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства  Администрации города Бийска», г. Бийск (ОГРН 

<

***>) к государственному  унитарному предприятию дорожного хозяйства Алтайского края «Юго-Восточное  дорожно-строительное управление», г. Бийск (ОГРН 

<

***>) об обязании  устранить недостатки в выполненных работах,  

при участии: от истца: ФИО2 - представителя по доверенности; от ответчика: ФИО3 - представителя по доверенности, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса РФ, арбитражный суд  

решил:

обязать государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского  края «Юго-Восточное дорожно-строительное управление» в течение 30 дней со дня  вступления настоящего решения в законную силу устранить недостатки в работах,  выполненных по муниципальному контракту № Ф.2018.335769 от 16.07.2018, выполнив:  

1. Для устранения дефектов в работах по ремонту дороги от ул. Ильи Мухачева от  пер. Мопровский до пр-та ФИО4 в г. Бийске:  

- Выравнивание поверхности асфальтобетонного покрытия с устройством уклонов  обеспечивающих отвод воды с проезжей части (фрезеровка, нанесение выравнивающего  слоя асфальтобетона, в случае повреждения бортового камня осуществление его замены с  заполнением швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором) согласно  требований муниципального контракта и нормативной документации - 76,2 м2;  

- Ремонт (санация) трещин асфальтобетонного покрытия с расшивкой - 633,5 м;  - Ремонт сопряжения асфальтобетонного покрытия с расшивкой шва - 101,4 м;  

- Замена бортового камня с заполнением швов между бортовыми камнями  цементно-песчаным раствором -138 шт.;  

- Заполнение швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором335 шт.;  

- Устройство тонкослойного покрытия (тонкослойные покрытия из  битумоминеральных смесей) - 2352, 5 м2.  

2. Для устранения дефектов в работах по ремонту дороги по ул. Михаила  Ломоносова от ул. Степана Разина до ул. Михаила Фрунзе в г. Бийске:  

- Демонтаж асфальтобетонного покрытия с сохранением целостности бортового  камня (в случае повреждения бортового камня осуществление его замены с заполнением  швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором) - 8972 м2.;  

- Устройство нового асфальтобетонного покрытия, с уклонами, обеспечивающими  отвод воды с покрытия, в соответствии с требованиями муниципального контракта и  нормативной документации- 8972 м2.;  

- Замена бортового камня с заполнением швов между бортовыми камнями  цементно-песчаным раствором -71 шт.;  

- Заполнение швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором1185 шт.;  

- Демонтаж люков смотровых колодцев инженерных сетей и решеток  ливнесточных колодцев - 10 шт.;  

- Монтаж люков смотровых колодцев инженерных сетей и решеток ливнесточных  колодцев с учетом отметки верха асфальтобетонного покрытия -10 шт.  

3. Для устранения дефектов в работах по ремонту дороги по ул. Александра  Можайского от ул. Социалистическая до ул. Ленинградская в г. Бийске:  

- Демонтаж асфальтобетонного покрытия с сохранением целостности бортового  камня (в случае повреждения бортового камня осуществление его замены с заполнением  швов между бортовыми камнями цементно-песчаным раствором) - 1829 м2.;  

- Устройство нового асфальтобетонного покрытия, с уклонами, обеспечивающими  отвод воды с покрытия, в соответствии с требованиями муниципального контракта и  нормативной документации - 1829 м2;  

- Демонтаж люков смотровых колодцев инженерных сетей с учетом отметки верха  асфальтобетонного покрытия - 4 шт.;  

- Монтаж люков смотровых колодцев инженерных сетей отметки верха  асфальтобетонного покрытия - 4 шт.  

Взыскать с государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства  Алтайского края «Юго-Восточное дорожно-строительное управление» в пользу  муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства,  благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска» 298 000 руб.  судебных издержек по экспертизе.  

Взыскать с государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства  Алтайского края «Юго-Восточное дорожно-строительное управление» в доход  федерального бюджета РФ 6 000 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия  решения, либо в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со  дня вступления решения в законную силу, если такое решение было предметом  рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья Е.А. Сосин