13_3563476  

 

Арбитражный суд Мурманской области  ул. Академика Книповича,20, г.Мурманск,183038, http://murmansk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

дело № А42-9216/2022

город Мурманск

2 марта 2023 года

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 174, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Мурманской области  

решил:

обязать общество с ограниченной ответственностью "Деловой центр" в срок до 1  июля 2023 года безвозмездно исполнить гарантийные обязательства по муниципальному  контракту от 16 апреля 2019 года № 15п-2019 и выполнить работы по устранению  дефектов асфальтового покрытия, в результате которых образовывается застой воды на  парковке, расположенной у дома № 3 по улице Строителей в городе Полярные Зори  Мурманской области, а именно:  

работы по снятию деформированного асфальтобетонного покрытия самоходными  холодными фрезами с шириной фрезерования 500-100 мм и толщиной слоя до 50 мм в  объеме 8 м2;  

работы по розливу вяжущих материалов в объеме 0,18 т;  

работы по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с  применением укладчиков асфальтобетона в объеме 0,184т;  

работы по розливу вяжущих материалов в объеме 0,11т;  

работы по устройству покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных  смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 в  объеме 368 м2;  

работы по розливу вяжущих материалов в местах стыков в объеме 0,0006. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Деловой центр" в пользу  муниципального казенного учреждения "Управление городским хозяйством" 6 000 рублей  судебных расходов.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца со дня  принятия.  

Судья Лесной И.А.