АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail:  

tomsk.info@arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

М О Т И В И Р О В А Н Н О Е 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А67- 574/2023

г. Томск

13 апреля 2023 года

24 марта 2023 года объявлена резолютивная часть 

Арбитражный суд Томской области в составе судьи Д.А. Соколова,  

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению областного  государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Томской области» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Капитель» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

о взыскании 266 185,18 руб., включая 261 185,18 руб. неустойки начисленной на основании пункта 6.3.1 Контракта № 6-р20 от 14.09.2020 на выполнение работ инженерным  изысканиям и разработке рабочей документации, содержащей рабочую документацию по  объекту: Капитальный ремонт мостового перехода через р. Шегарка на км 135+300 автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево в Кривошеинском районе Томской области  за период с 16.04.2021 по 21.09.2022, 5000 руб. штрафа, начисленного на основании пункта 6.3.2. контракта.  

УСТАНОВИЛ:

Областное государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Томской области» обратилось в Арбитражный суд Томской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Капитель» о взыскании 266 185,18 руб., включая  261 185,18 руб. неустойки начисленной на основании пункта 6.3.1 Контракта № 6-р20 от  14.09.2020 на выполнение работ инженерным изысканиям и разработке рабочей документации, содержащей рабочую документацию по объекту: Капитальный ремонт мостового  перехода через р. Шегарка на км 135+300 автомобильной дороги Томск-Каргала- Колпашево в Кривошеинском районе Томской области за период с 16.04.2021 по  21.09.2022, 5000 руб. штрафа, начисленного на основании пункта 6.3.2. контракта.  

В обоснование заявленных требований истец сослался на положения статей 309,  329, 330, 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, указав, что подрядчик не выполнил работы, предусмотренные контрактом, в согласованном объеме и в установленные  сроки. В связи с просрочкой выполнения работ и фактом невыполнения работ в целом  истцом, на основании пунктов 6.3.1, 6.3.2 контракта начислены пеня и штраф, установленные условиями контракта.  

 Определением арбитражного суда от 06.02.2023 исковое заявление принято, возбуждено производство по делу № А67-574/2023 с рассмотрением в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

 Определение о принятии искового заявления, направленное ответчику по адресу,  указанному в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, а так же  почтовому адресу, указанному в контракте № 6-р20 от 14.09.2020 возвращено органом  почтовой связи с отметкой «Истек срок хранения».  

 Ответчик, действуя разумно и осмотрительно, не может не осознавать, что в определенных случаях в отношении него может быть начата процедура судебного разбирательства. Указывая при регистрации в качестве юридического лица юридический адрес, ответчик должен понимать, что именно по этому адресу будет направляться судебная корреспонденция. Учитывая это, для реализации своих прав ответчик должен был принять необходимые и достаточные меры для получения предназначенной ему корреспонденции по  указанному адресу. В противном случае все риски, связанные с неполучением или несвоевременным получением корреспонденции, возлагаются на ее получателя. Действия ответчика, не принявшего должных мер по получению корреспонденции по адресу указанному  в качестве юридического адреса и ссылающегося впоследствии на собственную неосмотрительность в доказательство нарушения его права, не могут быть признаны отвечающими принципу добросовестности.  

Ответчик отзыв на заявление не представил, исковые требования не оспорил. 

 Исходя из положений части 5 статьи 228 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, согласно которым дело рассматривается в порядке упрощенного  производства без вызова сторон, судебное разбирательство по правилам главы 19 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не проводится. В связи с этим  арбитражный суд не извещает лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия.  

 В связи с истечением сроков, установленных судом для представления доказательств  и иных документов, дело рассмотрено судом по имеющимся доказательствам согласно  части 5 статьи 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации без  вызова сторон.  

 24.03.2023 в соответствии с частью 1 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вынесена резолютивная часть решения, которая размещена  на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».  

06.04.2023 общество с ограниченной ответственностью «Капитель» подана апелляционная желоба. Согласно части 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации по заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи  апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства,  арбитражный суд составляет мотивированное решение.  

 Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства по правилам  статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к  следующим выводам по существу заявленных требований.  

14.09.2020 ОГКУ «Томскавтодор» (заказчик) и ООО «Капитель» (подрядчик) заключен государственный контракт № 6-р20, в соответствии с условиями которого подрядчик обязуется выполнить работы по инженерным изысканиям и разработке рабочей документации, содержащей рабочую документацию по объекту: Капитальный ремонт мостового перехода через р. Шегарка на км 135+300 автомобильной дороги Томск-Каргала- Колпашево в Кривошеинском районе Томской области (далее - работы) в соответствии с  Заданием (Приложение 1 к Контракту) и сдать результат работ заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, которые установлены Контрактом (пункт 1.1).  

Согласно пункту 2.1 контракта цена Контракта составляет 1 993 780 (Один миллион девятьсот девяносто три тысячи семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, налогом на  добавленную стоимость не облагается на основании Главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации и Уведомления о возможности применения упрощенной системы  

налогообложения от 26.12.2002, и включает в себя все расходы, связанные с выполнением  работ в соответствии с условиями Контракта, в том числе: стоимость выполнения работ и  иных расходов, связанных с выполнением Контракта; налоги, сборы, пошлины и иные  обязательные платежи; все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период  действия Контракта в связи с его исполнением..  

В пункте 4.1 контракта установлены: сроки начала работ – с даты заключения Контракта и сроки завершения работ – 15.04.2021.  

В соответствии с пунктом 4.5 Контракта выполнение работ осуществляется в соответствии с Графиком исполнения Контракта (Приложение 2 к Контракту).  

Согласно Графика исполнения контракта (Приложения 2 к Контракту), срок исполнения первого этапа - 01.11.2020, срок исполнения второго этапа - 10.01.2021, срок исполнения третьего этапа - 15.04.2021.  

Место выполнения работ: мостовой переход через р.Шегарка на км 135+300 автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево в Кривошеинском районе Томской области и по месту нахождения Подрядчика (пункт 4.2.)  

Из пункта 3.4.1 контракта следует, что подрядчик обязан выполнить все работы в  объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать результат выполненных работ заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ.  

Пунктами 5.1, 5.2 контракта предусмотрено, что заказчик осуществляет приемку  выполненных работ в течение 10 рабочих дней со дня выполнения подрядчиком работ и  предоставления заказчику акта сдачи-приемки выполненных работ. Результатом выполненной работы по Контракту является: отчет по инженерным изысканиям, рабочая документация с наличием положительного заключения экспертизы о проверке достоверности  определения сметной стоимости, подготовленные в соответствии с требованиями Задания  (Приложение 1 к Контракту). Подрядчик не позднее, чем за 3 рабочих дня должен известить заказчика о дате и времени сдачи выполненных работ.  

Как следует из пункта 6.3 контракта в случае просрочки исполнения подрядчиком  обязательств, в том числе гарантийного обязательства, предусмотренных Контрактом, а  также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет подрядчику претензию, содержащую требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства, и устанавливается  Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,  предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени (пункт 6.3.1).  

Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки  исполнения подрядчиком обязательств, в том числе гарантийного обязательства, предусмотренных Контрактом, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера  штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения  или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г.   № 1063». Размер штрафа - 5 000 руб. (пункт 6.3.2).  

Как указал истец, в нарушение вышеуказанных требований и условий Контракта по  состоянию на 07.09.2022 Подрядчик не выполнил работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом. 07.09.2022 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от  исполнения Государственного контракта № 6-р20 от 14.09.2020. 21.09.2022 Государственный контракт № 6-р20 от 14.09.2020 расторгнут.  

В связи с допущенным ответчиком нарушением сроков выполнения работ, ОГКУ  «Томскавтодор» направило в адрес подрядчика претензию № 2495 от 05.10.2022 об уплате начисленной за период с 16.04.2021 по 21.09.2022 неустойки в виде пени, а также  штрафа за неисполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. Неисполнение ответчиком требований претензии послужило основанием для обращения ОГКУ  «Томскавтодор» в арбитражный суд с рассматриваемым иском.  

Отношения сторон, возникшие в связи с заключением Контракта, регламентируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), условиями заключенного Контракта, а также общими нормами гражданского законодательства об обязательствах.  

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных  работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить  строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов  производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик  обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2  статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик  обязуется принять результат работы и оплатить его.  

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если  иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров (пункт 2  статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации сроки выполнения работ являются существенным условием договора подряда.  

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской  Федерации, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.  

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и  требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его  условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.  

Доказательств выполнения обществом с ограниченной ответственностью «Капитель» согласованных видов и объемов работ, а также предъявления результата выполненных работ к приемке заказчику в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации ответчиком не представлено.  

В силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества  

должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами,  предусмотренным законом или договором.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.  

Истцом на основании пункта 6.3.1 государственного контракта начислена неустойка в виде пени в размере 261 185,18 руб. за период с 16.04.2021 по 21.09.2022 (по дату расторжения контракта).  

Поскольку ответчиком допущена просрочка исполнения обязательства по выполнению в согласованный сторонами срок работ областное государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Томской области» правомерно предъявило  ответчику требование об уплате неустойки.  

Кроме того, истцом предъявлен к взысканию штраф в размере 5 000 руб. за неисполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. Указанное требование соответствует условиям контракта. Обстоятельства, являющиеся основанием для  начисления штрафа, ответчиком не опровергнуты.  

Учитывая факт неисполнения подрядчиком обязательства, суд приходит к вывод о  том, что заказчик правомерно привлек подрядчика к ответственности в виде штрафа в  размере 5 000 руб.  

Принимая во внимание, что доказательства уплаты ООО «Капитель» в добровольном порядке пени и штрафа суду не представлены, требования истца о взыскании пени и  штрафа подлежат удовлетворению в общей сумме 266 185,15 руб.  

Государственная пошлина по правилам части 3 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относится на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований и подлежит взысканию в доход федерального  бюджета  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 228, 229 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Капитель» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу областного государственного казенного  учреждения «Управление автомобильных дорог Томской области» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) 261 185,18 руб., неустойки, 5000 руб. штрафа, всего взыскать  266 185,15 руб.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Капитель» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 8 324 руб. государственной пошлины.  

 Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со  дня его принятия, путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Томской  области.  

Решение (резолютивная часть), выполненное в форме электронного документа,  направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном  порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

 Судья Д.А. Соколов  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 18.01.2023 4:43:00

Кому выдана Соколов Дмитрий Александрович