РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-130569/23-80-1029

г. Москва

08 февраля 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 11 декабря 2023 года

Полный текст решения изготовлен 08 февраля 2024 года

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Председательствующего судьи Пронина А.П.,

при ведении протокола помощником судьи Остроушко В.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

истец АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПТС" (123376, РОССИЯ, Г МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, КРАСНАЯ ПРЕСНЯ УЛ, Д. 28, ПОМЕЩ. IV, КОМ. 11, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 09.11.2021, ИНН: 

<

***>)

ответчик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-СМАРТ" (111141, 

<

...>, ЭТ 1 ПОМ I КОМ 9, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 17.11.2017, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 7 489 808 руб. 30 коп.

в заседании приняли участие:

от истца: ФИО1 по доверенности № ПТС/47 от 17.11.2023 г.; ФИО2 по доверенности № ПТС/46 от 17.11.2023 г.

от ответчика: ФИО3 по доверенности № 3 от 12.05.2022 г. 

 

УСТАНОВИЛ:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПТС" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-СМАРТ" о взыскании неосновательного обогащения в размере 7 045 540 руб. 51 коп., неустойки в размере 444 267 руб. 79 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму неосновательного обогащения, исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, начиная с 05.05.2023 г. по день фактической уплаты неосновательного обогащения.

Истец поддержал заявленные исковые требования в полном объеме.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований, по доводам, изложенным в отзыве на иск.

Суд, рассмотрев исковые требования, выслушав доводы сторон, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 12 октября 2022 г. между АО «ПТС» (подрядчик) и ООО «СК Смарт» (субподрядчик) заключен договор на выполнение работ № ПТС/22/165/Рос (ИГК № 00000000727736223283) на объекте «Детский сад № 64», расположенном по адресу: ДНР, 

<

...>.

Цена работ по договору составила 8 885 355 руб. 81 коп.

Пунктом 3.2 договора установлена дата окончания выполнения работ - 30.01.2023 г.

Во исполнение своих договорных и финансовых обязательств истец перечислил ответчику авансовые платежи в размере 7 045 540 руб. 51 коп., что подтверждается платежными поручениями № 446 от 18.10.2022 г., № 717 от 22.03.2023 г., № 397 от 15.02.2023 г.

В соответствии со ст. 450.1 ГК РФ, право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В силу ч. 2 ст. 450.1 ГК РФ в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Согласно ч. 2 ст. 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В связи с неисполнением ООО «СК СМАРТ» обязательств, в соответствии со ст. 715 ГК РФ и разделом 14 договора, АО «ПТС сообщило об отказе от исполнения всех договорных и внедоговорных обязательств, возврате неотработанного аванса и штрафных санкций претензией исх. №ПТС-Исх-23-500 от 24.04.2023 г. Претензия получена ООО «СК СМАРТ» 25.04.2023 г. Следовательно, дата расторжения договора в одностороннем порядке - 05.05.2023 г. (п. 14.9 договора).

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

При расторжении договора обязательства сторон прекращаются (п. 2 ст. 453 ГК РФ).

В соответствии с п. 4 ст. 453 ГК РФ в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила своё обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60 ГК РФ), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Как разъяснено в п. 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 г. № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении», положения п. 4 ст. 453 ГК РФ не исключают возможности истребовать в качестве неосновательного обогащения, полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала. При ином подходе на стороне ответчика имела бы место необоснованная выгода. При расторжении договора сторона не лишена права истребовать ранее исполненное, если другая сторона неосновательно обогатилась.

Таким образом, требование из неосновательного обогащения при наличии между сторонами обязательственных правоотношений может возникнуть вследствие исполнения договорной обязанности при последующем отпадении правового основания для такого исполнения, в том числе и в случае объективной невозможности получить встречное предоставление по договору в полном объёме или в части.

В связи с прекращением договорных правоотношений удержание денежных средств, полученных субподрядчиком от подрядчика в качестве предварительной оплаты, следует квалифицировать, как неосновательное обогащение.

Поскольку спорный договор расторгнут, то у ответчика, в силу ст. 1102 ГК РФ, возникла обязанность вернуть неотработанный аванс в размере 7 045 540 руб. 51 коп.

Из материалов дела следует, что ответчик денежные средства в размере 7 045 540 руб. 51 коп. не возвратил.

Согласно п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счёт другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретённое или сбережённое имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 ГК РФ.

В силу п. 3 ст. 1103 ГК РФ поскольку иное не установлено данным кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ, подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

Таким образом, в отсутствие доказательств со стороны ответчика о выполнении работ на спорную сумму, у ответчика не имеется правовых оснований для ее удержания.

В соответствии со ст. 1107 ГК РФ на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ истец вправе начислить проценты за пользование чужими денежными средствами, поэтому требование истца о взыскании процентов, начисленных на сумму неосновательного обогащения, исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, начиная с 05.05.2023 г. по день фактической уплаты неосновательного обогащения, обоснованно и подлежит удовлетворению.

В соответствии со статьей 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 8.2 договора установлено, что за нарушение сроков выполнения своих обязательств, в частности, за окончание выполнения работ по договору после установленных договором сроков субподрядчик обязан уплатить подрядчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости невыполненных в срок на объекте работ за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) процентов стоимости невыполненных в срок работ на объекте.

Согласно расчету истца, проверенному судом и не оспоренному ответчиком, сумма неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору составила 444 267 руб. 79 коп.

Субподрядчик обязан извещать подрядчика письменно, за 12 (двенадцать) часов до начала приемки, о готовности скрытых работ. Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки подрядчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения подрядчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию подрядчика субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию подрядчика, а затем восстановить ее за свой счет (п. 4.1.23 договора).

Подрядчик с участием субподрядчика получает по каждому объекту положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза» о проверке достоверности сметной стоимости работ по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством в течение всего срока выполнения работ, но не позднее подписания сторонами итогового акта о приемке выполненных работ и передает в течение 2 (Двух) календарных дней с даты получения копию субподрядчику (п. 6.12 договора).

В случае если по результатам государственной экспертизы, предусмотренной п. 6.12 настоящего договора, цена работ уменьшается, субподрядчик, в течение 30 (тридцати) календарных дней, обязан вернуть разницу между оплаченной подрядчиком суммой и суммой, указанной в заключении ФАУ Главгосэкспертиза России о достоверности сметной стоимости работ (п. 6.13 договора).

Не позднее чем за 12 (двенадцать) часов до начала приемки работ субподрядчик письменно уведомляет подрядчика о проведении освидетельствования работ (п. 7.9 договора).

Никакие работы, подлежащие закрытию (скрытые работы), не должны закрываться в отсутствии подрядчика или представителя подрядчика (п. 7.10 договора).

Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки подрядчиком скрытых работ. Если работы были закрыты в отсутствие подрядчика в связи с его не уведомлением, то субподрядчик за свой счет должен открыть любую часть скрытых работ по указанию подрядчика, а затем восстановить за свой счет без продления сроков по договору (п. 7.11 договора).

Сдача-приёмка выполненных работ производится по объекту на основании акта о приемке выполненных работ по форме приложения 1, подтверждающего их выполнение, составленного после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ на основании локальных сметных расчетов (приложения 5 договору), исполнительной документации на выполненные объемы работ согласно перечню по приложению 12, с участием представителей подрядчика и субподрядчика (п. 7.12 договора).

Сдача-приемка выполненных работ осуществляется представлением первичной учетной документации, акта о приемке выполненных работ по форме приложения 1, исполнительной документации на выполненные объемы работ, а также счета-фактуры установленного образца (при необходимости), комплекта подписанной исполнительной документации (согласно приложению 12) в 5 экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном виде, отчета об использовании давальческого материала (согласно приложению 11) (п. 7.14 договора).

Таким образом, ответчиком фактически работы не выполнялись, акты КС-2 и КС-3, а также исполнительная документация в материалы дела не предоставлена.

Доводы отзыва ответчика признаны судом необоснованными и не состоятельными и отклонены ввиду противоречия фактическим обстоятельствам дела, представленным в дело доказательствам.

В соответствии со статьями 102 и 110 АПК РФ госпошлина по иску относится на ответчика. 

С учетом изложенного, на основании ст. ст. 307, 309, 310, 330, 395, 450.1, 453, 715, 1102, 1103, 1107, 1109 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд 

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-СМАРТ" в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПТС" неосновательное обогащение в размере 7 045 540 (Семь миллионов сорок пять тысяч пятьсот сорок) руб. 51 коп., неустойку в размере 444 267 (Четыреста сорок четыре тысячи двести шестьдесят семь) руб. 79 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму неосновательного обогащения, исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, начиная с 05.05.2023 г. по день фактической уплаты неосновательного обогащения, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 60 449 (Шестьдесят тысяч четыреста сорок девять) руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

 

Судья                                                                                                                   Пронин А.П.