Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения

30 марта 2020 года              Дело № А56-3804/2020

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Евдошенко А.П.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

истец: Открытое акционерное общество  энергетики и электрификации "Ленэнерго" (адрес:  Россия 188800, г Выборг, Ленинградская обл.,, ул Северный вал 5, ОГРН:  1027809170300)

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Управление механизации лесного хозяйства" (адрес:  Россия 188300, г ГАТЧИНА, ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл ГАТЧИНСКИЙ р-н, ул 7 АРМИИ 15/36, ОГРН:  1117847571401)

о взыскании 451 644 руб. 35 коп. неустойки, в том числе 162 534 руб. 58 коп. пени за нарушение сроков выполнения работ из расчета ставки 0,1% от стоимости невыполненного этапа работ за период с 01.08.2019 по 26.09.2019 и 28 148 руб. штрафа за превышение срока выполнения работ свыше 30 дней н основании пунктов 8.1.1 и 8.1.2 договора от 30.04.2019 №19-6071, 3 961 руб. 77 коп. пени за нарушение сроков выполнения работ из расчета 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости невыполненных работ за период с 01.09.2019 по 26.09.2019 на основании пункта 8.1 договора от 25.07.2018 №18-6671.

Суд отклонил ходатайство ответчика о переходе из упрощенной процедуры к рассмотрению дела по общим правилам искового производства ввиду отсутствия оснований для признания его обоснованным, влекущим необходимость рассмотрения настоящего дела по общим правилам искового производства. Доводы ответчика, положенные в обоснование заявленного ходатайства, судом не принимаются, поскольку обстоятельства, предусмотренные частью 5 статьи 227 АПК РФ, не установлены.

Установив имеющие значение для дела обстоятельства, оценив доводы сторон в обоснование заявленных требований и возражений, исследовав представленные доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд признает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пункта 1 статьи 708 ГК РФ, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного срока выполнения работы, так и промежуточных сроков выполнения работ.

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой. В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с условиями договоров ответчик свои обязательства по соблюдению сроков выполнения работ не исполнил надлежащим образом. Доказательств выполнения работ и сдачи их заказчику для приемки в установленном порядке и сроки суду не представил.

Довод о наличии обстоятельств, препятствующих своевременному исполнению обязательств в связи с отсутствием исходных данных (картографических материалов), необходимых для производства и завершения работ в установленный срок, судом не принимаются в качестве основания для исключения (уменьшения) заявленной неустойки.

В нарушение требований закона (статьи 716, 719 ГК РФ) ответчик немедленно не предупредил истца о невозможности завершения работ на стадии разумных сроков исполнения договора, в целях избежания наступления неблагоприятных последствий не приостановил производство работ.

Ссылки на наличие обстоятельств, препятствующих завершению работ по смыслу статей 401, 405, 716 ГК РФ не освобождает подрядчика от ответственности за просрочку исполнения обязательств.

Ответчиком не доказана невозможность своевременного выполнения работ по причинам, зависящим от заказчика или вследствие причин, находящихся вне его профессионального контроля и риска предпринимательской деятельности. 

Объективных доказательств, свидетельствующих о принятии ответчиком, осуществляющим профессиональную деятельность, всех зависящих от него разумных мер к исполнению обязательства в срок, в материалах дела не имеется. Доказательств отсутствия своей вины в нарушении принятого по договору обязательства ответчик не представил (пункт 2, пункт 3 статьи 401 ГК РФ).

При таких обстоятельствах, основания для освобождения ответчика от ответственности за несвоевременное выполнение работ отсутствуют.

При заключении договора ответчик должен был предвидеть наступление установленных договором неблагоприятных последствий в случае нарушения сроков выполнения работ.

Согласно расчету исковых требований истец начисляет неустойку за нарушение срока выполнения работ на стоимость неисполненного обязательства, что соответствует принципу юридического равенства, предусмотренному пунктом 1 статьи 1 ГК РФ, отвечает  компенсационной природе неустойки в соответствии с требованиями статьи 330 ГК РФ.

Учитывая отсутствие доказательств со стороны подрядчика явной несоразмерности допущенного нарушения и его последствий, оснований для применения положений статьи 333 ГК РФ, суд не усматривает. В результате нарушений, допущенных подрядчиком, у истца отсутствовало надлежащее встречное предоставление в виде результата работ, представляющего потребительскую ценность для заказчика, заявленная нестойка является соразмерной компенсацией  негативных последствий этого обстоятельства.

Руководствуясь статьями 12, 309, 310, 329, 330, 401, 702 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

решил:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Управление механизации лесного хозяйства» в пользу Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» 451 644 руб. 35 коп. неустойки, а также 12 033 руб. расходов по оплате госпошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

Судья                         Евдошенко А.П.