АРБИТРАЖНЫЙ СУД УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Железнодорожная, д. 14, г. Ульяновск, 432970 

Тел. (8422) 33-46-08 Факс (8422) 32-54-54 E-mail: info@ulyanovsk.arbitr.ru www.ulyanovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

арбитражного суда первой инстанции (резолютивная часть) 

г. Ульяновск Дело № А72-11165/2022  «25» сентября 2023 года  

Арбитражный суд в составе председательствующего Слепенковой О.А., 

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176-177, 180-182 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации  

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Стройцентр» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение месяца после вступления решения суда в  законную силу устранить недостатки выполненных работ в рамках гарантийных  обязательств, а именно:  

по адресу: ул. Локомотивная, 68 устранить путем пролива битумом трещины в  асфальтобетонном покрытии на тротуарах и проезжей части;  

по адресу: ул.Балтийская, 24 устранить трещины на отдельных участках  асфальтобетонного покрытия (проезд, тротуары), а также в местах сопряжения  асфальтобетонного покрытия тротуара с существующим асфальтобетонным покрытием;  

по адресу: ул. Нариманова, 53 заметить 4 (четыре) бортовых камня, на которых  имеются повреждения (сколы и трещины); заделать швы между бортовыми камнями;  восстановить асфальтобетонное покрытие местного проезда вдоль металлических гаражей  к мусорной площадке на площади 3 м2; выполнить работы по восстановлению газона,  после устройства пешеходной дорожки, не выполнены на площади -10 м2.;  

по адресу: пер. Брюханова, 1, 2 - на проезжей части, тротуарах устранить путем  проливки битумом продольные и поперечные трещины в объёме 150 п.м.; устранить  путем ямочного ремонта на проезжей части в местах примыкания асфальтобетонного  покрытия с борткамнем провалы 11 кв.м.;  

по адресу: ул. Ульяны ФИО1, 1 - произвести работы по восстановлению газона,  после устройства пешеходной дорожки не выполнены на площади - 10 м2., устранить  путем засыпки чернозема и посадки газона;  

по адресу: ул. Орджоникидзе, 53 - на проезжей части, тротуарах устранить путем  проливки битумом продольные и поперечные трещины в объеме 20 м.п.; устранить путем  проливки битумом отслоение асфальта около 2 подъезда 3 кв.м.  

по адресу: ул. Кузоватовская, 40 выполнить проливку трещин битумом, устранить  провалы и выбоины в покрытии.  

по адресу: пр-т Хо Ши Мина, 21, 23 -на тротуаре детской площадки устранить  провалы вдоль борткамня в размере 0,1 м2 в количестве 2шт. и трещины длиной 3,5 м.п.  

по адресу: ул. Промышленная, 26 устранить неполную проливку трещин битумом,  устранить провалы и выбоины в покрытии.  

по адресам пр. Заводской, 23, 27 устранить на отдельных участках  отремонтированного внутридворового проезда, заездных карманов, тротуаров  неоднородность и шелушение верхнего слоя асфальтобетонного покрытия; произвести  работы по установке бордюрного камня тротуара на внутридворовой территории МКД по  проезду Заводскому, 23 (установлен с отклонениями от вертикальной оси); устранить  трещины на отдельных участках отремонтированного асфальтобетонного покрытия  внутридворового проезда, парковки, заездных карманов и тротуаров; восстановить  асфальтобетонное покрытие тротуара на внутридворовой территории МКД по проезду  Заводскому, 23 после проведения работ на инженерных коммуникациях;  

по адресу: б-р Новосондецкий, 18 – устранить путем ямочного ремонта на  пешеходной дороге углубление (яму) глубиной 3-4 см. между 2 и 3 подъездом.  

по адресу :ул. Розы Люксембург, 18 - выполнить проливку трещин битумом,  устранить провалы и выбоины в покрытии.  

по адресу: ул. Марата, 6 - выполнить проливку трещин битумом, устранить  провалы и выбоины в покрытии.  

по адресу: ул. Железнодорожная, 5 - восстановить асфальтобетонное покрытие на  отдельных участках отремонтированного внутридворового проезда, заездных карманов  (неоднородность и шелушение верхнего слоя асфальтобетонного покрытия); устранить  трещины на отдельных участках отремонтированного асфальтобетонного покрытия  внутридворового проезда, парковки и тротуаре; заделать швы между установленными  бортовыми камнями, установить бортовые камни повторно (отклонения от вертикальной  оси);  

по адресу: ул. Камышинская, 6, 6а - выполнить проливку трещин битумом,  устранить провалы и выбоины в покрытии.  

по адресу: пр-т Гая, 37 –устранить трещины на отдельных участках  отремонтированного внутридворового проезда, неоднородность асфальтобетонного  покрытия; заделать швы между установленными бордовыми камнями, на площадке входа  в 1-ый подъезд восстановить разрушенный поребрик;  

По адресу: пр-кт. Сурова д.5- устранить путем ямочного ремонта на проезжей  части придомовой территории участок 1 кв.м с вырезанным асфальтобетонным  покрытием.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройцентр» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину в размере  9 000 руб.  

 Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия решения путем  подачи апелляционной жалобы в арбитражный суд апелляционной инстанции.  

Судья О.А. Слепенкова