АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Красная  ул., д. 8, г. Кемерово, 650000

www.kemerovo.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А27-17503 /2020

город  Кемерово

26 января 2021  года

Резолютивная часть решения объявлена 20 января 2021   года                                                           

Полный текст решения  изготовлен 26 января 2021  года                                                             

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Логиновой А.Е., 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи  секретарем ФИО1,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная компания «Ремтеплострой», г. Барнаул, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>

к Администрации города Кемерово, г. Кемерово, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>

о взыскании 297 247,21 руб. пени, 

при участии в заседании: от истца – ФИО2, директор, выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на 04.08.2020, паспорт (до перерыва), от ответчика – ФИО3, представитель, доверенность №01-32/3034 от 29.12.2020, удостоверение №3417 от 23.12.2020, диплом,

у с т а н о в и л :

общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажная компания «Ремтеплострой» (истец) обратилось в суд с иском к Администрации города Кемерово (ответчика, Администрация) о взыскании 297 247,21 руб. пени. Исковые требования мотивированы тем, что нарушен срок выполнения обязательств по оплате выполненных работ по муниципальным контрактам №Ф.2019.213465 и №Ф.2019.216672, заключенным на основании протокола подведения итогов от 16.04.2019 электронных аукционов №0339300000119000208, №0339300000119000213.

От ответчика в материалы дела представлен отзыв, возражения мотивированы тем, что оплата произведена в установленный контрактом срок, поскольку отношения по приемке  носят длительный характер, фактически приемка работ  по контракту №Ф.2019.213465 окончена 18.11.2019, по контракту №Ф.2019.216672 окончена 25.05.2020, о чем на актах формы КС-2 имеется отметка. На основании п. 3.9 контрактов оплата по контракту осуществляется с даты подписания заказчиком документов о приемке работ.

Представитель истца настаивал на исковых требованиях.

Представитель ответчика поддержала доводы, изложенные в отзыве.

Заслушав пояснения представителей сторон, изучив и оценив обстоятельства и материалы дела, суд установил следующее.

Между Управлением жилищно-коммунального хозяйства от имени администрации города Кемерово муниципального образования города Кемерово (далее – Заказчик) и ООО СМК «Ремтеплострой» (далее – Подрядчик) были заключены муниципальный контракт № Ф.2019.213465 по благоустройству (капитальному ремонту) дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: 

<

...>, 39Б, 39В и муниципальный контракт № Ф.2019.216672 по благоустройству (капитальному ремонту) дворовой территории многоквартирного дома расположенного по адресу: 

<

...> А.

В соответствии с п. 3.9 Контрактов, оплата осуществляется Заказчиком только за фактически выполненные работы в течение 30 дней, с даты подписания Заказчиком документов о приемке работ (акта приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3).

В материалы дела представлены Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 от 15.09.2019 г.

Оплата по контракту Ф.2019.213465 произведена 6 декабря 2019г. в размере 4 945 797,51 руб. и 10 декабря 2019г. в размере 260 305,13 руб. 

По контракту № Ф.2019.216672 оплата произведена 28 мая 2020 г. в размере 255 055, 58 руб. и 29 мая 2020г. в размере 4 846 055,96 руб. 

В соответствии с п. 10.2. Контрактов, в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Размер неустойки по расчету истца по контракту Ф.2019.213465 за период с 16.10.2019 по 10.12.2019 составляет 59 922,25 руб., по контракту Ф.2019.216672 за период с 16.10.2019 по 29.05.2020 составляет 237 324,96 руб.

Истцом 03.07.2020г. ответчику была направлена претензия об уплате пени, которая была оставлена без ответа.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

Как установлено судом, фактически приемка работ заказчиком произведена по контракту №Ф.2019.213465 - 18.11.2019, по контракту №Ф.2019.216672 - 25.05.2020, о чем на актах формы КС-2 имеется соответствующая отметка с указанием даты подписания актов заказчиком.

По условиям контрактов приемка работ длится 190 рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов (п. 7.5).

По условиям контрактов, оплата осуществляется Заказчиком только за фактически выполненные работы в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке работ.

С учетом даты подписания актов по форме КС-2, справки КС-3 – 18.11.2019, срок оплаты по контракту №Ф.2019.213465 не позднее 18.12.2019. Ответчиком оплата произведена 6 декабря 2019г. в размере 4 945 797,51 руб. и 10 декабря 2019г. в размере 260 305,13 руб., что подтверждается платежными поручениями №667074 от 06.12.2019, №722421 от 10.12.2019.

Срок  оплаты по контракту Ф.2019.216672, с учетом даты подписания ответчиком актов по форме КС-2, справки КС-3 – 25.05.2020. Оплата произведена 28.05.2020 на сумму 255 055, 58 руб. (платежное поручение №798813) и 29.05.2020г. в размере 4 846 055,96 руб. (платежное поручение №837120).

При указанных обстоятельствах, исковые требования удовлетворению не подлежат, поскольку нарушения сроков исполнения обязательств по оплате выполненных работ со стороны ответчика не допущено.

Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на истца на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

р е ш и л:

Исковые требования оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд  в течение месяца со дня его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кемеровской области.

 

Судья                                                                                                       А.Е. Логинова