АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ) 

14 апреля 2025 года Дело № А74-1159/2025  

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи В.О. Кушнира рассмотрел в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Кобежикова Александра Ивановича (ИНН 190158011331, ОГРНИП 304190109200101) к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527, ОРГН 1052460054327)  

об обязании в течении одного месяца со дня вступления решения в законную силу исполнить условия договора № 20.1900.297.24 от 31.01.2024 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Россия, Республика Хакасия, кадастровый номер земельного участка 19:11:120401:124, Российская Федерация, Республика Хакасия, Ширинский район, 5 км юго-западнее с. Шира, 0,5 км западнее автодороги Шира-Туим, земельный участок 2, а именно:  

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии; 

- выполнить строительство ЛЭП-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 49-17 ПС Шира-с. Аргыстар до РУ-10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ.;  

- выполнить строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором необходимой мощности;  

- выполнить строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь установленной ТП-10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя  

об обязании после исполнения договора № 20.1900.297.24 от 31.01.2024 предоставить индивидуальному предпринимателю Кобежикову Александру Ивановичу уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации,  

о взыскании 22 235 руб. 32 коп. неустойки за период с 01.08.2024 по 18.02.2025, с ее последующим начислением, начиная с 19.02.2024, до момента фактического исполнения обязательства из расчета 0,25% от суммы 44 030 руб. 34 коп. за каждый день просрочки, учитывая, что совокупный размер неустойки не может превышать размер неустойки, определенный в таком порядке за год просрочки;  

об установлении в случае неисполнения решения суда судебного штрафа (астрента) в размере 10 000 руб. за каждый календарный день неисполнения решения суда по истечении срока, предоставленного для исполнения решения суда, по день его фактического исполнения.  

Руководствуясь статьями 101, 102, 110, 112, 167-171, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Хакасия  

Р Е Ш И Л:

1. Отказать ответчику в удовлетворении ходатайств об уменьшении неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и рассмотрении дела по общим правилам искового производства.  

2. Удовлетворить исковые требования. Данные, необходимые для идентификации:  

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу исполнить обязательства по технологическому присоединению в соответствии с условиями договора № 20.1900.297.24 от 31.01.2024, а именно:  

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии; 

- выполнить строительство ЛЭП-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 49-17 ПС Шира-с. Аргыстар до РУ-10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ.;  

- выполнить строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором необходимой мощности;  

- выполнить строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь установленной ТП-10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя.  

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) после исполнения договора № 20.1900.297.24 от 31.01.2024 предоставить индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации.  

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) 22 235 руб. 32 коп. неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по договору за период с 01.08.2024 по 18.02.2025.  

Производить начисление неустойки, начиная с 19.02.2025, до момента фактического исполнения обязательства из расчета 0,25% от суммы 44 030 руб. 34 коп. за каждый день просрочки, учитывая, что совокупный размер неустойки по договору не может превышать размер неустойки, определенный в таком порядке за год просрочки.  

В случае неисполнения настоящего решения взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) судебный штраф (астрент) в размере 3 000 руб. за каждый календарный день неисполнения решения суда по истечении одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу по день его фактического исполнения.  

3. Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) 25 000 руб. возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины, уплаченной платежным поручением № 270 от 30.01.2025.  

Решение подлежит немедленному исполнению.  

Решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в Третий  

арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его  

принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения  

в полном объеме. Жалоба подается через Арбитражный суд Республики Хакасия. 

Судья В.О. Кушнир