﻿

Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040

E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru 

http://www.kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Калининград

Дело №

А21-1308/2020

«01»

декабря

2021 года

 

Резолютивная часть решения объявлена  

«29»

ноября

2021 года

 

Решение изготовлено в полном объеме   

«01»

декабря

2021 года

 

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.

при ведении протокола судебного заседания Вердян Н.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  ООО «Юпитер» (ОГРН 1167847119615) к ООО «АВТОТОР-АРЕНА» о взыскании 46 701 815 рублей

третьи лица: ООО «Проммеханика», ООО «Юпитер» (ОГРН 1177847263835), ООО «ЕЛМЕ МЕТАЛЛ РУС» 

при участии в судебном заседании:

от истца: Романенко Т.Ф. по решению суда

от ответчика: Кириенко М.А. по доверенности

от ООО «Юпитер»: Коршунов Е.А. по доверенности

от ООО «Проммеханика»: Горбатова О.В. по доверенности

от ООО «ЕЛМЕ МЕТАЛЛ РУС»: Алекссев А.В. по доверенности    

установил.

	Общество с ограниченной ответственностью «Юпитер» (ОГРН 1167847119615) в лице конкурсного управляющего обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «АВТОТОР-АРЕНА» о взыскании основного долга по договору от 31.01.2017 года в сумме 28 459 363 рублей, неустойки в   сумме 18 242 452 рублей.  

	Определением суда от 13.02.2020 года к участию в деле в качестве третьего лица привлечены ООО «Проммеханика», ООО «Юпитер»  (ОГРН 1177847263835).

	Определением суда от 16.08.2021 года удовлетворено ходатайство ООО «ЕЛМЕ МЕТАЛЛ РУС» о вступлении в дело в качестве третьего лица.

	Судом установлено.

Между ООО «АВТОРОР-АРЕНА» и ООО «Проммеханика» был заключен агентский договор от 15.06.2015 года № 15/06-15.

По условиям договора ООО «Проммеханика» обязалось организовать деятельность по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса», а ООО «АВОТОР-АРЕНА»  обязалось возместить расходы и выплатить вознагржание. 

	Между ООО «Проммеханика» и ООО «Юпитер» (ОГРН 1167847119615)  был заключен договор от 31.01.2017 года № 03-01-2017. 

По условиям договора ООО «Юпитер» (ОГРН 1167847119615) (далее – первый подрядчик) обязалось выполнить строительно-монтажные работы по устройству нулевого цикла чаши бассейна, изготовить, поставить, смонтировать железобетонные конструкции каркаса задания на объекте: «Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: г. Калининград, ул. Тихоокеанская», а ООО «Проммеханика» (далее – первый заказчик) обязалось работы принять и оплатить.

В соответствии  с пунктом 2.1 договора стоимость работ согласована 370 913 741 рубль.

В соответствии  с пунктами 3.2, 3.3 договора оплата выполненных работ производится в течение 10 банковских дней с  даты подписания актов выполненных работ в размере 95%. Окончательный расчет в размере 5% производится после полного завершения работ.

В соответствии с пунктом 7.7 договора за просрочку оплаты платежей подрядчик имеет право предъявить требование об оплате пени в размере 0,1% от суммы платежа за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от суммы договора.

Дополнительным соглашением от 16.03.2017 года № 1 к договору стороны согласовали цену работ в сумме 377 879 281 рубль.

Дополнительным соглашением от 28.03.2017 года № 2 к договору стороны согласовали цену работ в сумме 535 125 738 рублей.

Дополнительным соглашением от 28.03.2017 года № 3 к договору стороны согласовали цену работ в сумме 662 125 738 рублей.

За период с 6.02.2017 года по 27.10.2017 года первый подрядчик сдал, а первый заказчик принял работы на общую сумму 532 664 975,8 рублей (акты в деле).     

Соглашением от 04.06.2018 года ООО «АВТОРОР-АРЕНА» и ООО «Проммеханика» расторгли агентский договор от 15.06.2015 года № 15/06-15 с 08.06.2018 года.

ООО «Проммеханика» передало ООО «АВТОТОР-АРЕНА» всю документацию по договору от 31.01.20187 года № 03-01-2017 и по другим договорам, связанным со строительством физкультурного комплекса по акту от 07.06.2018 года. 

Сведений о внесении изменений в части заказчика в договор от 31.01.2017 года № 03-01-2017 суду не представлено.

В материалы дела представлен договор от 14.06.2018 года № 14/06/18 о передаче прав и обязанностей по договору от 31.01.2017 года № 03-01-2017.

По условиям указанного договора ООО «Юпитер»  (ОГРН 1167847119615) (первый подрядчик) уступило ООО «Юпитер» (ОГРН 1177847263835) (второй подрядчик) права и обязанности по договору от 31.01.2017 года № 03-01-2017 по отношению к ООО «АВТОТОР-АРЕНА». В договоре указано, что работы первым подрядчиком выполнены на сумму 532 664 975,8 рублей,  долг заказчика по оплате работ составляет 28 459 363,49 рублей; объемы и стоимость работ, оставшихся к исполнению, определены  в приложениях; за уступаемое право второй подрядчик уплачивает первому подрядчику 1 000 000 рублей. На договоре имеется отметка о согласовании его условий с ООО «АВТОТОР-АРЕНА».

В период с 03.07.2018 года по 25.11.2018 года второй подрядчик сдал, а ООО «АВТОТОР-АРЕНА» (второй заказчик) приняло работы по договору от 31.01.2017 года № 03-01-2017  на сумму 18 083 786,43 рублей (акты в деле). 

Дополнительным соглашением от 10.12.2018 года № 7 второй заказчик и второй подрядчик расторгли договор  от 31.01.2017 года № 03-01-2017; указали, что стоимость выполненных работ по нему составляет 579 208 125,51 рублей, оплачены работы в сумме 547 192 836 рублей, остаток задолженности 32 015 288,91 рублей должен быть оплачен в срок до 20.12.2018 года.

Между вторым заказчиком и вторым подрядчиком подписан акт сверки расчетов, согласно которому с учетом начального сальдо 28 459 363,28 рублей задолженность второго заказчика по оплате работ по состоянию на 18.12.2018 года составляет 32 015 288,91 рублей.

По платежному поручению от 25.12.2018 года № 444 второй заказчик оплатил второму подрядчику за  выполненные работы 32 015 288,91 рублей.

Впоследствии  между вторым заказчиком и вторым подрядчиком был заключен новый договор подряда на завершение строительных работ по объекту.

16.11.2018 года в рамках дела № А56-135092/2018 принято к рассмотрению заявление кредитора о признании ООО «Юпитер» (ОГРН 1167847119615)  (первый подрядчик) несостоятельным (банкротом).

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.06.2019 года по делу № А56-135092/2018 ООО «Юпитер» (ОГРН 1167847119615) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

ООО «Юпитер» (ОГРН 1167847119615) в лице конкурсного управляющего заявило к ООО «АВТОТОР-АРЕНА требования о взыскании основного долга по договору от 31.01.2017 года № 03-01-2017 в сумме 28 459 363 рублей.

Представители ООО «АВТОТОР-АРЕНА» и ООО «Проммеханика» требования не признали, пояснив, что в соответствии с условиями договора  от 31.01.2017 года № 03-01-2017  пять процентов от стоимости выполненных работ подлежали оплате после завершения работ и исправления дефектов; 28 459 363 рублей составляют 5% от стоимости выполненных первым подрядчиком работ;  в связи с выбытием первого подрядчика из отношений по договору  от 31.01.2017 года № 03-01-2017, оплата  5% стоимости работ была произведена второму подрядчику после расторжения договора; заказчик добросовестно выполнил свои обязательства по оплате работ  и не должен повторно их оплачивать;  взаимоотношения по сумме 28 459 363 рублей должны быть урегулированы между подрядчиками.

Представитель ООО «ЭЛМЕ МЕТАЛЛ РУС» поддержал позицию истца.

Производство по делу приостанавливалось до рассмотрения  в деле А56-135092/2018 заявления конкурсного управляющего о признании договора от 14.06.2018 года № 14/06/2018 о передаче прав и обязанностей  недействительным, о применении последствий недействительности сделки.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.04.2021 года по делу № А56-135092/2018/ сд.1  в удовлетворении заявления отказано. В мотивировочной части определения отражены выводы, согласно которым договор от 14.06.2018 года № 14/06/2018 о передаче прав и обязанностей со стороны ООО «Юпитер» (ОГРН 1167847119615) (первый подрядчик) подписан неуполномоченным лицом, он не влечет для него никаких последствий;  его оформление было направлено на причинение вреда кредиторам ООО «Юпитер» (ОГРН 1167847119615); а ООО «АВТОТОР-АРЕНА», согласовав оспариваемый договор и уплатив причитающиеся ООО «Юпитер» (ОГРН 1167847119615) денежные средства третьему лицу, злоупотребило своими правами.

Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.04.2021 года по делу № А56-135092/2018/ сд.1 обжаловалось, в части выводов суда осталось без изменения.

Выводы, изложенные в определении Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.04.2021 года по делу № А56-135092/2018/ сд.1,  являются основанием для взыскания с ООО «АВТОТОР-АРЕНА» в пользу  ООО «Юпитер» (ОГРН 1167847119615) (первый подрядчик) 28 469 363 рублей в счет стоимости выполненных им работ по договору от 31.01.2017 года № 03-01-2017 на основании положений статей 309, 310 ГК РФ, положений договора.

Согласно расчету истца за период с 05.05.2018 года по 04.02.2020 года подлежат уплате пени в сумме 18 242 452 рублей по положениям пункта 7.7 договора.

Расчет проверен судом. 28 459 363 рублей составляют 5% от стоимости выполненных первым подрядчиком работ. По отлагательному  условию договора их оплата должна быть произведена после  завершения выполнения всех работ по договору.  10.12.2018 года договор расторгнут, срок  выполнения обязательств по оплате был согласован до 20.12.02018 года.

За период с 20.12.2018 года по 04.02.2020 года размер неустойки составляет 11 725 257 рублей (28 459 363 х 0,1% х 412).  

Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АВТОТОР-АРЕНА» (ОГРН 1033901817245) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Юпитер» (ОГРН 1167847119615)  основной долг в сумме 28 459 363 рублей, неустойку в сумме 11 725 257 рублей, в доход Федерального бюджета госпошлину в сумме 172 000 рублей.

Во взыскании остальной суммы отказать.

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «Юпитер» (ОГРН 1167847119615) в доход Федерального бюджета госпошлину в сумме 28 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в  месячный срок в арбитражный апелляционный суд.

Судья                    							О.Н.Шкутко