Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Пермь 

09.03.2021 года Дело № А50-3333/20  

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Ю.А. Лаврова, при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Паны Л.И.,  рассмотрел в судебном заседании дело по иску товарищества собственников  недвижимости "Крупской, 56" (614070, Пермский край, город Пермь, улица  Крупской, дом 56, ОГРН: 1155958039390, Дата присвоения ОГРН:  06.05.2015, ИНН: 5906127580)  

к ответчику администрации города Перми (614000 Пермский край, город  Пермь, улица Ленина, 23, ОГРН: 1025900532460, Дата присвоения ОГРН:  22.12.2002, ИНН: 5902290635)  

о возложении обязанности устранить недостатки, 

третьи лица, не заявляющее самостоятельных требований относительно  предмета спора: 1. общество с ограниченной ответственностью «Пик» (ИНН  5908030915, ОГРН 1055904138619, 614113, Пермский край, города Пермь,  ул. Адмирала Нахимова, д. 4 лит. Б); 2.Департамент ЖКХ Администрации г.  Перми (614000, г. Пермь, ул. Ленина, 34, ОГРН 1125902007043, ИНН  5902293883)  

Руководствуясь ст.ст. 110, 167, 170, 171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края  

Р Е Ш И Л:

1.Исковые требования товарищества собственников недвижимости  "Крупской, 56" (ОГРН: 1155958039390, ИНН: 5906127580) удовлетворить.  

2. Обязать администрацию города Перми (ОГРН: 1025900532460, ИНН:  5902290635) устранить недостатки капитального ремонта кровли жилого  дома № 56 по ул. Крупской г. Перми, привести кровлю в нормативное,  работоспособное состояние, выполнив в срок, не превышающий 6 месяцев с  момента вступления в силу решения суда, следующие работы:  

- Разобрать слои паро- и теплоизоляции. Полотнища уложить с  перехлестом не менее 150 мм и склеить между собой; завести  

пароизоляционный слой на вертикальные конструкции не менее чем на  толщину утеплителя и приклеить. В местах наличия разрывов - заменить  пароизоляционный слой. Все слои утеплителя выполнить из полужестких  минераловатных плит толщиной по 50 мм. Вторично использовать только  материал, не имеющий дефектов (разрывы, нарушение целостности, следы  воздействия влаги) дополнительно укладывая новый;  

-Произвести замену кобылок; 

-Выполнить полную замену обрешетки с устройством новой обрешетки  из доски толщиной 40 мм шириной 120 мм, выполнить сплошную обрешетку  в карнизной части, вокруг вентиляционных шахт, под снегозадержателем;  

-Произвести полную замену покрытия кровли (в том числе покрытия  слуховых окон). По скатам применить профилированный стальной  оцинкованный лист НС44-1000-0,7, обеспечив нахлест профиля вдоль ската -  не менее 250 мм, а поперек ската - на один гофр, обеспечив соединение  профлистов межу собой комбинированными клепками с шагом 500мм;  

-На карнизном свесе выполнить замену кровли из листовой стали с  фальцевыми соединениями с устройством настенных желобов. Работы по  кровле выполнять согласно СП 17.13330.2017 «Кровли»  

-Устранить смещение части водосточной трубы на фасаде со стороны ул.  Крупской. Заменить крепления водосточных труб с наличием коррозии;  

-Разобрать слуховые окна и устроить вновь. Заменить оконные блоки с  устройством жалюзийных решеток с остеклением, с устройством отливов для  отвода атмосферных осадков от оконного блока  

-Произвести замену непрерывного ограждения кровли согласно  требований норм на новое высотой не менее 1,2 м, оборудованного  поручнями, рассчитанного на восприятие горизонтальных нагрузок не менее  0,3 кН/м  

-Выполнить обработку деревянных конструкций (вновь устроенных)  огнебиозащитным составом в полном объеме;  

-Переустроить места сопряжения составных элементов стропильных ног в  одном сечении без уступов, зазоров, дополнительных элементов  (коротышей);  

-Выполнить замену подкосов из бревен диаметром равным диаметру  существующих (не замененных) подкосов, центрировать их на опорах и  закрепить при помощи скоб с двух сторон;  

-Произвести замену покрытия вентиляционных боровов, выполненных из  боя пазогребневых плит. Выполнить равномерное заполнение швов клеем.  

-Выполнить устройство гидроизоляционных прокладок под замененными  частями лежня. Сопряжение вновь устроенных частей лежня с  существующим переустроить, выполнить в одном сечении без зазоров и  уступов.  

-Заменить изоляционные цилиндры теплоизоляции трубопроводов с  наличием механических повреждений, разрывов. В месте пропуска вентилей  использовать фасонные элементы изоляционного материала. Закрепить  цилиндры изоляции не менее чем двумя кольцами из оцинкованной  

проволоки диаметром 1,2-2,0 мм, размещенными на расстоянии не более 200- 250мм.  

-Проход кабеля через ограждающие конструкции кровли переустроить,  выполнить при помощи гильз.  

3.Взыскать с администрации города Перми (ОГРН: 1025900532460, ИНН:  5902290635) в пользу товарищества собственников недвижимости  "Крупской, 56" (ОГРН: 1155958039390, ИНН: 5906127580) расходы на  проведение экспертизы в размере 47 500 руб. 00 коп., расходы на  государственную пошлину в размере 6 000 руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через  Арбитражный суд Пермского края.  

Судья Ю.А. Лавров  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 04.08.2020 7:19:09

 Кому выдана Лавров Юрий Александрович