23/2023-318110(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А45-26807/2022

город Новосибирск

02 ноября 2023 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Серёдкиной Е.Л., при  ведении протокола секретарем судебного заседания Кудренко Р.С., рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по иску Администрации Решетовского сельсовета  Кочковского района Новосибирской области (ОГРН 1025405012511), с. Решеты  Новосибирской области,  

к обществу с ограниченной ответственностью «ТехноДор» (ОГРН 1105476015622), г.  Новосибирск,  

при участии в деле третьих лиц: 1) открытого акционерного общества по  строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных  сооружений «Новосибирскавтодор», 2) общества с ограниченной ответственностью  «Тринити» (ИНН 5402518352), 3) общества с ограниченной ответственностью  «СибСДК-Групп» (ИНН 5403051914), 4) общество с ограниченной ответственностью  «Стройсервис», 5) Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области  «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области», г.  Новосибирск,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

обязать общество с ограниченной ответственностью «ТехноДор» (ОГРН  1105476015622) в срок до 15 июня 2024 года выполнить следующие виды и объемы  работ для устранения выявленных дефектов (недостатков):  

1. устранить несоответствие толщины асфальтобетонного покрытия проезжей  части напротив дома № 4 ул. Калинина требованиям проектной документации, т.е.  выполнить переустройство слоя покрытия на участке ПК2+85-ПК3+52,98 с  соблюдением проектной величины толщины слоя.  

2. Устранить недостатки в виде застоя воды на покрытии на участке вдоль  правой кромки покрытия проезжей части, прилегающей к бортовому камню, с  ПК1+68 по ПК2+05, на участке вдоль левой кромки покрытия проезжей части на  сопряжении с правой кромкой покрытия парковочного кармана (место с нулевым  поперечным уклоном) с ПК1+63 по ПК 1+75, т.е выполнить переустройство слоя  покрытия с обеспечением проектной величины продольного уклона, либо выполнить  разработку и реализацию альтернативных мероприятий по обеспечению  поверхностного водоотвода на данных участках: укладка продольных водоотводных  лотков.  

3. Устранить недостатки в виде застоя воды на тротуаре на участке ПК2+85- ПК3+24 (лево), т.е. выполнить локальное переустройство покрытия тротуара в местах  просадок с обеспечением требуемой продольной и поперечной ровности.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТехноДор» (ОГРН  1105476015622) в доход федерального бюджета Российской Федерации 6000 рублей  государственной пошлины.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой  арбитражный апелляционный суд, в течение месяца после его принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный  суд Западно-Сибирского округа при условии, если оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.Л. Серёдкина