Арбитражный суд Калининградской области 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

г. Калининград Дело № А21-12528/2018 

«28» октября 2020года  

Руководствуясь статьями 167-170,174 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд   

Р Е Ш И Л:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «РАЛЕКС» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в месячный срок со дня вступления решения в  законную силу устранить за счет собственных средств строительные недостатки  (дефекты) в выполненных работах на объекте : 

<

...>, а именно выполнить следующие работы:  

- со стороны дворового фасада произвести очистку от старой краски фасадов,  балконов, шпатлевку и повторную окраску – 30м2;  

- со стороны дворового фасада тыльной стороны здания выполнить работы по  разборке старой бетонной отмостки на дворовом фасаде, разработке грунта,  установку подстилающего слоя, устройству новой бетонной отмостки -5,4м3;  

- выполнить разборку покрытий из стали 3-х дымовых труб, смену обделок-50п.м; 

- выполнить переделку всех подвесных участков желобов на обоих фасадов дома- 50м.п.;  

- выполнить работы по оштукатуриванию и окраске дымовой трубы над кровлей- 8,2м2.  

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Общество с  ограниченной ответственностью «РАЛЕКС»:  

- в пользу Администрации Советского городского округа (ИНН: 

<

***>; ОГРН:  

<

***>) 61 710руб.90коп. пени и 70 000руб.00коп. в возмещение расходов  на экспертизу;  

- в доход Федерального бюджета Российской Федерации 8 468руб.43коп.  госпошлины.  

 В части требований о выполнении работ по установке и разборке наружных  инвентарных лесов, по креплению лесов к наружным стенам производство по делу  прекратить.  

 Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в  Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.  

 Судья О.М.Педченко