АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

«

Дело № А13-9819/2021

город Вологда

19» октября 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена «12» октября 2022 года.

Полный текст решения изготовлен «19» октября 2022 года.

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Кутузовой И.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Коноваловой Н.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску акционерного общества «Вологодская областная энергетическая компания» к публичному акционерному обществу «Россети Северо-Запад» о понуждении к направлению договоров на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и урегулировании разногласий при заключении договоров,

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области,

при участии от истца – ФИО1 по доверенности от 01.01.2022,от ответчика – ФИО2 по доверенности от 31.12.2021, 

у с т а н о в и л:

акционерное общество «Вологодская областная энергетическая компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: Вологодская, область, 

<

...>; далее - Компания) обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с исковым заявлением к публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» о понуждении к заключению договоров об осуществлении технологического присоединения.

В порядке статьи 124 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) ответчик сообщил о смене своего наименования на публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» (далее – Общество).

Определением заместителя председателя суда от 20 октября 2021 года произведена замена судьи в составе суда по рассмотрению дела                   № А13-9819/2021 на судью Кутузову И.В.

В соответствии с частью 5 статьи 18 АПК РФ рассмотрение дела начато сначала.

Определением суда от 03 февраля 2022 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области.

В ходе рассмотрения истец в порядке статьи 49 АПК РФ неоднократно уточнял исковые требования, в итоге просил урегулировать разногласия по договорам об осуществлении технологического присоединения в поселках Пяжелка и селе Борисово-Судское Бабаевского района в редакции протоколов разногласий от 13.08.2022. а также возложить на Общество обязанность по направлению в адрес истца договоров об осуществлении технологического присоединения на условиях, предлагаемых истцом.

Уточнение исковых требований принято судом.

В обоснование заявленных требований истец сослался на статьи 421, 426 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), положения Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила технологического присоединения).

Ответчик в отзыве на исковое заявление, дополнениях к нему, а также представители Общества в судебном заседании с исковыми требованиями не согласились, сославшись на подачу истцом заявки по несоответствующей форме. В ходе рассмотрения дела представил проекты договоров, а также протоколы урегулирования разногласий к этим договорам, просил урегулировать разногласия по договорам в своей редакции.

Протокольным определением от 04.10.2022 в судебном заседании объявлялся перерыв до 14 час. 00 мин. 11.10.2022.

Протокольным определением от 11.10.2022 в судебном заседании объявлялся перерыв до 15час. 00 мин. 12.10.2022.

Информация об объявлении перерывов размещена на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел».

Департамент надлежащим образом извещен о времени и месте судебного заседания, представителя не направил. Дело рассмотрено в соответствии со статьей 156 АПК РФ в отсутствие представителя третьего лица.

Как видно из материалов дела, решением арбитражного суда Вологодской области от 24.02.2021 по делу № А13-6670/2020, вступившим в законную силу 05.07.2021,  на Компанию возложена обязанность по выполнению мероприятия по технологическому присоединению (созданию независимого резервного источника снабжения электрической энергией) до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя - федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» с целью обеспечения названному потребителю II категории надежности электроснабжения в населенных пунктах поселок Пяжелка и село Борисово-Судское. При этом в указанном решении отмечено, что независимый резервный источник электроснабжения должен быть связан с объектами электросетевого хозяйства сетевой организации.

Компания 07.07.2021 направила в адрес Общества заявки на присоединение энергопринимающих устройств № 7-4/07869 (поселок Пяжелка), № 7-4/07870 (село Борисово-Судское).

Письмом от 13.07.2021 № МР2/2/15/4042 Общество просило Компанию представить дополнительные сведения.

Письмом от 11.08.2021 № 7-4/09292 Компания отредактировала ранее направленные заявки, указав, что технологическое присоединение необходимо в связи со строительством нового сетевого объекта для электроснабжения конечных потребителей.

 Общество в письме от 17.08.2021 № МР2/2/15/4722 отказало в технологическом присоединении, указав, что в районе планируемого  размещения новых 2КТП-10/0,4 кВ имеются существующие электрические сети 10 кВ, принадлежащие заявителю, поэтому заявитель вправе осуществить технологическое присоединение к своим существующим сетям. При этом отметило, что в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 41 Правил технологического присоединения, Компании необходимо подать заявку в соответствии с пунктом 13(1) названных правил.

Изложенные обстоятельства явились поводом для обращения Компании в арбитражный суд с настоящим иском.

В ходе рассмотрения дела ответчик в судебном заседании представил проекты договоров (том 3, листы 34-44 по поселку Пяжелка, том 3, листы 47-57 по селу Бобрисово-Судское).

К представленным проектам договоров Компания представила протоколы разногласий и уточнила исковые требования, дополнив их требованием об урегулировании разногласий при заключении договоров.

В свою очередь, Общество представило протоколы урегулирования разногласий, к которым Компания составила протоколы согласования разногласий.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон № 35-ФЗ) технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

В силу пункта 6 Правил технологического присоединения технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные названными Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

В соответствии с пунктом 4 статьи 445 ГК РФ если сторона, для которой в соответствии с названным Кодексом или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. В этом случае договор считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.

Отказывая в заключении договора, Общество указало на то, что заявка подана по пункту 12(1)  Правил технологического присоединения, тогда как истец является сетевой организацией, объект, подлежащий присоединению является электросетевым объектом и данное присоединение планируется осуществить в целях исполнения истцом его обязательств перед конечными потребителями, в частности федеральным государственным унитарным предприятием «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» для обеспечения ему II категории надежности. Полагает, что в рассматриваемом случае заявка должна была быть подана по пункту 13(1) Правил технологического присоединения.

Суд соглашается с позицией ответчика в отношении того, что в рассматриваемых правоотношениях Компания является сетевой организацией.

Однако Правила технологического присоединения не исключают возможности обращения одной сетевой организации к другой сетевой организации в общем порядке, предусмотренном пунктом 2 указанных Правил, согласно которому действие настоящих Правил, кроме оснований, предусмотренных пунктом 41, распространяется, в том числе, на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств.

Правила технологического присоединения определяют порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям (пункт 1 Правил).

По смыслу приведенной нормы технологическому присоединению подлежат как энергопринимающие устройства, так и объекты электросетевого хозяйства, и объекты генерации. Обобщение указанных объектов единым термином «энергопринимающие устройства» обусловлено юридической техникой изложения Правил технологического присоединения, поскольку большая часть приведенных в них норм применима ко всем перечисленным объектам присоединения.

Аналогичное толкование названной нормы права дано в постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 05.04.2022 по делу                    № А56-76984/2020.

При изложенных обстоятельствах у Общества не имелось оснований для отказа истцу в направлении проектов договоров о технологическом присоединении.

Вместе с тем, поскольку в ходе рассмотрения дела проекты договоров были ответчиком представлены, имеется спор по урегулированию разногласий по предложенным проектам договоров, в удовлетворении требований Компании о возложении на Общество обязанности по направлению в адрес истца договоров об осуществлении технологического присоединения на условиях, предлагаемых истцом, надлежит отказать.

Согласно пункту 1 статьи 445 ГК РФ в случаях, когда в соответствии с названным Кодексом или иными законами для стороны, которой направлена оферта (проект договора), заключение договора обязательно, эта сторона должна направить другой стороне извещение об акцепте, либо об отказе от акцепта, либо об акцепте оферты на иных условиях (протокол разногласий к проекту договора) в течение тридцати дней со дня получения оферты. Сторона, направившая оферту и получившая от стороны, для которой заключение договора обязательно, извещение о ее акцепте на иных условиях (протокол разногласий к проекту договора), вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда в течение тридцати дней со дня получения такого извещения либо истечения срока для акцепта. 

Пунктом 2 статьи 445 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, когда в соответствии с названным Кодексом или иными законами заключение договора обязательно для стороны, направившей оферту (проект договора), и ей в течение тридцати дней будет направлен протокол разногласий к проекту договора, эта сторона обязана в течение тридцати дней со дня получения протокола разногласий известить другую сторону о принятии договора в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий. При отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения о результатах его рассмотрения в указанный срок сторона, направившая протокол разногласий, вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда. Если сторона, для которой в соответствии с указанным Кодексом или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. В этом случае договор считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда (пункт 4 статьи 445 ГК РФ). 

В случаях передачи разногласий, возникших при заключении договора, на рассмотрение суда на основании статьи 445 названного Кодекса либо по соглашению сторон условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются в соответствии с решением суда (пункт 1 статьи 446 ГК РФ). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 421, пунктом 1 статьи 422 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. 

Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Между сторонами возникли разногласия по пунктам 1, 1.1, 1.3, 2.1.4, абзацу второму пункта 2.3.18, пунктам 2.4.2, 3.1, 3.2, 4.3 договоров, пунктам 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 Технических условий, а также истец предложил дополнить договоры пунктами 13.

Общество предложило изложить пункты 1 и 1.1 договора по селу Борисово-Судское в следующей редакции:

«1. По договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения КТП-10/0,4кВ «Борисово-Суда» для энергоснабжения конечных потребителей (далее – электроустановка) заявителя, расположенной по адресу: поселок Борисово-Суда Бабаевского района Вологодской области со следующими характеристиками:

- максимальная мощность электроустановок 20 кВт, в том числе:

максимальная мощность ранее присоединенных электроустановок -;

максимальная мощность вновь присоединяемых электроустановок           20 кВт;

- категория надежности электроснабжения – сетевой объект,

через проектируемые объекты электросетевого хозяйства заявителя:       ВЛ 35 кВ, ПС 35/10 кВ, ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ в совокупности с распределительной и групповой сетью.

Точки присоединения (новые):

точка 1 – контактные соединения проводов на опоре № 19 ВЛ 10 кВ «Борисово» от ПС 35/10 кВ Борисово-Суда;

точка 2 отходящие контрактные соединения УСЛ-реклоузера на опоре № 3 ВЛ 35 кВ «Тешемля».

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 10 кВ, 35 кВ, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительств, реконструкцию) к присоединению электроустановок заяителя, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости  строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Заявитель обязуется выполнить мероприятия, предусмотренные для него в Технических условиях, внести плату за технологическое присоединение и, в случае расторжения договора, оплатить фактически понесенные сетевой организацией расходы в соответствии с условиями договора.

Местом исполнения договора является местонахождение присоединяемых электроустановок заявителя.»

Компания предложила изложить пункты 1 и 1.1 договора по селу Борисово-Судское в следующей редакции:

«1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее – технологическое присоединение) КТП-10/0,4 кВ «Борисово-Суда» для энергоснабжения конечных потребителей, в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых устройств 20 (кВ);

категория надежности – II;

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение 10 кВ;

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт.

Точки присоединения:

существующие – отсутствуют;

планируемые:

- (основной источник питания): контактные соединения проводов на проектируемой опоре ВЛ-10 кВ проектируемого участка ВЛ-10 кВ по ВЛ-10 кВ «Борисово» от ПС «Борисово-Суда» 35/10 кВ на границе участка заявителя;

- (резервный источник питания): контрактные соединения проводов на проектируемой опоре ВЛ-10 кВ проектируемого участка ВЛ-10 кВ от вновь смонтированной ПС 35/10 кВ «Кийно» от вновь построенной отпайки ВЛ-35 кВ по ВЛ-35 кВ «Тешемля» на границе земельного участка заявителя.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения 2КТП-10/0,4 кВ, которые расположены (будут располагаться) по адресу: Вологодская область, Бабаевский район, село Борисово-Судское (кадастровый номер земельного участка 35:02:0211004:583).

Заявитель обязуется выполнить мероприятия, предусмотренные для него в технических условиях, оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора, и в случае расторжения договора оплатить фактически понесенные сетевой организацией расходы в соответствии с условиями договора».

Общество предложило изложить пункты 1 и 1.1 договора по поселку Пяжелка в следующей редакции:

«1.1 По договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения КТП-10/0,4кВ (далее – электроустановка) заявителя, расположенной по адресу: поселок Пяжелка Бабаевского района Вологодской области со следующими характеристиками:

- максимальная мощность электроустановок 15 кВт, в том числе:

максимальная мощность ранее присоединенных электроустановок -;

максимальная мощность вновь присоединяемых электроустановок           15 кВт;

- категория надежности электроснабжения – сетевой объект,

через проектируемые объекты электросетевого хозяйства заявителя:       ВЛ 35 кВ, ПС 35/10 кВ, ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ в совокупности с распределительной и групповой сетью.

Точки присоединения:

точка 1 – контактные соединения проводов на проектируемой опоре ВЛ 10 кВ по ВЛ 10 кВ «Волна» от ПС Пяжелка 35/10 кВ на границе участка заявителя;

точка 2 - отходящие контрактные соединения УСЛ-реклоузера на опоре № 3 ВЛ 35 кВ «Тешемля».

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 10 кВ, 35 кВ, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительств, реконструкцию) к присоединению электроустановок заяителя, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости  строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Заявитель обязуется выполнить мероприятия, предусмотренные для него в Технических условиях, внести плату за технологическое присоединение и, в случае расторжения договора, оплатить фактически понесенные сетевой организацией расходы в соответствии с условиями договора.

Местом исполнения договора является местонахождение присоединяемых электроустановок заявителя.»

Общество предложило изложить пункту 1.3 договоров в следующей редакции:

«1.3. Срок выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению по договору составляет не более 12 месяцев с даты заключения договора.»

Компания предложила изложить пункты 1.3 договоров в следующей редакции:

«1.3 Срок выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.»

Общество предложило изложить пункты 3.2 договоров в следующей редакции:

«3.2 Заявитель осуществляет платеж в размере 100% (сто процентов) от размера платы за технологическое присоединение в течение 15 календарных дней с момента заключения настоящего договора.»

Компания предложила изложить пункты 3.2 договоров в следующей редакции:

«3.2 Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

а) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 15 дней с даты заключения договора;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 60 дней с даты заключения договора, но не позже даты фактического присоединения;

в) 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

г) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.»

Пункты 1 технических условий Общество предложил изложить в следующей редакции:

«1. Наименование объектов электросетевого хозяйства (далее – энергоустановки) заявителя: ВЛ 35 кВ, ПС 35/10 кВ, ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ в совокупности с распределительной и групповой сетью для электроснабжения конечных потребителей.»

Компания предложила изложить пункту 1 технических условий в следующей редакции:

«1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ»

Пункты 4 технических условий Общество предложило изложить в следующей редакции:

«4. Категория надежности сетевой объект.»

Компания предложила изложить пункты 4 технических условий в следующей редакции:

«4. Категория надежности: (II) вторая.»

Общество предложил изложить пункты 5 технических условий в следующей редакции:

«5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 10, 35 кВ».

Компания предложила изложить пункт 5 технических условии в следующей редакции:

«5. Класс напряжения электрических сетей. К которым осуществляется технологическое присоединение: 10 кВ».

Пункт 7 технических условий к договору по поселку Пяжелка Общество предложило изложить в следующей редакции:

«7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность электроустановок по каждой точке присоединения (для вновь присоединяемых электроустановок заявителя):

№ точки

Источник питания (наименование питающих линий)

Описание точки присоединения

Категория надежности

Максимальная присоединяемая мощность (кВт)

Вид питания

1.

ВЛ 10 кВ Волна (1 с.ш. РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Пяжелка)

Контактные соединения проводов на опоре № 3 ВЛ 10 кВ «Волна» от ПС 35/10 кв Пяжелка

 

Сетевой объект

 

15

 

основное

 

2.

ВЛ 35 кВ ФИО3 110/35/10 кВ Бабаево

Отходящие контактные соединения УСЛ-реклоузера 35 кВ

 

резервное

Компания предложила изложить пункт 7 технический условий к договору по поселку Пяжелка в следующей редакции:

«7. Точки присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) электрической сети        ПАО «Россетти Северо-Запад»:

7.1. существующие – отсутствуют.

7.2 Планируемые – (основной источник питания): контактные соединения проводов на проектируемой опоре ВЛ-10 кВ по ВЛ-10 кВ «Волна» от ПС «Пяжелка» 35/10 кВ на границе участка заявителя;

- (резервный источник питания): контактные соединения проводов на проектируемой опоре ВЛ-10 кВ проектируемого участка ВЛ-10 кВ от вновь смонтированной ПС 35/10 кВ «Кийно» от вновь построенной отпайки ВЛ-35 кВ по ВЛ-35 кВ «Тешемля» на границе участка заявителя».

Пункт 7 технических условий к договору по поселку Борисово-Судское Общество предложило изложить в следующей редакции:

«7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность электроустановок по каждой точке присоединения (для вновь присоединяемых электроустановок заявителя):

№ точки

Источник питания (наименование питающих линий)

Описание точки присоединения

Категория надежности

Максимальная присоединяемая мощность (кВт)

Вид питания

1.

ВЛ 10 кВ Борисово (1 с.ш. РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Борисово-Суда)

Контактные соединения проводов на опоре № 19 ВЛ 10 кВ «Борисово» от ПС 35/10 кв Юорисово-Суда

 

Сетевой объект

 

20

 

основное

 

2.

ВЛ 35 кВ ФИО3 110/35/10 кВ Бабаево

Отходящие контактные соединения УСЛ-реклоузера 35 кВ

 

резервное

Компания предложила изложить пункт 7 технический условий к договору по селу Борисово-Судское в следующей редакции:

«7. Точки присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) электрической сети        ПАО «Россетти Северо-Запад»:

7.1. существующие – отсутствуют.

7.2 Планируемые – (основной источник питания): контактные соединения проводов на проектируемой опоре ВЛ-10 кВ проектируемого участка ВЛ-10 кВ по ВЛ-10 кВ «Борисово» от ПС «Борисово-Суда» 35/10 кВ на границе участка заявителя;

- (резервный источник питания): контактные соединения проводов на проектируемой опоре ВЛ-10 кВ проектируемого участка ВЛ-10 кВ от вновь смонтированной ПС 35/10 кВ «Кийно» от вновь построенной отпайки ВЛ-35 кВ по ВЛ-35 кВ «Тешемля» на границе участка заявителя».

Пункты 9 технических условий к договорам Общество предложило изложить в следующей редакции: 

«9.Резервный источник питания: ПС 10/35/10 кВ Бабаево».

Компания предложила изложить указанный пункт в следующей редакции:

«9. Резервный источник питания: новая (проектируемая) ПС 35/10 кВ «Кийно».»

Пункты 10.1, 10.1.1, 10.1.1.1, 10.1.2 технических условий к договору по поселку Пяжелка Общество предложило изложить в следующей редакции:

«10. Сетевая организация осуществляет:

10.1 Требования к усилению существующей электрической сети.

10.1.1. Развитие существующих объектов сетевой организации:

10.1.1.1 Выполнить реконструкцию ВЛ 35 кВ Тешемля с установкой УСЛ-реклоузера 35 кВ у опоры № 3.

10.1.2. Новое строительство не требуется.»

Компания предложила пункты 10.1, 10.1.1, 10.1.1.1, 10.1.2 технических условий к договору по поселку Пяжелка изложить в следующей редакции:

«Мероприятия по технологическому присоединению, осуществляемые сетевой организацией:

10.1. Требования к электрической сети:

10.1.1. Первая точка присоединения:

10.1.1.1. Строительство проектируемой ВЛ 10 кВ от опоры № 3 ВЛ 10 кВ «Волна» до границы участка заявителя ориентировочной длиной – 2,075 км,  тип, марку и сечение провода, тип опор и точную длину определить проектом.

10.1.2. Вторая точка присоединения:

10.1.2.1. Установка реклоузера на первой опоре проектируемой отпайки ВЛ-35 кВ.

10.1.2.2. Строительство ВЛ-35 кВ от опоры ; 3 ВЛ-35 кВ «Тешемля» до проектируемой ПС 35/10 кВ «Кийно». Трассу, способ прокладки, марку и сечение провода, тип опор определить на стадии проектирования.

10.1.2.3. Строительство ПС 35/10 кВ «Кийно». Количество, тип, мощность силовых трансформаторов ПС, модификацию применяемого оборудования определить проектом.

10.1.2.4. Строительство проектируемой ВЛ 10 кВ от новой ПС 35/10 кВ «Кийно» до границы участка заявителя, ориентировочно длиной 12,5 км, тип, марку и сечение провода, тип опор и точную длину определить проектом.»

Пункты 10.1, 10.1.1, 10.1.1.1, 10.1.2 технических условий к договору по селу Борисово-Судское Общество предложило изложить в следующей редакции:

«10. Сетевая организация осуществляет:

10.1 Требования к усилению существующей электрической сети.

10.1.1. Развитие существующих объектов сетевой организации:

10.1.1.1 Выполнить реконструкцию ВЛ 35 кВ Тешемля с установкой УСЛ-реклоузера 35 кВ у опоры № 3.

10.1.2. Новое строительство не требуется.»

Компания предложила пункты 10.1, 10.1.1, 10.1.1.1, 10.1.2 технических условий к договору по селу Борисово-Судское изложить в следующей редакции:

«Мероприятия по технологическому присоединению, осуществляемые сетевой организацией:

10.1. Требования к электрической сети:

Строительство проектируемой ВЛ 35 кВ от опоры № 3 ВЛ 35 кВ «Тешемля» до вновь смонтированной ПС 35/10 кВ «Кийно» ориентировочно длиной- 85 км, тип, марку и сечение провода, тип опор и точную длину определить проектом.

10.1.1.1. Установка реклоузера на первой опоре проектируемой отпайки ВЛ 35 кВ.

10.1.2. Монтаж новой ПС 35/10 кВ «Кийно».

10.1.3. Строительство проектируемой ВЛ 10 кВ о новой ПС 35/10 кВ до границы участка заявителя, ориентировочно длиной – 26 км, тип, марку и сечение провода, тип опор определить проектом.

10.1.4. Строительство проектируемой ВЛ 10 кВ от опоры № 19 ВЛ 10 кВ «Борисово» до границы участка заявителя, ориентировочно длиной - 1,16 км, тип, марку и сечение провода, тип опор определить проектом.»

Пункты 11, 11.1.1., 11.1.2 технических условий договора по поселку Пяжелка Общество предложило изложить в следующей редакции:

«11. Заявитель осуществляет:

11.1. Требования к электрической сети:

11.1.1. Первая точка присоединения:

- выполнить строительство необходимого количества распределительных сетей 10 (0,4) кВ в целях приема присоединяемой мощности;

- выполнить монтаж ТП 10/0,4 кВ. Тип, мощность определить проектом из расчета проектируемой нагрузки.

11.1.2. Вторая точка присоединения:

- выполнить строительство ЛЭП 35 кВ. Трассу, способ прокладки, марку и сечение провода (кабеля),тип опор уточнить на стадии проектирования;

- выполнить строительство ПС 35/10 кВ. Количество, тип, мощность силовых трансформаторов ПС, модификацию, применяемого оборудования определить проектом. Присоединяемая мощность силовых трансформаторов должна соответствовать максимальной мощности присоединяемых электроустановок заявителя;

- выполнить строительство необходимого количества распределительных сетей 10 (0,4 кВ) в целях приема присоединяемой мощности;

- выполнить монтаж ТП 10/0,4 кВ. Тип, мощность определить проектом из расчета проектируемой нагрузки.

Мероприятия по проектированию и строительству в отношении линейных объектов выполнить в соответствии с требованиями статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ГОСТ и действующих руководящих нормативно-технических документов.».

Компания предложила пункты 11, 11.1.1, 11.1.2 технических условий договора по поселку Пяжелка изложить в следующей редакции:

«11.1.1. Приобрести и смонтировать энергопринимающие установки в соответствии с действующими ПУЭ и другими НТД на объекте, указанном в пункте 2 настоящих технических условий.

11.1.2. Разработка проектной документации  на строительство электросетевых сооружений 10/0,4 кВ объекта.

11.1.3. Выполнить монтаж ТП 10/0,4 кВ. Тип, мощность определить проектом из расчета проектируемой нагрузки.»

Пункты 11, 11.1.1., 11.1.2 технических условий договора по селу Борисово-Судское Общество предложило изложить в следующей редакции:

«11. Заявитель осуществляет:

11.1. Требования к электрической сети:

11.1.1. Первая точка присоединения:

- выполнить строительство необходимого количества распределительных сетей 10 (0,4) кВ в целях приема присоединяемой мощности;

- выполнить монтаж ТП 10/0,4 кВ. Тип, мощность определить проектом из расчета проектируемой нагрузки.

11.1.2. Вторая точка присоединения:

- выполнить строительство ЛЭП 35 кВ. Трассу, способ прокладки, марку и сечение провода (кабеля), тип опор уточнить на стадии проектирования;

- выполнить строительство ПС 35/10 кВ. Количество, тип, мощность силовых трансформаторов ПС, модификацию, применяемого оборудования определить проектом. Присоединяемая мощность силовых трансформаторов должна соответствовать максимальной мощности присоединяемых электроустановок заявителя;

- выполнить строительство необходимого количества распределительных сетей 10 (0,4 кВ) в целях приема присоединяемой мощности;

- выполнить монтаж ТП 10/0,4 кВ. Тип, мощность определить проектом из расчета проектируемой нагрузки.

Мероприятия по проектированию и строительству в отношении линейных объектов выполнить в соответствии с требованиями статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ГОСТ и действующих руководящих нормативно-технических документов.».

Компания предложила пункты 11, 11.1.1, 11.1.2 технических условий договора по селу Борисово-Судское изложить в следующей редакции:

«11.1.1. Приобрести и смонтировать энергопринимающие установки в соответствии с действующими ПУЭ и другими НТД на объекте, указанном в пункте 2 настоящих технических условий.

11.1.2. Выполнить монтаж ТП 10/0,4 кВ. Тип, мощность определить проектом из расчета проектируемой нагрузки.»

Пункты 11.10 технических условий к договорам Общество предложил изложить в следующей редакции:

«11.10. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.»

Компания предложила пункты 11.10 технических условий к договорам изложить в следующей редакции: 

«11.10. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.»

Кроме того, Компания предложила в технические условия к договору по поселку Пяжелка включить пункт 13 следующего содержания:

«13. Дополнительные сведения:

13.1 существующий ввод 0,4 кВ от ТП-5 на энергопринимающие устройства ФГУП «РТРС» отключить, демонтировать и считать недействующим.

13.2. В соответствии с пунктом 40(1) Правил технологического присоединения (утв. ПП РФ № 861 от 27.12.2004 г) снизить объем максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств на         15 кВт с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу сетевой организации от объем максимальной мощности, указанной в документах о технологическом присоединении.»

Компания предложила в технические условия к договору по селу Борисово-Судское включить пункт 13 следующего содержания

«13. Дополнительные сведения:

13.1 существующий ввод 0,4 кВ от ТП-5 на энергопринимающие устройства ФГУП «РТРС» отключить, демонтировать и считать недействующим.

13.2. В соответствии с пунктом 40(1) Правил технологического присоединения (утв. ПП РФ № 861 от 27.12.2004 г) снизить объем максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств на         20 кВт с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу сетевой организации от объем максимальной мощности, указанной в документах о технологическом присоединении.»

Общество возражает против включения пунктов 13 в договоры.

Разрешая разногласия сторон, суд исходит из следующего.

Истец полагает, что относится к категории заявителей, указанных в пункте 12 (1) Правил технологического присоединения - юридических лиц, осуществляющих технологическое присоединение по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств). 

Ответчик, в свою очередь, указал на регламентацию особенностей технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства разделом V Правил технологического присоединения, в связи с чем пункт 12 (1) названных Правил применению к отношениям сторон не подлежит.

Системный анализ Правил технологического присоединения в целом не позволяет отнести сетевую организацию, обращающуюся с заявкой на технологическое присоединение в вышестоящую сетевую организацию, к категории заявителей по пункту 12 (1) с учетом следующего.

Пункт 12.1 внесен в Правила технологического присоединения постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2009 № 334 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка технологического присоединения потребителей к электрическим сетям», при этом для указанной в нем группы заявителей впервые был введен льготный порядок с выгодными условиями технологического присоединения, предполагающими осуществление сетевой организацией технологического присоединения независимо от наличия технической возможности, с осуществлением мероприятий по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, с установлением точки присоединения не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются присоединяемые объекты заявителя; с возможностью воспользоваться беспроцентной рассрочкой платежа; с учетом внесения платы за технологическое присоединение данной категорией заявителей исходя из стандартизированных тарифных ставок, в которых расходы на покрытие строительства объектов равны нулю, стоимость технологического присоединения является максимально доступной.

Между тем, как указано выше, Компания является сетевой организацией, то есть профессиональным участником рынка электроэнергетики, применение к которому льготных условий и порядка технологического присоединения нормами законодательства не предусмотрено.

При изложенных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что, вопреки мнению истца, отношения сторон не регламентируются нормами Правил технологического присоединения для заявителей, относящихся к пункту 12 (1) Правил.

Поскольку истец не выступает в рассмотренных правоотношениях как потребитель, нуждающийся в технологическом присоединении объектов к электрическим сетям для собственных бытовых или производственных нужд, федеральный законодатель не предусмотрел применение к нему льготных условий.

Настоящий спор по существу сводится к определению сетевой организации, которая должна понести расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства для обеспечения второй категории надежности объектов федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

В соответствии с абзацем 3 пункта 13(1) Правил технологического присоединения  в заявке, направляемой сетевой организацией в смежную сетевую организацию, должны быть указаны, в том числе, сведения об объектах электросетевого хозяйства смежной сетевой организации, к которым осуществляется присоединение и (или) на которых необходимо проведение мероприятий по технологическому присоединению.

Согласно абзацу 5 пункта 25(4) Правил технологического присоединения в технических условиях для заявителей - сетевых организаций, которые подают заявки в соответствии с пунктом 13(1) настоящих Правил, должны быть указаны, в том числе, обоснованные требования к усилению электрической сети смежной сетевой организации, в которую подана заявка (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электроснабжения).

При этом отмечено, что указанные требования определяются исходя из требований технических условий (их проекта) для заявителя, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которого послужило основанием для обращения сетевой организации в смежную сетевую организацию.

Из приведенных норм права следует, что на сетевую организацию, к которой осуществляется технологическое присоединение, возложена обязанность по усилению уже существующей электрической сети, обязанность по строительству объектов электросетевеого хозяйства до границ земельного участка заявителя не предусмотрена.

Соответственно, пункты 1, 1.1 договоров, пункты 1, 5, 7, 9, 10.1, 10.1.1,  10.1.1.1, 10.1.2, 11, 11.1.1, 11.1.2 технических условий к договорам надлежит изложить в редакции Общества.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению регламентируется пунктом 16 Правил технологического присоединения. При этом 6-месячный срок предусмотрен для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 настоящих Правил. Истец не относится к таким заявителям.

Также истец не может быть отнесен к заявителям, для которых предусмотрено поэтапное внесение платы за технологическое присоединение.

Соответственно, пункты 1.3 и 3.2 договоров, а также пункты 11.10 технических условий к договорам подлежат изложению в редакции ответчика.

Согласно пункту 14 (1) Правил технологического присоединения технологическое присоединение энергопринимающих устройств в целях обеспечения надежного их энергоснабжения и качества электрической энергии может быть осуществлено по одной из трех категорий надежности. Отнесение энергопринимающих устройств заявителя (потребителя электрической энергии) к определенной категории надежности осуществляется заявителем самостоятельно. Отнесение энергопринимающих устройств ко второй категории надежности осуществляется в случае, если необходимо обеспечить надежное функционирование энергопринимающих устройств, перерыв снабжения электрической энергией которых приводит к недопустимым нарушениям технологических процессов производства. Энергопринимающие устройства, не отнесенные к первой или второй категориям надежности, относятся к третьей категории надежности

Толкование и использование термина «энергопринимающее устройство» в рассматриваемой норме пункта 14 (1) определяют два обстоятельства: конкретизация заявителя - потребитель электрической энергии, а также установление такого критерия отнесения ко второй категории надежности как недопустимые нарушения технологических процессов производства, что с очевидностью не может быть отнесено к объектам сетевого хозяйства.

Пункт 1.2.7 Правил устройства электроустановок. Издание седьмое, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204 (далее - ПУЭ) содержит понятие приемника электрической энергии (электроприемника) как аппарата, агрегата и др., предназначенного для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.

При этом пунктом 1.2.17 ПУЭ определено, что категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части проекта.

В соответствии с пунктом 1.2.18. ПУЭ в отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на три категории; электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.

Таким образом, исходя из системного толкования приведенных нормативных положений категории надежности определяются именно в отношении электроприемников, то есть энергопринимающих устройств конечных потребителей электрической энергии.

В рассматриваемом случае истец планирует строительство сетевого объекта для обеспечения второй категории надежности конечному потребителю. Поскольку определение категории надежности электроснабжения для сетевых объектов не предусмотрено, пункты 4 технических условий к договорам надлежит изложить в редакции Общества. 

В соответствии с пунктом 40 (1) Правил технологического присоединения заявители (за исключением лиц, указанных в пункте 13 настоящих Правил), имеющие на праве собственности или ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых в установленном порядке осуществлялось фактическое технологическое присоединение, вправе снизить объем максимальной мощности (избыток, реализованный потенциал энергосбережения и др.) собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу сетевой организации от объема максимальной мощности, указанной в документах о технологическом присоединении.

Для уменьшения максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителем в адрес сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие устройства заявителя, направляется заявка об уменьшении максимальной мощности.

В заявке об уменьшении максимальной мощности указываются:

наименование и реквизиты заявителя;

местонахождение этих устройств (электрических сетей);

объем максимальной мощности;

объем мощности, на который уменьшается максимальная мощность.

К заявке прилагаются копии документов о технологическом присоединении.

Сетевая организация в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки на уменьшение максимальной мощности направляет копию заявки, а также копии приложенных к ней документов субъекту оперативно-диспетчерского управления в случае, если ранее выданные заявителю технические условия подлежат согласованию с таким субъектом.

В пункте 40(2) Правил технологического присоединения указано, что сетевая организация при обращении заявителей, указанных в пункте 40(1) настоящих Правил, в течение 30 дней со дня такого обращения обязана направить этим заявителям:

соглашение об уменьшении максимальной мощности, предусматривающее обязательства сторон этого соглашения по подписанию документов о технологическом присоединении, фиксирующих объем максимальной мощности после ее уменьшения, а также по внесению изменений в иные документы, предусматривающие взаимодействие сетевой организации и заявителя (при наличии);

информацию о внесенных в технические условия изменениях, содержащих сведения о величине максимальной мощности объектов заявителя после ее уменьшения в связи с отказом в пользу сетевой организации, мероприятиях по перераспределению максимальной мощности по точкам присоединения, мероприятиях по установке (замене) устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности для снижения ее величины в объемах, предусмотренных соглашением о перераспределении мощности, мероприятиях по установке (замене) устройств, обеспечивающих техническое ограничение выдачи объектами микрогенерации электрической энергии в сеть для снижения ее величины в объемах, предусмотренных соглашением о перераспределении мощности, а также мероприятиях по подключению энергопринимающих устройств под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики.

Таким образом, перераспределение мощности является самостоятельной процедурой, осуществляется по отдельной заявке, соответственно, пункты 13 не подлежат включению в технические условия.

При изложенных обстоятельствах условия обоих договоров подлежат изложению в редакции ответчика.

Согласно статье 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на истца.

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, и в соответствии со статьей 177 АПК РФ будет направлен лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

Руководствуясь статьями 110, 167–170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области

р е ш и л:

урегулировать разногласия, возникшие при заключении договоров на осуществлении технологического присоединения между публичным акционерным обществом «Россетти Северо-Запад» и акционерным обществом «Вологодская областная энергетическая Компания».

Пункты 1, 1.1, 1.3, 3.2 договора на осуществлении технологического присоединения по поселку Пяжелка, пункты 1, 4, 5, 7, 9, 10.1, 10.1.1, 10.1.1.1, 10.1.2, 11, 11.1.1, 11.1.2, 11.10 технических условий к названному договору изложить в редакции публичного акционерного общества «Россетти Северо-Запад»:

«1.1. По договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения КТП-10/0,4кВ (далее – электроустановка) заявителя, расположенной по адресу: поселок Пяжелка Бабаевского района Вологодской области со следующими характеристиками:

- максимальная мощность электроустановок 15 кВт, в том числе:

максимальная мощность ранее присоединенных электроустановок -;

максимальная мощность вновь присоединяемых электроустановок           15 кВт;

- категория надежности электроснабжения – сетевой объект,

через проектируемые объекты электросетевого хозяйства заявителя:       ВЛ 35 кВ, ПС 35/10 кВ, ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ в совокупности с распределительной и групповой сетью.

Точки присоединения:

точка 1 – контактные соединения проводов на проектируемой опоре ВЛ 10 кВ по ВЛ 10 кВ «Волна» от ПС Пяжелка 35/10 кВ на границе участка заявителя;

точка 2 - отходящие контрактные соединения УСЛ-реклоузера на опоре № 3 ВЛ 35 кВ «Тешемля».

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 10 кВ, 35 кВ, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительств, реконструкцию) к присоединению электроустановок заяителя, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости  строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Заявитель обязуется выполнить мероприятия, предусмотренные для него в Технических условиях, внести плату за технологическое присоединение и, в случае расторжения договора, оплатить фактически понесенные сетевой организацией расходы в соответствии с условиями договора.

Местом исполнения договора является местонахождение присоединяемых электроустановок заявителя.

1.3. Срок выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению по договору составляет не более 12 месяцев с даты заключения договора.

3.2. Заявитель осуществляет платеж в размере 100% (сто процентов) от размера платы за технологическое присоединение в течение 15 календарных дней с момента заключения настоящего договора.

Пункт 1 технических условий: «Наименование объектов электросетевого хозяйства (далее – энергоустановки) заявителя: ВЛ 35 кВ, ПС 35/10 кВ, ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ в совокупности с распределительной и групповой сетью для электроснабжения конечных потребителей.»

Пункт 4 технических условий: «Категория надежности сетевой объект»

Пункт 5 технических условий: «Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 10, 35 кВ».

Пункт 7 технических условий: «Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность электроустановок по каждой точке присоединения (для вновь присоединяемых электроустановок заявителя):

№ точки

Источник питания (наименование питающих линий)

Описание точки присоединения

Категория надежности

Максимальная присоединяемая мощность (кВт)

Вид питания

1.

ВЛ 10 кВ Волна (1 с.ш. РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Пяжелка)

Контактные соединения проводов на опоре № 3 ВЛ 10 кВ «Волна» от ПС 35/10 кв Пяжелка

 

Сетевой объект

 

15

 

основное

 

2.

ВЛ 35 кВ ФИО3 110/35/10 кВ Бабаево

Отходящие контактные соединения УСЛ-реклоузера 35 кВ

 

резервное

 

Пункты 9, 10, 10.1, 10.1.1, 10.1.1.1, 10.1.2, 11, 11.1.1, 11.1.2, 11.10 технических условий:

«9. Резервный источник питания: ПС 110/35/10 кВ Бабаево.

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1 Требования к усилению существующей электрической сети.

10.1.1. Развитие существующих объектов сетевой организации:

10.1.1.1 Выполнить реконструкцию ВЛ 35 кВ Тешемля с установкой УСЛ-реклоузера 35 кВ у опоры № 3.

10.1.2. Новое строительство не требуется.»

11. Заявитель осуществляет:

11.1. Требования к электрической сети:

11.1.1. Первая точка присоединения:

- выполнить строительство необходимого количества распределительных сетей 10 (0,4) кВ в целях приема присоединяемой мощности;

- выполнить монтаж ТП 10/0,4 кВ. Тип, мощность определить проектом из расчета проектируемой нагрузки.

11.1.2. Вторая точка присоединения:

- выполнить строительство ЛЭП 35 кВ. Трассу, способ прокладки, марку и сечение провода (кабеля),тип опор уточнить на стадии проектирования;

- выполнить строительство ПС 35/10 кВ. Количество, тип, мощность силовых трансформаторов ПС, модификацию, применяемого оборудования определить проектом. Присоединяемая мощность силовых трансформаторов должна соответствовать максимальной мощности присоединяемых электроустановок заявителя;

- выполнить строительство необходимого количества распределительных сетей 10 (0,4 кВ) в целях приема присоединяемой мощности;

- выполнить монтаж ТП 10/0,4 кВ. Тип, мощность определить проектом из расчета проектируемой нагрузки.

Мероприятия по проектированию и строительству в отношении линейных объектов выполнить в соответствии с требованиями статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ГОСТ и действующих руководящих нормативно-технических документов.

11.10. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.».

Пункт 13 в технические условия не включать.

Пункты 1, 1.1, 1.3, 3.2 договора на осуществлении технологического присоединения по поселку Борисово-Судское, пункты 1, 4, 5, 7, 9, 10.1, 10.1.1, 10.1.1.1, 10.1.2, 11, 11.1.1, 11.1.2, 11.10 технических условий к названному договору изложить в редакции публичного акционерного общества «Россетти Северо-Запад»:

«1. По договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения КТП-10/0,4кВ «Борисово-Суда» для энергоснабжения конечных потребителей (далее – электроустановка) заявителя, расположенной по адресу: поселок Борисово-Суда Бабаевского района Вологодской области со следующими характеристиками:

- максимальная мощность электроустановок 20 кВт, в том числе:

максимальная мощность ранее присоединенных электроустановок -;

максимальная мощность вновь присоединяемых электроустановок           20 кВт;

- категория надежности электроснабжения – сетевой объект,

через проектируемые объекты электросетевого хозяйства заявителя:       ВЛ 35 кВ, ПС 35/10 кВ, ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ в совокупности с распределительной и групповой сетью.

Точки присоединения (новые):

точка 1 – контактные соединения проводов на опоре № 19 ВЛ 10 кВ «Борисово» от ПС 35/10 кВ Борисово-Суда;

точка 2 отходящие контрактные соединения УСЛ-реклоузера на опоре    № 3 ВЛ 35 кВ «Тешемля».

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 10 кВ, 35 кВ, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительств, реконструкцию) к присоединению электроустановок заяителя, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости  строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Заявитель обязуется выполнить мероприятия, предусмотренные для него в Технических условиях, внести плату за технологическое присоединение и, в случае расторжения договора, оплатить фактически понесенные сетевой организацией расходы в соответствии с условиями договора.

Местом исполнения договора является местонахождение присоединяемых электроустановок заявителя.

1.3 Срок выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению по договору составляет не более 12 месяцев с даты заключения договора.

3.2. Заявитель осуществляет платеж в размере 100% (сто процентов) от размера платы за технологическое присоединение в течение 15 календарных дней с момента заключения настоящего договора.

Пункт 1 технических условий: «Наименование объектов электросетевого хозяйства (далее – энергоустановки) заявителя: ВЛ 35 кВ, ПС 35/10 кВ, ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ в совокупности с распределительной и групповой сетью для электроснабжения конечных потребителей»

Пункт 4 технических условий: «Категория надежности сетевой объект».

Пункт 5 технических условий: «Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 10, 35 кВ»

Пункт 7 технических условий: «Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность электроустановок по каждой точке присоединения (для вновь присоединяемых электроустановок заявителя):

№ точки

Источник питания (наименование питающих линий)

Описание точки присоединения

Категория надежности

Максимальная присоединяемая мощность (кВт)

Вид питания

1.

ВЛ 10 кВ Борисово (1 с.ш. РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Борисово-Суда)

Контактные соединения проводов на опоре № 19 ВЛ 10 кВ «Борисово» от ПС 35/10 кв Юорисово-Суда

 

Сетевой объект

 

20

 

основное

 

2.

ВЛ 35 кВ ФИО3 110/35/10 кВ Бабаево

Отходящие контактные соединения УСЛ-реклоузера 35 кВ

 

резервное

Пункты 9, 10, 10.1, 10.1.1, 10.1.1.1, 10.1.2, 11, 11.1.1, 11.1.2, 11.10 технических условий:

«9. Резервный источник питания: ПС 110/35/10 кВ Бабаево.

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1 Требования к усилению существующей электрической сети.

10.1.1. Развитие существующих объектов сетевой организации:

10.1.1.1 Выполнить реконструкцию ВЛ 35 кВ Тешемля с установкой УСЛ-реклоузера 35 кВ у опоры № 3.

10.1.2. Новое строительство не требуется.»

11. Заявитель осуществляет:

11.1. Требования к электрической сети:

11.1.1. Первая точка присоединения:

- выполнить строительство необходимого количества распределительных сетей 10 (0,4) кВ в целях приема присоединяемой мощности;

- выполнить монтаж ТП 10/0,4 кВ. Тип, мощность определить проектом из расчета проектируемой нагрузки.

11.1.2. Вторая точка присоединения:

- выполнить строительство ЛЭП 35 кВ. Трассу, способ прокладки, марку и сечение провода (кабеля), тип опор уточнить на стадии проектирования;

- выполнить строительство ПС 35/10 кВ. Количество, тип, мощность силовых трансформаторов ПС, модификацию, применяемого оборудования определить проектом. Присоединяемая мощность силовых трансформаторов должна соответствовать максимальной мощности присоединяемых электроустановок заявителя;

- выполнить строительство необходимого количества распределительных сетей 10 (0,4 кВ) в целях приема присоединяемой мощности;

- выполнить монтаж ТП 10/0,4 кВ. Тип, мощность определить проектом из расчета проектируемой нагрузки.

Мероприятия по проектированию и строительству в отношении линейных объектов выполнить в соответствии с требованиями статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ГОСТ и действующих руководящих нормативно-технических документов.

11.10. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.»

Пункт 13 в технические условия не включать.

В удовлетворении требований о возложении на публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» обязанности по направлению в адрес истца договоров об осуществлении технологического присоединения на условиях, предлагаемых акционерным обществом «Вологодская областная энергетическая Компания», отказать.

Решение суда может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

Судья                                                                                                    И.В. Кутузова