АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-6072/2021

г. Чебоксары

02 июля 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 18 июня 2024 года. Полный текст решения изготовлен 02 июля 2024 года.

 

Арбитражный суд Чувашской Республики-Чувашии в составе судьи Афанасьева А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Майоровой М.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлениям 

общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики 

о признании недействительными предписаний от 04.06.2021 № 07/05 и от 17.06.2021 № 07/06,

с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора - администрации города Чебоксары Чувашской Республики, некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов», прокуратуры Чувашской Республики, прокуратуры Московского района города Чебоксары Чувашской Республики, 

при участии:

от заявителя – ФИО1 по доверенности от 02.02.2024, диплом                   1021240 530650, 

от Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики – ФИО2 по доверенности от 10.07.2023 №14, диплом 135005  0008543, 

от третьего лица - администрации города Чебоксары – не было,

от третьего лица - некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» - не было,

от третьего лица - прокуратуры Чувашской Республики – не было,

от третьего лица - прокуратуры Московского района города Чебоксары Чувашской Республики – не было,       

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль» (далее – ООО «Вертикаль», Общество или заявитель) обратилось в арбитражный суд                               с заявлением к Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики (далее – Госжилинспекция Чувашии) о признании недействительным предписания                   от 04.06.2021 № 07/05.  

Определением суда от 13.10.2021 производство по делу № А79-6072/2021 было приостановлено до принятия и  вступления в законную силу судебного акта Арбитражного суда Чувашской Республики – Чувашии по рассмотрению дела                № А79-2291/2021 по существу. 

Определением суда от 28.07.2023 возобновлено производство по делу                   № А79-6072/2021. 

Определением суда от 28.09.2023 объединены дела № А79-6072/2021 и                   № А79-6074/2021 в одно производство для совместного рассмотрения, которому присвоен № А79-6072/2021.  К участию в деле № А79-6072/2021 в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены администрация города Чебоксары Чувашской Республики и некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов». 

В рамках арбитражного дела №А79-6074/2021 общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль» обратилось в арбитражный суд  с заявлением                          к Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики о признании недействительным предписания от 17.06.2021 № 07/06.  

31 января 2024 года в арбитражный суд от администрации города Чебоксары поступил отзыв.

Определением суда от 25.03.2024 к участию в деле № А79-6072/2021                         в качестве третьих лиц,  не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены прокуратура Чувашской Республики и прокуратура Московского района города Чебоксары Чувашской Республики.   

Судом на основании статьи 158 и части 2 статьи 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вынесено протокольное определение об отложении судебного разбирательства по настоящему делу                             до 15 часов 00 минут 03 июня 2024 года.          

03 июня 2024 года в арбитражный суд от третьего лица - прокуратуры Чувашской Республики поступил краткий отзыв и ходатайство о рассмотрении настоящего дела без участия его  представителя.     

Судом на основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вынесено протокольное определение об объявлении перерыва в судебном заседании до 14 часов 15 минут  18 июня 2024 года. 

18 июня 2024 года в арбитражный суд от третьего лица - прокуратуры Чувашской Республики поступил отзыв и ходатайство о рассмотрении настоящего дела без участия его  представителя.     

Представитель заявителя в судебном заседании просил суд признать недействительными предписания от 04.06.2021 № 07/05 и  от 17.06.2021 № 07/06                     по основаниям, изложенным в письменных пояснениях. 

Представитель Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики в судебном заседании просил суд отказать в удовлетворении заявленных требований по доводам, указанным в отзыве и письменным пояснениям к нему.   

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о месте и времени судебного разбирательства, явку своих полномочных представителей                       в судебное заседание не обеспечили, в связи с чем дело рассматривается без их участия в силу статей 123, 156 и части 2 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Заслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, суд установил следующее.

ООО «Вертикаль» осуществляет управление многоквартирными домами № 5 по бульвару Юго-Западный г. Чебоксары и № 66 по ул. Гражданская г. Чебоксары, и является владельцем специального счета по формированию фонда капитального ремонта многоквартирных домов (далее – МКД) № 5 по Юго-Западному бульвару, № 66 по ул. Гражданская г. Чебоксары.

Государственной жилищной инспекцией Чувашской Республики на основании распоряжения руководителя Госжилинспекции Чувашии – главного государственного жилищного инспектора Чувашской Республики от 20.05.2021              № 526 проведена внеплановая документарная проверка в отношении                                ООО «Вертикаль».

По результатам проверки в отношении ООО «Вертикаль» составлен акт               от 04.06.2021 № 07/07 и вынесено предписание от 04.06.2021 № 07/05 об устранении нарушения законодательства. 

Названным предписанием ООО «Вертикаль» в срок до 10.07.2021 необходимо:

1.      Прекратить выставление взносов на капитальный ремонт путем предоставления платежных документов на оплату взносов на капитальный ремонт собственникам помещений дома № 66;

2.      Произвести перечисление денежных средств, находящихся на специальном счете для формирования фонда капитального ремонта № 66 на счет регионального оператора;

3.      УК предоставить некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта общего имущества» документы и информацию, связанную с формированием фонда капитального ремонта по дому № 66, предусмотренной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15.04.2016 № 134.  

Кроме этого, Государственной жилищной инспекцией Чувашской Республики на основании распоряжения руководителя Госжилинспекции Чувашии – главного государственного жилищного инспектора Чувашской Республики                     от 17.06.2021 № 594 также проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО «Вертикаль».

По результатам проверки в отношении ООО «Вертикаль» составлен акт                 от 17.06.2021 № 07/08 и вынесено предписание от 17.06.2021 № 07/06 об устранении нарушения законодательства. 

Названным предписанием ООО «Вертикаль» в срок до 12.07.2021 необходимо:

1.      Прекратить выставление взносов на капитальный ремонт путем предоставления платежных документов на оплату взносов на капитальный ремонт собственникам помещений дома № 5;

2.      Произвести перечисление денежных средств, находящихся на специальном счете для формирования фонда капитального ремонта № 5 на счет регионального оператора;

3.      УК предоставить некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта общего имущества» документы и информацию, связанную с формированием фонда капитального ремонта по дому № 5, предусмотренной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15.04.2016 № 134.  

Не согласившись с предписаниями Госжилинспекции Чувашии                              от 04.06.2021 № 07/05 и от 17.06.2021 № 07/06, заявитель обратился в арбитражный суд с заявлениями о признании их недействительными.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном этим Кодексом.

В соответствии с частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Таким образом, для признания ненормативного акта недействительным, решения и действия (бездействия) незаконными необходимо наличие одновременно двух условий: несоответствие их закону или иному нормативному правовому акту и нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности.

При рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (часть 4 статьи 200 указанного Кодекса).

В соответствии с частью 1 статьи 171 Жилищного кодекса Российской Федерации в случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора собственники жилых помещений в многоквартирном доме уплачивают взносы на капитальный ремонт на основании платежных документов, представленных региональным оператором, в сроки, установленные для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

Согласно постановлению администрации города Чебоксары Чувашской Республики от 10.03.2021 № 396 «О формировании фондов капитального ремонта многоквартирных домов города Чебоксары на счете регионального оператора – некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов №№ 3, 5 по бульвару Юго-Западный, № 16 по проезду Мясокомбинатский, № 66 по ул. Гражданская, №№ 16, 16 корп. 1 по ул. Мате Залка, № 58 по ул. Мичмана ФИО3, № 3 по ул. Эльменя, № 14 по ул. Энтузиастов, № 18 по ул. Ивана Франко г. Чебоксары необходимо производить на счете регионального оператора.

В адрес Госжилинспекции Чувашии поступило обращение собственника    (вх. 7744 от 13.05.2021) помещений многоквартирного дома № 66 по ул. Гражданская г. Чебоксары по вопросу обоснованности начисления и выставления ООО «Вертикаль» взносов на капитальный ремонт собственникам помещений дома №66. На основании указанного обращения вынесено распоряжение                         от 20.05.2021 № 526 о проведении проверки в отношении ООО «Вертикаль», по результатам которого доводы заявителя подтвердились.  ООО «Вертикаль» осуществляло выставление и начисление взносов на капитальный ремонт собственникам помещений дома № 66 (акт проверки от 04.06.2021 № 07/07).

В адрес Госжилинспекции Чувашии также поступило обращение собственника (вх. 8131 от 20.05.2021) помещений многоквартирного дома № 5 по Юго-Западному бульвару г.Чебоксары по вопросу обоснованности начисления и выставления ООО «Вертикаль» взносов на капитальный ремонт собственникам помещений дома № 5. На основании указанного обращения вынесено распоряжение от 17.06.2021 № 594 о проведении проверки в отношении                        ООО «Вертикаль», по результатам которого доводы заявителя подтвердились.  ООО «Вертикаль» осуществляло выставление и начисление взносов на капитальный ремонт собственникам помещений дома № 5 (акт проверки                         от 17.06.2021 № 07/08).

Таким образом, в соответствии с постановлением администрации города Чебоксары Чувашской Республики от 10.03.2021 № 396 «О формировании фондов капитального ремонта многоквартирных домов города Чебоксары на счете регионального оператора – некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» Госжилинспекцией Чувашии были вынесены в отношении ООО «Вертикаль» предписания от 04.06.2021 № 07/05 и от 17.06.2021 № 07/06.

Вместе с тем, обстоятельства дела свидетельствуют, что решением Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии от 10.10.2022 по делу № А79-2291/2021 признано недействительным постановление № 396 от 10.03.2021 администрации города Чебоксары Чувашской Республики «О формировании фондов капитального ремонта многоквартирных домов города Чебоксары на счете регионального оператора – НО «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» в части многоквартирных домов: Юго-Западный бульвар 

<

...>

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 03.04.2023 решение Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии от 10.10.2022 по делу № А79-2291/2021 отменено в части признания недействительным постановления администрации города Чебоксары Чувашской Республики от 10.03.2021 № 396 «О формировании фондов капитального ремонта многоквартирных домов города Чебоксары на счете регионального оператора – некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» в отношении многоквартирных домов по адресам: Юго-Западный бульвар, д.3, ул.Эльменя, д.3. 

В указанной части в удовлетворении требования обществу с ограниченной ответственностью «Вертикаль» отказано. 

В остальной обжалуемой части решение Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии от 10.10.2022 по делу № А79-2291/2021 оставлено без изменения, апелляционная жалоба Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики – без удовлетворения. 

На основании изложенного, на момент проведения Госжилинспекцией Чувашии вышеуказанных проверок в отношении ООО «Вертикаль» и вынесения ею оспариваемых предписаний от 04.06.2021 № 07/05 и от 17.06.2021 № 07/06, постановление администрации города Чебоксары Чувашской Республики от 10.03.2021 № 396 «О формировании фондов капитального ремонта многоквартирных домов города Чебоксары на счете регионального оператора – некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» действовало, в связи с чем спорные многоквартирные дома должны были осуществлять формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора. 

В связи с признанием судом недействительным постановления администрации города Чебоксары Чувашской Республики от 10.03.2021 № 396 в части указанных домов, для ООО Вертикаль» не влекут какие-либо правовые последствия оспариваемыми предписаниями Госжилинспекции Чувашии. 

Обстоятельства дела также свидетельствуют, что ООО «Вертикаль» сопроводительным письмом от 09.01.2020 в Госжилинспекцию Чувашии направлен протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома                № 66 по ул. Гражданская г. Чебоксары от 26.12.2019 № 16, согласно которому по второму вопросу повестки дня принято решение о наделении ООО «Вертикаль» полномочиями на организацию и выполнение работ по капитальному ремонту МКД, по четвертому вопросу повестки дня утвержден перечень работ и работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: замена системы отопления и канализации, ремонт мягкой кровли, замена лифтового оборудования (лифтов) подъезды 1, 2, 3, 4, 5, 6, по пятому вопросу – срок проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме с 20.03.2020 по мере поступления денежных средств.

ООО «Вертикаль» в Госжилинспекцию Чувашии представлена информация о проведенных работах по капитальному ремонту общего имущества в доме № 66 по ул. Гражданская г. Чебоксары: заменены лифты в подъездах №№ 1, 2                            с 23.04.2020 по 17.08.2020, а также о том, что ведутся работы по замене лифта в подъезде № 3.

В части доводов ООО «Вертикаль» о материальных потерях от вынесенных предписаний Госжилинспекции Чувашии следует отметить, что при заключении договора с ООО «Лифт» на специальном счете было недостаточно средств для проведения ремонта по замене лифта, поскольку остаток денежных средств по состоянию на 01.02.2021 составлял 1053,5 тыс. руб., договор подряда с ООО «Лифт» на проведение капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: 

<

...>, под. 3 заключен 27.01.2021.

Указанные обстоятельства свидетельствуют, что оспариваемое предписание от 04.06.2021 не могло повлиять на действия ООО «Вертикаль» при заключении договора подряда с ООО «Лифт», соответственно, причинно-следственная связь между взысканием ООО «Лифт» с ООО «Вертикаль» пени отсутствует.

Внеочередным общим собранием собственников помещений МКД № 5 по бульвару Юго-Западный г. Чебоксары, оформленного протоколом от 16.11.2017              № 12, приняты решения о наделении ООО «Вертикаль» полномочиями на организацию и выполнение работ по капитальному ремонту МКД, на выполнение претензионной и исковой работы по вопросам капитального ремонта дома с правом обращения от имени собственников дома в отношении должников о взыскании задолженности по оплате взносов  на капитальный ремонт, образовавшихся с 01.12.2014, расходов по госпошлине, а также начисление пени за просрочку платежей; утвержден размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт за 1 кв.м общей площади помещения на уровне минимального взноса, в размере установленном Кабинетом Министров Чувашской Республики; утвержден перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме: замена нижней разводки системы отопления, канализации, холодного и горячего водоснабжения (ниже отметки 0,00), замена верхней разводки горячего водоснабжения и подъездных стояков; утверждены сроки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме с 01.04.2018 в размере поступления денежных средств на специальный счет; утвержден источник финансирования расходов по обслуживанию (содержанию) специального счета в размере 10,00 руб. с одного помещения в месяц из статьи «Содержание жилья» с 01.12.2017 в квитанции по оплате за жилищно-коммунальные услуги.

ООО «Вертикаль» письмом от 14.09.2020 направило в Госжилинспекцию Чувашии протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома № 5 по Юго-Западному бульвару в г. Чебоксары от 20.04.2020 № 16, согласно которому по третьему вопросу повестки дня принято решение о наделении ООО «Вертикаль» полномочиями на организацию и выполнение работ по капитальному ремонту МКД, на выполнение претензионной и исковой работы по вопросам капитального ремонта дома с правом обращения от имени собственников дома в отношении должников о взыскании задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт, образовавшихся с 01.12.2014, расходов по госпошлине, а также начисления пени за просрочку; по четвертому вопросу повестки дня принято решение утвердить лицо, уполномоченное от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме, участвовать в приемке оказанных работ и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты ФИО4, собственника кв. № 62; по пятому вопросу повестки дня утвержден перечень работ и работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: замена лифтового оборудования (лифта).

Решение о сроке проведения капитального ремонта не принималось.

ООО «Вертикаль» письмом от 17.02.2021 представлена в Госжилинспекцию Чувашии информация о проведенных работах по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 5 по Юго-Западному бульвару                               г. Чебоксары: с 25.01.2018 по 02.03.2018 произведена замена верхней и нижней разводки ГВС, нижней разводки ХВС и канализации; с 16.06.2020 по 30.10.2020 заменен лифт в подъезде № 4.

16.06.2020 между ООО «Вертикаль» и ООО «Лифт» заключен договор подряда на проведение капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: 

<

...>, под. 4.

Срок начала работ по капитальному ремонту объекта: 17.06.2020, срок окончания работ: 30.10.2020 (п.п. 4.2, 4.3 договора). Стоимость выполняемых работ составляет 2 000 000 руб. (п. 3.1 договора). Пунктом 3.4 договора предусмотрено выделение авансового платежа подрядчику в размере 30% от сметной стоимости выполняемых работ.

Согласно пункту 13.1 договора заказчик – ООО «Вертикаль» не позднее чем через 30 дней после подписания им акта приемки, обусловленного договором выполненного этапа работы, обязуется оплатить подрядчику – ООО «Лифт» стоимость принятых заказчиком по акту выполненных работ.

При соблюдении срока окончания работ по капитальному ремонту – 30.10.2020, оплата должна быть произведена ООО «Вертикаль» не позднее 30.11.2020.

ООО «Вертикаль» оплату по договору подряда с ООО «Лифт»  произвело                в полном объеме за выполнение работ по капитальному ремонту (замене) лифта               в подъезде № 4 многоквартирного дома № 5 по Юго-Западному бульвару                           г. Чебоксары.

Работы, предусмотренные региональной программой капремонта на 2020 год по замене лифтов, ремонту машинных и блочных помещений, ремонту системы электроснабжения и утвержденные протоколом общего собрания собственников помещений многоквартирного дома № 5 по Юго-Западному бульвару г. Чебоксары от 20.04.2020 № 16 о замене лифтового оборудования (лифтов), выполнены частично (не заменены 3 лифта).

По состоянию на 01.07.2021 остаток денежных средств по указанному дому составлял 326,0 тыс. руб.

Общим собранием собственников помещений многоквартирного дома № 5 по Юго-Западному бульвару г. Чебоксары, оформленного протоколом от 20.07.2021 № 17, принято решение против получения кредита или займа, принято решение о переносе сроков выполнения работ по капитальному ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений на 2025 год и проведение указанных работ с 11.01.2025 по 31.12.2025.

Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии причинно-следственной связи между оспариваемыми предписаниями Госжилинспекции Чувашии и наступившими для ООО «Вертикаль» последствиями, вызванными взысканием ООО «Лифт» с ООО «Вертикаль» убытков в виде процентов за пользование чужими денежными средствами.

Как следует из материалов дела, согласно уведомлениям от 23.08.2023 Госжилинспекция Чувашии по причине наличия постановления Первого арбитражного апелляционного суда от 03.04.2023 по делу № А79-2291/2021 отменила и отозвала оспариваемые предписания от 04.06.2021 № 07/05 и от 17.06.2021 № 07/06.

При таких обстоятельствах арбитражный суд полагает, что предписания от 04.06.2021 № 07/05 и от 17.06.2021 № 07/06 не нарушают права и законные интересы заявителя при осуществлении им деятельности по управлению спорными многоквартирными домами. 

Целью данного правового регулирования является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

В соответствии с частью 3 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного требования. 

На основании изложенного в удовлетворении заявлений ООО «Вертикаль» следует отказать. 

Расходы по уплате государственной пошлины относятся на заявителя на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении заявлений общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль» к Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики                о признании недействительными предписаний от 04.06.2021 № 07/05 и от 17.06.2021 № 07/06 отказать.  

            Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано                   в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

 

Судья

А.А. Афанасьев