АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

156000, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2 http://kostroma.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

/ в соответствии со ст. 176 АПК РФ/ 

Р Е З О Л Ю Т И В Н А Я Ч А С Т Ь Р Е Ш Е Н И Я

 

«21» июня 2021 г. по результатам рассмотрения дела № А31-17463/2019 

Суд первой инстанции в составе председательствующего: судьи  Тетерина О.В.  

руководствуясь ст.ст. 110, 150, 167 – 171, 173, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации  

Р Е Ш И Л :

иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью строительная  компания «Волга-Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение  60 дней после вступления решения суда в законную силу устранить  следующие недостатки выполненных работ при строительстве  многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>:  

- устранить проседание отмостки между подъездами № 1 и № 2, а также с  торца подъезда № 1 в месте расположения ШПРГ, а именно произвести  подсыпку и уплотнить грунт, подлить бетонную отмостку;  

- устранить причину попадания ливневых вод в подвальное помещение  подъезда № 1 с торца дома, а именно произвести работы согласно проектной  документации 990/13-ПЗУ Раздел 2. «Схема планировочной организации  земельного участка» том 2 лист 4 уклона рельефа от дома № 3, корпус 2, а  именно тротуара с фасадной стороны, на въезде на гостевые автостоянки,  расположенной с обратной стороны дома № 3, корпус 2 по ул. Даремская  смонтировать валик отвода поверхностных вод,  

- загерметизировать примыкание труб вентиляционной трубы выше  уровня кровли газодымоходного канала, установить металлические фартуки,  

- произвести ремонт межпанельных швов в районе квартир №№ 30, 31, 34,  35, 59, 64, 67. Произвести прочистку поверхностей от плесени и выполнить  

антисептирование внутренних поверхностей в квартирах №№ 30, 31, 34, 35,  59, 64, 67 в районе межпанельных швов,  

- выполнить работы по заделке снаружи стыка панелей в верхнем углу  примыкания стеновых плит и плиты перекрытия, устранить плесень по углам  выхода на крышу подъездов № 1 и № 2 и выполнить антисептирование  внутренних поверхностей.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная  компания «Волга-Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания  Градская» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6 000 руб. расходов по  уплате государственной пошлины.  

Производство по делу в части требований истца к ответчику об обязании  устранить недостатки выполненных работ при строительстве  многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...> прекратить.  

Исполнительный лист выдается после вступления решения в законную  силу по заявлению взыскателя.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение  месяца со дня его принятия, а со дня вступления решения в законную силу – в  кассационном порядке в течение двух месяцев при условии, что оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная или кассационная жалобы подаются через Арбитражный  суд Костромской области.  

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании и  приобщена к делу.  

Судья О.В. Тетерин 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 12.01.2021 16:22:30Кому выдана Тетерин Олег Валерьевич