Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040

http://kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Калининград

Дело №

А21-9113/2022

«14»

ноября

2022 года

 

Резолютивная часть решения объявлена  

«07»

ноября

2022 года

 

Решение изготовлено в полном объеме   

«14»

ноября

2022 года

 

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.

при ведении протокола судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «ГУСЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» к обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ И МОНТАЖ» о взыскании 956 712,4 рублей

при участии в заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности

от ответчика: н/я

установил. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «ГУСЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»обратилось в суд иском к обществу с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ И МОНТАЖ" о взыскании неустойки в сумме 956 712,4 рублей.

Дело рассмотрено в  порядке статьи 156 АПК РФ.

В судебном заседании 31.10.2022 года истец уточнил требования, просил взыскать неустойку за ранее заявленный период в сумме 888 124,5 рублей. Уточненные требования приняты судом к рассмотрению.

Судом установлено.

Между сторонами был заключен контракт от 08.09.2021 года № 03335200014921002760.

По условиям контракта ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ И МОНТАЖ" (поставщик) обязалось в срок по 20.12.2021 года поставить и смонтировать модульный фельдшерско-акушерский пункт (пункта 1.1, 2.2).

В соответствии с пунктом 3.1 контракта его цена была согласована 35 173 250 рублей.

Поставщик  обязательства по договору не выполнил, уведомлением от 06.04.2022 года № 712 поставщик извещен об отказе заказчика от исполнения договора. 

В связи с нарушением срока поставки и монтажа, установленного контрактом, истец обратился в суд с иском (уточненным)  о взыскании неустойки по положениям пункта 6.8 контракта за период с 21.12.2021 года по 31.03.2022 года в сумме 888 124,5 рублей.

В отзыве поставщик указал, что 28.10.2022 года им оплачено 15 000 рублей (без приложения платежного поручения), просил применить положения статьи 333 ГК РФ и снизить размер неустойки.

Факт нарушения обязательств по контракту подтвержден материалами дела и не оспорен поставщиком.

Согласно расчету истца за период с 21.12.2021 года по 31.10.2022 года подлежит уплате неустойка в сумме 888 124,5 рублей: 35 173 250 х 7,5% х 101 : 300.

Расчет неустойки проверен судом, признан обоснованным. 

Оснований для применения положений статьи 333 ГК РФ судом не установлено.

Судом объявлялся перерыв по делу для проверки  истцом довода поставщика о перечислении 15 000 рублей. Истец получение денежных средств не подтвердил.

Требования истца в сумме 888 124,5 рублей подлежат удовлетворению на основании положений статьи 330 ГК РФ, положений  контракта от 08.09.2021 года № 03335200014921002760.

Решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ И МОНТАЖ» (ОГРН 

<

***>) в пользу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «ГУСЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» (ОГРН 

<

***>) неустойку в сумме 888 124,5 рублей, расходы по госпошлине в сумме 20 762 рублей.  

Возвратить  государственному бюджетному учреждению здравоохранению Калининградской области «ГУСЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» из Федерального бюджета госпошлину в сумме 1392 рублей.

Решение может быть обжаловано в  месячный срок в арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                    О.Н.Шкутко