АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации

Дело № А40-120825/24-126-907

г. Москва

28 октября 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 09 сентября 2024года  

Полный текст решения изготовлен 28 октября 2024 года Арбитражный суд г. Москвы в составе: председательствующего судьи Новикова М.С. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Антоновским С.А., рассматривает в судебном заседании дело по иску МИНОБОРОНЫ РОССИИ (ИНН 

<

***>) к ППК "ВСК" (ИНН 

<

***>) 

третье лицо - АО "31 ГПИСС" (Москва, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  05.08.2009, ИНН: 

<

***>, КПП: 770401001)  

о взыскании 1 061 452,42 руб. При участии представителей: от истца: ФИО1, доверенность от 24.04.2024. от ответчика: ФИО2, доверенность от 22.01.2024. от третьего лица: ФИО3 по дов. от 01.01.2024 

УСТАНОВИЛ:

Минобороны России (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города  Москвы с иском о взыскании с ППК "ВСК" (далее - ответчик) неустойки в размере 1  061 452 руб. 42 коп. по государственному контракту от 20.11.2020 №  2022187377082554164000000.  

Определением Арбитражного суда города Москвы от 31.07.2024 к участию в  рассмотрении заявления в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  

требований относительно предмета спора привлечено АО "31 ГПИСС".  

Истец исковые требования поддержал в полном объеме, с учётом возражений на  отзыв ответчика.  

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований, по доводам  отзыва, заявил о применении ст. 333 ГК РФ.  

Третье лицо, согласно представленному отзыву, против удовлетворения  заявленных требований возражало.  

Выслушав представителей сторон, исследовав и оценив, имеющиеся в деле  доказательства, суд считает исковые требования подлежащими частичному  удовлетворению, исходя из следующего.  

Как усматривается из материалов дела, между Министерством обороны  Российской Федерации (далее -Государственный заказчик) и и ППК «ВСК» (далее -  Генпроектировщик) заключен государственный контракт №  2022187377082554164000000 от 20.11.2020 (далее - Контракт).  

В соответствии с пунктом 4.1 Контракта цена Контракта составляет 20 471  599,26 руб.  

Согласно пункту 2.1 Контракта Генпроектировщик осуществляет разработку  градостроительной документации в объёме, необходимом для получения разрешения  на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, выполнение обследований, обмерных  работ, проведение инженерных изысканий, необходимых для подготовки проектной  документации, разработку проектной документации и рабочей документации для  реконструкции объекта в соответствии с условиями Контракта, в том числе раздела 16  Контракта, другими исходными данными, необходимыми для выполнения  Генпроектировщиком работ.  

Разделом 3 Контракта установлены сроки выполнения обязательств:  выполнение обследований, обмерных работ - 30.06.2021;  

 проведение инженерных изысканий - 30.08.2021; разработка градостроительной  документации - 01.10.2021;  

разработка проектной документации - 29.10.2021; 

получение положительного заключения Государственной экспертизы проектной  документации - 30.12.2021;  

разработка рабочей документации - 31.01.2022; 

подписание итогового акта приемки выполненных работ - 28.02.2022.  

Обязательства по Контракту в полном объеме Генпроектировщиком не  исполнены.  

В соответствии с разделом 13 Контракта Министерством обороны Российской  Федерации в адрес ответчика направлена претензия от № 153/6/1539дсп от 28.01.2022.  

Претензия оставлена без удовлетворения. 

Вышеизложенные обстоятельства послужили основанием для обращения  Минобороны России в суд с иском.  

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства сторон по  договору должны исполняться надлежащим образом.  

Исходя из положений ст. 310 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от  исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за  исключением случаев, предусмотренных законом.  

В соответствии со статьей 401 Гражданского кодекса Российской Федерации  (далее - ГК РФ) лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его  ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или  неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные  основания ответственности.  

Пунктом 3 статьи 405 ГК РФ установлено, что должник не считается  просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки  кредитора. В силу пункта 1 статьи 406 ГК РФ кредитор считается просрочившим, если  он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не  совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или  договором либо вытекающих из обычаев делового оборота или из существа  обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего  обязательства.  

В соответствии со статьей 783 Гражданского кодекса к договору возмездного  оказания услуг применяются общие положения о подряде (статьи 702 - 729 Кодекса),  если это не противоречит статьям 779 - 782 Кодекса, а также особенностям предмета  договора возмездного оказания услуг.  

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона  (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)  определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять  результат работы и оплатить его.  

Соглашением сторон в соответствии со ст. ст. 421, 431 ГК РФ стороны вправе  предусмотреть размер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение  условий договора.  

В соответствии с п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса РФ, неустойкой признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан  уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Критериями для  установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно  

высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки над суммой  возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, длительность неисполнения  обязательств и др. (Информационное письмо президиума ВАС РФ от 14.07.1997 № 17).  

По состоянию на 30.06.2021 выполненных работ по Контракту Генподрядчиком  не представлено, в связи с чем, оснований для уменьшения цены Контракта в целях  расчета неустойки не имеется.  

Согласно пункту 10.4 Контракта в случае нарушения сроков выполнения этапов  работ, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик требует уплату  неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения  Генпроектировщиком данного обязательства начиная со дня, следующего после дня  истечения установленного срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой  действующей на дату уплаты неустойки (пени) ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации (далее - ЦБ РФ) от цены Контракта, уменьшенной на сумму,  пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически  исполненных Генпроектировщиком.  

Просрочка выполнения работ по этапу «выполнение обследований, обмерных  работ» с 01.07.2021 по 30.08.2021 составляет 61 день.  

Просрочка выполнения работ по этапу «проведение инженерных изысканий» с  31.08.2021 по 01.10.2021 составляет 32 дня.  

Просрочка выполнения работ по этапу «разработка градостроительной  документации» с 02.10.2021 по 29.10.2021 составляет 28 дней.  

Просрочка выполнения работ по этапу «разработка проектной документации» с  30.10.2021 по 30.12.2021 составляет 62 дня.  

Неустойка за нарушение сроков выполнения этапов работ по Контракту  рассчитывается по формуле: (цена Контракта - стоимость фактически выполненных  работ) х размер ключевой ставки, установленный ЦБ РФ х 1/300 х количество дней  просрочки.  

По расчету истца итоговая сумма неустойки составляет 1 061 452 руб. 42 коп.  

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и  возражений; обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела,  определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц,  участвующих в деле.  

В соответствии с ч. 1 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства  по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном,  объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.  

Частично удовлетворяя заявленные требования, суд исходил из следующего.  

Как указывает ответчик в своем отзыве, из текста искового заявления следует,  что Государственный заказчик предъявляет требования о нарушении каждого из этапов  производства работ, но рассчитывает неустойку исходя не из стоимости конкретного  этапа, а от общей стоимости Контракта.  

В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может  обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника,  поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами,  предусмотренными законом или договором.  

В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан  уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  

Неустойка, как способ обеспечения обязательства, должна компенсировать  кредитору расходы или уменьшить неблагоприятные последствия, возникшие  вследствие ненадлежащего исполнения должником своего обязательства перед  кредитором.  

Превращение института неустойки в способ обогащения кредитора  недопустимо и противоречит ее компенсационной функции.  

Действующее гражданское законодательство допускает исполнение  обязательства по частям (ст. 311 ГК РФ).  

Начисление неустойки на общую сумму Контракта без учета надлежащего  исполнения части работ противоречит принципу юридического равенства,  предусмотренному п. 1 ст. 1 ГК РФ, поскольку создает преимущественные условия  кредитору, которому, следовательно, причитается компенсация не только за не  исполненное в срок обязательство, но и за те работы, которые были выполнены  надлежащим образом или срок выполнения которых еще не наступил.  

Согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 15.07.2014 г. № 5467/14 и Определении Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.12.2015 г. № 307-ЭС15-15798  начисление неустойки на общую сумму контракта, а не на стоимость просроченного  обязательства является злоупотреблением правом (статья 10 ГК РФ).  

Вместе с тем, суд считает, что расчет неустойки истца произведен неверно,  поскольку начисление неустойки последним произведено не от цены этапа, а от цены  Контракта.  

Так, суд соглашается с расчётом ответчика, представленном в отзыве на  исковое заявление, что с учётом стоимости этапа работ общий размер неустойки  составляет 159 009 руб. 73 коп.  

Ответчиком заявлено о применении судом ст. 333 ГК РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно  несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить  неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим  предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии  заявления должника о таком уменьшении.  

Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности,  под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства ГК РФ  предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет  адекватна и соизмерима с нарушенным интересом (Определение Верховного суда РФ  от 24.02.2015г. по делу № 5-КГ14-131).  

Снижение неустойки судом возможно только в одном случае - в случае явной  несоразмерности неустойки последствиям нарушения права.  

Согласно п. 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7,  при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства  необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего  незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими  денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия  правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).  

При этом, судам необходимо принимать во внимание конкретные  обстоятельства дела, учитывая в том числе: соотношение сумм неустойки и основного  долга; длительность неисполнения обязательства; соотношение процентной ставки с  размерами ставки рефинансирования; недобросовестность действий кредитора по  принятию мер по взысканию задолженности; имущественное положение должника.  

Исходя из конкретных обстоятельств дела, подлежащая уплате неустойка  несоразмерна последствиям нарушения обязательства, в связи с чем, суд находит  основания для ее уменьшения до 100 000 руб.  

Судом рассмотрены иные доводы ответчика, однако они не могут служить  основанием для отказа в удовлетворении заявленных исковых требований, так как не  подтверждены доказательствами, противоречат материалам дела и основаны на  неверном толковании норм права.  

По правилам статей 65, 66, 68 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле,  должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих  требований и возражений. Доказательства представляются лицами, участвующими в  деле. Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены  определенными доказательствами, не могут быть подтверждены другими  доказательствами.  

В соответствии со ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск  наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных  действий.  

Кроме того, Ответчиком не представлено доказательств, что предусмотренные  Контрактом работы не могли быть выполнены Генподрядчиком в сроки,  установленные Контрактом, ввиду нарушений со стороны Государственного заказчика.  Как и не представлено доказательств того, что ответчиком были приняты меры для  надлежащего исполнения обязательства, согласно положениям статьи 719  Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на ответчика.  

В соответствии с п. 3 ст. 110 АПК РФ государственная пошлина, от уплаты.  которой в установленном порядке истец был освобожден, взыскивается с ответчика в  доход федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых  требований, если ответчик не освобожден от уплаты государственной пошлины.  

Учитывая ст. ст. 8, 12, 307-310, 330, 333, 702, 711, ГК РФ, руководствуясь ст. ст.  65, 68, 71, 75, 110, 123, 137, 156, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с ППК "ВСК" (ИНН 

<

***>) в пользу МИНОБОРОНЫ РОССИИ  (ИНН 

<

***>) 100 000 (сто тысяч) руб. неустойки.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  

Взыскать с ППК "ВСК" (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 5 770 (пять тысяч семьсот семьдесят) руб.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: М.С. Новиков