113/2023-158360(1) 

 

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12  

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru 

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  № 09АП-30320/2023

Дело № А40-3188/23

г. Москва

13 июня 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 06 июня 2023 года  Постановление изготовлено в полном объеме 13 июня 2023 года  

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Новиковой Е.М., судей Порывкина П.А., Фриева А.Л., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО  "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОСТНИК", на решение  Арбитражного суда г. Москвы от «16» марта 2023 года по делу № А40-3188/23, по иску  ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КРОНОС" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к ООО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОСТНИК"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании,  

при участии в судебном заседании: от истца: ФИО2 по доверенности от 18.10.2022, от ответчика: ФИО3 по доверенности от 14.02.2023. 

УСТАНОВИЛ:

ООО "СК "Кронос" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города  Москвы с иском к ООО "ПСК "Мостник" (далее – ответчик) о взыскании  неотработанного аванса в виде неосновательного обогащения в размере 9 400 000 руб.,  неустойки в размере 8 162 772 руб. 14 коп., процентов по статье 395 ГК РФ в размере  353 208 руб. 22 коп., с последующим начислением за период с 08.09.2022 по дату  фактического исполнения обязательства по возврату неосновательного обогащения.  

Решением Арбитражного суда города Москвы с ООО "ПСК "МОСТНИК" (ИНН  

<

***>) в пользу ООО "СК "КРОНОС" (ИНН 

<

***>) взысканы денежные  средства в размере 9 400 000 руб., неустойка в размере 2 908 573 руб. 98 коп., проценты  за пользование чужими денежными средствами согласно ст. 395 ГК РФ в размере  

353 208 руб. 22 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами  согласно ст. 395 ГК РФ, начисляемые на денежные средства (9 400 000 руб.) с  08.09.2022 по дату фактической оплаты денежных средств, а также расходы по оплате  государственной пошлины в размере 86 308 руб. 91 коп. В удовлетворении остальной  части исковых требований отказано.  

Ответчик не согласился с выводами суда, обратился с апелляционной жалобой, в  которой просит решение суда первой инстанции отменить по мотивам, изложенным в  жалобе.  

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции судебного  акта проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии с главой 34  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы  апелляционной жалобы, просил решение суда отменить. Представитель истца против  доводов апелляционной жалобы возражал, просил апелляционную жалобу - без  удовлетворения.  

Выслушав объяснения представителей истца и ответчика, исследовав и оценив в  совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, изучив  доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд не находит  оснований для изменения или отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.  

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции,  28.01.2022 между истцом (подрядчиком) и ответчиком (субподрядчиком) был заключен  договор № 28/01/22- 362 на выполнение работ по строительству объекта "А-113  строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область).  Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от  транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31  (пересечение с автомобильной дорогой М-10 "Россия", граница работ по пусковому  комплексу № 5"). Строительство съезда № 5 и эстакады в его составе на транспортной  развязке № 18. Путепровод на съезде № 5 через а/д Бухарово-Кочугино", ценой 93 824  967 руб. 13 коп. (пункт 3.1), в срок до 20.12.2022 (пункт 4.1).  

Также судом установлен факт авансирования истцом ответчика в размере 9 400 000 руб., согласно представленным платежным поручениям. 

Поскольку ответчик к выполнению работ не приступил, что следует из  отсутствия актов (формы № КС-2) и справок (формы № КС-3), истец обратился в адрес  ответчика с претензией исх. № 19-04/323 от 19.04.2022, содержащей требования  приступить к выполнению работ по договору.  

Ответчик уведомлением исх. № 24/04 от 23.04.2022 сообщил о невозможности  выполнения работ, ссылаясь на неисполнение истцом условий пунктов 6.1, 6.2  договора, выраженные в непредставлении строительной площадки и проектной  документации, а также неблагоприятные погодные условия (снеготаяние, паводки).  

В связи с чем истец уведомлением исх. № 27-04/348 от 27.04.2022, в  соответствии с пунктом 15.3 договора и пунктом 2 статьи 715 ГК РФ отказался от  исполнения договора в одностороннем порядке, с указанием на необходимость  возврата аванса и уплаты неустойки.  

Уведомлением исх. № 17/05 от 17.05.2022 ответчиком указано на невозможность  выполнения работ в установленные договором сроки, поскольку истцом не была  передана проектная документация, а также постоянно вносились изменения в  конструктивные решения, выражено несогласие с расчетом начисленной неустойки.  

Поскольку в ответ на направленную претензию ответчик свои обязательства не  исполнил, истец обратился с настоящим иском в суд.  

Арбитражный апелляционный суд согласен с выводами суда первой инстанции о  частичном удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.  

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим  образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.  Односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение его  условий не допускаются.  

Согласно пункту 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда  подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика  

определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется  создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат  и уплатить обусловленную цену.  

Пунктом 3 статьи 450 ГК РФ предусмотрено, что в случае одностороннего  отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается  законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или  измененным.  

Право заказчика на односторонний отказ от исполнения договора предусмотрен  также положениями статей 715, 717 ГК РФ.  

Таким образом, применительно к спорным правоотношениям отказ от  исполнения договора допустим как в силу закона, так и предусмотрен соглашением  сторон.  

Статья 715 ГК РФ устанавливает возможность отказа от исполнения договора в  связи с его ненадлежащим исполнением подрядчиком в случае, когда подрядчик не  приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу  настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным либо  становится очевидным, что работа не будет выполнена надлежащим образом. В  соответствии со ст. 717 ГК РФ заказчик может отказаться от исполнения договора  немотивированно.  

В данных статьях предусмотрены различные последствия отказа от договора.  Так, например, в случае отказа от исполнения договора на основании ст. 715 ГК РФ, у  заказчика возникает право требования возмещения убытков.  

В то же время при отказе от исполнения договора на основании ст. 717 ГК РФ у  заказчика не возникает указанного права. Напротив, он обязан будет уплатить  подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной  до получения извещения об отказе. Кроме того, у заказчика возникнет обязанность  возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в  пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены,  выплаченной за выполненную работу.  

Принимая во внимание приведенные положения законодательства, суд первой  инстанции пришел к верному выводу, что договор должен считаться расторгнутым с  27.04.2022. Отказ истца от договора ответчиком не оспорен. Спор в отношении  определения даты признания договора расторгнутым между сторонами отсутствует.  

Положения пункта 4 статьи 453 ГК РФ в соответствии с которым стороны не  вправе требовать возмещения того, что было исполнено ими по обязательству до  момента расторжения договора, не исключают возможности истребовать в качестве  неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные  средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было  предоставлено и обязанность его предоставить отпала (пункт 1 Информационного  письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 N 49 "Обзор практики рассмотрения споров,  связанных с применением норм о неосновательном обогащении").  

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом,  иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество  (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему  неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное  обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 указанного Кодекса.  

Судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе  состязательности и равноправия сторон (статьи 8, 9 АПК РФ). Доказательства  представляются лицами, участвующими в деле. Каждое лицо, участвующее в деле,  должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих  требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления  последствий совершения (не совершения) ими процессуальных действий (часть 2  

статьи 9, части 1 и 3 статьи 65, часть 1 статьи 66 АПК РФ). Арбитражный суд  оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на  всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в  деле доказательств (часть 1 статьи 71 АПК РФ).  

Вместе с тем, ответчиком в нарушение ст. 65 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации не представлено доказательств выполнения работ и/или  несения затрат на сумму аванса.  

Таким образом, судом первой инстанции правомерно удовлетворены исковые  требования о взыскании 9 400 000 руб.  

На основании статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и  конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре  могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы  (промежуточные сроки).  

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не  предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как  начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.  

Согласно ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная  законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору  в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в  случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан  доказывать причинение ему убытков.  

Так истцом применительно к пункту 13.2 договора исчислена неустойка за  период с 29.01.2022 по 27.04.2022 (87 дней) в размере 8 162 772 руб. 14 коп.  

Как верно установлено судом первой инстанции, ответчиком не представлено  доказательств отсутствия его вины, правом, предусмотренным положениями статей  716, 719 ГК РФ, ответчик не воспользовался, о приостановлении выполнения работ в  связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по передаче  строительной площадки и проектной документации, не сообщил.  

Также суд первой инстанции признал представленный истцом расчет неустойки  арифметически и методологически выполненным неверно, в то время как контррасчет  ответчика является верным и подлежащим применению, поскольку в последнем  применено ограничение периода начисления неустойки 31.03.2022, как то  предусмотрено постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 "О введении  моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым  кредиторами".  

Правила статьи 333 ГК РФ предусматривают право суда уменьшить  подлежащую уплате неустойку в случае ее явной несоразмерности последствиям  нарушения обязательства.  

Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности,  под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства  предполагается выплата кредитору такой компенсации его потерь, которая будет  адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.  

Исходя из правовой позиции, выраженной в Определении Конституционного  Суда Российской Федерации от 21.12.2000 N 263-О, предоставленная суду возможность  снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями  нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в  законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения  размера неустойки, то есть, по существу, - на реализацию требования статьи 17 (часть  3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и  свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.  

Именно поэтому в части первой статьи 333 ГК РФ речь идет не о праве суда, а,  по существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю  

мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба,  причиненного в результате конкретного правонарушения.  

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 71 Постановления Пленума  Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 г. N 7 "О применении судами  некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об  ответственности за нарушение обязательств", если должником является коммерческая  организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация  при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом  допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может  быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333  Гражданского кодекса Российской Федерации).  

В силу диспозиции статьи 333 ГК РФ основанием для ее применения может  служить только явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения  обязательств. При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения  обязательства суду необходимо учитывать, что при установлении, осуществлении и  защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники  гражданских правоотношений должны действовать добросовестно; никто не вправе  извлекать преимущества из своего незаконного или недобросовестного поведения  (пункты 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Таким образом, неустойка является мерой гражданско-правовой  ответственности должника в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  договорных обязательств, носит компенсационный характер по отношению к  возможным убыткам кредитора, направленный на восстановление нарушенных прав  кредитора, а не карательный (штрафной) характер.  

Суд первой инстанции, применяя к спорным правоотношениям положения  статьи 333 ГК РФ и уменьшая размер неустойки на 50% от размера неустойки,  определенной контррасчетом, до 2 908 573 руб. 98 коп., учел чрезмерно высокий  размер неустойки, обоснованно принял во внимание компенсационный характер  неустойки, а также принцип ее соразмерности последствиям неисполнения  обязательств должником.  

Довод ответчика о еще большем снижении неустойки отклоняется, поскольку  доказательств наличия оснований для снижения размера неустойки, определенного  судом первой инстанции, ответчиком не представлено, из материалов дела такие  основания не усматриваются.  

Более того, при включении в договор положений о штрафных санкциях за  просрочку исполнения обязательств и их размере стороны действовали добровольно,  доказательств наличия в договоре признаков кабальности сделки в материалы дела не  представлено.  

Правовых оснований для переоценки выводов суда первой инстанции в  указанной части судом апелляционной инстанции не установлено.  

Дополнительно истцом заявлено требование о взыскании процентов 

(пункт 1 статьи 395, пункт 2 статьи 1107 ГК РФ) за период с 28.04.2022 по 07.09.2022 в  размере 353 208 руб. 22 коп., и, с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 48  постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О  применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской  Федерации об ответственности за нарушение обязательств", с последующим  начислением за период с 08.09.2022 по дату фактического исполнения обязательства по  возврату неосновательного обогащения.  

Расчет судом проверен и признан верным. 

Таким образом, судом первой инстанции правомерно удовлетворены исковые  требования в указанной части.  

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, направлены на  переоценку обжалуемого судебного акта, не содержат фактов, которые не были бы  проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы  юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на  обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой  инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не  могут служить основанием для отмены оспариваемого решения суда.  

Фактические обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения  спора по существу, установлены судом на основании полного и всестороннего  исследования имеющихся в деле доказательств, отвечающих признакам относимости,  допустимости и достаточности.  

Судом первой инстанции дана надлежащая оценка всем имеющимся в деле  доказательствам, оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта не  имеется.  

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для  отмены принятого судебного акта, арбитражным апелляционным судом не  установлено.  

Апелляционная жалоба заявителя удовлетворению не подлежит. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 271  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 16.03.2023 по делу 

 № А40-3188/23 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.  

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в  законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев  со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского  округа.  

Председательствующий судья Е.М. Новикова  

Судьи П.А. Порывкин  

 А.Л. Фриев