АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

 

 

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-8056/2017

г. Чебоксары

23 октября 2017 года

Резолютивная часть решения оглашена 16.10.2017.

 

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Новожениной О.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Гарант", ОГРН:1132130006007 ИНН:2130119265 г. Чебоксары,

к открытому акционерному обществу "Чувашавтодор", ОГРН:1082130014812 ИНН:2130047821 г. Чебоксары,  

о взыскании 12228068 руб. 40 коп.

при участии

от истца: ФИО2 по доверенности №87 от 30.03.2017,

от ответчика: ФИО3 по доверенности №04 от 15.05.2017,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Гарант" обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с открытого акционерного общества "Чувашавтодор" 13053156 руб. 40 коп., в том числе:

- 96000 руб. долга по оплате услуг, оказанных согласно универсальному передаточному документу №178 от 01.08.2015 в рамках договора №9 на оказание услуг строительными механизмами от 01.06.2015;

- 825088 руб. долга по оплате товара, переданного по универсальному передаточному документу №121 от 20.08.2015 в рамках договора поставки №144 от 20.08.2015;

- 1054751 руб. долга по оплате работ, выполненных согласно акту о приемке выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ №1 от 24.08.2015 в рамках договора субподряда №23 дс. сод. на содержание республиканских автомобильных дорог в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики от 21.08.2015;

- 2944905 руб. 92 коп. долга по оплате товара, переданного по универсальным передаточным документам №241 от 05.11.2015, №255 от 09.11.2015, №256 от 11.11.2015, №273 от 19.11.2015, №296 от 30.11.2015, №302 от 11.12.2015, №395 от 28.12.2015, №382 от 30.12.2015, №383 от 30.12.2015, №389 от 30.12.2015;

- 7921799 руб. 38 руб. долга по оплате работ, выполненных согласно актам о приемке выполненных работ и справкам о стоимости выполненных работ №2 от 10.12.2015, №3 от 10.12.2015, №1 от 15.12.2015 в рамках договора субподряда №41-дс на ремонт автомобильной дороги по ул. 10 Пятилетки в г. Новочебоксарске Чувашской Республики от 24.11.2015;

- 99937 руб. долга по оплате услуг, оказанных согласно универсальному передаточному документу №303 от 11.12.2015;

- 67500 руб. долга по оплате товара, переданного по универсальному передаточному документу №230 от 17.12.2015 в рамках договора поставки №220 от 17.12.2015;

- 43175 руб. 10 руб. долга по оплате услуг, оказанных согласно универсальному передаточному документу №8 от 25.01.2016 и акту №28 от 29.02.2016 в рамках договора субподряда №23 на содержание автомобильных дорог общего пользований местного значения и искусственных сооружений на них в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики в 2016 году от 18.12.2015.

В заседании суда представитель истца заявил ходатайство об уменьшении размера исковых требований до 12228068 руб. 40 коп., в том числе:

- 96000 руб. долга по оплате услуг, оказанных согласно универсальному передаточному документу №178 от 01.08.2015 в рамках договора №9 на оказание услуг строительными механизмами от 01.06.2015;

- 1054751 руб. долга по оплате работ, выполненных согласно акту о приемке выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ №1 от 24.08.2015 в рамках договора субподряда №23 дс. сод. на содержание республиканских автомобильных дорог в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики от 21.08.2015;

- 2944905 руб. 92 коп. долга по оплате товара, переданного по универсальным передаточным документам №241 от 05.11.2015, №255 от 09.11.2015, №256 от 11.11.2015, №273 от 19.11.2015, №296 от 30.11.2015, №302 от 11.12.2015, №395 от 28.12.2015, №382 от 30.12.2015, №383 от 30.12.2015, №389 от 30.12.2015;

- 7921799 руб. 38 руб. долга по оплате работ, выполненных согласно актам о приемке выполненных работ и справкам о стоимости выполненных работ №2 от 10.12.2015, №3 от 10.12.2015, №1 от 15.12.2015 в рамках договора субподряда №41-дс на ремонт автомобильной дороги по ул. 10 Пятилетки в г. Новочебоксарске Чувашской Республики от 24.11.2015;

- 99937 руб. долга по оплате услуг, оказанных согласно универсальному передаточному документу №303 от 11.12.2015;

- 67500 руб. долга по оплате товара, переданного по универсальному передаточному документу №230 от 17.12.2015 в рамках договора поставки №220 от 17.12.2015;

- 43175 руб. 10 руб. долга по оплате услуг, оказанных согласно универсальному передаточному документу №8 от 25.01.2016 и акту №28 от 29.02.2016 в рамках договора субподряда №23 на содержание автомобильных дорог общего пользований местного значения и искусственных сооружений на них в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики в 2016 году от 18.12.2015.

Представитель ответчика исковые требования не оспорил. В отзыве на исковое заявление ответчик указал на то, что по данным бухгалтерского учета ОАО "Чувашавтодор", задолженность составляет 12163798 руб. 30 коп.

Выслушав представителей сторон и изучив материалы дела, суд установил следующее.

01.06.2015 открытым акционерным обществом "Чувашавтодор" (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Гарант" (исполнитель) заключен договор №9 на оказание услуг строительными механизмами, по условиям которого исполнитель оказывает заказчику услуги путем предоставления асфальтоукладчика BOMAG BF-600C для выполнения определенной работы в соответствии с назначением механизма.

В пункте 2.1 договора стоимость 1 машино-часа с НДС стороны согласовали в размере 4000 руб.

Оплата за оказанные услуги производится заказчиком в течение месяца после предъявления оформленных в установленном порядке документов (пункт 3.2 договора).

Согласно подписанному сторонами универсальному передаточному документу №178 от 01.08.2015 истцом ответчику оказаны услуги на сумму 96000 руб.

Кроме того, как следует из подписанного сторонами универсального передаточного документа №303 от 11.12.2015, истцом ответчику оказаны услуги погрузчика на сумму 99937 руб.

Оценив вышеуказанные правоотношения сторон, суд приходит к выводу о том, что данные правоотношения регулируются нормами главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации о возмездном оказании услуг.

В соответствии с частью 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В силу части 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

17.12.2015 сторонами заключен договор поставки №220 от 17.12.2015, по условиям которого истец (поставщик) обязуется передать ответчику (покупателю), а покупатель принять и оплатить на условиях настоящего договора резец дорожный Wirtgen №8 в количестве 150 штук.

В пункте 4.3 договора стороны согласовали следующий порядок расчетов за товар - отсрочка платежа 14 календарных дней.

По универсальному передаточному документу №230 от 17.12.2015 истец передал ответчику товар на сумму 67500 руб.

Согласно статьям 454, 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик обязуется передать в обусловленный срок или сроки товары покупателю, а покупатель обязуется принять эти товары и уплатить за них определенную денежную сумму (цену).

В силу пункта 1 статьи 486, пункта 1 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель обязан оплатить товар в предусмотренные договором сроки с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

Кроме того, по универсальным передаточным документам №241 от 05.11.2015, №255 от 09.11.2015, №256 от 11.11.2015, №273 от 19.11.2015, №296 от 30.11.2015, №302 от 11.12.2015, №395 от 28.12.2015, №382 от 30.12.2015, №383 от 30.12.2015, №389 от 30.12.2015 истец передал ответчику товар на общую сумму 2944905 руб. 92 коп.

Согласно статье 454 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

В соответствии с пунктом 1 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

21.08.2015 сторонами заключен договор субподряда №23 дс.сод. на содержание республиканских автомобильных дорог в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики, по условиям которого ответчик (подрядчик) поручает, а истец (субподрядчик) принимает на себя обязательства по выполнению работ по содержанию республиканских автомобильных дорог в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики, обеспечивающих безопасное и бесперебойное движение транспортных средств.

Виды и объемы работ стороны согласовали в приложении №1 к договору.

Цена договора определяется из учета стоимости 1 м2 ямочного ремонта по фактически выполненным объемам.

Стоимость 1 м2 ямочного ремонта определяется территориальным сборником сметных цен и расценок, применяемых при проведении работ по содержанию автомобильных дорог в уровне цен по состоянию на 3 кв. 2013 года с пересчетом в текущий уровень цен по прогнозным индексам-дефляторам (приложение №2 к договору - калькуляция).

Оплата за выполненные работы по настоящему договору производится в течение 5 дней при условии перечисления заказчиком (КУ "Чувашупрдор" Минтранса Чувашии) подрядчику средства республиканского бюджета в 2015 году (пункт 2.1 договора).

Сроки выполнения работ - август 2015 года (пункт 6.1 договора).

Согласно акту о приемке выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ №1 от 24.08.2015 в рамках договора субподряда №23 дс. сод. на содержание республиканских автомобильных дорог в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики от 21.08.2015 истцом работы выполнены на сумму 1054751 руб.

24.11.2015 сторонами заключен договор субподряда №41-дс на ремонт автомобильной дороги по ул. 10 Пятилетки в г. Новочебоксарске Чувашской Республики, по условиям которого ответчик (подрядчик) поручает, а истец (субподрядчик) принимает на себя обязательство выполнить объемы по ремонту автомобильной дороги по ул. 10 Пятилетки в г. Новочебоксарске Чувашской Республики.

Стоимость работ на момент подписания договора составляет 68220405 руб. с учетом НДС 18% (пункт 3.1 договора).

Подрядчик осуществляет оплату субподрядчику за выполненные работы по настоящему договору способом безналичного расчета платежным поручением после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ (формы №КС-2 и №КС-З), исполнительной документации. 

Обязательства Подрядчика перед субподрядчиком по оплате выполненных работ субподрядчиком возникают только после проверки актов о приемке выполненных работ формы №КС-2 автономным учреждением Чувашской Республики "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве ЧР" Минстроя Чувашии и приемки выполненных работ заказчиком (Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики) и поступления денежных средств подрядчику от заказчика. В этом случае оплата производится в течение 20 дней с даты поступления денежных средств от Управления городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (пункт 4.1 договора).

Пунктом 4.2 договора предусмотрено, что субподрядчик оплачивает услуги подрядчика в размере 3% от стоимости работ по настоящему договору. Возмещение услуг производится путем удержания их стоимости из стоимости выполненных работ.

В пункте 5.1 договора стороны согласовали следующие сроки выполнения и завершения работ: начало - со дня подписания договора, окончание -15.12.2015.

Согласно актам о приемке выполненных работ и справкам о стоимости выполненных работ №2 от 10.12.2015, №3 от 10.12.2015, №1 от 15.12.2015 истцом работы выполнены на сумму 33982533 руб. 31 коп.

Таким образом, услуги ответчика, предусмотренные пунктом 4.2 договора, составляют 1019476 руб. и их стоимость подлежит удержанию из стоимости работ, выполненных истцом.

18.12.2016 сторонами заключен договор субподряда №23 на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики в 2016 году, по условиям которого истец (генподрядчик) поручает, а ответчик (субподрядчик) принимает на себя обязательства по выполнению всего комплекса работ и услуг на 2016 год по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики в 2016 году, обеспечивающих круглогодичное безопасное и бесперебойное движение транспортных средств, а также обустройство, безопасность дорожного движения и повышение пропускной способности автомобильных дорог (приложение №1).

Согласно пункту 2.1 договора общая стоимость работ и услуг по содержанию автомобильных дорог в 2016 году составляет 7584237 руб. 47 коп. с учетом НДС 18%.

В пункте 7.1 договора стороны согласовали следующие сроки выполнения работ: начало - 01.01.2016, окончание - 31.12.2016.

Пунктом 4.1.26 договора предусмотрено, что субподрядчик обязан оплатить генподрядчику генподрядные услуги в размере 3% от стоимости выполненных работ.

Согласно универсальному передаточному документу №8 от 25.01.2016 и акту №28 от 29.02.2016 в рамках договора субподряда №23 на содержание автомобильных дорог общего пользований местного значения и искусственных сооружений на них в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики в 2016 году от 18.12.2015 истцом ответчику оказаны услуги на сумму 43175 руб. 10 руб.

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса (пункт 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

С учетом уменьшения размера исковых требований истец просит взыскать с ответчика задолженность в размере 12228068 руб. 40 коп.

В отзыве на исковое заявление ответчик указал на то, что по данным бухгалтерского учета ОАО "Чувашавтодор", задолженность составляет 12163798 руб. 30 коп.

Доказательств оплаты товара, оказанных услуг и выполненных работ, как того требует статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчик не представил.

Как указано выше, по договору субподряда №41-дс на ремонт автомобильной дороги по ул. 10 Пятилетки в г. Новочебоксарске Чувашской Республики от 24.11.2015 ответчиком истцу оказаны услуги на сумму 1019476 руб. и их стоимость подлежит удержанию из стоимости работ, выполненных истцом.

При таких обстоятельствах требование о взыскании задолженности подлежит удовлетворению частично в размере 11208592 руб. 40 коп.

Государственную пошлину суд на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относит на стороны пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

взыскать с открытого акционерного общества "Чувашавтодор" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Гарант" 11208592 (одиннадцать миллионов двести восемь тысяч пятьсот девяносто два) руб. 40 коп. долга.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Гарант" в доход федерального бюджета 7015 (семь тысяч пятнадцать) руб. государственной пошлины.

Взыскать с открытого акционерного общества "Чувашавтодор" в доход федерального бюджета 77125 (семьдесят семь тысяч сто двадцать пять) руб. государственной пошлины.   

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

 

Судья

О.А. Новоженина