АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть объявлена 25.09.2019 г.)

Дело № А82-14694/2019

г. Ярославль

12 октября 2019 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Бессоновой И.Ю. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кареловой Н.Г., Максимовой Д.М. 

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление  Общества с ограниченной ответственностью "Виннер" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

к  Муниципальному казенному учреждению "Агентство по строительству города Ярославля" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

о   взыскании   1122986.75  руб.

при участии:

от истца – ФИО3 – представитель по доверенности от 29.04.2019 г.

от ответчика – не явились

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Виннер" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к муниципальному казенному учреждению "Агентство по строительству города Ярославля" о взыскании 1 109 475 руб. 97 коп., в том числе 1 042 006 руб. 08 коп., 67 469 руб. 89 коп. пени по состоянию на 15.07.2019г., о продолжении начисления пени по день фактического исполнения обязательства.

Истец в судебном заседании представил уточненное заявление, просил взыскать сумму основного долга в размере 1 042 006 руб. 08 коп., сумму пени в размере 78 775 руб. 65 коп. по состоянию на 18.09.2019г. в рамках требования о продолжении начисления пени.

Ответчик в заседание не явился, извещен, направил письменный отзыв на иск, указал, что согласно актам сумма выполненных работ составляет 1 042 473 руб. 08 коп., оспорил расчет пени, представил контррасчет, согласно которому сумма пени составляет 69 081 руб. 23 коп. по состоянию на 15.07.2019г.

В судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ объявлялся перерыв до 25.09.2019 г. до 14 час. 50 мин.

Информация о перерыве размещена на официальном сайте суда.

После перерыва судебное заседание продолжено с участием представителя истца.

Истец представил уточненное исковое заявление, просил взыскать сумму задолженности в размере 1 042 473 руб. 08 коп., сумму пени в размере 80 513 руб. 67 коп. по состоянию на 25.09.2019г. в рамках требования о продолжении начисления пени. Уточненное заявление направил ответчику.

Ответчик возражений на уточненный иск не направил.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

20.08.2018 г. между муниципальным казенным учреждением "Агентство по строительству" города Ярославля /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Виннер" /Подрядчик/ заключен муниципальный контракт № 227-18Д, согласно п.п. 1.1, 3.1, 3.2, 5.1, 5.4, 9.5 которого предметом настоящего контракта является выполнение работ по засыпке пазух в осях: 5-7/А-Е в объеме 26,84 куб. м. с послойным уплотнением слоями 15-20 см., до плотности грунта 1,65 т/куб. м. для здания школы с инженерными коммуникациями, по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Большая Октябрьская д. 64а. Срок начала выполнения Paбот - с даты заключения настоящего контракта. Срок окончания выполнения Работ- 28.12.2018 г. Цена настоящего контракта определяется на основании локального сметного расчета (Приложение № 2) и составляет 81 404,00 руб., в том числе НДС (18%) – 12 417,56 руб. Расчеты между Сторонами производятся путем безналичных перечислений денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Оплата выполненных Работ осуществляется и течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и на основании выставленною Подрядчиком счёта и счета-фактуры. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня установлена в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Во исполнение условий заключенного муниципального контракта истцом выполнены согласованные работы, результат работ сдан ответчику, им принят, не оплачен.  

По данным истца за ответчиком числится задолженность в размере 81 404 руб. 

Претензией от 15.04.2019 г. № 19041514-ВР истец просил оплатить задолженность в полном объеме.

20.08.2018 г. между муниципальным казенным учреждением "Агентство по строительству" города Ярославля /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Виннер" /Подрядчик/ заключен муниципальный контракт № 229-18Д, согласно п.п. 1.1, 3.1, 3.2, 5.1, 5.4, 9.5 которого предметом настоящего контракта является выполнение работ по засыпке пазух в осях: 3-5/А1-Г1 в объеме 26,7 куб. м. с послойным уплотнением слоями 15-20 см., до плотности грунта 1,65 т/куб. м. для здания школы с инженерными коммуникациями, по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Большая Октябрьская д. 64а. Срок начала выполнения Paбот - с даты заключения настоящего контракта. Срок окончания выполнения Работ- 28.12.2018 г. Цена настоящего контракта определяется на основании локального сметного расчета (Приложение № 2) и составляет 80 971,00 руб., в том числе НДС (18%) – 12 351,51 руб. Расчеты между Сторонами производятся путем безналичных перечислений денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Оплата выполненных Работ осуществляется и течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и на основании выставленною Подрядчиком счёта и счета-фактуры. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня установлена в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Во исполнение условий заключенного муниципального контракта истцом выполнены согласованные работы, результат работ сдан ответчику, им принят, не оплачен.  

По данным истца за ответчиком числится задолженность в размере 80 971 руб. 

Претензией от 15.04.2019 г. № 19041516-ВР истец просил оплатить задолженность в полном объеме.

20.08.2018 г. между муниципальным казенным учреждением "Агентство по строительству" города Ярославля /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Виннер" /Подрядчик/ заключен муниципальный контракт № 228-18Д, согласно п.п. 1.1, 3.1, 3.2, 5.1, 5.4, 9.5 которого предметом настоящего контракта является выполнение работ по засыпке пазух в осях: 1-3/И-В в объеме 26,41 куб. м. с послойным уплотнением слоями 15-20 см., до плотности грунта 1,65 т/куб. м. для здания школы с инженерными коммуникациями, по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Большая Октябрьская д. 64а. Срок начала выполнения Paбот - с даты заключения настоящего контракта. Срок окончания выполнения Работ- 28.12.2018 г. Цена настоящего контракта определяется на основании локального сметного расчета (Приложение № 2) и составляет 80 105,00 руб., в том числе НДС (18%) – 12 219, 41 руб. Расчеты между Сторонами производятся путем безналичных перечислений денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Оплата выполненных Работ осуществляется и течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и на основании выставленною Подрядчиком счёта и счета-фактуры. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня установлена в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Во исполнение условий заключенного муниципального контракта истцом выполнены согласованные работы, результат работ сдан ответчику, им принят, не оплачен.  

По данным истца за ответчиком числится задолженность в размере 80 105 руб. 

Претензией от 15.04.2019 г. № 19041515-ВР истец просил оплатить задолженность в полном объеме.

20.08.2018 г. между муниципальным казенным учреждением "Агентство по строительству" города Ярославля /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Виннер" /Подрядчик/ заключен муниципальный контракт № 295-18Д, согласно п.п. 1.1, 3.1, 3.2, 5.1, 5.4, 9.5 которого предметом настоящего контракта является выполнение работ по обратной засыпке траншей инженерных сетей водоснабжения В1 и канализации К2 на объекте строительства: «Здание школы с инженерными коммуникациями, по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Большая  Октябрьская д. 64а. Срок начала выполнения Paбот - с даты заключения настоящего контракта. Срок окончания выполнения Работ- 28.12.2018 г. Цена настоящего контракта определяется на основании локального сметного расчета (Приложение № 2) и составляет 81 837,00 руб., в том числе НДС (18%) – 12 483,61 руб. Расчеты между Сторонами производятся путем безналичных перечислений денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Оплата выполненных Работ осуществляется и течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и на основании выставленною Подрядчиком счёта и счета-фактуры. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня установлена в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Во исполнение условий заключенного муниципального контракта истцом выполнены согласованные работы, результат работ сдан ответчику, им принят, не оплачен.  

По данным истца за ответчиком числится задолженность в размере 81 837 руб. 

Претензией от 16.04.2019 г. № 1904161-ВР истец просил оплатить задолженность в полном объеме.

20.08.2018 г. между муниципальным казенным учреждением "Агентство по строительству" города Ярославля /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Виннер" /Подрядчик/ заключен муниципальный контракт № 296-18Д, согласно п.п. 1.1, 3.1, 3.2, 5.1, 5.4, 9.5 которого предметом настоящего контракта является выполнение работ по обратной засыпке траншей инженерных сетей канализации К1 на объекте строительства: «Здание школы с инженерными коммуникациями, по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Большая  Октябрьская д. 64а. Срок начала выполнения Paбот - с даты заключения настоящего контракта. Срок окончания выполнения Работ- 28.12.2018 г. Цена настоящего контракта определяется на основании локального сметного расчета (Приложение № 2) и составляет 77 940,00 руб., в том числе НДС (18%) – 11 889,15 руб. Расчеты между Сторонами производятся путем безналичных перечислений денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Оплата выполненных Работ осуществляется и течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и на основании выставленною Подрядчиком счёта и счета-фактуры. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня установлена в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Во исполнение условий заключенного муниципального контракта истцом выполнены согласованные работы, результат работ сдан ответчику, им принят, не оплачен.  

По данным истца за ответчиком числится задолженность в размере 81 837 руб. 

Претензией от 16.04.2019 г. № 1904162-ВР истец просил оплатить задолженность в полном объеме.

20.08.2018 г. между муниципальным казенным учреждением "Агентство по строительству" города Ярославля /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Виннер" /Подрядчик/ заключен муниципальный контракт № 335-18Д, согласно п.п. 1.1, 3.1, 3.2, 6.1, 6.4, 10.4 которого предметом настоящего контракта является выполнение дополнительных работ по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке проезда площадью 180,0 кв. м. здания школы с инженерными коммуникациями по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Большая  Октябрьская д. 64а. Срок начала выполнения Paбот - с даты заключения настоящего контракта. Срок окончания выполнения Работ- 03.10.2018 г. Цена настоящего контракта определяется на основании локального сметного расчета (участок №1) (Приложение № 2) и составляет 91 982,18 руб., в том числе НДС (18%) – 14 031,18 руб. Расчеты между Сторонами производятся путем безналичных перечислений денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Оплата выполненных Работ осуществляется и течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и на основании выставленною Подрядчиком счёта и счета-фактуры. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня установлена в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Во исполнение условий заключенного муниципального контракта истцом выполнены согласованные работы, результат работ сдан ответчику, им принят, не оплачен.  

По данным истца за ответчиком числится задолженность в размере 91 982 руб. 18 коп. 

Претензией от 16.04.2019 г. № 1904169-ВР истец просил оплатить задолженность в полном объеме.

20.08.2018 г. между муниципальным казенным учреждением "Агентство по строительству" города Ярославля /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Виннер" /Подрядчик/ заключен муниципальный контракт № 336-18Д, согласно п.п. 1.1, 3.1, 3.2, 6.1, 6.4, 10.4 которого предметом настоящего контракта является выполнение дополнительных работ по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке проезда площадью 178,2 кв. м. здания школы с инженерными коммуникациями по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Большая  Октябрьская д. 64а. Срок начала выполнения Paбот - с даты заключения настоящего контракта. Срок окончания выполнения Работ- 03.10.2018 г. Цена настоящего контракта определяется на основании локального сметного расчета (участок №2) (Приложение № 3) и составляет 91 137,30 руб., в том числе НДС (18%) – 13 902,30 руб. Расчеты между Сторонами производятся путем безналичных перечислений денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Оплата выполненных Работ осуществляется и течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и на основании выставленною Подрядчиком счёта и счета-фактуры. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня установлена в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Во исполнение условий заключенного муниципального контракта истцом выполнены согласованные работы, результат работ сдан ответчику, им принят, не оплачен.  

По данным истца за ответчиком числится задолженность в размере 91 137 руб. 30 коп. 

Претензией истец просил оплатить задолженность в полном объеме.

20.08.2018 г. между муниципальным казенным учреждением "Агентство по строительству" города Ярославля /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Виннер" /Подрядчик/ заключен муниципальный контракт № 337-18Д, согласно п.п. 1.1, 3.1, 3.2, 6.1, 6.4, 10.4 которого предметом настоящего контракта является выполнение дополнительных работ по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке проезда площадью 180,3 кв. м. здания школы с инженерными коммуникациями по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Большая  Октябрьская д. 64а. Срок начала выполнения Paбот - с даты заключения настоящего контракта. Срок окончания выполнения Работ- 03.10.2018 г. Цена настоящего контракта определяется на основании локального сметного расчета (участок №1) (Приложение № 3) и составляет 92 119,06 руб., в том числе НДС (18%) – 14 052,06 руб. Расчеты между Сторонами производятся путем безналичных перечислений денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Оплата выполненных Работ осуществляется и течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и на основании выставленною Подрядчиком счёта и счета-фактуры. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня установлена в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Во исполнение условий заключенного муниципального контракта истцом выполнены согласованные работы, результат работ сдан ответчику, им принят, не оплачен.  

По данным истца за ответчиком числится задолженность в размере 92 119,06 руб. 18 коп. 

Претензией от 19.04.2019 г. № 1904192-ВР истец просил оплатить задолженность в полном объеме.

20.08.2018 г. между муниципальным казенным учреждением "Агентство по строительству" города Ярославля /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Виннер" /Подрядчик/ заключен муниципальный контракт № 338-18Д, согласно п.п. 1.1, 3.1, 3.2, 6.1, 6.4, 10.4 которого предметом настоящего контракта является выполнение дополнительных работ по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке проезда площадью 177,5 кв. м. здания школы с инженерными коммуникациями по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Большая  Октябрьская д. 64а. Срок начала выполнения Paбот - с даты заключения настоящего контракта. Срок окончания выполнения Работ- 03.10.2018 г. Цена настоящего контракта определяется на основании локального сметного расчета (участок №4) (Приложение № 3) и составляет 90 729,02 руб., в том числе НДС (18%) – 13 840,02 руб. Расчеты между Сторонами производятся путем безналичных перечислений денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Оплата выполненных Работ осуществляется и течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и на основании выставленною Подрядчиком счёта и счета-фактуры. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня установлена в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Во исполнение условий заключенного муниципального контракта истцом выполнены согласованные работы, результат работ сдан ответчику, им принят, не оплачен.  

По данным истца за ответчиком числится задолженность в размере 90 729 руб. 02 коп. 

Претензией от 19.04.2019 г. № 1904193-ВР истец просил оплатить задолженность в полном объеме.

20.08.2018 г. между муниципальным казенным учреждением "Агентство по строительству" города Ярославля /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Виннер" /Подрядчик/ заключен муниципальный контракт № 339-18Д, согласно п.п. 1.1, 3.1, 3.2, 6.1, 6.4, 10.4 которого предметом настоящего контракта является выполнение дополнительных работ по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке проезда площадью 179,2 кв. м. здания школы с инженерными коммуникациями по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Большая  Октябрьская д. 64а. Срок начала выполнения Paбот - с даты заключения настоящего контракта. Срок окончания выполнения Работ- 03.10.2018 г. Цена настоящего контракта определяется на основании локального сметного расчета (участок №5) (Приложение № 3) и составляет 91 624,64 руб., в том числе НДС (18%) – 13 976,64 руб. Расчеты между Сторонами производятся путем безналичных перечислений денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Оплата выполненных Работ осуществляется и течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и на основании выставленною Подрядчиком счёта и счета-фактуры. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня установлена в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Во исполнение условий заключенного муниципального контракта истцом выполнены согласованные работы, результат работ сдан ответчику, им принят, не оплачен.  

По данным истца за ответчиком числится задолженность в размере 91 624 руб. 64 коп. 

Претензией от 19.04.2019 г. № 1904194-ВР истец просил оплатить задолженность в полном объеме.

20.08.2018 г. между муниципальным казенным учреждением "Агентство по строительству" города Ярославля /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Виннер" /Подрядчик/ заключен муниципальный контракт № 340-18Д, согласно п.п. 1.1, 3.1, 3.2, 6.1, 6.4, 10.4 которого предметом настоящего контракта является выполнение дополнительных работ по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке проезда площадью 178,7 кв. м. здания школы с инженерными коммуникациями по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Большая  Октябрьская д. 64а. Срок начала выполнения Paбот - с даты заключения настоящего контракта. Срок окончания выполнения Работ- 03.10.2018 г. Цена настоящего контракта определяется на основании локального сметного расчета (участок №6) (Приложение № 3) и составляет 91 386,28 руб., в том числе НДС (18%) – 13 940,28 руб. Расчеты между Сторонами производятся путем безналичных перечислений денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Оплата выполненных Работ осуществляется и течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и на основании выставленною Подрядчиком счёта и счета-фактуры. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня установлена в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Во исполнение условий заключенного муниципального контракта истцом выполнены согласованные работы, результат работ сдан ответчику, им принят, не оплачен.  

По данным истца за ответчиком числится задолженность в размере 91 386 руб. 28 коп. 

Претензией истец просил оплатить задолженность в полном объеме.

20.08.2018 г. между муниципальным казенным учреждением "Агентство по строительству" города Ярославля /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Виннер" /Подрядчик/ заключен муниципальный контракт № 341-18Д, согласно п.п. 1.1, 3.1, 3.2, 6.1, 6.4, 10.4 которого предметом настоящего контракта является выполнение дополнительных работ по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке проезда площадью 178,4 кв. м. здания школы с инженерными коммуникациями по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Большая  Октябрьская д. 64а. Срок начала выполнения Paбот - с даты заключения настоящего контракта. Срок окончания выполнения Работ- 03.10.2018 г. Цена настоящего контракта определяется на основании локального сметного расчета (участок №7) (Приложение № 3) и составляет 91 237,60 руб., в том числе НДС (18%) – 13 917,60 руб. Расчеты между Сторонами производятся путем безналичных перечислений денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Оплата выполненных Работ осуществляется и течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и на основании выставленною Подрядчиком счёта и счета-фактуры. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня установлена в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Во исполнение условий заключенного муниципального контракта истцом выполнены согласованные работы, результат работ сдан ответчику, им принят, не оплачен.  

По данным истца за ответчиком числится задолженность в размере 91 237 руб. 60 коп. 

Претензией от 19.04.2019 г. № 1904196-ВР истец просил оплатить задолженность в полном объеме.

По данным истца за ответчиком числится задолженность в размере 1 042 473 руб. 08 коп.

Отсутствие оплаты задолженности послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.  

Изучив материалы дела, суд считает исковые требования в части основного долга подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

Исходя из положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.  

В  силу ч.1 ст. 702 ГК РФ  по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.  

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику. 

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  

Факт исполнения принятых на себя договорных обязательств со стороны истца и принятия результатов работы ответчиком подтверждается материалами дела, в том числе Актами о приемке выполненных работ, справками о стоимости выполненных работ, подписанными без разногласий, ответчиком не оспаривается. 

Возражения ответчиком не заявлены, уточненную сумму долга ответчик подтвердил.

При имеющихся обстоятельствах требования истца о взыскании стоимости выполненных работ в сумме 1 042 473 руб. 08 коп. являются обоснованными,  подлежат удовлетворению. 

Истцом заявлено требование о взыскании договорной неустойки.

Согласно ст.ст. 330, 331 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

Факт просрочки исполнения договорного обязательства подтверждается материалами дела, ответчиком не оспаривается.

При наличии просрочки исполнения договорного обязательства требование о взыскании неустойки, о продолжении начисления пени являются обоснованными, соответствуют ст. 330 ГК РФ, п. 9.5, 10.4 муниципальных контрактов.

По расчету истца сумма неустойки за период с 30.10.2018 г. по 25.09.2019 г. составляет 80 513  руб. 67 коп.

Проверив расчет истца, контррасчет ответчика, суд соглашается с расчетом истца, так как ответчик при расчете пени применяет процентную ставку, действующую в соответствующий период нарушения. 

Частью 5 статьи 34 Закона №44-ФЗ установлено, что в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

При добровольной уплате названной неустойки ее размер по общему правилу подлежит исчислению по ставке, действующей на дату фактического платежа. При этом закон не содержит прямого указания на применимую ставку в случае взыскания неустойки в судебном порядке. Вместе с тем по смыслу данной нормы, закрепляющей механизм возмещения возникших у кредитора убытков в связи с просрочкой исполнения обязательств по оплате потребленных энергетических ресурсов, при взыскании суммы неустоек (пеней) в судебном порядке за период до принятия решения суда ко всему периоду просрочки подлежит применению ставка на день его вынесения. Данный механизм расчета неустойки позволит обеспечить правовую определенность в отношениях сторон на момент разрешения спора в суде. /"Обзор судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017)/.

При расчете пени, начисленных на сумму непогашенного долга, подлежит применению ключевая ставка Банка России, действующая на дату вынесения судебного акта, 7 % годовых.

Уточненный расчет истца соответствует положениям контрактов, принимается судом.

Оснований для применения ст. 333 АПК РФ у суда не имеется.

В силу ст. 110 АПК РФ расходы истца по оплате госпошлины по делу относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  Муниципального казенного учреждения "Агентство по строительству города Ярославля"  (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу  Общества с ограниченной ответственностью "Виннер"  (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) 1 042 473 руб. 08 коп. задолженность, 80 513 руб. 67 коп. неустойка по состоянию на 25.09.2019г., 24 094 руб. 75 коп. в возмещение расходов по уплате госпошлины.

Продолжить начисление пени на сумму задолженности с 26.09.2019г. до момента фактического исполнения обязательства с применением одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России  от не уплаченной в срок суммы.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья

Бессонова И.Ю.