﻿

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443001, г.Самара, ул. Самарская,203Б, тел. (846) 207-55-15

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

30 ноября 2021 года

Дело №

А55-28170/2020

 

Резолютивная часть   объявлена      23 ноября        2021 года 

Решение      в полном объеме изготовлено        30 ноября     2021 года 

 

Арбитражный суд Самарской области

в составе

судьи Балькиной Л.С. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Хабибуллиной Л.Р. 

рассмотрев в судебном заседании  23 ноября 2021 года  дело по иску, заявлению

Общества с ограниченной ответственностью "Энергострой"

к  Обществу с ограниченной ответственностью "НефтеГазоТехнологии"

Третьи лица АО «Транснефть приволга», Стахов Н.А., Управление ФНС России по Самарской области, 

О взыскании 158 184 126 руб. 74 коп. 

при участии в заседании

от истца – представитель Алиев Ш.Р., конкурсный управляющий Решухин К.Ю., после перерыва - конкурсный управляющий Решухин К.Ю

от ответчика – Шитикова Е. В. представитель 

от третьего лица 3 – представители Свистунова Е.М.,  Геворгян  С.Р., 

иные – не участвовали. 

установил:

Общества с ограниченной ответственностью "Энергострой" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском с учетом принятого судом уточнения исковых требования ( т.25 л.д. 128-131) к Обществу с ограниченной ответственностью "НефтеГазоТехнологии" о взыскании задолженности в сумме 158 184 126 руб. 74 коп. по договорам субподряда №60/1-НГТ от 18.09.2017 , №61-НГТ от 18.06.2017 ,№62-НГТ от 28.09.2017, №62/1-НГТ от 01.04.2017, №65- НГТ от 29.09.2017,  №68-НГТ от 17.10.2017, №70-НГТ от 06.08.2017 , №71-НГТ от 09.10.2017. В обоснование требований истец ссылается на уклонение ответчика от оплаты стоимости выполненных работ . 

      Ответчик требования истца отклонил по мотивам, изложенным в отзыве на иск. Возражая против требований истца, ответчик указывает на оплату стоимости выполненных работ и отсутствие спорной задолженности. 

      К участию в деле в качестве третьих лиц привлечены  АО «Транснефть приволга», Стахов Н.А., Управление ФНС России по Самарской области.  Третьи лица 1,2 явку представителей не обеспечили , извещены в соответствии с положениями ст. 123  АПК РФ , УФНС России по Самарской области поддержало позицию истца. 

        Истец и УФНС России по Самарской области просили о приостановлении производства по делу до рассмотрении в деле о несостоятельности ( банкротстве)  ООО "Энергострой" в рамках обособленного спора, в котором оспариваются акты приема передачи векселей и акт взаимозачета между истцом и ответчиком. Суд отказал в приостановлении производства по делу  в связи с отсутствием оснований , предусмотренных ст. 143 АПК РФ, связанных с невозможностью рассмотрения настоящего дела до  рассмотрения  обособленного спора по заявлению конкурсного управляющего об оспаривании сделок между  ООО "Энергострой" и ООО «НГТ» ( акты приема – передачи векселей, акта взаимозачета № 86 от  31.12.2018 ) в деле о банкротстве   № А55-2245/2020. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 143 АПК РФ арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого судом общей юрисдикции. Условием приостановления производства по делу по данному основанию является объективная невозможность рассмотрения и разрешения дела арбитражным судом до разрешения другого дела. Обязанность приостановить производство по делу по данному основанию связана не с фактом наличия в производстве суда другого дела, а с невозможностью рассмотрения настоящего спора до принятия решения по другому делу. Такой объективной невозможности рассмотрения настоящего дела судом  не установлено.

        Истец заявил о фальсификации доказательств. Суд по результатам проверки заявления истца о фальсификации доказательств на основании ст. 161 АПК РФ признал его необоснованным.

   Исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов, изложенных в исковом заявлении, отзыве на иск,  письменных пояснениях , заслушав пояснения представителей участвующих в деле лиц,  суд считает исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

 

Как следует из материалов дела, между Обществом  с ограниченной ответственностью "Энергострой" ( субподрядчик )   и  Обществом с ограниченной ответственностью "НефтеГазоТехнологии" ( подрядчик) заключены договоры субподряда №60/1-НГТ от 18.09.2017 , №61-НГТ от 18.06.2017 ,№62-НГТ от 28.09.2017, №62/1-НГТ от 01.04.2017, №65- НГТ от 29.09.2017,  №68-НГТ от 17.10.2017, №70-НГТ от 06.08.2017 , №71-НГТ от 09.10.2017 на следующие работы:              

          «СИКН №402. Техническое перевооружение» - Договор субподряда №60/1-НГТ от 18.09.2017 г. Субподрядчик обязался выполнить работы и услуги, определенные пунктом 

2.1. указанного Договора, а Подрядчик, в соответствии с условиями статьи 4 Договора, обязался оплатить принятые работы и услуги, в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней на основании предоставленных Субподрядчиком подписанных Сторонами Журнала учета выполненных работ (форма КС-ба), Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), счета-фактуры, Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), ведомости переработки давальческих материалов поставки Подрядчика, Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма М-35), Реестра смонтированного оборудования поставки Субподрядчика, Ведомости оборудования Подрядчика, монтаж которого начат. Стоимость работ и услуг по Договору составляет 20 133 987,47 рублей с учетом НДС., оплата не произведена. 

         «Замена камеры СОД полевого изготовления на 1380 км МН «Гурьев-Куйбышев» Ду-700 (прием, пуск) на заводское исполнение. Самарское РНУ. Реконструкция» - Договор субподряда №61-НГТ от 18.06.2017 г. Субподрядчик обязался выполнить работы и услуги, определенные пунктом 2.1. указанного Договора, а Подрядчик, в соответствии с условиями статьи 4 Договора, обязался оплатить принятые работы и   услуги, в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней на основании предоставленных Субподрядчиком подписанных Сторонами Журнала учета выполненных работ (форма КС-ба), Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), счета-фактуры, Справки о стоимости выполненных работ   (форма КС-3), ведомости переработки давальческих материалов поставки Подрядчика, Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма М-35), Реестра смонтированного оборудования поставки Субподрядчика, Ведомости оборудования Подрядчика, монтаж которого начат. Стоимость работ и услуг по Договору составляет 47 612 623 руб. 56 коп. с учетом НДС., оплата не произведена. 

	«Реконструкция НП ССН «17 пусковой комплекс» - Договор субподряда №62-НГТ от 28.09.2017 г.. в редакции Дополнительного соглашения №2 от 17.11.2017 г.Субподрядчик обязался выполнить работы и услуги, определенные пунктом 2.1. указанного Договора, а Подрядчик, в соответствии с условиями статьи 4 Договора, обязался оплатить принятые работы и услуги, в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней на основании предоставленных Субподрядчиком подписанных Сторонами Журнала учета выполненных работ (форма КС-ба), Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), счета-фактуры, Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), ведомости переработки давальческих материалов поставки Подрядчика, Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма М-35), Реестра смонтированного оборудования поставки Субподрядчика, Ведомости оборудования Подрядчика, монтаж которого начат.Стоимость работ и услуг по основному Договору составляет 4 136 567,81 рублей с учетом НДС. Стоимость работ и услуг по основному Договору с учетом Дополнительного соглашения №2 от 17.11.2017 г. составляет 34 218 257,21рублей с учетом НДС., задолженность составляет  5 000 000  руб. 

           «Замена камеры СОД полевого изготовления на 1429 км МН «Гурьев-Куйбышев» Ду-700 (прием) на заводское исполнение. Самарское РНУ.Реконструкция» - Договор субподряда №62/1-НГТ от 01.04.2017 г. Субподрядчик обязался выполнить работы и услуги, определенные пунктом 2.1. указанного Договора, а Подрядчик, в соответствии с условиями статьи 4 Договора, обязался оплатить принятые работы и услуги, в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней на основании предоставленных Субподрядчиком подписанных Сторонами Журнала учета выполненных работ (форма КС-ба), Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), счета-фактуры, Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), ведомости переработки давальческих материалов поставки Подрядчика, Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма М-35), Реестра смонтированного оборудования поставки Субподрядчика, Ведомости оборудования Подрядчика, монтаж которого начат. Стоимость работ и услуг по Договору составляет 10 038 382  руб. 90 коп. с учетом НДС., оплата не произведена. 	

           «Реконструкция НП ССН «4 Пусковой комплекс» - Договор субподряда №65-НГТ от 29.09.2017 г. Субподрядчик обязался выполнить работы и услуги, определенные пунктом 2.1. указанного Договора, а Подрядчик, в соответствии с условиями статьи 4 Договора, обязался оплатить принятые работы и услуги, в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней на основании предоставленных Субподрядчиком подписанных Сторонами Журнала учета выполненных работ (форма КС-ба), Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), счета-фактуры, Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), ведомости переработки давальческих материалов поставки Подрядчика, Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма М-35), Реестра смонтированного оборудования поставки Субподрядчика, Ведомости оборудования Подрядчика, монтаж которого начат. Стоимость работ и услуг по Договору составляет 16 269 200,72 рублей с учетом НДС., задолженность составляет 15 522 654 руб.  54 коп.           

           «Реконструкция площадки ССН. 5 пусковой комплекс» - Договор субподряда №68-НГТ от 17.10.2017 г. в редакции Дополнительного соглашения №1 от 17.10.2017 г. Субподрядчик обязался выполнить работы и услуги, определенные пунктом 2.1. указанного Договора, а Подрядчик, в соответствии с условиями статьи 4 Договора, обязался оплатить принятые работы и услуги, в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней на основании предоставленных Субподрядчиком подписанных Сторонами Журнала учета выполненных работ (форма КС-ба), Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), счета-фактуры, Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), ведомости переработки давальческих материалов поставки Подрядчика, Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма М-35), Реестра смонтированного оборудования поставки Субподрядчика, Ведомости оборудования Подрядчика, монтаж которого начат. Стоимость работ и услуг по основному Договору составляет 51 163 141,40 рублей с учетом НДС. Стоимость работ и услуг по основному Договору с учетом Дополнительного соглашения №1 от 15.11.2017 г. составляет 83 006 975,18 рублей с учетом НДС., задолженность составляет  34 583 585 руб. 07 коп. 

          «МН НКК, участок Ик-Бугуруслан, 2051,5 км пересечение а/д «Бугуруслан-Абдулино» Ду 1200 Бугуруслан РНУ. Капитальный ремонт» - Договор субподряда№70-НГТ от 06.08.2017 г.  Субподрядчик обязался выполнить работы и услуги, определенные пунктом 2.1. указанного Договора, а Подрядчик, в соответствии с условиями статьи 4 Договора, обязался оплатить принятые работы и услуги, в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней на основании предоставленных Субподрядчиком подписанных Сторонами Журнала учета выполненных работ (форма КС-ба), Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), счета-фажтуры, Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), ведомости переработки давальческих материалов поставки Подрядчика, Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма М-35), Реестра смонтированного оборудования поставки Субподрядчика, Ведомости оборудования Подрядчика, монтаж которого начат. Стоимость работ и услуг по Договору составляет 18 583 825 руб. 93 коп.с учетом НДС., задолженность составляет  17 528 197 руб.  70 коп. 

	«ССВД БКНС «Комсомолец». Бугурусланское РНУ. Техническоеперевооружение» - Договор субподряда №71-НГТ от 09.10.2017 г. Субподрядчик обязался выполнить работы и услуги, определенные пунктом 2.1. указанного Договора, а Подрядчик, в соответствии с условиями статьи 4 Договора, обязался оплатить принятые работы и услуги, в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней на основании предоставленных Субподрядчиком подписанных Сторонами Журнала учета выполненных работ (форма КС-ба), Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), счета-фактуры, Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), ведомости переработки давальческих материалов поставки Подрядчика, Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма М-35), Реестра смонтированного оборудования поставки Субподрядчика, Ведомости оборудования Подрядчика, монтаж которого начат. Стоимость работ и услуг по Договору составляет 16 511 458,55 рублей с учетом НДС., задолженность составляет 7 764 695 руб. 50 коп.            

         Как указал истец, Работы выполнены им  в полном объеме и приняты подрядчиком,  что подтверждается представленными в материалы дела копиями актов , справок, акта сверки,  но,  оплачены Подрядчиком частично., полная оплата не произведена. ( т. 1 –т.11. л.д. 131). В соответствии с данными бухгалтерского учета Субподрядчика (Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2017 по 01.10.2019 г. между ООО «ЭнергоСтрой» и ООО «НГТ») Субподрядчик выполнил работы на общую сумму 369 783 339,84 рублей с учетом НДС.  В связи с выявлением задолженности ООО «НГТ» перед ООО «ЭнергоСтрой» за выполненные и принятые работы и услуги по указанным Договорам  истец направил  претензию № 01/10 от 01.10.2019 года.  Поскольку  ответчик не исполнил требования , изложенные в претензии, истец обратился  в суд с требованием о взыскании задолженности в сумме  158 184 126 руб.  74 коп. 

         Ответчик в обоснование возражений, указывает на отсутствие  спорной задолженности  в связи с ее полной оплатой и   передачей  ответчику во исполнение обязательств по оплате стоимости работ  по договорам векселей  и осуществления взаимозачета , что подтверждается  платежными поручениями, векселями, актами приема – передачи векселей на сумму  95 220 622 руб. 43 коп.  и  актом взаимозачета на сумму 62 963 504 руб. 31 коп. , актом сверки взаимных расчетов, также ответчиком по доводам о взаимозачете  в материалы дела представлены копии налоговой декларации по НДС  за 2018 года с отметкой налогового органа,  товарных накладных о передаче товаров истцу на общую сумму 62 963 504 руб. 31 коп., книги покупок ООО «Энергострой» за  4 квартал 2018, книги продаж  ООО «НГТ» за 4 квартал 2018. 

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (статья 711 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

По смыслу пункта 1 статьи 711 и пункта 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда оплате подлежит фактически выполненный (переданный заказчику) результат работ.

Согласно абзацу 1 пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Пунктом 6 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации специально предусмотрены основания, по которым заказчик вправе отказаться от приемки: если обнаруженные недостатки исключают возможность использовать результат работы для цели, которая указана в договоре, и к тому же ни подрядчик, ни сам заказчик не могут устранить недостатки (т.е. существенные недостатки).

В части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" (далее - Информационное письмо N 51) разъяснено, что основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

       Как следует из представленных в материалы дела копий  актов сдачи – приемки по форме КС-2 , справок по форме КС-3 , работы  по спорным договорам истцом выполнены и приняты ответчиком, возражений относительно объема, стоимости и качества выполненных работ ответчиком при рассмотрении дела не предъявлено. По доводам ответчика спорная задолженность , по его мнению, отсутствует в связи с полным исполнением им  обязанности по оплате стоимости работ. 

         При рассмотрении дела истец заявил о фальсификации представленных ответчиком  в материалы дела  доказательств:	Акт взаимозачета № 86 от 31.12.2018г. на сумму 62 963 504,31 руб. между ООО «НЕФТЕГАЗОТЕХНОЛОГИИ» и ООО «Энергострой»; Акт приема-передачи векселей от 20.11.2018г. в количестве 5-ти штук (№000001 - №000005) на сумму 5 000 000 руб.; Акт приема-передачи векселей от 20.11.2018г. в количестве 8-ти штук (№000014-№000021) на сумму 17 528 197,7 руб.; Акт приема-передачи векселей от 20.11.2018г. в количестве 4-х штук (№000026 - №000029) на сумму 15 522 654,54 руб.; Акт приема-передачи векселей от 20.11.2018г. в количестве 4-х штук (№000022 - №000025) на сумму 12 547 802,22 руб.; Акт приема-передачи векселей от 20.11.2018г. в количестве 11-ти штук (№000030 - №000040) на сумму 29 082 301,29 руб.; Акт приема-передачи векселей от 20.11.2018г. в количестве 4-х iutvk (№000041 -№000044) на сумму 5 501 283,78 руб.;Акт приема-передачи векселей от 20.11.2018г. в количестве 8-ми штук (№000006 - №000013), на сумму 10 038 382,90 руб.; Акт сверки взаимных расчетов на 31.12.2018 года за IV квартал 2018 года;

Простой вексель № 000001 от 20.11.2018 на сумму 1 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000002 от 20.11.2018 на сумму 1 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000003 от 20.11.2018 на сумму 1 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000004 от 20.11.2018 на сумму 1 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000005 от 20.11.2018 на сумму 1 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000006 от 20.11.2018 на сумму 1 000 000,00 рублей;

Простой вексель №000007 от 20.11.2018 на сумму 1 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000008 от 20.11.2018 на сумму 1 000 000,00 рублей; 

Простой вексель № 000009 от 20.11.2018 на сумму I 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000010 от 20.11.2018 на сумму 1 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000011 от 20.11.2018 на сумму 2 000 000,00 рублей; 

Простой вексель № 000012 от 20.11.2018 на сумму 2 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000013 от 20.11.2018 на сумму 1 038382,90 рублей;

Простой вексель № 000014 от 20.11.2018 на сумму 4 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000015 от 20.11.2018 на сумму 3 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000016 от 20.11.2018 на сумму 3 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000017 от 20.11.2018 на сумму 2 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000018 от 20.11.2018 на сумму 2 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000019 от 20.11.2018 на сумму 1 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000020 от 20.11.2018 на сумму 1 000 000,00 рублей;

Простой вексель №000021 от 20.11.2018 на сумму 1 528 197,70 рублей;

Простой вексель № 000022 от 20.11.2018 на сумму 4 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000023 от 20.11.2018 а на сумму 4 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000024 от 20.11.2018 а на сумму 4 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000025 от 20.11.2018 на сумму 547 802,22 рублей;

Простой вексель № 000026 от 20.11.2018 на сумму 5 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000027 от 20.11.2018 на сумму 5 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000028 от 20.11.2018 на сумму 5 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000029 от 20.11.2018 на сумму 522645,54 рублей;

Простой вексель № 000030 от 20.11.2018 на сумму 3 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000031 от 20.11.2018 на сумму 3 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000032 от 20.11.2018 а на сумму 3 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000033 от 20.11.2018 на сумму 2 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000034 от 20.11.2018 на сумму 2 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000035 от 20.11.2018 на сумму 3 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000036 от 20.11.2018 на сумму 3 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000037 от 20.11,2018 а на сумму 4 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000038 от 20.11.2018 на сумму 2500 000,00 рублей;

Простой вексель № 000039 от 20.11.2018 на сумму 2 500 000,00 рублей;

Простой вексель № 000040 от 20.11.2018 на сумму 1 082 301,29 рублей;

Простой вексель №000041 от 20.11.2018 на сумму 417698,71 рублей;

Простой вексель № 000042 от 20.11.2018 на сумму 597 649,49 рублей;

Простой вексель № 000043 от 20.11.2018 на сумму 2 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000044 от 20.11.2018 на сумму 1 485 935,58 рублей;

Товарная накладная от 21.11.2018 № 445 на сумму 575 973,10 рублей;

Товарная накладная от 21.11.2018 № 526 на сумму 421 801,86 рублей;

Товарная накладная от 21.11.2018 № 593 на сумму 252 147,59 рублей;

Товарная накладная от 22.11.2018 № 447 на сумму 412 124,44 рублей;

Товарная накладная от 23.11.2018 № 453 на сумму 1 440 167,23 рублей;

Товарная накладная от 30.11.2018 № 456 на сумму 749 332,33 рублей;

Товарная накладная от 30.П.2018 № 457 на сумму 666 597,58 рублей;

Товарная накладная от 30.11.2018 № 498 на сумму 481 582,64 рублей;

Товарная накладная от 30.11.2018 № 503 на сумму 412 958,68 рублей;

Товарная накладная от 30.11.2018 № 507 на сумму 406 403,77 рублей;

Товарная накладная от 30.11.2018 № 518 на сумму 731 803,39 рублей;

Товарная накладная от 30.11.2018 № 541 на сумму 1 194 064,39 рублей;

Товарная накладная от 30.11.2018 № 340 на сумму 1 872 459,16 рублей;

Товарная накладная от 30.11.2018 № 339 на сумму 499 545,74 рублей;

Товарная накладная от 30.11.2018 №338 на сумму 655 489,26 рублей;

Товарная накладная от 30.11.2018 № 337 на сумму 1 391 215,91 рублей;

Товарная накладная от 30.11.2018 № 336 на сумму 380 027,44 рублей;

Товарная накладная от 30.11.2018 № 335 на сумму 355 519,98 рублей;

Товарная накладная от 30.11.2018 № 334 на сумму 444 388,89 рублей; 

Товарная накладная от 30.11.2018 года № 333 на сумму 803 476,60 рублей;

Товарная накладная от 30.11.2018 № 332 на сумму 774 291,33 рублей;

Товарная накладная от 30.11.2018 № 331 на сумму 444 399,60 рублей;

Товарная накладная от ЗОЛ 1.2018 № 330 на сумму 757 500,00 рублей;

Товарная накладная от 30.11.2018 № 329 на сумму 196 275,77 рублей;

Товарная накладная от 30.11.2018 № 328 на сумму 2 230 985,46 рублей;

Товарная накладная от 30.11.2018 № 327 на сумму 492 375,07 рублей;

Товарная накладная от 30.11.2018 № 326 на сумму 413 595,00 рублей;

Товарная накладная от 30.11.2018 № 325 на сумму 459 549,85 рублей;

Товарная накладная от 03.12.2018 № 355 на сумму 632 130,72 рублей;

Товарная накладная от 03.12.2018 № 356 на сумму 408 198,00 рублей;

Товарная накладная от 03.12.2018 № 357 на сумму 871 210,00 рублей;

Товарная накладная от 03.12.2018 № 356 на сумму 408 198,00 рублей;

Товарная накладная от 03.12,2018 № 359 на сумму 143 492,00 рублей;

Товарная накладная от 03.12.2018 № 360 на сумму 506 417,98 рублей;

Товарная накладная от 03.12.2018 № 361 на сумму 4 292 568,62 рублей;

Товарная накладная от 03.12.2018 № 362 на сумму 37 820,00 рублей;

Товарная накладная от 03.12.2018 № 351 на сумму 494 027,09 рублей;

Товарная накладная от 03.12.2018 № 350 на сумму 123 624,00 рублей;

Товарная накладная от 03.12.2018 № 347 на сумму 71 751,20 рублей;

Товарная накладная от 03.12.2018 № 346 на сумму 230 612,24 рублей;

Товарная накладная от 03.12.2018 № 345 на сумму 434 887,82 рублей;

Товарная накладная от 03.12.2018 № 344 на сумму 151 963,04 рублей;

Товарная накладная от 03.12.2018 № 343 на сумму 5 870,01 рублей;

Товарная накладная от 03.12.2018 № 352 на сумму 327 257,00 рублей;

Товарная накладная от 03.12.2018 № 353 на сумму 364 984,00 рублей;

Товарная накладная от 04.12.2018 № 566 на сумму 1 241 332,17 рублей;

Товарная накладная от 04.12.2018 № 371 на сумму 1 014 747,00 рублей;

Товарная накладная от 04.12.2018 № 372 на сумму 328 474,00 рублей;

Товарная накладная от 04.12.2018 № 373 на сумму 811 318,00 рублей;

Товарная накладная от 04.12.2018 № 374 на сумму 154 372,81 рублей;

Товарная накладная от 04.12.2018 № 375 на сумму 278 100,00 рублей;

Товарная накладная от 04.12.2018 № 376 на сумму 159 612,00 рублей;

Товарная накладная от 04.12.2018 № 377 на сумму 351 381,12 рублей;

Товарная накладная от 04.12.2018 № 378 на сумму 4 564 441,00 рублей;

Товарная накладная от 04.12.2018 № 379 на сумму 342 188,00 рублей;

Товарная накладная от 04.12.2018 № 363 на сумму 246 932,00 рублей;

Товарная накладная от 04.12.2018 № 364 на сумму 14 978,09 рублей;

Товарная накладная от 04.12.2018 № 365 на сумму 219 290,00 рублей;

Товарная накладная от 04.12.2018 № 366 на сумму 665 511,20 рублей;

Товарная накладная от 04.12.2018 № 367 на сумму 388 731,00 рублей;

Товарная накладная от 04.12.2018 № 368 на сумму 1 254 651,50 рублей;

Товарная накладная от 04.12.2018 № 369 на сумму 541 500,00 рублей;

Товарная накладная от 05.12.2018 № 380 на сумму 914 120,70 рублей;

Товарная накладная от 05.12.2018 № 381 на сумму 1 008 569,00 рублей;

Товарная накладная от 05.12.2018 № 648 на сумму 622 641,37 рублей; 

Товарная накладная от 06.12.2018 № 383 на сумму 92 859,61 рублей; 

Товарная накладная от 06.12.2018 № 349 на сумму 6 945,50 рублей; 

Товарная накладная от 06.12.2018 № 348 на сумму 23 797,28 рублей;

Товарная накладная от 06.12.2018 № 647 на сумму 600 073,20 рублей;

Товарная накладная от 06.12.2018 №384 на сумму 1 046 773,63 рублей;

Товарная накладная от 06.12.2018 № 385 на сумму 476 834,02 рублей;

Товарная накладная от 06.12.2018 № 386 на сумму 1 579 649,19 рублей;

Товарная накладная от 06.12.2018 № 387 на сумму 1 566 486,23 рублей;

Товарная накладная от 06.12.2018 № 388 на сумму 1 537 328,87 рублей;

Товарнаянакладнаяот06.12.2018 №389 на сумму 1 160 318,00 рублей;

Товарная накладная от 06.12.2018 № 390 на сумму 909 141,00 рублей;

Товарная накладная от 06.12.2018 № 391 на сумму 1 196 630,32 рублей;

Товарная накладная от 06.12.2018 № 392 на сумму 1 224 360,06 рублей;

Товарная накладная от 06.12.2018 № 393 на сумму 621 623,21 рублей;

Товарная накладная от 06.12.2018 № 394 на сумму 801 485,04 рублей;

Товарная накладная от 06.12.2018 № 395 на сумму 794 552,00 рублей;

Товарная накладная от 06.12.2018 № 396 на сумму 705 278,82 рублей;

Товарная накладная от 06.12.2018 № 397 на сумму 360096,67 рублей;

Товарная накладная от 06.12.2018 № 354 на сумму 752 323,75 рублей;

Товарная накладная от 10.12.2018 № 442 на сумму 2 939 821,05 рублей;

Товарная накладная от 14.12.2018 № 407 на сумму 10 504,03 рублей;

Товарная накладная от 17.12.2018 № 409 на сумму 278 929,31 рублей;

Товарная накладная от 21.12.2018 № 601 на сумму 61 206,00 рублей;

Товарная накладная от 24.12.2018 № 646 на сумму 14 745,98 рублей;

Товарная накладная от 31.12.2018 № 643 на сумму 41370,71 рублей;

Суд в соответствии со ст. 161 АПК РФ  разъяснил лицам, участвующим в деле, уголовно – правовые последствия заявления о фальсификации доказательств и  предложил ответчику исключить оспариваемые  документы из числа доказательств по делу. Ответчик такого согласия не дал. 

В судебное заседание явился Стахов Н.А., у которого были  отобраны  экспериментальные образцы подписи. 

        Ответчиком представлены  подлинные Акт взаимозачета № 86 от 31.12.2018г. на сумму 62 963 504,31 руб. между ООО «НЕФТЕГАЗОТЕХНОЛОГИИ» и ООО «Энергострой»; Акт приема-передачи векселей от 20.11.2018г. в количестве 5-ти штук (№000001 - №000005) на сумму 5 000 000 руб.; Акт приема-передачи векселей от 20.11.2018г. в количестве 8-ти штук (№000014-№000021) на сумму 17 528 197,7 руб.; Акт приема-передачи векселей от 20.11.2018г. в количестве 4-х штук (№000026 - №000029) на сумму 15 522 654,54 руб.; Акт приема-передачи векселей от 20.11.2018г. в количестве 4-х штук (№000022 - №000025) на сумму 12 547 802,22 руб.; Акт приема-передачи векселей от 20.11.2018г. в количестве 11-ти штук (№000030 - №000040) на сумму 29 082 301,29 руб.; Акт приема-передачи векселей от 20.11.2018г. в количестве 4-х штук (№000041 -№000044) на сумму 5 501 283,78 руб.;Акт приема-передачи векселей от 20.11.2018г. в количестве 8-ми штук (№000006 - №000013), на сумму 10 038 382,90 руб.; Акт сверки взаимных расчетов на 31.12.2018 года за IV квартал 2018 года. Определением от 21.06.2021 суд назначил по делу по  делу судебную   почерковедческую экспертизу, проведение которой поручено эксперту Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория судебной экспертизы ФЛСЭ» Трухачеву Виктору Валентиновичу по следующему вопросу: Выполнены ли подписи от имени    Стахова Н.А. в следующих документах: Акте взаимозачета № 86 от 31.12.2018г. на сумму 62 963 504,31 руб. между ООО «НЕФТЕГАЗОТЕХНОЛОГИИ» и ООО «Энергострой»; Акте приема-передачи векселей от 20.11.2018г. в количестве 5-ти штук (№000001 - №000005) на сумму 5 000 000 руб.; Акте приема-передачи векселей от 20.11.2018г. в количестве 8-ти штук (№000014-№000021) на сумму 17 528 197,7 руб.; Акте приема-передачи векселей от 20.11.2018г. в количестве 4-х штук (№000026 - №000029) на сумму 15 522 654,54 руб.; Акте приема-передачи векселей от 20.11.2018г. в количестве 4-х штук (№000022 - №000025) на сумму 12 547 802,22 руб.; Акте приема-передачи векселей от 20.11.2018г. в количестве 11-ти штук (№000030 - №000040) на сумму 29 082 301,29 руб.; Акте приема-передачи векселей от 20.11.2018г. в количестве 4-х штук (№000041 -№000044) на сумму 5 501 283,78 руб.;Акте приема-передачи векселей от 20.11.2018г. в количестве 8-ми штук (№000006 - №000013), на сумму 10 038 382,90 руб.; Акте сверки взаимных расчетов на 31.12.2018 года за IV квартал 2018 года самим Стаховым  Н.А. или другим лицом?

Производство по делу было приостановлено.

Определением от 22.09.2021 производство по делу возобновлено.

В материалы дела поступило экспертное заключение, содержащее следующие вывод: решить вопрос, кем Стаховым Н.А. либо другим лицом выполнены рукописные подписи, расположенные в исследуемых документах, не представилось возможным. Судом заслушаны пояснения и ответы эксперта Трухачева В.В. на дополнительные вопросы по экспертному заключению. Стахов Н.А. после возобновления производства по делу в судебные заседания не являлся и письменных пояснений не представлял. Согласно выводам  экспертного заключения №2021/410 от 02.09.2021 установить,  подписаны документы директором ООО «Энергострой» Стаховым Н.А. или иным лицом не представляется возможным. Как указал эксперт в экспертном заключении,  оценкой результатов  сравнительного исследования было установлено, что ни совпадающие , ни различающиеся  признаки в своем  объеме не  достаточны для  какого  - либо  определенного ( положительного или отрицательного ) вывода.  Выявленные  совпадающие  признаки немногочисленны , их идентификационная значимость  невысока, что обусловлено  строением исследуемого  почерка, поэтому они не могут быть  положены в обоснование  положительного ( категорического или  вероятного) вывода. Природа же различающихся  признаков не определена: являются ли они  признаками почерка  другого лица  либо это  варианты подписи  Стахова Н.А. , не проявившиеся в представленных образцах. Также нельзя исключить  возможности «автоподлог» ( умышленное внесение  изменений  в собственную подпись с целью последующего отказа от нее).  Судом в судебном заседании обозревались подлинные векселя, представленные ответчиком , копии которых представлены  в материалы дела, а именно:

 Простой вексель № 000001 от 20.11.2018 на сумму 1 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000002 от 20.11.2018 на сумму 1 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000003 от 20.11.2018 на сумму 1 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000004 от 20.11.2018 на сумму 1 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000005 от 20.11.2018 на сумму 1 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000006 от 20.11.2018 на сумму 1 000 000,00 рублей;

Простой вексель №000007 от 20.11.2018 на сумму 1 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000008 от 20.11.2018 на сумму 1 000 000,00 рублей; 

Простой вексель № 000009 от 20.11.2018 на сумму I 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000010 от 20.11.2018 на сумму 1 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000011 от 20.11.2018 на сумму 2 000 000,00 рублей; 

Простой вексель № 000012 от 20.11.2018 на сумму 2 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000013 от 20.11.2018 на сумму 1 038382,90 рублей;

Простой вексель № 000014 от 20.11.2018 на сумму 4 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000015 от 20.11.2018 на сумму 3 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000016 от 20.11.2018 на сумму 3 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000017 от 20.11.2018 на сумму 2 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000018 от 20.11.2018 на сумму 2 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000019 от 20.11.2018 на сумму 1 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000020 от 20.11.2018 на сумму 1 000 000,00 рублей;

Простой вексель №000021 от 20.11.2018 на сумму 1 528 197,70 рублей;

Простой вексель № 000022 от 20.11.2018 на сумму 4 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000023 от 20.11.2018 а на сумму 4 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000024 от 20.11.2018 а на сумму 4 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000025 от 20.11.2018 на сумму 547 802,22 рублей;

Простой вексель № 000026 от 20.11.2018 на сумму 5 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000027 от 20.11.2018 на сумму 5 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000028 от 20.11.2018 на сумму 5 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000029 от 20.11.2018 на сумму 522645,54 рублей;

Простой вексель № 000030 от 20.11.2018 на сумму 3 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000031 от 20.11.2018 на сумму 3 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000032 от 20.11.2018 а на сумму 3 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000033 от 20.11.2018 на сумму 2 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000034 от 20.11.2018 на сумму 2 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000035 от 20.11.2018 на сумму 3 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000036 от 20.11.2018 на сумму 3 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000037 от 20.11,2018 а на сумму 4 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000038 от 20.11.2018 на сумму 2500 000,00 рублей;

Простой вексель № 000039 от 20.11.2018 на сумму 2 500 000,00 рублей;

Простой вексель № 000040 от 20.11.2018 на сумму 1 082 301,29 рублей;

Простой вексель №000041 от 20.11.2018 на сумму 417698,71 рублей;

Простой вексель № 000042 от 20.11.2018 на сумму 597 649,49 рублей;

Простой вексель № 000043 от 20.11.2018 на сумму 2 000 000,00 рублей;

Простой вексель № 000044 от 20.11.2018 на сумму 1 485935,58 рублей. 

           При рассмотрении дела в материалы дела  ответчиком в   подтверждение доводов о полном  исполнении обязанности по  оплате стоимости выполненных  работ   по договорам представлены копии актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, счетов – фактур,  журналов учета выполненных работ , платежных поручений,  векселей  с 000001 по 000044 от 20.11.2018 ( 44 векселя), книги продаж ООО  «НГТ» за  4 квартал 2018 года по ООО «Энергострой», товарных накладных от 21.11.2018 № 445 на сумму 575 973,10 рублей; от 21.11.2018 № 526 на сумму 421 801,86 рублей; от 21.11.2018 № 593 на сумму 252 147,59 рублей; от 22.11.2018 № 447 на сумму 412 124,44 рублей; от 23.11.2018 № 453 на сумму 1 440 167,23 рублей; от 30.11.2018 № 456 на сумму 749 332,33 рублей; от 3011.2018 № 457 на сумму 666 597,58 рублей; от 30.11.2018 № 498 на сумму 481 582,64 рублей; от 30.11.2018 № 503 на сумму 412 958,68 рублей;  от 30.11.2018 № 507 на сумму 406 403,77 рублей; от 30.11.2018 № 518 на сумму 731 803,39 рублей; от 30.11.2018 № 541 на сумму 1 194 064,39 рублей; от 30.11.2018 № 340 на сумму 1 872 459,16 рублей;  от 30.11.2018 № 339 на сумму 499 545,74 рублей;  от 30.11.2018 №338 на сумму 655 489,26 рублей; 30.11.2018 № 337 на сумму 1 391 215,91 рублей;  от 30.11.2018 № 336 на сумму 380 027,44 рублей;  30.11.2018 № 335 на сумму 355 519,98 рублей;  от 30.11.2018 № 334 на сумму 444 388,89 рублей;  от 30.11.2018 года № 333 на сумму 803 476,60 рублей;  от 30.11.2018 № 332 на сумму 774 291,33 рублей; от 30.11.2018 № 331 на сумму 444 399,60 рублей;от 30.11.2018 № 330 на сумму 757 500,00 рублей; от 30.11.2018 № 329 на сумму 196 275,77 рублей;от 30.11.2018 № 328 на сумму 2 230 985,46 рублей;от 30.11.2018 № 327 на сумму 492 375,07 рублей;от 30.11.2018 № 326 на сумму 413 595,00 рублей;от 30.11.2018 № 325 на сумму 459 549,85 рублей;от 03.12.2018 № 355 на сумму 632 130,72 рублей;от 03.12.2018 № 356 на сумму 408 198,00 рублей; от 03.12.2018 № 357 на сумму 871 210,00 рублей; от 03.12.2018 № 358 на сумму 22615 . 09  рублей; от 03.12,2018 № 359 на сумму 143 492,00 рублей;от 03.12.2018 № 360 на сумму 506 417,98 рублей; от 03.12.2018 № 361 на сумму 4 292 568,62 рублей; от 03.12.2018 № 362 на сумму 37 820,00 рублей; от 03.12.2018 № 351 на сумму 494 027,09 рублей; от 03.12.2018 № 350 на сумму 123 624,00 рублей; от 03.12.2018 № 347 на сумму 71 751,20 рублей; от 03.12.2018 № 346 на сумму 230 612,24 рублей; от 03.12.2018 № 345 на сумму 434 887,82 рублей; от 03.12.2018 № 344 на сумму 151 963,04 рублей; от 03.12.2018 № 343 на сумму 5 870,01 рублей; от 03.12.2018 № 352 на сумму 327 257,00 рублей; от 03.12.2018 № 353 на сумму 364 984,00 рублей; от 04.12.2018 № 566 на сумму 1 241 332,17 рублей; от 04.12.2018 № 371 на сумму 1 014 747,00 рублей; от 04.12.2018 № 372 на сумму 328 474,00 рублей; от 04.12.2018 № 373 на сумму 811 318,00 рублей; от 04.12.2018 № 374 на сумму 154 372,81 рублей; от 04.12.2018 № 375 на сумму 278 100,00 рублей; от 04.12.2018 № 376 на сумму 159 612,00 рублей; от 04.12.2018 № 377 на сумму 351 381,12 рублей; от 04.12.2018 № 378 на сумму 4 564 441,00 рублей; от 04.12.2018 № 379 на сумму 342 188,00 рублей; от 04.12.2018 № 363 на сумму 246 932,00 рублей; от 04.12.2018 № 364 на сумму 14 978,09 рублей; от 04.12.2018 № 365 на сумму 219 290,00 рублей; от 04.12.2018 № 366 на сумму 665 511,20 рублей; от 04.12.2018 № 367 на сумму 388 731,00 рублей; от 04.12.2018 № 368 на сумму 1 254 651,50 рублей; от 04.12.2018 № 369 на сумму 541 500,00 рублей; от 05.12.2018 № 380 на сумму 914 120,70 рублей; от 05.12.2018 № 381 на сумму 1 008 569,00 рублей; от 05.12.2018 № 648 на сумму 622 641,37 рублей;  от 06.12.2018 № 383 на сумму 92 859,61 рублей; от 06.12.2018 № 349 на сумму 6 945,50 рублей; от 06.12.2018 № 348 на сумму 23 797,28 рублей; от 06.12.2018 № 647 на сумму 600 073,20 рублей; от 06.12.2018 №384 на сумму 1 046 773,63 рублей; от 06.12.2018 № 385 на сумму 476 834,02 рублей; от 06.12.2018 № 386 на сумму 1 579 649,19 рублей; от 06.12.2018 № 387 на сумму 1 566 486,23 рублей; от 06.12.2018 № 388 на сумму 1 537 328,87 рублей; от06.12.2018 №389 на сумму 1 160 318,00 рублей; от 06.12.2018 № 390 на сумму 909 141,00 рублей; от 06.12.2018 № 391 на сумму 1 196 630,32 рублей;от 06.12.2018 № 392 на сумму 1 224 360,06 рублей;от 06.12.2018 № 393 на сумму 621 623,21 рублей; от 06.12.2018 № 394 на сумму 801 485,04 рублей; от 06.12.2018 № 395 на сумму 794 552,00 рублей; от 06.12.2018 № 396 на сумму 705 278,82 рублей; от 06.12.2018 № 397 на сумму 360096,67 рублей; от 06.12.2018 № 354 на сумму 752 323,75 рублей; от 10.12.2018 № 442 на сумму 2 939 821,05 рублей; от 14.12.2018 № 407 на сумму 10 504,03 рублей; от 17.12.2018 № 409 на сумму 278 929,31 рублей; от 21.12.2018 № 601 на сумму 61 206,00 рублей; от 24.12.2018 № 646 на сумму 14 745,98 рублей; от 31.12.2018 № 643 на сумму 43370,71 рублей., счетов –фактур,   а также подлинные Акт взаимозачета № 86 от 31.12.2018г. на сумму 62 963 504,31 руб. между ООО «НЕФТЕГАЗОТЕХНОЛОГИИ» и ООО «Энергострой»; Акт приема-передачи векселей от 20.11.2018г. в количестве 5-ти штук (№000001 - №000005) на сумму 5 000 000 руб.; Акт приема-передачи векселей от 20.11.2018г. в количестве 8-ти штук (№000014-№000021) на сумму 17 528 197,7 руб.; Акт приема-передачи векселей от 20.11.2018г. в количестве 4-х штук (№000026 - №000029) на сумму 15 522 654,54 руб.; Акт приема-передачи векселей от 20.11.2018г. в количестве 4-х штук (№000022 - №000025) на сумму 12 547 802,22 руб.; Акт приема-передачи векселей от 20.11.2018г. в количестве 11-ти штук (№000030 - №000040) на сумму 29 082 301,29 руб.; Акт приема-передачи векселей от 20.11.2018г. в количестве 4-х штук (№000041 -№000044) на сумму 5 501 283,78 руб.; Акт приема-передачи векселей от 20.11.2018г. в количестве 8-ми штук (№000006 - №000013), на сумму 10 038 382,90 руб., а всего  - акты приема передачи векселей на сумму  95 220 622 руб.  43 коп.; Акт сверки взаимных расчетов на 31.12.2018 года за IV квартал 2018 года.  На  документах, представленных в материалы дела  ответчиком , имеется печать ООО «Энергострой», печать организации не может находиться в свободном доступе для лиц, не имеющих полномочий на совершение действий по представлению истца  в правоотношениях с контрагентами (статьи 182, 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).В материалы дела истцом  не представлено доказательств того, что печать выбывала  из владения истца  помимо его воли. Выданные ООО «НГТ» векселя содержат полное наименование и адрес лица, которому должен быть совершен платеж - ООО «Энергострой», 443009, г. Самара, ул. Воронежская, д. 7, оф. 3, представленные в материалы дела Акты приема-передачи векселей подтверждают факт передачи векселей ответчику и содержат реквизиты сторон,   позволяющие идентифицировать как векселедателя ООО «НГТ», так и лицо, которому  переданы векселя - ООО «Энергострой».  Вексельное законодательство не устанавливает требований к печати при выдаче векселя организацией (ст. 143.1 ГК, Закон от 11.03.1997 № 48-ФЗ, Положение, утвержденное постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 № 104/1341). Таким образом, отсутствие печати на векселе, либо ее отличие не является основанием для признания его недействительным (ст. 2,  76 Положения, утвержденного постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 № 104/1341). Доводы  о том, что сведения ООО «СК Альянс» ИНН 6324078079 в ЕГРЮЛ признаны недостоверными суд принять не может, учитывая, что сведения о недостоверности в отношении директора ООО «СК Альянс» были внесены в ЕГРЮЛ 11.01.2021 года, а сделка по  передача векселей  ООО «СК Альянс»  осуществлена  в первом квартале  2020 года -  до внесения в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений о руководителе данного юридического лица. Нахождение векселя у должника (векселедателя) свидетельствует о прекращении обязательств по векселю, (ст. 39, ст. 77 Положения о переводном и простом векселе, введенным в действие постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 N 104/1341). В абз. 2 п. 24 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ N 14 от 04.12.2000  указано, что  в силу положений ст. 408 ГК РФ  нахождение долгового документа (векселя) у должника удостоверяет, пока не доказано иное, прекращение обязательств. Бремя доказывания факта неполучения платежа в этом случае лежит на кредиторе по векселю. В данном случае, подлинники векселей, выданных  ООО  «НГТ», обозревались в судебном заседании,  и находятся у  ответчика  (векселедателя) , что свидетельствует о прекращении обязательств по векселю. В соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство прекращается зачетом. Зачет в гражданском праве означает погашение вытекающих из обязательственных отношений требований сторон без совершения двойного (параллельного) платежа. По своей юридической природе зачет есть способ надлежащего исполнения обязательства. При этом статья 165 Кодекса не содержит запрета на проведение зачета при осуществлении расчетов  за выполнение работ и поставку товаров. Между  истцом и ответчиком составлен акт взаимозачета № 86 от 31.12.2018, которым произведен взаимозачет встречных однородных требований на сумму  62 963 504  руб. 31 коп. в соответствии с положениями статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.Определением Арбитражного суда Самарской области от 24.05.2021 походатайству Ответчика суд истребовал у ИФНС России по Промышленному району г.Самары заверенные надлежащим образом копии документов в отношении ООО«Энергострой»: книгу покупок за период с 01.10.2018 по 31.12.2018, книгу продаж за период с 01.07,2017 по 30.09.2017, книгу продаж за период с 01.10.2017 по 31.12.2017, налоговую декларацию по НДС за 3-4 квартал 2017 года, налоговую декларацию по НДС за 3 квартал2018 года. В  ответ на запрос суда в материалы дела представлены  документы ( т. 26). В книге покупок ООО «Энергострой» за 4 квартал 2018 года указаны операции по покупке у ООО «НефтеГазоТехнологии» товаров на общую сумму 62 963 504,31 рублей. Как следует из материалов дела, товарные накладные и  счета – фактуры, представленные ответчиком, отражены  в отчетности за 2018 , что подтверждается  книгами продаж за указанный период., аналогичные операции с указанием счет-фактур также отражены в бухгалтерской отчетности ООО «Энергострой»,  и данные операции отражены в налоговой отчетности, которая представлена в материалы дела Инспекцией ФНС по Промышленному району г. Самары. В книге покупок ООО «Энергострой» за 4 квартал 2018 года, предоставленной Инспекцией ФНС по Промышленному району г. Самары, указаны операции по покупке у ООО «НефтеГазоТехнологии» товаров на общую сумму 62 963 504,31 рублей., указанные  операции из Книги покупок ООО «Энергострой» полностью соответствуют сведениям из Книги продаж ООО «НефтеГазоТехнологии» за 4 квартал 2018 года,  таким образом, ООО «Энергострой»  путем включения в налоговую отчетность были одобрены хозяйственные операции, отраженные в спорных товарных накладных. Кроме того, товарные накладные отражены в Акте сверки взаиморасчетов от 31.12.2018 года, который подписан со стороны ответчика  и скреплен печатью организации, а товарные накладные , представленные в подтверждение  поставки товара, также скреплены печатью  ООО «Энергострой». При этом,  отсутствие расшифровки подписи представителя на юридически значимом документе само по себе не порочит, как полномочия такого представителя на совершение зафиксированного в документе юридически значимого действия, так и доказательственное значение этого документа.  Таким образом,  стороны заключили Акт взаимозачета №86 от 31.12.2018, на котором стоит печать ООО «Энергострой» и подпись от имени директора, что говорит об обоюдном согласии на зачет встречных требований. При наличии в деле   документов, подтверждающих  получение истцом  товара  и отражения данных операций  в бухгалтерской и налоговой отчетности,   с учетом положений ст. 410 ПК РФ, взаимозачет  на сумму 62 963 504  руб. 31 коп. является обоснованным. 

           Учитывая, что по результатам проведенной судебной почерковедческой экспертизы  ( в отношении подписи на документах Акт взаимозачета № 86 от 31.12.2018г. на сумму 62 963 504,31 руб. между ООО «НЕФТЕГАЗОТЕХНОЛОГИИ» и ООО «Энергострой»; Акт приема-передачи векселей от 20.11.2018г. в количестве 5-ти штук (№000001 - №000005) на сумму 5 000 000 руб.; Акт приема-передачи векселей от 20.11.2018г. в количестве 8-ти штук (№000014-№000021) на сумму 17 528 197,7 руб.; Акт приема-передачи векселей от 20.11.2018г. в количестве 4-х штук (№000026 - №000029) на сумму 15 522 654,54 руб.; Акт приема-передачи векселей от 20.11.2018г. в количестве 4-х штук (№000022 - №000025) на сумму 12 547 802,22 руб.; Акт приема-передачи векселей от 20.11.2018г. в количестве 11-ти штук (№000030 - №000040) на сумму 29 082 301,29 руб.; Акт приема-передачи векселей от 20.11.2018г. в количестве 4-х штук (№000041 -№000044) на сумму 5 501 283,78 руб.;Акт приема-передачи векселей от 20.11.2018г. в количестве 8-ми штук (№000006 - №000013), на сумму 10 038 382,90 руб.; Акт сверки взаимных расчетов на 31.12.2018 года за IV квартал 2018 года)  доводы истца  о непринадлежности подписи Стахову  Н.А. не подтвердились,   на обозрение суда  ответчиком были представлены подлинные векселя с 000001 по 000044 от 20.11.2018, что свидетельствует о  прекращении обязательств по векселю,  а  доводы  истца о том, что товар истцу по оспариваемым товарным накладным не передавался,  опровергается представленными в материалы дела документами, подтверждающими отражение данных операций  в бухгалтерской и налоговой отчетности  истца, заявление истца о фальсификации доказательств следует признать необоснованным. Поскольку материалами дела подтверждается факт исполнения ответчиком обязательств по оплате спорной  задолженности  истцу на сумму 158 184 126 руб. 74 коп. , между сторонами подписан акт взаимозачета  № 86 от 31.12.2018 на сумму  62 963 504 руб. 31 коп., обстоятельства, свидетельствующие об обоснованности произведенного взаимозачета  подтверждены  товарными накладными , содержащими  отметки о передаче товара ответчиком истцу, и последующим  включением операций по  передаче товара в налоговую отчетность: в книге покупок ООО «Энергострой» за 4 квартал 2018 года, предоставленной Инспекцией ФНС по Промышленному району г. Самары, указаны операции по покупке у ООО «НефтеГазоТехнологии» товаров на общую сумму 62 963 504,31 рублей,  данные хозяйственные операции из Книги покупок ООО «Энергострой» полностью соответствуют сведениям из Книги продаж ООО «НефтеГазоТехнологии» за 4 квартал 2018 года; факт передачи ответчиком векселей подтверждается двухсторонними  актами приема передачи векселей  на сумму  95 220 622 руб. 43 коп. , подлинники  указанных актов представлены в материалы,  подлинные векселя, находящиеся у ответчика,  обозревались в судебном заседании при рассмотрении дела,  т.е. обстоятельства, связанные с оплатой спорной задолженности ответчиком в соответствии со ст. 65 АПК РФ документально подтверждены, оснований для  взыскания   задолженности не имеется, в иске  следует отказать. 

Судебные издержки по оплате государственной пошлины ( 200 000 руб. ) и связанные с проведением судебной экспертизы ( 27 000 руб. ) в соответствии со ст.  110 АПК РФ следует отнести на истца. 

 

Руководствуясь ст. ст. 110,167-171, 176   Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать. 

      Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Энергострой"  в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме  200 000 руб. 

       Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара в течение месяца со дня принятия  с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

 

Судья

/

Л.С. Балькина