ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-224327/17-63-2022

03 апреля  2018 г.

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена     27 февраля 2018г. 

Решение в полном объеме изготовлено      03 апреля 2018 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи  Ишановой Т.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО «Волгоэлектромонтаж» (ИНН 

<

***>)

к ответчику:  ООО «Фирма ИНТРЭК»  (ИНН: 

<

***>)

третьи лица: ООО «Интер РАО-Управление электрогенерацией» (ИНН 

<

***>), ООО «Интер РАО-Инжиниринг» (ИНН 

<

***>)

о взыскании 21 835 032 руб. 07 коп.

при участии:

от истца   – ФИО2 по дов. от 17.01.2016 г. № 3;

от ответчика – не явился, извещен;

от третьих лиц:  не явились, извещены

УСТАНОВИЛ:

Иск  заявлен  о взыскании задолженности в размере 21 835 032 руб. 07 коп., госпошлины в размере 132 175 руб. 

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ООО «Интер РАО-Управление электрогенерацией», ООО «Интер РАО-Инжиниринг».

Ответчик и третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения спора не явились, представителей с надлежащими полномочиями не направили, отзыв на иск не представили, и суд считает возможным рассмотрение спора в отсутствие представителя ответчика и третьих лиц, в порядке ст. 156 АПК РФ.

Истец исковые требования поддержал в полном объеме.

Суд, рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства, считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим  основаниям.

Между ООО «Волгоэлектромонтаж» (подрядчик, истец) и ООО «Фирма ИНТРЭК», (заказчик, ответчик) заключен договор подряда № Д/УЭГ/28/01/3726-ВЭМ/1 от 21.09.2016г. на выполнение подрядчиком работ по прокладке силового и контрольного кабеля и вторичной коммуникации в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к договору) в объеме выданной рабочей документации на объекте: Энергоблок ПГУ-420 МВт Верхнетагильской ГРЭС, расположенной по адресу: 624162, 

<

...> (Промплощадка) согласно пункту 1.1. договора.

В соответствие с условиями договора и дополнительного соглашения к договору №1 от 30.11.2016г. стоимость работ является ориентировочной и составляет 20 600 000 руб. 00 коп. с учетом НДС – 3 142 372 руб. 88 коп.

Пунктом 3.2. договора установлено, что окончательная стоимость будет определяться по фактическим выполненным объемам работ, подтвержденным актами выполненных работ КС-2, справками о стоимости выполненных работ КС-3, исполнительной документацией.

В соответствии с пунктом 3.3. договора договорная Цена включает в себя, среди прочего, все налоги, сборы, таможенные пошлины и взносы, которые должны быть уплачены Субподрядчиком в связи с исполнением обязательств по Договору, как в Российской Федерации, так и за ее пределами. Возмещение затрат, связанных с подвижным (разъездным) характером работ и командированием не входят стоимость Договора и оплачиваются Субподрядчику согласно п. 2.9 Приложения 4 .

Приложением 4 установлено, что размер средств на возмещение затрат, связанных с подвижным (разъездным) характером работ и командированием определяется на основании ПОС, утвержденного Заказчиком, но не выше размера средств, указанного в Сводном сметном расчете, утвержденном Заказчиком. К возмещению принимаются командировочные расходы рабочего персонала для выполнения строительно-монтажных работ кроме, учтённых в нормативах накладных расходов (МДС 81-33.2004. приложение 6, раздел V, п. 9ж).

Окончательные расчеты с Подрядчиком производятся по фактическим затратам, подтвержденным первичными бухгалтерским и иными отчетными документами (расчетами), согласованными Заказчиком с учетом следующих норм возмещения:

- проезд к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы | включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами в пределах лимита ССР, согласованного с заказчиком в соответствии с ПОС. При этом:

- стоимость проезда рабочего и обслуживающего персонала возмещается в размере стоимости проезда в плацкартном вагоне пассажирского поезда не чаще 1 раза в 45 суток на человека.

- расходы на проживание рабочего персонала возмещаются в размере 250 рублей в сутки, при подтверждении соответствующими документами.

- суточные расходы рабочего персонала возмещаются в размере не более 500 рублей за каждый день нахождения в командировке.

С целью осуществления контроля за расходованием средств на командирование Подрядчик на любом этапе строительства может запросить у Субподрядчика справку о фактическом количестве и квалификационном составе командированного персонала на объекте.

Срок исполнение работ, согласно п. 3 дополнительного соглашения  №1 от 30.11.2016г.  установлен с 21.09.2016г. по 30.03.2017г.

П. 8.2 Договора (в редакции п. 4 дополнительного соглашения № 1 от 30.11.16 г.) определено, что оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ производится Подрядчиком на основании подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), а также при условии предоставления исполнительной документации в 4-х экземплярах, а также счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями НК РФ. Зачет суммы оплаченного аванса производится Подрядчиком при возмещении суммы фактически понесенных затрат Субподрядчика, связанных с подвижным (разъездным) характером работ и командированием, рассчитанной с учетом норм Приложения №4 к Договору. Подрядчик вправе в одностороннем порядке производить зачет суммы аванса из отложенного платежа с последующим уведомлением Субподрядчика о состоявшемся зачете. При оплате Подрядчик удерживает 5 % (отложенный платёж) от суммы выполненных работ за отчетный период, указанной в справке о стоимости работ (форма КС-3). Во избежание сомнений, Отложенный Платеж представляет собой согласованный способ обеспечения надлежащего исполнения обязательств Субподрядчика настоящему Договору, не является удерживаемой Подрядчиком принадлежащей Субподрядчику суммой, и Субподрядчик получает право на выплату Отложенного Платежа, только в порядке и сроки, установленные настоящим пунктом, в связи с чем на сумму Отложенного Платежа не начисляются проценты. Из Отложенного Платежа вычитаются, т.е. Отложенный Платеж уменьшаается на любые суммы, которые Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ, включая, без ограничения, расходы, убытки, неустойки, штрафы, неосновательное обогащение, подлежащие возврату платежи. Подрядчик письменно уведомляет Субподрядчика о соответствующем уменьшении Отложенного Платежа с приложением обосновывающих документов. С момента получения Субподрядчиком письменного уведомления об уменьшении Отложенного Платежа либо с момента, когда согласно настоящему Пункту сумма из Отложенного Платежа считается подлежащей к уплате Субподрядчиком, соответствующее обязательство Субподрядчика перед Подрядчиком (по возмещению убытков, уплате неустойки, штрафа, неосновательного обогащения, др.) в сумме, эквивалентной зачтенной сумме, считается прекращенным.

В соответствии с п.7.1. договора способом признания готовности работ по настоящему Договору является ежемесячное оформление Акта о приеме выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Пунктом 7.2. договора  предусмотрено, что по окончании каждого календарного месяца не позднее 15 (пятнадцатого) числа Субподрядчик представляет Подрядчику для подписания Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) за прошедший месяц, исполнительную документацию в 4-х экземплярах по факту выполнения работ. Вышеуказанные справки о стоимости произведенных работ и затрат по форме КС-3 (КС-2), Акты приёмки Работ, подтверждают лишь объем и стоимость произведенных промежуточных Работ и не являются документами, подтверждающими приемку Подрядчиком выполненных Работ (результата Работ) в смысле статей 720 и 753 ГК РФ и, не влекут предусмотренных указанными статьями Гражданского кодекса РФ последствий.

Датой окончательной приемки выполненных Работ является дата подписания Сторонами Акта окончательной приемки выполненных работ, оформленного по форме удовлетворительной для Подрядчика.

В связи с уходом с площадки и прекращением ответчиком работ по договору 31.05.2017 г. в адрес ответчика был направлен Акт сдачи-приемки всего объема работ от 31.05.2017г., (письмо № 189 от 05.06.2017 г.) на сумму выполненных и предъявленных работ, составляющую 44 819 951,53 руб. 

Однако,  ответчик принятые на себя обязательства по оплате работ в полном объеме  не исполнил,  в связи с чем за ним образовалась задолженность в размере 21 835 032 руб. 07 коп.

Выполнение работ на указанную сумму подтверждается следующими документами:

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 31.10.2016. на сумму 3 630 323,10 рублей. (Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 31.10.2016. на сумму 2 056 260, 92 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 2 от 31.10.2016. на сумму 1 546 211, 82 руб.,  Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 3 от 31.10.2016. на сумму 25 147,62 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 4 от 31.10.2016. на сумму 1 116, 28 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 5 от 31.10.2016. на сумму 586,46 руб.);

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 2 от 30.11.2016. на сумму 6 063 917,34 руб. (Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 6 от 30.11.2016. на сумму 6 063 917, 34 руб.);

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 4 от 31.12.2016. на сумму 7 309 558,38 руб. (Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 8 от 31.12.2016. на сумму 1 368 591, 14 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 9 от 31.12.2016. на сумму 3 068 944, 00 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 10 от 31.12.2016. на сумму 2 663 586, 86 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 11 от 31.12.2016. на сумму 208 436, 38 руб.);

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 5 от 31.01.2017. на сумму 4 961 074, 00 руб. (Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 12 от 31.01.2017. на сумму 4 961 074, 00 руб.);

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 7 от 28.02.2017. на сумму 6 416 688, 96 руб. (Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 14 от 28.02.2017. на сумму 1 070 285, 96 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 15 от 28.02.2017. на сумму 1 367 257, 74 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 16 от 28.02.2017. на сумму 840 582, 44 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 17 от 28.02.2017. на сумму 1 315 846, 32 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 18 от 28.02.2017. на сумму 27 553, 00 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 19 от 28.02.2017. на сумму 718 057, 14 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 20 от 28.02.2017. на сумму 104 526, 76 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 21 от 28.02.2017. на сумму 972 579, 60 руб.);

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 28.02.2017. (Доп. согл.) на сумму 1 821 675, 74 руб. (Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 28.02.2017. на сумму 431 640, 46 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 2 от 28.02.2017. на сумму 975 498, 92 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 3 от 28.02.2017. на сумму 414 536, 36 руб.);

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 8 от 31.03.2017. на сумму 3 162 759, 90 руб. (Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 22 от 31.03.2017. на сумму 1 237 298, 44 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 23 от 31.03.2017. на сумму 414 661, 44 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 24 от 31.03.2017. на сумму 198 756, 84 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 25 от 31.03.2017. на сумму 917 366, 22 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 26 от 31.03.2017. на сумму 156 786, 60 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 27 от 31.03.2017. на сумму 237 890, 36 руб.)

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 2 от 31.03.2017. (Доп. согл.) на сумму 4 123 462, 80 руб. (Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 4 от 31.03.2017. на сумму 497 460, 86 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 5 от 31.03.2017. на сумму 136 183, 80 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 6 от 31.03.2017. на сумму 335, 12 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 7 от 31.03.2017. на сумму 10 769, 86 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 8 от 31.03.2017. на сумму 103 450, 60 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 9 от 31.03.2017. на сумму 137 144, 32 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 10 от 31.03.2017. на сумму 226 466, 78 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 11 от 31.03.2017. на сумму 144 878, 04 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 12 от 31.03.2017. на сумму 404 220, 80 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 13 от 31.03.2017. на сумму 353 199, 96 руб. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 14 от 31.03.2017. на сумму 1 019, 52 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 15 от 31.03.2017. на сумму 66 216, 88 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 16 от 31.03.2017 на сумму 161 619, 88 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 17 от 31.03.2017. на сумму 122 039, 14 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 18 от 31.03.2017. на сумму 106 329, 80 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 19 от 31.03.2017. на сумму 5 344, 22 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 20 от 31.03.2017. на сумму 97 106, 92 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 21 от 31.03.2017. на сумму 1 129 938, 50 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 22 от 31.03.2017. на сумму 85 469, 76 руб., Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 23 от 31.03.2017. на сумму 334 268, 04 руб.)

Кроме того, затраты, связанные с подвижным (разъездным) характером работ и командированием подтверждаются следующими документами:

-Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 3 от 30.11.2016. на сумму 1020 046, 63 руб. (Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 7 от 30.11.2016. на сумму 1 020 046, 63 руб.);

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 6 от 28.02.2017. на сумму 2 477 545,19 руб. (Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 13 от 28.02.2017. на сумму 2 477 545, 19 руб.);

-Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 9 от 14.04.2017. на сумму 1 018 804,35 руб.  (Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 28 от 14.04.2017. на сумму 1 018 804, 35 руб.);

-Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 10 от 17.04.2017. на сумму 1 209 912, 91 руб. (Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 29 от 17.04.2017. на сумму 1 209 912, 91 руб.);

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 11 от 31.05.2017. на сумму 1 604 182,22 руб. (Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 30 от 31.05.2017. на сумму 1 604 182, 22 руб.).

Письмом № МИ-2017-0003148 от 06.07.17г. ответчик отказался от подписания Акта сдачи-приемки всего объема работ от 31.05.2017г., по причине того, что стоимость всего объема выполненных работ, указанная в Акте, не соответствует сумме принятых КС-2.

В свою очередь, разница между суммой Акта сдачи-приемки всего объема работ и суммой принятых работ возникла в результате необоснованного отказа ответчика от подписания актов, выполненных работ, а также актов на возмещение затрат, связанных с подвижным (разъездным) характером работ и командированием.

На замечания ответчика, предъявленные в ходе приемки выполненных работ, истец предпринимал меры по их устранению. После устранения замечаний истец направил акты о приемке выполненных работ письмом № 94 от 22.03.2017, № 106  от 03.04.2017, № 122 от 12.04.2017, № 133 от 24.04.2017, № 145 от 26.04.2017,  № 151 от 28.04.2017  № 168 от 15.05.2017.

Истец повторно направил в адрес ответчика претензию № 254 от 21.07.2017 с приложением всех обосновывающих документов.

В ответе на данную претензию мотивировал отказ от подписания актов по следующим причинам:  не представлены копии приказа о предоставлении прав персоналу, согласно требований Ростехнадзора, список исполнительной документации, не соблюдена процедура завершения работ, не соблюдены требования при единовременном выполнении которых возможно подписание окончательной приемки выполненных работ по договору, не представлены счета-фактуры за февраль, март 2017 года, оставлены без удовлетворения требования об оплате штрафов.    

Статьей 307 Гражданского кодека Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) установлено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе.

В соответствии со статьёй 401 Гражданского кодекса, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Как следует из положений статьи 421 Гражданского кодекса, стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (статья 431 Гражданского кодекса).

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Как следует из пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно части 1 статьи 711 Гражданского кодекса установлена обязанность заказчика уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно п. 8.3. оплата выполненных подрядчиком работ по договору производится заказчиком в течение 45 банковских дней от даты подписания сторонами согласованных (завизированных) заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Согласно положениям статьи 753 Гражданского кодекса заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Рассмотрев возражение ответчика, изложенные в ответе на претензию истца № 254 от 21.07.2017, суд приходит к выводу о том, что они являются не обоснованными, поскольку копии приказов на персонал были предоставлены ответчику  по акту приемки от 23.09.16, исполнительная документация предоставлена при приемке работ, счета-фактуры направлены вместе с актами о приемке выполненных работ, а остальные возражения не существенны.

По смыслу гражданско-правового регулирования отношений сторон в сфере подряда и согласно сложившейся в правоприменительной практике правовой позиции, основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 января 2000 г. № 51).

В соответствии с пунктом 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу ч. 4 ст. 131 АПК РФ в случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам.

Ответчик отзыв на исковое заявление, так же как и возражений по существу исковых требований и доказательств, опровергающих доводы истца, в том числе размер задолженности, не представил.

В соответствии с ч. 3 ст. 70 АПК РФ, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, отсутствие письменного отзыва на иск, содержащего возражения на заявленные требования, в отсутствие сведений обосновывающих невозможность их представления по каким-либо не зависящим от ответчика уважительным причинам в суд первой инстанции, обязывает суд рассматривать спор по имеющимся в деле доказательствам и лишает ответчика права в последующем ссылаться на не представленные в суд первой инстанции доказательства.

Ответчиком не представлено доказательств оплаты долга, в связи, с чем исковые требования признаются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Таким образом, с учетом отсутствия доказательств оплаты задолженности, суд считает, что требование о взыскании задолженности в размере 21 835 032 руб. 07 коп. заявлено правомерно и полежит принудительному взысканию с ответчика.

Государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в порядке ст.110 АПК РФ.

Суд, руководствуясь ст.ст.  309, 310, 421, 431, 702, 711, 740, 746, 753 ГК РФ и ст.ст. ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 75, 110, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ,

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «Фирма ИНТРЭК»  в пользу ООО «Волгоэлектромонтаж» задолженность в размере 21 835 032 руб. 07 коп.

Взыскать с ООО «Фирма ИНТРЭК»  в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 132 175 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия. 

СУДЬЯ                                                                                        Т.Н. Ишанова