АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

660049, 

<

...>, https://krasnoyarsk.arbitr.ru/ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Именем Российс кой Федерации 

30 октября 2025 года Дело № А33-25083/2025  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

в удовлетворении ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Алгоритм Спец Техники» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о переходе к рассмотрению настоящего дела по общим правилам искового производства - отказать.  

В удовлетворении ходатайств публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о переходе к рассмотрению настоящего дела по общим правилам искового производства, увеличении срока выполнения мероприятий до 6-ти месяцев и снижении размера договорной неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации - отказать.  

Удовлетворить ходатайство публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о снижении размера судебной неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.14090.24 от 16.12.2024 для электроснабжения объекта общества с ограниченной ответственностью «Алгоритм Спец Техники» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) - «Объект торговли (магазин, торговый центр, прочее)», расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, кадастровый номер земельного участка 24:11:0350001:1853.  

Код доступа к материалам дела - 

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Алгоритм Спец Техники» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку за неисполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.14090.24 от 16.12.2024 в сумме 141 135,06 руб. за период с 17.06.2025 по 27.08.2025 (784 083,66 руб. * 0,25 % * 72 дня)); с 28.08.2025 – неустойку по день фактического исполнения обязательств из расчета 1 960,21 руб. за каждый день просрочки, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 62 057 руб. и 1 000 руб. судебной неустойки за каждый день просрочки, начиная с 31-го дня после вступления решения суда в законную силу, по день его фактического исполнения.  

Во взыскании судебной неустойки в остальной сумме отказать. 

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.  

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя.  

Судья О.И. Медведева