Пятый арбитражный апелляционный суд

ул. Светланская, 115, г. Владивосток, 690001

http://5aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело

№ А24-158/2021

г. Владивосток

10 сентября 2021 года

Резолютивная часть постановления объявлена 08 сентября 2021 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 10 сентября 2021 года.

Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего В.В. Верещагиной,

судей С.Н. Горбачевой, Е.Н. Номоконовой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.А. Манукян,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ВВВ»,

апелляционное производство № 05АП-3874/2021 

на решение от 29.04.2021 

судьи В.И. Решетько

по делу № А24-158/2021 Арбитражного суда Камчатского края 

по иску муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «ВВВ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 1 740 655 рублей 56 копеек неустойки,

при участии: стороны не явились

УСТАНОВИЛ:

муниципальное казенное учреждение «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» (далее – истец, МКУ «Служба благоустройства», учреждение) обратилось в Арбитражный суд Камчатского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ВВВ» (далее – ответчик, ООО «ВВВ», общество) о взыскании 1 740 655 рублей 56 копеек неустойки за нарушение сроков выполнения работ по контракту № 0138300000420000218_77979/95-ДП/20мк от 20.05.2020.

Решением суда от 29.04.2021 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО «ВВВ» обжаловало его в порядке апелляционного производства, просило в удовлетворении исковых требований о взыскании штрафа и неустойки отменить, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

Через канцелярию суда от 06.07.2021 от сторон поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу, подписанное представителями сторон.

В судебном заседании 07.07.2021 от ответчика поступило ходатайство об отложении судебного заседания, которое удовлетворено судом апелляционной инстанции, в связи с чем судебное разбирательство отложено на 28.07.2021.

За время отложения от МКУ «Служба благоустройства» во исполнение определения суда от 07.07.2021 поступили три экземпляра подписанного сторонами мирового соглашения от 05.07.2021.

От сторон поступили ходатайства о проведении судебного заседания по рассмотрению вопроса об утверждении мирового соглашения в отсутствие его представителя.

Исследовав материалы дела, изучив представленный текст мирового соглашения от 05.07.2021 по настоящему делу, подписанного представителями сторон без возражений, арбитражный суд апелляционной инстанции считает подлежащим удовлетворению ходатайство о заключении мирового соглашения в силу следующего.

Согласно статье 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 АПК РФ.

В соответствии со статьей 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону. Мировое соглашение утверждается в судебном заседании арбитражным судом, в производстве которого находится дело (статья 141 АПК РФ).

Поскольку мировое соглашение в представленной редакции не противоречит закону и иным нормативным правовым актам, а также не нарушает права и законные интересы сторон и других лиц, учитывая, что суть мирового соглашения заключается в окончании процесса мирным урегулированием спора, то есть достижением определенности в отношениях между сторонами на основе волеизъявления самих сторон, арбитражный суд апелляционной инстанции утверждает мировое соглашение в данной редакции.

На основании части 2 статьи 150 и пункта 3 статьи 269 АПК РФ в связи с утверждением мирового соглашения производство по настоящему делу подлежит прекращению, а решение Арбитражного суда Камчатского края от 29.04.2021 – отмене. 

Согласно пункту 4 части 7 статьи 141 АПК РФ при утверждении мирового соглашения суд указывает на распределение судебных расходов.

При этом нормы абзаца 2 подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, пункта 3 части 7 статьи 141   АПК РФ содержат императивное правило о возврате истцу из федерального бюджета половины уплаченной им государственной пошлины по иску. Аналогичное правило применяется при возврате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Пунктом 8 мирового соглашения от 05.07.2021 стороны договорились о том, что все расходы по уплате государственной пошлины по делу относятся на ответчика.

Кроме того, сторонами в пункте 9 мирового соглашения от 05.07.2021 установлено, что расходы по оплату услуг представителей сторон, а также иные расходы, прямо или косвенно связанные с настоящим делом, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

Как следует из материалов дела, при подаче искового заявления по настоящему делу в арбитражный суд истцом в доход федерального бюджета уплачена государственная пошлина не уплачена в связи с тем, что  МКУ «Служба благоустройства» освобождено от уплаты государственной пошлины за подачу иска.

Поскольку истец в силу закона освобожден от уплаты госпошлины за подачу иска, с ООО «ВВВ» в доход федерального бюджета подлежит взысканию 15 204 рубля судебных расходов по уплате госпошлины за подачу иска (30 407рублей * 50% = 15 204 рубля).

При обращении ООО «ВВВ» в апелляционной суд с жалобой им уплачена госпошлина по чек-ордеру ПАО «Сбербанк России» Камчатское отделение № 8556/3 от 31.05.2021 на сумму 3 000 рублей, в связи с чем ответчику из федерального бюджета возвращается половина уплаченной им государственной пошлины в размере 1 500 рублей (3 000 рублей * 50% = 1 500 рублей).

Руководствуясь статьями 258, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Камчатского края от 29.04.2021 по делу № А24-158/2021 отменить.

Утвердить мировое соглашение по делу № А24-158/2021 от 05.07.2021, заключенное между Обществом с ограниченной ответственностью «ВВВ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), в дальнейшем именуемое «Ответчик», в лице директора ФИО1 Оглы, действующего на основании Устава, в одной стороны, и Муниципальным казенным учреждением «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), в  дальнейшем именуемое «Истец», в лице начальника ФИО2, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях урегулирования спора по делу № А24-158/2021, в предложенной сторонами редакции: 

 1.По настоящему мировому соглашению Стороны признают, что в ходе исполнения муниципального контракта № 0138300000420000218_77979/95-ДП/20мк от 20.05.2020 на выполнение работ по устройству сквера с детской площадкой  по ул. Звездная 12 Петропавловск-Камчатского городского округа, в период с 20.05.2020г. по 01.09.2020г., Ответчик надлежащим образом выполнил работы на общую сумму 7 189 662,56 (семь миллионов сто восемьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят два рубля пятьдесят шесть копеек). Данное обстоятельство установлено определением Арбитражного суда Камчатского края от 02.07.2021г. по делу № А24-672/2021.

2.Поскольку статьей 34 Федерального закона от 05 апреля 2013г.                         № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусмотрен расчет пени, исходя из цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), Стороны определили неустойку (пени) за нарушение Ответчиком срока окончания выполнения работ по муниципальному контракту № 0138300000420000218_77979/95-ДП/20мк от 20.05.2020г. на выполнение работ по устройству сквера с детской площадкой  по ул. Звездная 12 Петропавловск-Камчатского городского округа в размере 262 010,82 руб. (двести шестьдесят две тысячи десять рублей восемьдесят две копейки), исходя из расчета: 27 739 530, 87  (цена контракта, руб.)  7 189 662,56 (стоимость фактически исполненных обязательств до срока окончания выполнения работ, предусмотренного контрактом, руб.) х 90 (дни просрочки с 02.09.2020г. по 30.11.2020г.) х 4,25% (ключевая ставка Банка России, действующая на момент расторжения контракта) / 300 = 262 010, 82 руб.

3.За нарушение условий контракта № 0138300000420000218_77979/95-ДП/20мк от 20.05.2020 г. на выполнение работ по устройству сквера с детской площадкой  по ул. Звездная 12 Петропавловск-Камчатского городского округа Ответчик обязан оплатить Истцу неустойку в размере 1 648 987,36 руб. (один миллион шестьсот сорок восемь тысяч девятьсот восемьдесят семь рублей тридцать шесть копеек), исходя из расчета: 1 386 976,54 (штраф в соответствии с 7.3 контракта, руб.) + 262 010,82 (пени в соответствии с п. 2 настоящего мирового соглашения, руб.) = 1 648 987,36 руб.

4.Истец отказывается от исковых требований в размере 91 668,20  (девяносто одна тысяча шестьсот шестьдесят восемь рублей двадцать копеек), исходя из расчета: 1 740 655,56 (цена иска, руб.) – 1 648 987,36 (неустойка за нарушение условий контракта, указанная в п. 3 настоящего мирового соглашения).

5.Ответчик обязуется оплатить Истцу неустойку в размере 1 648 987,36 (один миллион шестьсот сорок восемь тысяч девятьсот восемьдесят семь рублей тридцать шесть копеек) в течение 4 (четырех) месяцев с даты утверждения судом настоящего мирового соглашения по следующим реквизитам: 

ИНН/КПП 

<

***>/410101001

Отделение Петропавловск-Камчатский Банк России/УФК по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский

№ казначейского счета (рас.счет): 03100643000000013800

№ единого казначейского счета (кор.счет): 40102810945370000031

БИК ТОФК 013002402

Управление финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (МКУ «Служба благоустройства» л/сч 

<

***>)

Код бюджетной классификации (пени по контракту): 907 116 07010 04 0000 140

Код бюджетной классификации (штраф по контракту): 907 116 07090 04 0000 140

Назначение платежа: оплата неустойки (пени / штраф) по муниципальному контракту №__

5.1.При изменении реквизитов, указанных в п.5 настоящего мирового соглашения, Истец не позднее следующего рабочего дня письменно сообщает Ответчику о таких изменениях.

6.Ответчик вправе оплачивать неустойку, указанную в п. 5 настоящего мирового соглашения, по частям в пределах установленного срока.

7.Утверждение арбитражным судом настоящего мирового соглашения влечет за собой окончательное прекращение гражданско-правового спора по иску полностью.

8.Все расходы по уплате государственной пошлины по делу относятся на Ответчика.

9.Расходы по оплате услуг представителей Сторон, а также по иные расходы, прямо или косвенно связанные с настоящим делом, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.

10.Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу ст.142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству истца или ответчика.

11.Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

12.Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела.

13.Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения арбитражным судом и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Производство по делу прекратить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВВВ» в доход федерального бюджета 15 204 (пятнадцать тысяч двести четыре) рубля государственной пошлины за подачу искового заявления.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ВВВ» из федерального бюджета 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей государственной пошлины, уплаченной по чек-ордеру  ПАО «Сбербанк России» Камчатское отделение № 8556/3 от 31.05.2021.

Выдать справку на возврат государственной пошлины.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Дальневосточного округа через Арбитражный суд Камчатского края в течение двух месяцев.

Председательствующий

Судьи

В.В. Верещагина

С.Н. Горбачева

Е.Н. Номоконова