102/2017-121085(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-3289/2017

город Саратов

12 июля 2017 года

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

РЕШИЛ:

Исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью  «Саратовсоюзлифтмонтаж» удовлетворить частично.  

Признать договор на выполнение подрядных работ № 7 от 30.01.2015 года, заключенный  между Обществом с ограниченной ответственностью «ЭФФИН ГРУПП» и Обществом с  ограниченной ответственностью «Саратовсоюзлифтмонтаж», измененным 27.04.2016 года в  следующем:  

1) Подпункт 2.2.2 пункта 2.2 Договора в следующей редакции: 

 «Окончательный расчет за выполненные работы согласно п. 1. настоящего Договора  производится Генподрядчиком с учетом глав 6 и 8 Договора после выполнения всего объема  работ по настоящему Договору и предоставления Подрядчиком Генподрядчику счета на оплату,  накладной и счета-фактуры по выполненным работам, подписанных обеими Сторонами акта о  приемке выполненных работ (формы КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат  (формы КС-3), счета-фактуры, по выполненным работам, при условии передачи Подрядчиком  документации в соответствии с п. 4.1.13 настоящего Договора в следующем порядке:  

Генподрядчик в срок до 31.05.2016 г. перечисляет на расчетный счет Подрядчика  денежные средства в размере 2550000 рублей, в том числе НДС, а в срок до 31.08.2016 г.  перечисляет на расчетный счет Подрядчика денежные средства в размере 2459915 рублей, в том  числе НДС».  

2) Пункт 2.3 Договора исключен. 3) Пункт 8.5 Договора в следующей редакции: 

«В случае просрочки платежей, указанных в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 настоящего  Договора, Генподрядчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% от указанных  платежей за каждый день просрочки».  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЭФФИН ГРУПП» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 410068, город Саратов, 

<

...> отделение) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  «Саратовсоюзлифтмонтаж» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения:  410056, 

<

...>) задолженность по договору подряда № 07  от 30.01.2015 года в размере 4394915 рублей; неустойку за период с 31.05.2016 года по  21.02.2017 года в размере 492097 рублей 57 копеек; неустойку, начисленную на сумму  задолженности в размере 4394915 рублей, оставшуюся к моменту начисления неустойки, по  ставке в размере 0,05% за каждый день просрочки, за период с 22.02.2017 года по день  фактической уплаты долга.  

В удовлетворении исковых требований Общества с ограниченной ответственностью  «Саратовсоюзлифтмонтаж» в остальной части – отказать.  

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЭФФИН ГРУПП» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 410068, город Саратов, 

<

...> отделение) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 4000  рублей.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Саратовсоюзлифтмонтаж»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 410056, 

<

...>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 1000  рублей.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. Копии решения направить лицам, участвующим в деле. 

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную, кассационную  инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, путем подачи соответствующей жалобы через арбитражный суд первой  инстанции.  

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1