ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП -4, проезд Соломенной Сторожки, 12

адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-80582/2024

город Москва                                                                                       Дело № А40-92243/24

Резолютивная часть постановления объявлена 28 января 2025 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 29 января 2025 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи: Яниной Е.Н.,

судей: Сергеевой А.С., Сазоновой Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

ОАО "МЗ "Арсенал" 

на Решение Арбитражного суда города Москвы от 06.11.2024 по делу № А40-92243/24 по иску ОАО "МЗ "Арсенал" (ИНН: 

<

***>) 

к АО "НПП "Салют" (ИНН: 

<

***>) 

о взыскании 7 536 915 руб. 81 коп. 

и по встречному исковому заявлению АО "НПП "Салют" 

к ОАО "МЗ "Арсенал" о взыскании 3 606 150 руб. 48 коп. 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: 1) АО "Концерн "Моринформсистема - Агат" (ИНН: 

<

***>) 2) ПАО СЗ "Северная Верфь" (ИНН: 

<

***>) 3) Министерство Обороны Российской Федерации (ИНН: 

<

***>) 4) АО "конструкторское бюро "Аметист" (ИНН: 

<

***>)

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: ФИО2 – по доверенности от 20.12.2024; 

от ответчика: ФИО3 – по доверенности от 09.01.2025, ФИО4 - по доверенности от 09.01.2025;

от третьих лиц: не явились, извещены; 

УСТАНОВИЛ:

ОАО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "АРСЕНАЛ" (далее - ОАО "МЗ "АРСЕНАЛ") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о взыскании с АО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САЛЮТ" (далее - АО "НПП "САЛЮТ") неустойки в сумме 7 536 915 руб. 81 коп., начисленной за нарушение обязательств по поставке изделия 1Б66-К для заказа заводской № 926 проекта 22350 в рамках третьего этапа по договору № 1925187303141412209000151/77/59-2021 от 26.07.2021 за период с 31.12.2023 по 15.04.2024, с последующим начислением неустойки по день фактического исполнения обязательств по поставке.

АО "НПП "САЛЮТ" обратилось в арбитражный суд со встречным иском о взыскании с ОАО "МЗ "АРСЕНАЛ" суммы 3 606 150 руб. 48 коп., в том числе, 3 084 816 руб. 49 коп. – задолженность по третьему этапу договора № 1925187303141412209000151/77/59-2021 от 26.07.2021 и 521 333 руб. 99 коп. – неустойка, начисленная за нарушение обязательств по оплате за период с 21.12.2023 по 06.06.2024, с последующим начислением неустойки по день фактического исполнения денежного обязательства.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены АО "КОНЦЕРН "МОРИНФОРМСИСТЕМА - АГАТ", ПАО СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ", АО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "АМЕТИСТ".

Решением суда от 06.11.2024 по делу № А40-92243/24  первоначальные исковые требования ОАО "МЗ "АРСЕНАЛ" оставлены без удовлетворения,  встречные исковые требования о взыскании окончательного расчета и неустойки за несвоевременную поставку удовлетворены частично.  

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ОАО "МЗ "Арсенал" обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной  жалобой, в которой просило указанное решение суда первой инстанции отменить.

В процессе производства по делу в суде апелляционной инстанции сторонами на утверждение представлено мировое соглашение, подписанное от имени ОАО "МЗ "Арсенал" директором ФИО5,  от АО "НПП "Салют" директором ФИО6, от АО "конструкторское бюро "Аметист" – директором ФИО6

На основании ст. 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта. Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону. Мировое соглашение утверждается арбитражным судом.

В соответствии со ст. 140 АПК РФ мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается сторонами или их представителями при наличии у них полномочий на заключение мирового соглашения, специально предусмотренных в доверенности или ином документе, подтверждающих полномочия представителя. 

Представленное на утверждение сторонами мировое соглашение по форме и содержанию соответствует установленным законом требованиям, суд апелляционной инстанции не усматривает препятствий для его утверждения.           

В связи с изложенным принятое судом первой инстанции решение подлежит отмене, производство по делу – прекращению.

Руководствуясь ст.ст. 110, 176, 266-269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

П О С Т А Н О В И Л:

Утвердить мировое соглашение в редакции от 22.01.2025, заключенное между:

Открытым акционерным обществом «Машиностроительный завод «Арсенал», в лице Генерального директора ФИО5, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона -1»,

Акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «Салют»», в лице Генерального директора ФИО6, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона-2»,

Акционерным обществом «Конструкторское бюро «Аметист», в лице генерального директора ФИО6, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона-3», а вместе именуемые «Стороны», в целях урегулирования спора по делу № А40-92243/24 и руководствуясь ч. 4 ст. 49, ст. 139-141 АПК РФ, заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:

1. Сторона-1 признает требования Стороны - 2 в части окончательного расчета за поставку изделия 1Б66-К (зав.№2234835) по договору №1925187303141412209000151/77/59-2021 от 26.07.2021 в сумме 3 084 816 руб. 49 коп.

2. Сторона-2 признает неустойку за просрочку обязательств:

- по этапу 1 Договора №1925187303141412209000151/08/59-2021 от 26.07.2021 в размере 1 180 429 руб. 08 коп.;

- по этапу 1 Договора №1925187303141412209000151/77/59-2021 в размере 948 852 руб. 00 коп.;

- по этапам 1 и 2 Договора №2029187303921412209209443/09/59-2022 от 14.01.2022 в размере 2 864 430 руб. 62 коп. (этап 1) и 408 727 руб. 95 коп (этап 2), 

всего на общую сумму 5 402 439 руб. 65 коп.

3. Стороны пришли к соглашению, что задолженность Стороны-1 в сумме 3 084 816 руб. 49 коп. считается погашенной перед Стороной-2 зачетом взаимных требований, сумма задолженности Стороны-2 после проведения зачета взаимных требований составляет 2 317 623 руб. 16 коп

4. Сторона-2 обязуется выплатить Стороне-1 задолженность в размере 2 317 623 руб. 16 коп. в срок не позднее 31.01.2025 года.

5. Сторона-1 обязуется заключить Дополнительное соглашение к Договору № 1619187304551432209007007/342/59-2022 от 05.12.2022 о переносе сроков по этапам 1 и 3. Срок выполнение работ установить для этапа 1-31.12.2024, для этапа 3-31.03.2025.

6. Настоящим Сторона-1 подтверждает, что не имеет финансовых и материальных претензий к Стороне-3 по неисправности изделия 1Б66-К (зав. №1174822), поставленному по договору №1018187404892020105000118/836 от 13.11.2013.

7. Стороны согласились, что с момента утверждения настоящего мирового соглашения и исполнения его условий в установленные сроки, Стороны не будут заявлять друг к другу каких-либо ранее не предъявленных требований по договору №1925187303141412209000151/77/59-2021 от 26.07.2021 в том числе ранее не предъявленных требований о взыскании задолженности, неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами, штрафов, убытков, судебных и иных расходов, прямо или косвенно связанных с делом № А40-92243/2024.

8. Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу ст. 142 АПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и сроки, которые предусмотрены этим соглашением, что им известны правовые последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу.

Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

9. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Девятым арбитражным апелляционным судом и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10. Настоящее мировое соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Сторон соглашения и один экземпляр для Девятого арбитражного апелляционного суда.

11. Последствия утверждения мирового соглашения, предусмотренные ст. 151 АПК РФ, Сторонам понятны.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.11.2024 по делу № А40-92243/24 отменить, производство по делу № А40-92243/24  прекратить.

Возвратить ОАО "МЗ "Арсенал" (ИНН: 

<

***>) из дохода федерального бюджета в размере 30 342,50 руб. (50 % оплаченной истцом государственной пошлины при подаче искового заявления, на основании платежного поручения № 3407 от 15.04.2024), 30 000 руб. (100 % оплаченной истцом государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы, платежным поручением № 11001 от 27.11.2024г.).

Возвратить АО "НПП "Салют" (ИНН: 

<

***>) из дохода федерального бюджета в размере 20.515 руб. 50 коп. (50 % оплаченной государственной пошлины при подаче встречного искового заявления, на основании платежного поручения № 4995 от 06.06.2024г.)

Разъяснить  сторонам , что возврат государственной пошлины осуществляется налоговым органом на основании настоящего судебного акта без выдачи справки на возврат госпошлины в соответствии с абзацем 8 пункта 3 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья                                                                  Е.Н. Янина

Судьи:                                                                                                          А.С. Сергеева

Е.А. Сазонова