АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А24-6284/2024

г. Петропавловск-Камчатский

18 марта 2025 года

Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи Ищук Ю.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Маркиной М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

по иску общества с ограниченной ответственностью управляющей  

компании «Домюнион» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к фонду капитального ремонта многоквартирных домов  

Камчатского края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

об устранении недостатков работ по капитальному ремонту,  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмет спора, на стороне ответчика, общество с ограниченной ответственностью «СамТоргСтрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

при участии: 

от истца: до и после перерыва ФИО1 – представитель по  

доверенности от 01.04.2024 (сроком на три года), диплом; 

от ответчика: до перерыва ФИО2 – представитель по доверенности от  

09.01.2025 № 01/2025 (сроком по 31.12.2025), диплом; до и после 

перерыва ФИО3 – представитель по доверенности от 

09.01.2025 № 04/2025 (сроком по 31.12.2025), диплом; 

от третьего лица: до перерыва ФИО4 – генеральный директор согласно  

сведениям из ЕГРЮЛ, после перерыва не явился, 

Руководствуясь статьями 167–171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

иск удовлетворить частично. 

Обязать фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу обеспечить выполнение работ по устранению недостатков работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного жилого дома № 2Б по ул. Тельмана г. Петропавловск-Камчатского, а именно:  

 - примыкание к канализационным стоякам выполнить с применением переходного элемента из ЭПДМ резины согласно проектному решению рабочей документации 3107.4-п/2019;  

 - в местах примыкания гидроизоляционного ковра к стойкам ограждения установить переходной элемент из ЭПДМ резины согласно проектному решению рабочей документации 3107.4-п/2019;  

- прижимные рейки крепления верхнего слоя примыкания вентиляционных шахт привести в проектное положение согласно рабочей документации 3107.4-п/2019; выполнить крепление в соответствие с проектным решением с шагом крепления 200 мм;  

 - в местах примыкания вертикальных поверхностей контрфорсов с кровлей установить краевые прижимные рейки;  

- устранить на поверхности кровли вздутия верхнего слоя кровельного материала (воздушные пузыри) в районе квартир №№ 14, 30, 31, 32;  

- на канализационных стояках, металлических зонтах, металлических стойках ограждения устранить нарушения лакокрасочного покрытия и ржавчину;  

- выполнить работы по нанесению дополнительного слоя герметизирующего материала в местах выхода канализационных стояков, на прижимные планки (краевые рейки) и стойки перильного ограждения.  

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать. 

Взыскать с фонда капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края в пользу общества с ограниченной ответственностью управляющей компании «Домюнион» 175 000,00 руб. судебных расходов.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения, а также в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Ю.В. Ищук