141_2719901 

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(

Резолютивная часть решения

)

Дело № А50-26908/2017

17 сентября 2019 г.

г. Пермь

 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Пономарева Г.Л.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску  государственного казенного учреждения Пермского края «Управление  капитального строительства Пермского края» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Терра-Строй»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об обязании устранить выявленные недостатки работ в рамках гарантийного  срока,  

третьи лица: государственное казенное учреждение Пермского края «1 отряд  противопожарной службы Пермского края» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>), общество с ограниченной ответственностью «Научный  Проектно-Технологический Институт «ОРТЭКС» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Пермского края  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Терра-Строй»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение одного месяца со дня  

вступления решения в законную силу безвозмездно устранить недостатки  

(привести в нормативное состояние) по государственному контракту от  

07.04.2014 № 2/2014-AI, а именно: 

выполнить ремонт узлов на кровле (выполнить герметизацию швов и  

стыков); выполнить теплоизоляцию кровли; в период с 15.05.2020 по 20.06.2020 

выполнить восстановление (подливка) отмостки вокруг здания  пожарного депо в полном объеме согласно проекту;  

выполнить монтаж двух существующих секций ограждения  территории и восстановить проектное положение существующего столба;  

выполнить ремонт полов (подливка стяжки, восстановление верхнего  покрытия) во входном тамбуре - 2,2 кв. м, помещении комнаты отдыха - 20  кв.м, выполнить ремонт стен (заделку трещин в перегородках в помещениях  пожарного депо, окраска) - в помещении кухни - 15 кв.м, тамбуре - 2 кв.м,  помещении душевой - 4 кв. м, комнате отдыха 2 кв.м, коридоре - 10 кв.м,  раздевалке - 80 кв.м, в узле ввода - 24 кв.м;  

закрепить трубы отопления в помещении комнаты отдыха - 12 п.м; 

выполнить переклейку обоев и окраску в помещении начальника части  - 6 кв.м;  

выполнить ремонт потолков в помещении раздевалки - 27 кв.м; узле  ввода воды - 8 кв.м;  

заменить поврежденные плитки подвесного потолка в здании депо  (помещение кухни - 30 шт., диспетчерской - 7 шт., пост ГДЗС - 8 шт.);  

выполнить ремонт потолков в помещении электрощитовой и котельной  4 кв.м, и стен 4 кв.м;  

выполнить ремонт асфальта перед въездом в помещение гаража  площадью 6x2 кв.м;  

устранить течь грунтовых вод в смотровой яме гаража;  

в месте выпуска канализации из здания депо восстановить покрытие  путем бетонирования;  

устранить деформацию стен в административной части пожарного  депо;  

восстановить озеленение территории согласно проекту площадью 11  кв.м;  

восстановить проектное положение бордюрного камня по периметру  территории на границе асфальтового покрытия в количестве 10 шт. с  использованием бордюрного камня, который предоставит заказчик.  

В удовлетворении остальной части отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Терра-Строй»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу государственного  казенного учреждения Пермского края «Управление капитального  строительства Пермского края» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  судебные расходы по оплате судебной экспертизы в сумме 60 000 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Терра-Строй»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета РФ  государственную пошлину в сумме 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме).  

Судья Г.Л. Пономарев