Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А40-118629/23-141-929

г.  Москва

31 августа 2023г.

Резолютивная часть решения объявлена               28 августа 2023г.

Мотивированное решение изготовлено                     31 августа 2023г.

 

Арбитражный суд в составе судьи Авагимяна А.Г.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрел дело по иску ООО «ДельтаСпецКом» (ИНН 

<

***>) 

к АО «Евракор» (ИНН 

<

***>) 

о взыскании 19 748 531руб. 73коп.

В судебное заседание явились:

от истца – ФИО2 по доверенности от 31.07.2023г., 

от ответчика – ФИО3 по доверенности 04.04.2023г.,

от ФИО4 по паспорту, 

УСТАНОВИЛ:

ООО «ДельтаСпецКом» обратилось с учетом уточнения предмета исковых требований к АО «Евракор» о взыскании 16 572 601руб. 32коп. задолженности,  1 718 783руб. 08коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму долга за период с 24.05.2023г. по дату фактической оплаты долга и 327 366руб. 17коп. неустойки по договорам №ГПН-19/11023/00003/Р/15-2СП от 01.11.2019г. и по договору №РИ999-15-18СП от 19.06.2019г.

Истец поддержал исковые требования, просил их удовлетворить.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление.

Оценив материалы дела, выслушав представителей сторон, суд пришел к выводу о частичном удовлетворении исковых требований, исходя при этом из следующего.

Как усматривается из материалов дела, 01.11.2019г. между истцом и ответчиком заключен договор №ГПН-19/11023/00003/Р/15-2СП.

В соответствии с вышеуказанным договором истец обязался выполнять работы, а ответчик принимать и оплачивать их.

В порядке ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

Согласно п. 5.1. договора оплата выполненных работ по соответствующему этапу работ осуществляется ответчиком в соответствии с распределением договорной цены и графиком финансирования в размере 90% от стоимости принятых к учету работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет истца в течение 35 дней с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления подписанных в оригинале: акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), при этом выполненные работы должны быть предварительно подтверждены строительным контролем подрядчика/заказчика, а акт о приемке выполненных работ подписан подрядчиком и заказчиком; справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); счета-фактуры установленного образца; отчета о расходе материалов (форма М-29), подписанных обеими сторонами и представленными в оригинале; пакета исполнительной документации, подписанной представителями заказчика и подрядчика, оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ и договором.

Пунктом 5.1.1. договора предусмотрено, что выплата 10% отложенного платежа от стоимости выполненных работ по договору в целом осуществляется ответчиком в течение 60 календарных дней, но не ранее 45 календарных дней с даты подписания сторонами: акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11; акта сверки взаиморасчетов по выполненным работам в 2-х экземплярах; оригинала одного комплекта исполнительной документации, подписанной представителями заказчика и подрядчика.

Так, решением Арбитражного суда г. Москвы от 19.07.2021г. по делу №А40-218858/20, вступившим в законную силу, в удовлетворении исковых требований отказано полностью.

Судом установлено, что: «Сторонами не оспаривается, что работы выполнены и, соответственно, приняты на сумму 231 452 026,44 рублей.».

«Как следует из материалов дела ответчиком всего по Договору облачно 214 879 425,11 рублей с учётом аванса, текущих платежей, договора цессии от 19 октября 2020 г. и зачёта от 6 октября 2020 г.

Задолженность ответчика составляет 16 572 601,33 рубля, что соответствует размеру гарантийного удержания по Договору.».

«Акт по форме КС-11 не подписан до настоящего времени. Тем самым, основания для выплаты истцу отложенного платежа отсутствуют.».

Согласно ч. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Таким образом, арбитражным судом в рамках дела №А40-218858/20 установлено, что стоимость выполненных истцом работ составила 231 452 026руб. 44коп., в то время как ответчиком оплачено 214 879 425руб. 11коп., следовательно, задолженность ответчика, составляющая сумму гарантийного удержания, составляет 16 572 601руб. 33коп. (231 452 026руб. 44коп. - 214 879 425руб.11коп.).

Истцом заявлено требование о взыскании суммы гарантийного удержания в размере 16 572 601руб. 32коп., в обоснование чего истцом представлены следующие документы.

Так, 11.09.2020г. письмом №2020-1496 ответчик сообщил истцу о том, что акт по форме КС-11 от 31.08.2020г. не представляется возможным подписать, поскольку не произведена приемка законченного строительством объекта заказчиком строительства ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-Развитие».

В свою очередь 10.01.2022г. письмом №09-01/000017 ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-Развитие» в адрес истца направило копию акта по форме КС-11 приемки законченного строительством объекта (АКТ №2-1000/4 приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 от 30.08.2021г.).

Кроме того, истцом в материалы дела представлено письмо ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-Развитие» от 23.08.2023г., согласно которому ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-Развитие» подтвердило факт выполнения и оплаты работ.

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Статья 753 ГК РФ предусматривает возможность составления одностороннего акта. Названная норма защищает интересы подрядчика, если заказчик необоснованно отказался от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку (п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 №51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).

В отсутствие мотивированного отказа от подписания направленного подрядчиком одностороннего акта о приемке выполненных работ работы считаются принятыми заказчиком и подлежат оплате,  а сумма гарантийного удержания – оплате.

Таким образом, учитывая то, что акт по форме КС-11 подписан между заказчиком и ответчиком, а последний необоснованно уклоняется от подписания акта по форме КС-11 между ним и истцом, то суд приходит к выводу, что срок для возврата суммы гарантийного удержания наступил.

В порядке ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Задолженность ответчика составила 16 572 601руб. 32коп. и до настоящего времени им не погашена.

Кроме того, наличие задолженности в размере 16 572 601руб. 32коп. по оплате суммы гарантийного платежа ответчиком не оспорено.

Так, в действиях ответчика усматривается односторонний отказ от исполнения обязательств, что в соответствии со ст. 310 ГК РФ не допускается, следовательно, требование истца о взыскании 16 572 601руб. 32коп. задолженности подлежит удовлетворению в судебном порядке.

Истцом также заявлено требование о взыскании 1 718 783руб. 08коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.09.2021г. по 23.05.2023г.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Проверив расчет исковых требований в части начисленных процентов за пользование чужими денежными средствами, суд не усматривает оснований признать его верным, учитывая, что согласно п. 5.1.1. договора срок для возврата суммы гарантийного удержания - в течение 60 календарных дней, но не ранее 45 календарных дней с даты подписания сторонами: акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11, поскольку акт по форме КС-11 подписан между заказчиком и ответчиком 30.08.2021г., следовательно, проценты за пользование чужими денежными средствами за нарушение срока оплаты суммы гарантийного удержания подлежат начислению с 30.10.2021г. (30.08.2021г. + 60 календарных дней), что по расчету суда составляет 1 537 619руб. 56коп. за период с 30.10.2021г. по 31.03.2022г. и с 02.10.2022г. по 23.05.2023г.

Ссылка ответчика на то, что расчет процентов должен производиться с 04.05.2023г., то есть с момента получения претензии, отклоняется судом, поскольку истец и ранее обращался к ответчику с требованием о подписании акта по форме КС-11.

Кроме того, истец просит взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму долга, за период с 24.05.2023г. по дату фактической оплаты долга.

Согласно п. 3 ст. 395 ГК РФ проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Согласно п. 48 постановления пленума Верховного суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств» сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Таким образом, суд считает возможным удовлетворить заявленное требование.

Кроме того, между сторонами подписан договор №РИ999-15-18СП от 19.06.2019г.

В соответствии с вышеуказанным договором истец обязался выполнять работы, а ответчик принимать и оплачивать их.

Пунктом 27.2.1. договора предусмотрено, что в случае, если ответчик нарушил условия оплаты, оговоренные в статье 4 договора, на срок свыше 15 календарных дней (с учетом условий продления сроков оплаты, установленных в п. 21.6. договора), истец вправе взыскать с ответчика пени  в размере 0,1% от суммы задержанного  / просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы просроченного платежа.

Так, статья 4 договора посвящена порядку оплаты и сверки расчетов, налогам, в котором также указывается на обязательство ответчика по возврату суммы гарантийного удержания.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 06.02.2023г. по делу №А40-185722/22, вступившим в законную силу, в удовлетворении ходатайства ответчика о привлечении к участию в деле третьего лица отказано. 

Взыскано с АО "ЕВРАКОР" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу ООО "ДЕЛЬТАСПЕЦКОМ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) задолженность в сумме 6.547.323 руб. 47 коп. 

В удовлетворении остальной части иска отказано. 

Взыскано с АО "ЕВРАКОР" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета РФ государственную пошлину в сумме 51.066 руб. 04 коп. 

Взыскано с ООО "ДЕЛЬТАСПЕЦКОМ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета РФ государственную пошлину в сумме 19.012 руб. 27 коп.

Судом установлено, что: «Учитывая изложенное, суд считает факт наличия задолженности ответчика перед истцом подтвержденным, в связи с чем, сумма задолженности подлежит взысканию с ответчика в размере 6.547.323 руб. 47 коп. В удовлетворении остальной части требования суд отказывает.».

«Требование о взыскании процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ в данном случае также подлежит отклонению, поскольку исходя из буквального толкования условий договора, за нарушение порядка оплаты работ, в том числе выплаты заявленных в иске 10% стоимости фактически выполненных работ (п.4.9, 4.10) условиями договора предусмотрена неустойка (п.27.2.1), а не заявленные истцом проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.».

Согласно ч. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Так, истцом заявлено требование о взыскании неустойки, предусмотренной п. 27.2.1. договора, за нарушение срока оплаты задолженности в размере 6 547 323руб. 47коп., установленной решением суда по делу №А40-185722/22, что по расчету истца составляет 327 366руб. 17коп. за период с 01.06.2021г. по 25.04.2023г. с учетом 5% ограничения размера неустойки (4 543 842руб. 49коп. без учета ограничения).

Размер неустойки судом проверен, признан правильным и подлежащим удовлетворению в заявленной сумме в судебном порядке с учетом того, что в соответствии с установленным п. 27.2.1 договора ограничением размер неустойки, размер рассчитанной истцом неустойки не превышает неустойку, подлежащую начислению с учетом введения моратория Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022г. №497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами».

Учитывая, что исковые требования удовлетворены частично, то судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика в порядке ст. 110 АПК РФ пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Руководствуясь ст.ст. 309, 310, 330, 395, 702, 720, 753 ГК РФ, ст.ст. 69, 110, 167-170, 176 АПК РФ, суд

                                                                     РЕШИЛ:

Взыскать с Акционерного общества «Евракор» (ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ДельтаСпецКом» (ИНН 

<

***>) 16 572 601руб. 32коп. задолженности, 327 366руб. 17коп. неустойки и 1 537 619руб. 56коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Взыскать с Акционерного общества «Евракор» (ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ДельтаСпецКом» (ИНН 

<

***>) проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму долга в размере 16 572 601руб. 32коп., с применением ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, за период с 24.05.2023г. по дату фактической оплаты долга.   

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с Акционерного общества «Евракор» (ИНН 

<

***>) в доход Федерального бюджета РФ 115 188руб. 00коп. госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный  суд в  течение месяца со дня  принятия. 

Судья                                                                                                   А.Г. Авагимян