АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, 

<

...> http://www.msk.arbitr.ru

РЕШЕНИЕ

 Именем Российской Федерации

г. Москва	 Дело № А40-179257/25-110-1379 26.01.2026 г.

Резолютивная часть решения объявлена 13.01.2026 Решение в полном объеме изготовлено 26.01.2026 Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Мищенко А.В. /единолично/, при ведении протокола судебного заседания секретарем Булаховой М.Н,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "СК АВАНГАРД" (109129, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТЕКСТИЛЬЩИКИ, УЛ ЮНЫХ ЛЕНИНЦЕВ, Д. 37, КВ. 119, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "МЕРИДИАН" (117452, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗЮЗИНО, Б-Р ЧЕРНОМОРСКИЙ, Д. 17, К. 1, ПОМЕЩ. 1/2/5, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 4 674 565,42 рублей, а также по встречному иску,

при участии: от истца – ФИО1 по дов., от ответчика- не явился,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "СК АВАНГАРД" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "МЕРИДИАН" о взыскании 3 064 441 руб. задолженности по Договору № СК/23/03/23 от 23.03.2023, 1 578 388 руб. 37 коп. процентов за период с 07.05.2024 по 04.06.2025, 31 736 руб. 05 коп. процентов за период с 04.06.2025 по 17.06.2025, проценты на сумму 3 064 441 руб., исходя из ключевой ставки ЦБ в соответствующие периоды, с 17.06.2025 по день фактической оплаты.

Общество с ограниченной ответственностью "МЕРИДИАН" предъявило встречный иск о взыскании 1 627 780 руб. 73 коп. неустойки по Договору № СК/23/03/23 от 23.03.2023.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, 23.03.2023 между ООО "СК Авангард" и ООО "Меридиан" заключен договор № СК/23/03/23 от 23 марта 2023 года, предметом договора являются работы по изготовлению и монтажу светопрозрачных алюминиевых

конструкций, на объекте: Капитальный ремонт ГБЗУ «Городская поликлиника № 195 Департамента здравоохранения города Москвы», по адресу: 

<

...>» согласно Приложения № 1 к настоящему Договору.

Согласно п.2.1 Стоимость работ по Договору составляет 36786346,00 (Тридцать шесть миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч триста сорок шесть) рублей 00 копеек, включая НДС 20% - 6131057,67 (Шесть миллионов сто тридцать одна тысяча пятьдесят семь) рублей 67 копеек.

Согласно п.2.2 после подписания Договора и выставления счета Подрядчиком Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 25750500,00 (Двадцать пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 20%.

Согласно п.2.3 оплата суммы в размере 7357270,00 (Семь миллионов триста пятьдесят семь тысяч двести семьдесят) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 20%, Заказчик оплачивает в течении 3 (трех) рабочих дней после доставки изделий на объект.

Согласно п.2.4 оплата суммы в размере 3678576,00 (Три миллиона шестьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 20%, Заказчик оплачивает в течении трех рабочих дней после подписания актов приемки передачи выполненных работ.

23.03.2023 года ООО "Меридиан" оплатила согласно пункту 2.2 договора денежную сумму в размере 25750500,00 (Двадцать пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

18.04.2023 между ООО "СК Авангард" и ООО "Меридиан" заключено Дополнительное соглашение № 1 к Договору № СК/23/03/23 от 23 марта 2023 года.

29.05.2023 между ООО "СК Авангард" и ООО "Меридиан" заключено Дополнительное соглашение № 1 к Договору № СК/23/03/23 от 23 марта 2023 года. 1.1. На основании ст. 450 ГК РФ, Стороны договорились о внесении изменений в п.2.1 Договора № СК/23/03/23 от «23» марта 2023 г., при этом вышеуказанный пункт читать в следующей редакции: «п.2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет 33314941,00 (Тридцать три миллиона триста четырнадцать тысяч девятьсот сорок один) рубль 00 копеек, включая НДС 20% - 5 552 490,17 (Пять миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи четыреста девяносто) рублей 17 копеек.

На основании ст. 450 ГК РФ, Стороны договорились о внесении изменений в п.2.3 Договора № СК/23/03/23 от «23» марта 2023 г., при этом вышеуказанный пункт читать в следующей редакции: «п.2.3. Оплата суммы в размере 4 232 946,00 (Четыре миллиона двести тридцать две тысячи девятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%, Заказчик оплачивает в течении 3 (трех) рабочих дней после доставки 75 (Семьдесят пять) процентов изделий на объект».

На основании ст. 450 ГК РФ, Стороны договорились о дополнении п.2.4. Договора № СК/23/03/23 от «23» марта 2023 г., выше указанный пункт читать в следующей редакции: «п.2.4. Оплата суммы в 3 331 495,00 (Три миллиона триста тридцать одна тысяча четыреста девяносто пять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%, Заказчик оплачивает в течении трех рабочих дней после подписания актов приемки передачи выполненных работ».

На основании ст. 450 ГК РФ, Стороны договорились о дополнении п. 3.1. Договора № СК/23/03/23 от «23» марта 2023 г., вышеуказанный пункт читать в следующей редакции: «п.3.1. Работы по Договору в целом должны быть закончены не позднее 10 октября 2023 года.

В обоснование требования, ООО "СК Авангард" сослалось на те обстоятельства, что ООО "Меридиан" оплата по Договору произведена частично, в результате чего образовалась задолженность в размере 3 064 441 руб.

15.08.2023 между сторонами выше указанного договора подписаны КС-2 и КС-3 на сумму в размере 27872637 (двадцать семь миллионов восемьсот семьдесят две тысячи шестьсот тридцать семь рублей).

06.05.2023 между сторонами выше указанного договора подписаны КС-2 и КС-3 на сумму в размере 5442304 (пять миллионов четыреста сорок две тысячи триста четыре рубля).

15.01.2023 между сторонами выше указанного договора подписаны Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. задолженность ООО "Меридиан" перед ООО "СК Авангард" по № СК/23/03/23 от 23 марта 2023 года составляет 7564441 (семь миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок один рубль).

04.06.2025 года ООО "Меридиан" добровольно переведены денежные средства: в размере 3500000 (три миллиона пятьсот тысяч рублей) частичная, оплата по счету № 16 от 28.05.2025 по Договору СК/23/03/23 от 23.03.23 за работы по изготовлению. И монтажу свет прозрачных, алюминиевых, конструкций. В том числе НДС (20%) 583333-33.

17.06.2025 ООО "Меридиан" добровольно переведены денежные средства: в размере 1000000 (один миллион рублей) частичная, оплата по счету № 16 от 28.05.2025 по Договору СК/23/03/23 от 23.03.23 за работы по изготовлению. И монтажу свет прозрачных, алюминиевых, конструкций. В том числе НДС (20%) 166666-67.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчик}', а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно части 1 статьи 711 Гражданского кодекса установлена обязанность заказчика уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Пунктом 1 ст. 746 ГК РФ установлено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком, в размере, предусмотренном сметой, в срок и порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

Статьей 720 ГК РФ установлена обязанность Заказчика в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу. Заказчик вправе ссылаться на выявленные недостатки в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

Согласно положениям статьи 753 Гражданского кодекса заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

По смыслу гражданско-правового регулирования отношений сторон в сфере подряда и согласно сложившейся в правоприменительной практике правовой позиции, основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ

является сдача результата работ заказчику (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 января 2000 г. N 51).

В силу пункта 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Таким образом, статья 395 ГК РФ предусматривает последствия неисполнения или просрочки исполнения денежного обязательства.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 50 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и в пункте 1 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.1998 N 13/14 "О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами", проценты за пользование чужими денежными средствами являются мерой ответственности за неисполнение денежного обязательства

Как следует из материалов дела, ООО "СК АВАНГАРД" заявляет требование о взыскании проценты за пользование чужими денежными средствами за просрочку сдачи результата работ, которое является нарушением обязательства по выполнению работ и сама по себе не образует просрочку денежного обязательства. Следовательно, избранный ООО "МЕРИДИАН" способ защиты и правовое основание требований являются ненадлежащими.

При отсутствии договорной неустойки требование о компенсации последствий просрочки выполнения работ может заявляться в форме убытков (при доказанности их состава и размера), но не путем прямого применения статьи 395 ГК РФ к неденежному обязательству.

Таким образом, ООО "СК АВАНГАРД" выполнены работы в соответствии с договором и сданы Заказчику. Доказательств погашения задолженности Заказчиком не представлено, в связи с чем, требование о взыскании 3 064 441 руб. подлежит удовлетворению.

Кроме того, ООО "СК АВАНГАРД" заявлено требование о взыскании 1 610 124 руб. 42 коп. процентов, которое подлежит удовлетворению.

Согласно п.65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 по смыслу ст.330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

Кроме того, Пунктом 48 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - постановление Пленума № 7) разъяснено, что сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 Кодекса, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 Кодекса).

Соответственно, с ООО "МЕРИДИАН" подлежат взысканию проценты на сумму 3 064 441 руб., исходя из ключевой ставки ЦБ в соответствующие периоды, с 17.06.2025 по день фактической оплаты.

При указанных обстоятельствах, первоначальный иск подлежит удовлетворению.

В обоснование встречного иска ООО «Меридиан» сослалось на следующие обстоятельства.

В соответствии с условиями договора, ООО "СК Авангард" приняло на себя обязательство выполнить работы по изготовлению и монтажу светопрозрачных алюминиевых конструкций, на объекте: «Капитальный ремонт ГБЗУ «Городская поликлиника № 195 Департамента здравоохранения города Москвы», по адресу: 

<

...>», согласно приложению № 1 к Договору.

Согласно п. 3.1. Договора - Работы по договору должны быть закончены не позднее 30.05.2023г.

В связи с тем, что Заказчик оплатил аванс 23.03.2023 сумма в размере 27 750 500 руб. Стороны подписали дополнительное соглашение № 1 от 18.04.2023г. на уменьшение стоимости работ до 33 314 941 руб.

ООО «Меридиан» ссылается, что работы были сданы 15.08.2023 и 06.05.2024г.

В связи с изложенным, ООО «Меридиан» заявляет проценты по ст. 395 ГК РФ в размере 1 627 780,73 руб., исходя из следующего расчета:

с 24.03.2023г по 17.04.2023г с суммы 36 786 346 рублей.

Задолженность,

руб.

Период просрочки

Ставка

Дней в году

Проценты, руб.

с

по

дни

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1]х[4]х[5]/[6]

36 786 346

23.03.2023

17.04.2023

26

7,50%

365

196 529,79

с 18.04.2023г по 15.08.2023г. с суммы 33 314 941 руб.

Задолженность,

руб.

Период просрочки

Ставка

Дней в году

Проценты, руб.

с

по

дни

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1]х[4]х[5]/[6]

33 314 941

18.04.2023

23.07.2023

97

7,50%

365

664 016,97

33 314 941

24.07.2023

14.08.2023

22

8,50%

365

170 682,03

33 314 941

15.08.2023

15.08.2023

1

12%

365

10 952,86

Итого:

120

7,72%

845 651,86

с 16.08.2023г. по 06.05.2024г

Задолженность,

руб.

Период просрочки

Ставка

Дней в году

Проценты, руб.

с

по

ДНИ

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1]х[4]х[5]/[6]

5 442 304

16.08.2023

17.09.2023

33

12%

365

59 045,27

5 442 304

18.09.2023

29.10.2023

42

13%

365

81 410,90

5 442 304

30.10.2023

17.12.2023

49

15%

365

109 591,60

5 442 304

18.12.2023

31.12.2023

14

16%

365

33 399,35

5 442 304

01.01.2024

06.05.2024

127

16%

366

302 151,96

Итого:

265

14,84%

585 599,08

Вместе с тем так условиями договора ответственность за нарушение срока выполнения работ в виде неустойки либо иного вида, не предусмотрены, а положения

ст. 395 ГК РФ в данном случае неприменимы, поскольку являются внедоговорной ответственностью за нарушение денежного обязательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 156, 169-171 АПК РФ,

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить. В удовлетворении встречного иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "МЕРИДИАН" (ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "СК АВАНГАРД" (ОГРН: 

<

***>) 3 064 441 руб. задолженности, 1 610 124 руб. 42 коп. процентов, проценты на сумму 3 064 441 руб., исходя из ключевой ставки ЦБ в соответствующие периоды, с 17.06.2025 по день фактической оплаты, 195 237 руб. в возмещение расходов по госпошлине, 1 500 руб. в возмещение издержек..

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья: А.В.Мищенко