АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, 

<

...>

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 

<

***>

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

город Смоленск

05.06.2025Дело № А62-1906/2025

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Печориной В. А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Язевой Е.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью "ГЕОСТРОЙ-2010" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)

к Смоленскому муниципальному унитарному предприятию "ГОРВОДОКАНАЛ" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)

об изменении контракта № 1/подр от 07.09.2023,

при участии: 

от истца: ФИО1 – представитель по доверенности от 17.12.2024, копия диплома, паспорт;

от ответчика: - ФИО2 - представитель по доверенности от 17.02.2025, копия диплома, паспорт;

У С Т А Н О В И Л :

общество с ограниченной ответственностью "ГЕОСТРОЙ-2010" (далее по тексту – истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к Смоленскому муниципальному унитарному предприятию "ГОРВОДОКАНАЛ" (далее по тексту – ответчик) об изменении контракта № 1/подр от 07.09.2023.

 В судебном заседании от 05.06.2025 от ответчика поступило ходатайство о признании исковых требований в полном объеме.

В соответствии с частью 3 статьи 49 АПК РФ ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично.

Согласно части 5 статьи 49 АПК РФ арбитражный суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.

В силу части 3 статьи 70 АПК РФ признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом (абзац 5 часть 4 статьи 170 АПК РФ).

При этом суд не устанавливает фактических обстоятельств дела, не исследует доказательств и не указывает материально-правовые основания удовлетворения иска.

В данном случае признание иска сделано уполномоченным лицом, не нарушает прав и законных интересов иных лиц, не противоречит закону, в связи с чем, принимается судом.

Учитывая изложенное, исковые требования подлежат удовлетворению.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случае прекращения производства по делу (административному делу) или оставления заявления (административного искового заявления) без рассмотрения Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции или арбитражными судами.

При заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца (административного истца) от иска (административного иска), признании ответчиком (административным ответчиком) иска (административного иска), в том числе по результатам проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу (административному истцу) подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции - 50 процентов, на стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции, пересмотра судебных актов в порядке надзора - 30 процентов.

Как следует из материалов дела, истцом уплачена государственная пошлина в размере 50000 рублей (платежное поручение № 967 от 17.03.2025).

В связи с признанием иска, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию с ответчика 15000 рублей в качестве судебных расходов, а 35000 рублей подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

1. Изменить с 01.01.2025 контракт Nºl/подр от 07.09.2023 г. на одновременное выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства «Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска. (Участок канализационного коллектора в районе Краснинского шоссе)», «Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска (Участок канализационного коллектора по проспекту Строителей)», «Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска (Участок напорного канализационного коллектора от КНС Nº5 по проспекту ФИО5)», заключенный между Смоленским муниципальным унитарным предприятием «Горводоканал» и Обществом с ограниченной ответственностью «ГЕОСТРОЙ-2010», обязав Смоленское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «ГЕОСТРОЙ-2010» дополнительное соглашение № 4 следующего содержания: 

Дополнительное соглашение № 4

к контракту №1/подр на одновременное выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства 

«Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска. (Участок канализационного коллектора в районе Краснинского шоссе)», 

«Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска (Участок канализационного коллектора по проспекту Строителей)», 

«Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска (Участок напорного канализационного коллектора от КНС №5 

по проспекту ФИО5) от 07.09.2023 г.

Идентификационный код закупки 233673100034267310100100010010000000 

Идентификатор государственного контракта (ИГК) 87010610041742209230 

Идентификатор государственного контракта (ИГК) 000 S2 3

<

***> 23 000001 4

г. Смоленск «____» _______ 2025 года

Смоленское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» (СМУП «Горводоканал»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. генерального директора ФИО3 действующего на основании распоряжения Администрации города Смоленска №1463-ЛС от 23.11.2023 г. и Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «ГЕОСТРОЙ-2010» (ООО «ГЕОСТРОЙ-2010»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора ФИО4, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», а каждое по отдельности как указано выше или «Сторона», в связи 

· с получением положительного заключения государственной экспертизы №64-1-1-3-001064-2024 от 16.01.2024г., в том числе в части достоверности определения сметной стоимости, по проекту «Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска. (Участок канализационного коллектора в районе Краснинского шоссе)», 

· с получением положительного заключения государственной экспертизы №67-1-1-3-046016-2024 от 12.08.2024г., в том числе в части достоверности определения сметной стоимости, по проекту «Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска. (Участок напорного канализационного коллектора от КНС №5 по проспекту ФИО5)», 

· с получением положительного заключения заключение государственной экспертизы №67-1-1-3-053508-2024 от 12.09.2024г., в том числе в части достоверности определения сметной стоимости, по проекту «Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска. (Участок канализационного коллектора по проспекту Строителей)», 

· с получением положительного заключения технологического и ценового аудита по объекту «Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска. (Участок канализационного коллектора в районе Краснинского шоссе)» №02741-24/ГГЭ-46575/24-02 от 28.06.2024г.,

· с получением положительного заключения технологического и ценового аудита по объекту «Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска (Участок напорного канализационного коллектора от КНС №5 по проспекту ФИО5) №06754-24/ГГЭ-48800/24-02 от 28.12.2024г., 

· с получением положительного заключения технологического и ценового аудита (далее – ТЦА) по объекту «Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска (Участок канализационного коллектора по проспекту Строителей) №06043-24/ГГЭ-49148/24-02 от 09.12.2024г., 

заключили настоящее дополнительное соглашение №4 к контракту №1/подр от 07.09.2023 г. на одновременное выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства «Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска (Участок канализационного коллектора в районе Краснинского шоссе)», «Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска (Участок канализационного коллектора по проспекту Строителей)», «Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска (Участок напорного канализационного коллектора от КНС №5 по проспекту Гагарина)» идентификационный код закупки 233673100034267310100100010010000000 (далее — Контракт) о нижеследующем:

1.По тексту Контракта Сводный и локальный сметные расчеты считать Сметами Контракта.

2. Дополнительное соглашение № 3 к Контракту от 26.04.2024 г. признать утратившим силу.

3. Пункт 2.1. Контракта изложить в следующей редакции:

«2.1. Цена Контракта является твердой и определяется в соответствии со Сметами Контракта (Приложение № 2.1, 2.2., 2.3. к Контракту) и составляет 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС -20% - 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек (далее – Цена Контракта).

Все объемы и виды работ, включенные в настоящий Контракт, оплачиваются Подрядчику, за исключением работ, исключённых Заказчиком вследствие изменения Технической документации.

Оплата работ по Контракту осуществляется за счет средств, полученных Заказчиком в рамках заключенного с Публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» договора займа № 247Д/ФНБ от 21.08.2023 г. в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС -20%- 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек, за счет субсидии муниципального бюджета в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС -20%- 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек.

В случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Контракта НДС не облагается.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.».

4. Пункт 2.5. Контракта изложить в следующей редакции:

«2.5. Стоимость работ по подготовке Проектной и Рабочей документации и (или) выполнению инженерных изысканий составляет 37 473 536 (тридцать семь миллионов четыреста семьдесят три тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС – 20% 6 245 589 (шесть миллионов двести сорок пять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 40 копеек.».

5. Пункт 2.6. Контракта изложить в следующей редакции:

«2.6. Стоимость работ по строительству Объекта составляет 712 526 463 (семьсот двенадцать миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 60 копеек, в том числе НДС -20% - 118 754 410 (сто восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста десять) рублей 60 копеек.».

6. Пункт 4.1. Контракта изложить в следующей редакции:

«4.1.Срок выполнения Подрядных работ: 

-начало выполнения Подрядных работ, связанных с проведением инженерных изысканий и подготовки Проектной и Рабочей документации в целях реконструкции Объекта, – с момента заключения настоящего Контракта; 

-окончание выполнения работ, связанных с проведением инженерных изысканий и подготовки Проектной и Рабочей документации в целях строительства Объекта – до 31 декабря 2024 года (включительно);

-начало выполнения полного комплекса строительно-монтажных работ по строительству Объекта – после получения разрешения на строительство и передачи Подрядчику по акту Технической документации в порядке, определенном п. 9.1.6. настоящего Контракта;

-окончание выполнения полного комплекса строительно-монтажных работ по строительству Объекта – (срок передачи результата Подрядных работ Заказчику по акту приемки законченного строительством Объекта) – до 17.04.2026 года включительно».

7. Внести изменения в Приложение № 3 к Контракту «График выполнения подрядных работ», изложив его в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

8. Приложение № 2 к Контракту принять в редакции Приложений №2.1, №2.2., №2.3 к настоящему дополнительному соглашению:

Приложение № 2.1. «Смета контракта по объекту «Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска. Участок канализационного коллектора в районе Краснинского шоссе»» с предельной стоимостью выполнения работ 155 938 681 рублей 58 копеек, в том числе НДС 20% - 25 989 780 рублей 26 копеек.

Приложение № 2.2. «Смета контракта по объекту «Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска. Участок напорного канализационного коллектора от КНС №5 по проспекту ФИО5»» с предельной стоимостью выполнения работ 221 577 767 рублей 04 копейки, в том числе НДС 20% - 36 929 627 рубля 84 копейки.

Приложение № 2.3. «Смета контракта по объекту «Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска. Участок канализационного коллектора по проспекту Строителей»» с предельной стоимостью выполнения работ 372 483 551 рубль 38 копеек, в том числе НДС 20% - 62 080 591 рублей 90 копеек.

9. Внести изменения в Приложение № 9 к Контракту «График оплаты», изложив его в редакции Приложения № 3 к настоящему дополнительному соглашению.

10. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон, имеет силу до конца действия Контракта и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с момента заключения Контракта.

11. Все иные положения Контракта, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются без изменений, и исполняются Сторонами в строгом соответствии с его положениями.

 12. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух оригинальных идентичных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта.

14. Неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения № 4 и Контракта являются следующие Приложения:

- Приложение № 1 – График выполнения Подрядных работ (Приложение № 3 к Контракту);

- Приложение № 2.1. «Смета контракта по объекту «Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска (Участок канализационного коллектора в районе Краснинского шоссе)»;

- Приложение № 2.2. «Смета контракта по объекту «Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска (Участок напорного канализационного коллектора от КНС №5 по проспекту ФИО5)»;

- Приложение № 2.3. «Смета контракта по объекту «Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска (Участок канализационного коллектора по проспекту Строителей)».

- Приложение № 3 – «График оплаты» (Приложение № 9 к Контракту).

Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:

СМУП «Горводоканал»

Юридический адрес:

214000, г. Смоленск, ул. Соболева, д. №5 ИНН 

<

***> КПП 673101001

ОГРН 

<

***>

Подрядчик:

ООО «ГЕОСТРОЙ-2010»

Юридический адрес:

214030, 

<

...>, помещ. 510

ИНН 

<

***> КПП 670001001

ОГРН 

<

***>

Заказчик:

_________________ /ФИО3/

М.П.

Подрядчик:

_________________ /ФИО4/

М.П.

Приложение № 1 

к дополнительному соглашению № 4 

от ___ __________ 2025 г.

Приложение № 3 

к контракту № 1/подр от 07 сентября 2023г.     

График выполнения Подрядных работ

Срок начала строительства Объекта (начальный срок): 

проектно-изыскательские работы: с даты заключения Контракта – 31.12.2024 включительно.

строительно-монтажные работы: с даты получения разрешения на строительство и передачи Подрядчику по акту Технической документации в порядке, определенном п. 9.1.6. настоящего Контракта до 17.04.2026 включительно.

Срок окончания строительства - в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, не позднее 17.04.2026 включительно.

Порядковый номер этапа выполнения Контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ

Наименование комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ

Сроки исполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ

Физический объем работ

Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования Заказчика

(при наличии)

1

2

3

4

5

Выполнение инженерных изысканий, разработка Проектной документации, прохождение государственной экспертизы Проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая экспертизу достоверности определения сметной стоимости и ТЦА, разработка Рабочей документации и согласование с заинтересованными службами и надзорными органами 

с даты заключения контракта до 31.12.2024 включительно

1 комплекс работ

-

 Строительство Объекта:

"Новое строительство объектов центральной системы водоотведения г. Смоленск (участок канализационный коллектор в районе Краснинского шоссе)"

Разработка грунта (для укладки трубы в проектные отметки)

с момента выдачи РнС и Технической документации до 15.09.2025

1 комплекс работ

Монтаж труб

с момента выдачи РнС и Технической документации до 30.09.2025

1 комплекс работ

Монтаж колодцев

с момента выдачи РнС и Технической документации до 10.10.2025

1 комплекс работ

Восстановление существующих колодцев

с момента выдачи РнС и Технической документации до 10.10.2025

1 комплекс работ

Обратная засыпка

с момента выдачи РнС и Технической документации до 15.10.2025

1 комплекс работ

Благоустройство

с момента выдачи РнС и Технической документации до 10.11.2025

1 комплекс работ

"Новое строительство объектов центральной системы водоотведения г. Смоленск. Участок напорного канализационного коллектора от КНС №5 по проспекту ФИО5"

Монтаж трубы

с момента выдачи РнС и Технической документации до 13.05.2025

1 комплекс работ

Прокладка трубы методом ГНБ

с момента выдачи РнС и Технической документации до 10.04.2025

1 комплекс работ

Монтаж ж/б камер

с момента выдачи РнС и Технической документации до 20.11.2025

1 комплекс работ

Обратная засыпка траншеи грунтом

с момента выдачи РнС и Технической документации до 10.01.2026

1 комплекс работ

Благоустройство, в том числе покрытие и газоны

с момента выдачи РнС и Технической документации до 20.02.2026

1 комплекс работ

"Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленка. Участок канализационного коллектора по проспекту Строителей"

Разработка грунта (для укладки трубы в проектные отметки)

с момента выдачи РнС и Технической документации до 16.09.2025

1 комплекс работ

Устройство футляра под дорогой

с момента выдачи РнС и Технической документации до 20.04.2025

1 комплекс работ

Монтаж трубы

с момента выдачи РнС и Технической документации до 18.10.2025

1 комплекс работ

Монтаж ж/б камер

с момента выдачи РнС и Технической документации до 15.12.2025

1 комплекс работ

Обратная засыпка траншеи грунтом

с момента выдачи РнС и Технической документации до 20.12.2025

1 комплекс работ

Благоустройство

с момента выдачи РнС и Технической документации до 17.04.2026

1 комплекс работ

Срок подписания Сторонами акта о соответствии состояния Строительной площадки условиям Контракта: не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с момента заключения Контракта.

Срок передачи Подрядчику копии разрешения на строительство - не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения положительного заключения экспертизы проектной документации и заключения по результатам проведения ТЦА; 

копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений – не позднее 10 календарных дней с момента получения положительного заключения экспертизы проектной документации.

Срок передачи Подрядчику копий технических условий и разрешений на временное присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства: не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения положительного заключения экспертизы проектной документации.

Срок передачи Подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации: не предусмотрено.

Срок подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией: срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения содержится в технических условиях.

Срок подписания акта о соответствии состояния Строительной площадки условиям Контракта при завершении строительства объекта: в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня ввода Объекта в эксплуатацию.

Заказчик:

СМУП «Горводоканал»

Юридический адрес:

214000, г. Смоленск, ул. Соболева, д. №5 ИНН 

<

***> КПП 673101001

ОГРН 

<

***>

ОКПО 03304350

ОКАТО 66401000000

Подрядчик:

ООО «ГЕОСТРОЙ-2010»

Юридический адрес:

214030, 

<

...>, помещ. 510

ИНН 

<

***> КПП 670001001

ОГРН 

<

***>

Заказчик:

_________________ /ФИО3/

М.П.

Подрядчик:

_________________ /ФИО4/

М.П.

Приложение № 2.1. 

к дополнительному соглашению № 4 

от ___ __________ 2025 г.

к контракту № 1/подр от 07 сентября 2023г.

Смета Контракта

по объекту: «Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска. Участок канализационного коллектора в районе Краснинского шоссе»

Составлена в текущем уровне цен 4 квартала 2023года

9

 10,00 

№№ п/п

Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования

Ед. измерения

 Кол-во (объем работ) 

Цена за единицу измерения, без НДС, руб

Стоимость всего, руб

Страна происхождения оборудования

1

2

3

4

5

6

7

I

ПИР

комплекс

1

7 118 680,00

7 118 680,00

II

Строительно-монтажные работы, в том числе:

122 830 221,32

1

Разбивка оси трассы

км

0,5382

3 344,80

1 800,17

2

Вырубка зеленых насаждений с транспортировкой

шт

4

1 836,31

7 345,24

3

Демонтаж благоустройства с транспортировкой

м3

54,742

3 179,83

174 070,25

4

Организация дорожного движения (ОДД)

комплекс

1

96 902,10

96 902,10

5

Разработка грунта 

м3

2 010,4

461,29

927 377,42

6

Устройство трубопровода

м

498,7

233 485,51

116 439 223,84

7

Гидравлическое испытание трубопроводов

м

498,7

21,00

10 472,70

8

Присоединение к существующим сетям и колодцам

комплекс

1

712 862,94

712 862,94

9

Устройство колодцев

шт

18

152 179,35

2 739 228,30

10

Демонтаж существующих колодцев

шт

7

27 172,04

190 204,28

11

Обратная засыпка траншей и котлованов

м3

1 841,1

207,73

382 451,70

12

Благоустройство

м2

2 209

519,82

1 148 282,38

III

Непредвиденные работы и затраты-3%

0,00

ИТОГО: 

129 948 901,32

НДС-20%

25 989 780,26

ВСЕГО с учетом НДС

155 938 681,58

Примечание :

Смета контракта не учитывает стоимость затрат на содержание службы заказчика и строительного контроля.

Заказчик:

 Подрядчик: 

СМУП "Горводоканал"

 ООО "ГЕОСТРОЙ-2010" 

___________________ /___________________/

 ____________________ /______________________/ 

М.П.

 М.П. 

Приложение № 2.2. 

к дополнительному соглашению № 4 

от ___ __________ 2025 г.

к контракту № 1/подр от 07 сентября 2023г.

Смета контракта

по объекту: "Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска. Участок напорного канализационного коллектора от КНС № 5 по проспекту ФИО5"

Составлена в текущем уровне цен 1 квартала 2024года

руб. 

№№ п/п

Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования

Единица измерения

Количество

 (объем работ)

Цена на единицу измерения, без НДС, руб.

Стоимость всего, руб.

Страна происхождения оборудования

1

2

3

4

5

6

7

I

 ПИР 

комплекс

1

9 729 700,00

9 729 700,00

II

Строительно-монтажные работы, в том числе:

174 918 439,20

1

Разбивка оси трассы

км

1,77

30 536,72

54 172,14

2

Вырубка зеленых насаждений с транспортировкой

шт

6

2 435,87

14 615,22

3

Демонтажные работы

комплекс

1

365 210,22

365 210,22

4

Организация дорожного движения (ОДД)

комплекс

1

626 540,42

626 540,42

5

Срезка растительного грунта

м3

1 734,55

105,66

183 272,55

6

Разработка грунта 

м3

10 708,30

218,95

2 344 582,29

7

Устройство трубопровода, в том числе:

м

1 774

84 685,44

150 231 970,56

 7.1

Устройство трубопроводов Д900, в том числе:

м

1 774

84 680,88

150 223 881,12

 7.2

Гидравлическое испытание трубопроводов

м

1 774

4,57

8 107,18

8

Крепление стенок котлованов и траншей Устройство траншей и котлованов (в ОЗ ВЛ и без)

м2

1 998

630,82

1 260 378,36

9

Утилизация строительных отходов

т

7 515,283

600,34

4 511 724,75

10

Устройство водопропускной трубы (переход через овраг)

м

11

42 493,89

467 432,79

11

Монтаж оборудования в здании КНС №5, в том числе:

комплекс

1

6 022 402,53

6 022 402,53

 11.1

Стоимость оборудования задвижки "DENDOR" тип 47GVA DN 800 PN10/PN16 в комплекте с электроприводом MT903.А100-34 (DN 800), S2-15, 380В, IP67

шт

2

2 416 717,56

4 833 435,12

12

Устройство колодцев

шт

7

128 513,10

899 591,70

13

Устройство камеры гашения напора

шт

1

211 458,16

211 458,16

14

Откачка дождевого стока, в том числе:

комплекс

1

44 579,61

44 579,61

 14.1

Стоимость оборудования насоса поверхностного ручного, производительностью 1,32 м3/ч, максимальная высота всасывания 6 м

шт

3

5 762,10

17 286,30

15

Обратная засыпка траншей и котлованов

м3

9 943,50

661,08

6 573 448,98

16

Благоустройство

м2

4 202,00

263,46

1 107 058,92

III

Непредвиденные работы и затраты-3%

0,00

ИТОГО

184 648 139,20

НДС 20%

36 929 627,84

Всего с учетом НДС

221 577 767,04

Примечание :

Смета контракта не учитывает стоимость затрат на содержание службы заказчика и строительного контроля.

Заказчик:

 Подрядчик: 

СМУП "Горводоканал"

 ООО "ГЕОСТРОЙ-2010" 

___________________ /___________________/

 ____________________ /______________________/ 

М.П.

 М.П. 

 Приложение № 2.3. 

к дополнительному соглашению № 4 

от ___ __________ 2025 г.

к контракту № 1/подр от 07 сентября 2023г.

Смета Контракта

по объекту: «Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска.Участок канализационного коллектора по проспекту Строителей"

Составлена в текущем уровне цен 2 квартала 2024года

9

№№ п/п

Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования

Ед. измерения

Количество (объем работ)

Цена за единицу измерения, без НДС, руб

Стоимость всего, руб

Страна происхождения оборудования

1

2

3

4

5

6

7

I

ПИР

комплекс

1,00

14 379 567,00

14 379 567,00

II

Строительно-монтажные работы, в том числе:

296 023 392,48

1

Вырубка зеленых насаждений с транспортировкой

шт

15,00

1 136,47

17 047,05

2

Демонтаж благоустройства с транспортировкой

м3

46,44

2 806,81

130 348,26

3

Срезка растительного грунта

м3

1 775,80

167,20

296 913,76

4

Разработка грунта 

м3

10 342,10

262,98

2 719 765,46

5

Устройство трубопровода, в том числе:

м

1 735,70

154 225,88

267 689 866,50

5.1

Устройство трубопроводов закрытым способом Д900мм

м

142,00

125 846,69

17 870 229,98

5.2

Гидравлическое испытание трубопроводов

м

142,00

17,01

2 415,42

5.3

Устройство трубопроводов закрытым способом Д1100мм

м

679,00

202 127,05

137 244 266,95

5.4

Гидравлическое испытание трубопроводов

м

679,00

21,00

14 259,00

5.5

Устройство трубопроводов закрытым способом Д225мм

м

24,00

14 727,59

353 462,16

5.6

Гидравлическое испытание трубопроводов

м

24,00

0,84

20,16

5.7

Устройство футляра Д1440 мм

м

67,50

64 861,96

4 378 182,30

5.8

Устройство трубопровода Д1100мм в футляре 1440мм

м

67,50

127 169,30

8 583 927,75

5.9

Гидравлическое испытание трубопроводов

м

67,50

21,00

1 417,50

5.10

Устройство трубопроводов Д1100 открытым способом

м

809,10

118 575,35

95 939 315,69

5.11

Гидравлическое испытание трубопроводов

м

809,10

21,00

16 991,10

5.12

Устройство трубопроводов Д900 открытым способом

м

38,10

67 744,24

2 581 055,54

5.13

Гидравлическое испытание трубопроводов

м

38,10

17,01

648,08

5.14

Устройство трубопроводов Д500 открытым способом

м

24,40

21 362,53

521 245,73

5.15

Гидравлическое испытание трубопроводов

м

24,40

5,24

127,86

5.16

Устройство трубопроводов до Д225 открытым способом

м

50,30

3 623,44

182 259,03

5.17

Гидравлическое испытание трубопроводов

м

50,30

0,84

42,25

6

Крепление стенок котлованов и траншей Устройство траншей и котлованов

м2

598,14

8 702,98

5 205 600,46

7

Утилизация строительных отходов

т

4 398,26

1 419,73

6 244 341,67

8

Присоединение к существующим сетям и колодцам

шт

10,00

94 715,66

947 156,60

9

Восстановление свода существующего коллектора

комплекс

1,00

1 593 167,60

1 593 167,60

10

Устройство колодцев

шт

47,00

141 121,43

6 632 707,21

11

Демонтаж существующих колодцев

м3

14,25

12 397,48

176 664,09

12

Обратная засыпка траншей и котлованов

м3

9 548,00

406,54

3 881 643,92

13

Благоустройство

м2

90,00

5 424,11

488 169,90

III

Непредвиденные работы и затраты-3%

0,00

ИТОГО: 

310 402 959,48

НДС-20%

62 080 591,90

ВСЕГО с учетом НДС

372 483 551,38

Примечание :

Смета контракта не учитывает стоимость затрат на содержание службы заказчика и строительного контроля.

Заказчик:

 Подрядчик: 

СМУП "Горводоканал"

 ООО "ГЕОСТРОЙ-2010" 

___________________ /___________________/

 ____________________ /______________________/ 

М.П.

 М.П. 

Приложение № 3 

к Дополнительному соглашению № 4 

от ___ ________ 2025 г. 

Приложение № 9 

к контракту № 1/подр от 07 сентября 2023г.

График оплаты

Порядковый номер этапа выполнения Контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ

Наименование комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ

Сроки выплаты аванса

Размер аванса, подлежащий выплате Подрядчику от цены Контракта

Сумма к оплате

Сроки оплаты за выполненный комплекс работ и (или) вида работ и (или) часть работ отдельного вида работ

1

2

3

4

5

6

1

Выполнение инженерных изысканий, разработка Проектной документации, прохождение государственной экспертизы Проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая экспертизу достоверности определения сметной стоимости, и ТЦА, разработка Рабочей документации и согласование сзаинтересованными службами и надзорными органами

Выплата аванса не предусмотрена

0,00 ₽

37 473 536,40 ₽

в течение 7(семи) рабочихдней с датыподписанияЗаказчикомдокумента оприемке

1.1.

Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска. (Участок канализационного коллектора в районе Краснинского шоссе)

8 542 416,00 

в течение 7(семи) рабочихдней с датыподписанияЗаказчикомдокумента оприемке

1.2.

Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска (Участок напорного канализационного коллектора от КНС № 5 по проспекту ФИО5)

11 675 640,00 

1.3.

Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска (Участок канализационногоколлектора по проспекту Строителей)

17 255 480,40 

2

Строительство объекта капитального строительства

в течение 10 (десяти) календарных дней смомента письменного обращения Подрядчика, направленного Заказчику посленаправления Проектной документации нагосударственную экспертизу.

371 831 225,96 ₽

712 526 463,60 ₽

в течение 7(семи) рабочихдней с датыподписанияЗаказчикомдокумента оприемке

2.1

Новое строительство объектов централизованной системыводоотведения г. Смоленска. (Участок канализационного коллектора в районе Краснинского шоссе)

 147 396 265,58 

в течение 7(семи) рабочихдней с датыподписанияЗаказчикомдокумента оприемке

2.2

Новое строительство объектов централизованной системыводоотведения г. Смоленска (Участок напорного канализационного коллектора от КНС № 5 по проспектуФИО5)

209 902 127,04 ₽

в течение 7(семи) рабочихдней с датыподписанияЗаказчикомдокумента оприемке

2.3

Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска (Участок канализационногоколлектора по проспекту Строителей)

355 228 070,98 ₽

в течение 7(семи) рабочихдней с датыподписанияЗаказчикомдокумента оприемке

Итого

750 000 000,00 ₽

Цена контракта составляет - 750 000 000,00 руб (Семьсот пятьдесят миллионов рублей 00 коп.), в том числе НДС-20% - 125 000 000,00 руб (сто дводцать пять миллионов руб. 00 коп.)

Срок окончательной оплаты - не позднее 7 (семи) Рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, на основании документа о приемке, сметы Контракта, акта приемки выполненных работ (КС-2), предоставления справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта приемки законченного строительством объекта (КС-11) (в случае приемки работ по окончательному этапу), счета, счета-фактуры.

Заказчик:

Подрядчик:

СМУП "Горводоканал"

ООО "ГЕОСТРОЙ-2010"

_______________ /______________________/

___________________ /________________________/

М.П.

М.П.

Взыскать со Смоленского муниципального унитарного предприятия "ГОРВОДОКАНАЛ" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ГЕОСТРОЙ-2010" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) судебные расходы в виде уплаченной по делу государственной пошлины в размере 15000 рублей.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "ГЕОСТРОЙ-2010" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в связи с признанием ответчиком иска в размере 35000 рублей (платежное поручение от 17.03.2025 № 967), о чем выдать справку.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

Судья В.А. Печорина