АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А45-33727/2019

г. Новосибирск

14 ноября  2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 07.11.2019

Решение в полном объеме изготовлено 14.11.2019

 Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Майковой Т.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  акционерного общества "Региональные электрические сети" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск

к закрытому акционерному обществу "Стройконтакт" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск

о взыскании 2326862,01 руб. убытков, 56517,35 руб. долга,

при участии в судебном заседании представителя истца ФИО2 по доверенности от 08.08.2019, 

установил:

Акционерное общество "Региональные электрические сети" обратилось в суд с иском к закрытому акционерному обществу "Стройконтакт" о взыскании убытков, связанных с исполнением договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 129674/5326747 от 18.11.2016 г., в размере 2 326 862,01 руб.; задолженности по внесению платы по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 141308/5329028 от 25.08.2017 г. в размере 56 517,35 руб..

        Истец иск поддержал в полном объеме.

        Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом,  представил отзыв на иск, в котором указывает наличие в действиях истца признаков умышленного уклонения от уплаты государственной пошлины в полном объеме. По существу исковых требований ответчик отзыв не представил, против удовлетворения иска не возражал.  

         Рассмотрев материалы дела, выслушав пояснения представителя истца, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска. 

        Как следует из материалов дела, в соответствии с условиями Договора № 129674/5326747  АО «РЭС» обязалось осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям многоквартирного 16-тиэтажного жилого дома и двухуровневой подземной парковки по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Виноградова (кадастровый номер земельного участка: 54:35:083015:22), а ЗАО «Стройконтакт» обязалось оплатить расходы на технологическое шрисоединение и выполнить мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположено присоединяемое энергопринимающее устройство.

         Согласно п. 10 Договора № 129674/5326747 размер платы за технологическое присоединение объекта определен в соответствии с Приказом Департамента по тарифам Новосибирской области № 485-ТП (п. 7), 484-ТП от 30.12.2015 г. и составил 2 598 960.63 руб.. в т.ч. НДС. Заявитель внес часть платы по Договору № 129674/5326747 в размере 100000 руб., уведомление о выполнении своей части мероприятий в Сетевую организацию не направлял.

          Согласно заявлению исх. № 9/9-2 от 25.06.2018 на основании ст. 782 ГК РФ ЗАО «Стройконтакт» в лице Конкурсного управляющего ФИО3 в одностороннем порядке отказалось от исполнения Договора № 129674/5326747.

          В соответствии с п. 1 ст. 450.1 ГК РФ Договор № 129674/5326747 прекращен с 03.07.2018 г. - момента получения указанного заявления.

          В силу п. 1 ст. 782 ГК РФ Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

          Во исполнение Договора № 129674/5326747 до его расторжения АО «РЭС» понесло следующие расходы:

1)расходы на подготовку и выдачу технических условий

Согласно п. 18 Правил технологического присоединения мероприятия по технологическому присоединению включают в себя, в том числе, подготовку, выдачу и согласование сетевой организацией технических условий.

         Приказом Департамента по тарифам Новосибирской области №485-ТП, 484-ТП от 30.12.2015 г. (в редакции Приказа от 11.01.2016 г. № 2-ТП), действовавшим на дату заключения между АО «РЭС» и ЗАО «Стройконтакт» Договора № 129674/5326747, предусмотрена плата за подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 61 руб. за 1 кВт присоединяемой мощности (без НДС).

         АО «РЭС» подготовлены и выданы ЗАО «Стройконтакт» Технические условия № 53-16/129674 от 15.09.2016 г., являющиеся приложением № 1 к Договору № 129674/5326747.

       С учетом присоединяемой мощности объектов Заявителя в размере 315,1 кВт (п. 1 Договора № 129674/5326747) размер платы за подготовку и выдачу Технических условий составляет 22 680,90 руб., в т.ч. НДС (расчет - приложение № 1 к исковому заявлению).

 В соответствии с п. 6 Договора № 129674/5326747, п.п 10.1, 10.2 Технических условий на АО «РЭС» была возложена обязанность по прокладке кабельных ЛЭП-10 кВ от ЛЭП-10 кВ РУ-10 кВ ТП-2001 (яч. 5) - РУ-10 кВ ТП-2037 (яч. 5) и кабельной ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ТП 2001 (яч. 2) до границ земельного участка заявителя.

            В целях исполнения своих договорных обязательств АО «РЭС» заключило сАО «РЭМиС» Дополнительное соглашение № РИ-69-15-01644-ДС97 от 10.02.2017 г. к Договору подряда № РИ-69-15-01644 от 24.02.2016 г. на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ (соответствующие мероприятия предусмотрены Приложением № 1 к Договору).

        Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по объекту «кабельные линии 10 кВ до границ земельного участка заявителя» выполнены АО «РЭМиС» надлежащим образом, что подтверждается: Актом о приемке проектно-изыскательских работ № 1 от25.05.2017 г. на сумму 211 640,07 руб.; Актом о приемке строительно-монтажных работ № 1 от 25.06.2017 г. и Справкой стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.06.2017 г. на сумму 2 192 541,04 руб.

        Сумма понесенных АО «РЭС» затрат, связанных с выполнением проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, составляет 2 404 181,11 руб. (211640,07 руб. + 2 192 541,04 руб.).

        Таким образом, общая сумма затрат, понесенных АО «РЭС» в связи с исполнением обязательств по Договору № 129674/5326747 до его прекращения, составляет: 22 680,90 руб. + 2 404 181,11 руб. = 2 426 862,01 руб.

        Денежные средства в размере 100 000,00 руб., внесенные ЗАО «Стройконтакт» за технологическое присоединение по Договору № 129674/5326747, подлежат удержанию с последнего в счет выполнения АО «РЭС» мероприятий по подготовке и выдаче технических условий (полностью в размере 22 680,90 руб.), а также выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ (частично в размере 77 319,10 руб.).

         Таким образом, ЗАО «Стройконтакт» обязано возместить АО «РЭС» расходы в размере 2 326 862,01 руб. (2 426 862,01 руб. - 100 000,00 руб.).

        Обязанность ЗАО «Стройконтакт» по возмещению АО «РЭС» фактически понесенных расходов по Договору № 129674/5326747 установлена также решением Арбитражного суда Новосибирской области от 26.10.2018 г. и постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 25.02.2019 г. по делу  А45-29345/2018. 

        В соответствии с условиями Договора № 141308/5329028 АО «РЭС» обязалось осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям открытого склада строительных материалов с проектируемой кабельной линией 0,4 кВ по адресу: г.Новосибирск, ул. Первомайская, 200Б в Первомайском районе (кадастровый номер земельного участка: 54:35:082780;10), а ЗАО «Стройконтакт» обязалось оплатить расходы за технологическое присоединение и выполнить мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположено присоединяемое энергопринимающее устройство.

          Согласно п. 10 Договора № 141308/5329028 в редакции Дополнительного соглашения  от 28.03.2018 г. размер платы за технологическое присоединение объекта определен в соответствие с Приказами Департамента по тарифам Новосибирской области №№ 524-ТП (и. 7), 523-ТП от 27.12.2016 г. (в редакции Приказов № 1-ТП от 09.01.2017 г., № 53-ТП от 14.03.2017 г.) и составляет 143517,35 руб., в т.ч. НДС.

         Порядок и сроки внесения ЗАО «Стройконтакт» платы за технологическое присоединение установлены в п. 11. Договора № 141308/5329028.

        Фактическое технологическое присоединение к электрическим сетям Объекта Ответчика осуществлено 12.07.2018 г., что подтверждается Актом об осуществлении технологического присоединения № 141308/5329028 от 12.07.2018 г. (далее - Акт).

        Ответчиком плата за технологическое присоединение объекта внесена в размере 87000,00 руб. Исходя из п. И Договора № 141308/5329028, п. 16(2) Правил технологического присоединения ЗАО «Стройконтакт» должно было внести остаток платы в размере 56 517,35 руб. (143 517,35 - 87 000,00 руб.) не позднее истечения 15 дней с даты подписания Акта, то есть 27.07.2018 г. Однако Ответчик не исполнил указанное обязательство до настоящего времени.

          Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для обращения АО «РЭС» в Арбитражный суд Новосибирской области с настоящим исковым заявлением.

        По условиям договора технологического присоединения сетевая организация обязана реализовать мероприятия, необходимые для осуществления такого технологического присоединения, а заявитель обязан помимо прочего внести плату за технологическое присоединение (пункт 4 статьи 23.1, пункт 2 статьи 23.2, пункт 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике, подпункт "е" пункта 16, пункты 16(2), 16(4), 17, 18 Правил N 861).

Из характера обязательств сетевой организации и заявителя следует, что к правоотношениям по технологическому присоединению применимы как нормы главы 39 ГК РФ, так общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ).

Статья 393 ГК РФ обязывает должника возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, в том числе реальный ущерб и упущенную выгоду (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

Сторона, заявившая об одностороннем отказе от исполнения договора в связи с существенным нарушением его условий со стороны контрагента, вправе предъявить ему требование о возмещении убытков, причиненных прекращением договора (пункт 1 статьи 393, пункт 3 статьи 450, пункт 5 статьи 453 ГК РФ).

         Истец, выполнивший определенную часть работы по технологическому присоединению, исполнил часть своих обязательств в рамках договора, понеся определенные производственные издержки. Издержки, не компенсированные сетевой компании, уменьшают ее имущественную базу и, как следствие, являются для нее убытками.

        Обстоятельства несения истцом заявленных расходов и их размер установлен вступившим в законную силу решением суда по делу А45-29345/2018, и в настоящем деле ответчиком не оспаривалось. В этой части иск подлежит удовлетворению. 

       Подлежит удовлетворению также требование о взыскании платы по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 141308/5329028 от 25.08.2017 г. в размере 56 517,35 руб.

        Факт технологического присоединения объекта подтвержден материалами дела, в связи с чем на основании статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861, требование о взыскании платы по договору в размере 56517,35 рублей подлежит удовлетворению. 

       Согласно п.п. 1, 2 ст. 5 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» под текущими платежами понимаются денежные обязательства, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом. Требования кредиторов по текущим платежам не подлежат включению в реестр требований кредиторов.

         При этом в соответствии с п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 г. № 63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве» в силу абзаца второго пункта 1 статьи 5 Закона о банкротстве возникшие после возбуждения производства по делу о банкротстве требования кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ являются текущими.

        По смыслу этой нормы текущими являются любые требования об оплате товаров, работ к услуг, поставленных, выполненных и оказанных после возбуждения дела о банкротстве, в том числе во исполнение договоров, заключенных до даты принятия заявления о признании должника банкротом.

       Определение о принятии заявления о признании ЗАО «Стройконтакт» банкротом вынесено Арбитражным судом Новосибирской области 05.04.2017 г. (дело № А45-5986/2017).

         Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 22.02.2018 г. по делу №А45-5986/2017 ЗАО «Стройконтакт» признано несостоятельным (банкротом), введено конкурсное производство с применением правил параграфа 7 главы IX Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» о банкротстве застройщиков.

        Учитывая, что расходы во исполнение Договора № 129674/5326747 понесены АО «РЭС» после 05.04.2017 г., технологическое присоединение объекта к электрическим сетям по Договору  № 141308/5329028 осуществлено после 05.04.2017 г., заявленные АО «РЭС» требования относятся к текущим платежам.

         Руководствуясь статьями 110,  167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

решил:

Взыскать с закрытого акционерного общества "Стройконтакт" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск в пользу акционерного общества "Региональные электрические сети" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск в счет компенсации расходов по договору № 129674/5326747 денежные средства в размере 2326862,01 рубля, задолженность по договору № 141308/5329028 в размере 56517,35 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 13992 рубля.

        Взыскать с закрытого акционерного общества "Стройконтакт" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 20925 рублей.

        Выдать исполнительный лист и справку после вступления решения суда в законную силу. 

Решение, не вступившее в законную силу,  может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца после его принятия.

         Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу.

Судья                  Т.Г. Майкова