494/2018-180824(1) 

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  № 09АП-34236/2018

Дело № А40-48494/18

г. Москва

10 августа 2018 года.

Резолютивная часть постановления объявлена 09 августа 2018 г.  Постановление изготовлено в полном объеме 10 августа 2018 г.  

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи: Семикиной О.Н., судей: Тетюка В.И., Комарова А.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело № А40-48494/18, принятое судьей Никоновой  О.И. (шифр судьи: 105-249)  

по иску общества с ограниченной ответственностью «РАЦИОНАЛЬНЫЕ  ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ» (125438, 

<

...>, ЭТ 2, ПОМ IX, КОМ 12Д, ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>, Дата регистрации 21.01.2016)  

к закрытому акционерному обществу «АРТ-БЮРО Л» (113035, 

<

...>, 6, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Дата  регистрации 29.08.2002)  

о взыскании при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО2 по доверенности от 21.03.2018г., ФИО3 по  доверенности от 10.07.2018г.,  

от ответчика: ФИО4 г/д, ФИО5 по доверенности от 14.06.2018г., 

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «РАЦИОНАЛЬНЫЕ  ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с  исковым заявлением к закрытому акционерному обществу «АРТ-БЮРО Л» о  взыскании основного долга в размере 1.544.000 руб., неустойки в размере 257.500 руб.  

Решением (резолютивная часть) Арбитражного суда города Москвы от 18.05.2018  исковые требования удовлетворены в части основного долга, в удовлетворении  остальной части иска отказано.  

Не согласившись с решением Арбитражного суда города Москвы 18.05.2018,  стороны обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными  жалобами, в которых просят изменить решение суда первой инстанции и принять по  делу новый судебный акт.  

Девятый арбитражный апелляционной суд определением от 18.07.2018 перешел к  рассмотрению дела по правилам, установленным Арбитражным процессуальным  кодексов Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции в  связи с ненадлежащим извещением ответчика о времени и месте судебного  разбирательства.  

Как следует из материалов дела, 21.09.2016 между обществом с ограниченной  ответственностью «РАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ» (далее - истец) и  закрытым акционерным обществом «АРТ-БЮРО Л» (далее - ответчик) заключен  договор подряда № 2016/09/21-01 (далее - договор), согласно условиям которого истец  принял на себя обязательства по выполнению монтажа оборудования индивидуального  теплового пункта, оформлению исполнительной документации и сдаче Ростехнадзору и  ПАО «МОЭК» на объекте, расположенном но адресу: 

<

...>.  

22.09.2016 года во исполнение и.4.1.1. договора ответчик произвел предоплату  по договору в размере 3.090.000 руб.  

Истец указывает, что строительно-монтажные работы выполнены истцом в  полном объёме, и 15 мая 2017 года ответчику для подписания переданы акты по  унифицированной форме КС-2, что подтверждается сопроводительным письмом от  15.05.2017 № 40/2017-Р с отметкой ответчика в получении.  

При указанных обстоятельствах истец указывает, что в результате у ответчика  образовалась задолженность перед истцом в размере 1.544.000 руб.  

13 июня 2017 года ответчику направлена претензия № 47/2017-Р, которая  оставлена ответчиком без удовлетворения.  

Также истец заявил требование о взыскании с ответчика в силу ст. 329, 330 ГК  РФ, п.9.3 договора неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки от цены  Договора, но не более 5% от цены договора в размере 257.500 руб.  

Суд апелляционной инстанции установил, что требования истца не подлежат  удовлетворению исходя из следующего.  

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору  подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны  (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется  принять результат работы и оплатить его.  

В соответствии со статьей 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если  договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или  отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после  окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена  надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.  

В силу статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору  строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок  построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные  строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия  для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.  

Статьей 746 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что  оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере,  предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или  договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе  или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего  Кодекса.  

Согласно пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача  результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом,  подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем  делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт  

сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным  

лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. 

В соответствии с пунктом 1.5 договора стороны пришли к соглашению, что срок  начала работ определяется подписанным договором и датой поступления на расчетный  счет подрядчика аванса, указанного в п. 4.1.1 договора, а промежуточные сроки и  окончание работ - согласно графику выполнения работ, согласованному сторонами в  приложении № 2 к договору и являющемуся его неотъемлемой частью.  

Согласно графику производства работ, установленному в приложении № 2 к  договору, работы осуществляются в три этапа, причем первый этап должен был быть  завершен в течение 90 календарных дней со дня поступления аванса.  

Следовательно, 1 этап работы должен был быть завершен не позднее 20.12.2016.  20.12.2016 стороны подписали дополнительное соглашение № 1 к договору,  

которым продлили срок договора по всем трем этапам работ до 30.03.2018. 

В соответствии с пунктом 2.1 договора приемка выполненных подрядчиком работ  осуществляется заказчиком по актам о приемке выполненных работ, составленным по  унифицированной форме № КС-2, стоимость выполненных работ подтверждается  справкой о стоимости выполненных работ и затрат, составленной по унифицированной  форме № КС-3.  

Согласно п.4.2.1 первый этап включает в связи окончание строительно-монтажных  работ по монтажу ИТП. Подготовку и подписание в ПАО «МОЭК» комплекта  исполнительной документации (акты скрытых работ, гидравлических испытаний,  паспорта, сертификаты) на выполненные строительно-монтажные работы по ИТП.  

Однако до настоящего времени, в нарушение пп. 5.1, 5.4 и 5.5 договора, подрядчик  свои обязательства по сдаче работ заказчику не исполнил, так, исполнитель не выполнил  и не сдал заказчику работы, предусмотренные пунктом 7, 13 и 21 Приложения № 1 к  Договору (Пуско-наладочные работы). Согласно Правилам технической эксплуатации  тепловых энергоустановок (п. 2.4.9) пуско-наладочные работы считаются успешно  проведенными при нормальной и непрерывной работе в течение 24 часов, что не было  осуществлено подрядчиком.  

Истец не представил доказательства окончание строительно-монтажных работ по  монтажу ИТП, не представил акты скрытых работ, паспорта, сертификаты.  

В представленных в адрес заказчика актах о приемке выполненных работ  исполнитель исключил пуско-наладочные работы.  

Невыполнение работ в данной части явилось основанием для отказа заказчика от  выплаты оставшейся суммы от цены договора до выполнения работ в полном объеме.  

Указанные обстоятельства отражены в переписке между сторонами. 

Суд апелляционной инстанции установил, что работы по первому этапу были  исполнены не в полном объеме, о чем исполнитель был должным образом письменно  уведомлен, как предусмотрено пунктом 2 договора, и никаких действий по завершению  работ не предпринял.  

Позднее, в апреле 2018 года ответчик направил в адрес истца претензию о  нарушении сроков работ, оставленную последним без ответа.  

Требования о применении к ответчику мер ответственности также подлежит  отклонению как акцессорное.  

В силу положений ст. 106, 110, 112 АПК РФ расходы по оплате государственной  пошлины и расходы по оплате услуг представителя подлежат отнесению на истца,  поскольку в удовлетворении исковых требований отказано. Более того, истец не доказал  оказание юридических услуг исполнителем в связи с тем, что интересы истца  представляли ФИО2 по доверенности от 21.03.2018г., ФИО3 по  доверенности от 10.07.2018г., выданной руководителем истца. Доказательства  представления интересов истца в суде компанией ООО «Юридическая служба» в суд  апелляционной инстанции не представлено. Не представлены доказательства оказания  

услуг по договору № 1 от 20.03.2018 по представлению заказчика в суде ООО  «Юридическая служба», не доказано выполнение работ по подбору документов и  других материалов, обосновывающих заявленные истцом требования. Не представлены  доказательства консультирования истца по всем возникающим в связи с судебным  процессом вопросам.  

Суд апелляционной инстанции установил отсутствие правовых оснований для  удовлетворения исковых требований.  

Руководствуясь статьями 110, 176, 266-271 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 18.05.2018 по делу № А40- 48494/18 отменить. В удовлетворении исковых требований отказать.  

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную  силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня  изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского  округа.  

Председательствующий судья О.Н. Семикина 

Судьи   В.И. Тетюк 

А.А. Комаров