А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й С У Д Г О Р О Д А М ОС К В Ы 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И 

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Москва Дело № А40-281834/22-151-2144  21.04.2023 года  

Резолютивная часть решения объявлена 06.04.2023 года 

Решение в полном объеме изготовлено 21.04.2023 года 

Арбитражный суд города Москвы в составе Судьи Вольской К.В. при ведении секретарем судебного заседания Пономаревым В.А рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по исковому заявлению ООО "СТРОЙАЛЬЯНС" (ОГРН: 1137746365459)  к ответчику АО "МОССТРОЙ" (ОГРН: 1037739587159)  

о взыскании 1 344 282,79 руб. при участии от истца: Снхчян Р.А. доверенность от 11.05.2022 от ответчика: Требуков С.В. доверенность от 05.04.2021 

У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен о взыскании задолженности по договору № 005-12/21 от 25.12.2021 в  размере 1 309 100 руб. 00 коп., процентов в размере 35 182 руб. 79 коп. за период с 15.01.2023  по 31.03.2022, с 26.01.2022 по 31.03.2022, с 02.02.2022 по 31.03.2022, а также процентов,  начисленных на сумму долга, начиная с 02.10.2022 по день фактической оплаты  задолженности, по ставке рефинансирования Банка России, действующей в соответствующие  периоды.  

Истец требования поддержал, ответчик против удовлетворения требований возражал.  

Изучив материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого  доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их  совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд пришел к следующим выводам.  

«25» декабря 2021 года между Обществом с ограниченной ответственностью  «СтройАльянс» (ОГРН: 1137746365459, ИНН: 7724873845, адрес: 115516, г. Москва,  муниципальный округ Царицыно вн.тер.г., Промышленная ул., д. 11, стр. 3, этаж/помещ./ком.  4/I/19б, офис 307) (далее – «Истец» или «Подрядчик») и Акционерным обществом  «МОССТРОЙ» (ОГРН: 1037739587159, ИНН: 7731178063, адрес: 115054, город Москва,  Бахрушина улица, дом 13, помещение II; комната 16) (далее – «Ответчик» или «Заказчик») был  заключен Договор подряда № 005-12/21 (далее – «Договор»).  

В соответствии с п. 1.1. Договора, Подрядчик обязуется на основании Задания на  выполнение работ выполнить строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на объекте  

ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы»,  расположенном по адресу: г. Москва, ул. Тимуровская д. 3 (далее – «Объект»), а Заказчик  обязуется принять и оплатить выполненные работы, в порядке, предусмотренном Договором.  

Согласно п. 2.1.1. Договора, Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные  работы в порядке, предусмотренном Договором.  

В соответствии с п. 4.1. Договора, Подрядчик обязуется выполнить работы и передать  результат Заказчику в срок с даты заключения Договора по «31» января 2022 года  включительно.  

В соответствии с п. 5.1. Договора, по окончанию работ, предусмотренных Договором,  Подрядчик направляет в адрес Заказчика: подписанные со своей стороны акт о приемке  выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма  КС-3) и табель учета рабочего времени, завизированный уполномоченным представителем  Заказчика, надлежаще оформленным приказом, доверенностью.  

Согласно п. 5.2. Договора, в течении 3 (трех) рабочих дней со дня получения от  Подрядчика документов, предусмотренных п. 5.1. Договора, Заказчик обязуется рассмотреть  представленный акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости  выполненных работ и затрат (форма КС-3), направить в адрес Подрядчика подписанный  экземпляр акта о приемке выполненных работы (форма КС-2) либо направить мотивированный  отказ от подписания акта приемки выполненных работ.  

Истец выполнил Работы в полном объеме и в предусмотренный Договором срок, в  связи с чем по окончанию Работ (а также в процессе производства Работ) передал Заказчику  промежуточные и конечные закрывающие документы, а именно:  

1. Сопроводительное письмо № 001/0122 от 11.01.2022 года:  

1.1. Акт выполненных работ № 1 (Табель учёта рабочего времени) за период с  27.12.2021 по 11.01.2022г. – 2 экз.;  

1.2. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 за период с 27.12.2021 по  11.01.2022г. на сумму 731 400,00 руб. – 2 экз.;  

1.3. Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 за период  27.12.2021 по 11.01.2022г. на сумму 731 400,00 руб. – 2 экз.;  

1.4. Счет-фактура № 1 от 11 января 2022 г. на сумму 731 400,00 руб.– 1 экз.;  1.5. Счёт на оплату № 1 от 11 января 2022 г. на сумму 731 400,00 руб. – 1 экз.  

Документация принята Заказчиком за вх. № 9/МС от 13.01.2022 года.  2. Сопроводительное письмо № 002/0122 от 21.01.2022 года:  

2.1. Акт выполненных работ № 2 (Табель учёта рабочего времени) за период с  12.01.2022 по 20.01.2022г. – 2 экз.;  

2.2. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 2 за период с 12.01.2022 по  20.01.2022г. на сумму 450 500,00 руб. – 2 экз.;  

2.3. Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 2 за период с  12.01.2022 по 20.01.2022г на сумму 450 500,00 руб. – 2 экз.;  

2.4. Счет-фактура № 2 от 20 января 2022 г. на сумму 450 500,00 руб.– 1 экз.;  2.5. Счёт на оплату № 2 от 20 января 2022 г. на сумму 450 500,00 руб. – 1 экз.  

Документация принята Заказчиком за вх. № 22/МС от 21.01.2022 года.  3. Сопроводительное Письмо № 003/0122 от 27.01.2022 года:  

3.1. Акт выполненных работ № 3 (Табель учёта рабочего времени) за период с  21.01.2022 по 27.01.2022г. – 2 экз.;  

3.2. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 3 за период с 21.01.2022 по  27.01.2022г. на сумму 127 200,00 руб. – 2 экз.;  

3.3. Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 3 за период с  21.01.2022 по 27.01.2022г. на сумму 127 200,00 руб. – 2 экз.;  

3.4. Счет-фактура № 3 от 27 января 2022 г. на сумму 127 200,00 руб.– 1 экз.;  

3.5. Счёт на оплату № 3 от 27 января 2022 г. на сумму 127 200,00 руб. – 1 экз. Документация принята Заказчиком 28.01.2022 года. 

(далее вышеизложенные документы именуются – «Акты выполненных работ», «Акты о  приемке выполненных работ КС-2», «Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС –  3»).  

Таким образом, Работы Заказчиком приняты, Акты выполненных работ, Акты о  приемке выполненных работ КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3  подписаны Сторонами, экземпляры Подрядчика возращены, в связи с чем Подрядчик считает,  что выполненные и принятые Работы подлежат немедленной оплате.  

В соответствии с п. 3.1. Договора, стоимость работ по Договору определяется на  основании нарядов – заданий, табелей рабочего времени в соответствии с единичными  расценками в размере 5 300, 00 (пять тысяч триста) рублей 00 копеек за 1 человеко – день – с 9  ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин., в том числе НДС 20%.  

В соответствии с п. 3.2. Договора, в стоимость работ по Договору входят все работы,  необходимые для достижения результата работ, в том числе и не указанные в Договоре, но  выполнение которых необходимо для достижения результата работ по Договору.  

В соответствии с п. 3.4. Договора, оплата работ по Договору может производиться  еженедельно и производится в течении 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Сторонами  акта приемки выполненных работ.  

Заказчиком были нарушены условия п. 2.1.1. Договора, а именно: не исполнена  обязанность по оплате выполненных работ, и п. 3.4. Договора, а именно: выполненные Работы  не были оплачены в установленный Договором срок.  

Акты о приемке выполненных работ КС-2 были подписаны Сторонами: 

 - 11.01.2022 года за отчетный период с 27.12.2021 по 11.01.2021 года на сумму 731 400  рублей, следовательно с учетом п. 3.4. Договора, Работы должны были быть оплачены не  позднее 14.01.2022 года;  

- 20.01.2022 года за отчетный период с 12.01.2022 по 20.01.2022 года на сумму 450 500  рублей, следовательно с учетом п. 3.4. Договора, Работы должны были быть оплачены не  позднее 25.01.2022 года;  

- 27.01.2022 года за отчетный период с 21.01.2022 года по 27.01.2022 года на сумму 127  200 рублей, следовательно с учетом п. 3.4. Договора, Работы должны были быть оплачены не  позднее 01.02.2022 года.  

Общая стоимость выполненных Подрядчиком Работ по Договору составляет 1 309 100  рублей, что подтверждается Актами о приемке выполненных работ КС-2, Справками о  стоимости выполненных работ и затрат КС-3.  

Исходя из Акта сверки взаимных расчетов между Истцом и Ответчиком за период с  декабря 2021 года по февраль 2022 года, задолженность последнего на сегодняшний день  составляет 1 309 100 рублей.  

В соответствии с п. 7.1. Договора, за неисполнение/ненадлежащее исполнение  обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и  законодательством Российской Федерации.  

24.05.2022 года Истец направил в адрес Ответчика Досудебную претензию об оплате  задолженности по Договору подряда № 005-12/21 от «25» декабря 2021 года в размере 1 309  100 рублей 00 копеек (далее – «Претензия»), что подтверждается Почтовой описью и Кассовым  чеком от 24.05.2022 года.  

Ответчик Претензию получил 30.05.2022 года, что подтверждается Отчетом об  отслеживании почтового отправления с идентификатором № 10937737051838.  

Указанные обстоятельства послужили основаниями для обращения в суд.  

Удовлетворяя требования в полном объеме, суд принимает во внимание положения ст.  8, 10, 12, 309, 310, 395, 421, 431, 702, 708, 711, 720, 746, 753, 779, 781 Гражданского кодекса, а  также отмечает следующее.  

Совокупность надлежащих, относимых и допустимых доказательств подтверждает  обоснованность позиции истца по требованиям основного долга в размере 1 309 100 руб. 00  коп.  

Рассмотрев расчет процентов, суд признает его методологически и арифметически  верным.  

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.  

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления  последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.  

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленных требований,  действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по  своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и  непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность  каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств  в их совокупности, находит заявленные требования подлежащими удовлетворению в полном  объеме.  

Судебные расходы подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 8, 10, 12, 309, 310, 395, 421, 431, 702,  708, 711, 720, 746, 753, 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 4, 8, 9,  27, 64-68, 71, 75, 110, 112, 167-171, 176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

Взыскать с АО "МОССТРОЙ" (ОГРН: 1037739587159) в пользу ООО  "СТРОЙАЛЬЯНС" (ОГРН: 1137746365459) задолженность в размере 1 309 100 руб., проценты  за пользование чужими денежными средствами в размере 35 182 руб. 79 коп., проценты за  пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму долга 1 309 100 руб. в  порядке ст. 395 ГК РФ с 02.10.2022 по дату фактической оплаты долга, а также расходы на  оплату госпошлины в размере 26 443 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи  апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья К.В. Вольская