35/2018-221441(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А45-35141/2018

г. Новосибирск

20 ноября 2018 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи 

Исаковой С.А., при ведении протокола секретарём судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску по иску  Федерального казенного учреждения "Федеральное управление  автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства" (ОГРН  

<

***>), г. Новосибирск, к обществу с ограниченной  ответственностью "Сибавтобан" (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск,  при участии 3-его лица: общество с ограниченной ответственностью  «СибПрофи» (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск, о понуждении к  исполнению гарантийных обязательств,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

обязать общество с ограниченной ответственностью "Сибавтобан"  (ОГРН 

<

***>) в срок до 01.06.2019 безвозмездно устранить  недостатки, выявленные в период гарантийного срока, по государственному  контракту № 193-16 на выполнение дорожных работ по капитальному  ремонту автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Кемерово- Красноярск-Иркутск км 93+000-км 98+000, Новосибирская область, а  именно:  

- выполнить работы по устранению дефектов (просадка берм дорожных  знаков право, лево) в соответствии с требованиями проекта и нормативно- технической документацией на км 93+000 - км 98+000 28 шт.  

- выполнить работы по устранению дефектов (коррозия металла  лестничного схода право, лево) в соответствии с требованиями проекта и  нормативно-технической документацией на км 95+500 протяженностью 24,6  площадью 80 м2, км 96+200 протяженностью 37 м площадью 69 м2.  

- выполнить работы по устранению дефектов (просадка автомобильной  дороги (примыкание) в соответствии с требованиями проекта и нормативно- технической документацией на в/п трубе) на км 94+300 право  протяженностью 4 м, шириной 12 м, площадью 48 м2.  

-выполнить работы по устранению дефектов (разрушение и просадка  бетонного укрепления откоса у в/п) в соответствии с требованиями проекта и  нормативно-технической документацией на км 96+247 лево протяженностью  3 м, шириной 1,5 м, площадью 4,5 м2.  

- выполнить работы по устранению дефектов (разрушение бетонной  конструкции водосброса на обочине право, лево) в соответствии с  требованиями проекта и нормативно-технической документацией км 96+201  (2 шт.), км 96+356 (2шт), км 96+491 (2 шт.), км 96+631 (2 шт.).  

- выполнить работы по устранению дефектов (размыв откоса земляного  полотна (примыкание)) в соответствии с требованиями проекта и  нормативно-технической документацией на км 94+300 право  протяженностью 4 м, шириной 2 м, площадью 8 м2.  

- выполнить работы по устранению дефектов (размыв и просадка откоса  земляного полотна) в соответствии с требованиями проекта и нормативно- технической документацией на км 95+460 право протяженностью 4 м,  шириной 2 м, площадью 8 м, на км 96+234 лево протяженностью 4 м,  шириной 5 м, площадью 20 м2.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сибавтобан"  (ОГРН 1025401927473) в доход федерального бюджета Российской  Федерации государственную пошлину в размере 6 000 руб.  

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в порядке  апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд  (г. Томск) в течение месяца после принятия.  

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть  обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд  Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в течение двух месяцев с момента  вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный  суд Новосибирской области.  

 Судья С.А. Исакова