Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения

30 июня 2017 года            Дело № А56-29061/2017

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Евдошенко А.П.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерСтройПроект" (адрес:  Россия 199406, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул ШЕВЧЕНКО 21/1 ЛИТЕР А/19-Н, ОГРН:  1157847147182)

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "ПроПроект" (адрес:  Россия 197375, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул ВЕРБНАЯ 27/А/815, ОГРН:  1107847285182)

о взыскании 340 081 руб. 13 коп.

руководствуясь статьями 309, 310, 329, 330, 702, 708, 758 Гражданского кодекса российской Федерации и статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

решил:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ПроПроект" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ИнтерСтройПроект"  340 081 руб. 13 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным планом выполнения работ (Приложение №1) в редакции Дополнительного соглашения №2 от 07.10.2015, за период с 20.01.2016 по 07.11.2016 на основании пунктов 5.2, 5.10 договора субподряда №ПР-13-01/ОК-15-КС-СП2 от 06.10.2015, с учетом Соглашения об уступке прав и переводе долга в обязательствах от 01.07.2016, а также 10 435 руб. 97 коп. расходов по оплате госпошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

Судья                     Евдошенко А.П.