Именем Российской Федерации

                                                     

Р Е Ш Е Н И Е

г. Москва

28.06.2019г.                         Дело № А40-72580/19-151-578

Резолютивная часть решения оглашена 25.06.2019г.

Решение изготовлено в полном  объеме 28.06.2019г.

Арбитражный суд города Москвы в составе

Судьи Щербаковой И.Э, 

при ведении протокола секретарем судебного  заседания  Кунижевым И.Б.  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению иску  -  АО «31 ГПИСС» (ОГРН 1097746425370)

к ответчику - ФГУП «ГВСУ № 14» (ОГРН 1035009568439) 

третье лицо - ООО «ЦентрТелекомСтрой» (ИГРНН 1143668047599)

о взыскании 689 017 889 руб. 

при участии: 

от истца  – согласно протокола. 

от ответчика –  согласно  протокола. 

от третьего  лица  -  согласно  протокола.       

УСТАНОВИЛ:

Иск предъявлен о взыскании 689 017 889 руб.  задолженности  по договору  № 328/ГУССТ1/2012 от 05.05.2012 г.

Определением суда от 28.05.2019 г. к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО «ЦентрТелекомСтрой».

В судебном заседании истец требования поддержал по доводам искового заявления.

Ответчик в судебном заседании представил отзыв на заявление, требования не признал, указал, что в адрес истца неоднократно направлялись  замечания по представленной документации, которые истцом устранены не были, в виду чего, ответчик не смог принять результат работ.

Третье лицо в судебном заседании изложило доводы по делу, поддержало позицию истца.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей истца, ответчика и третьего лица, обозрев представленные по делу документы, суд установил, что 05 мая 2012 года между ФГУП «ГУССТ № 1 при Спецстрое России» и АО«31ГПИСС» (далее - Субподрядчик) был заключен договор подряда № 328/ГУССТ1/2012 на проектно-изыскательские работы по объекту «сеть волоконно-оптических линий связи ВКО в центральном промышленном районе» (шифр ВОЛС/ВКО) (далее - Договор).

Правопреемником ФГУП «ГУССТ № 1 при Спецстрое России» является ФГУП «ГВСУ № 14» (далее - Подрядчик), что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

Согласно п. 2.1 Контракта Субподрядчик обязался выполнить комплекс проектно-изыскательских и землеустроительных работ.

В соответствии с п. 4.9 Договора Подрядчик перечислил Субподрядчику аванс в размере 757 424 533 рубля.

Между Подрядчиком и Субподрядчиком подписаны следующие акты приемки выполненных работ по I и II этапам: Акт №7-15 от 05.04.2016 г. на сумму 16 279 834,87 руб.; Акт № 12-16 от 12.04.2016 г. на сумму 2 276 143,76 руб.; Акт № 13-16 от 06.04.2016 г. на сумму 18 118 258,94 руб.; Акт№ 14-16 от 11.04.2016 г. на сумму 15 985 987,02 руб.; Акт №45-15 от 05.04.2016 г. на сумму 17 056 726,92 руб.; Акт№ 55-15 от 05.04.2016 г. на сумму 23 726 993,84 руб.; Акт № 56-15 от 05.04.2016 г. на сумму 26 340 817,16 руб.; Акт №57-15 от 05.04.2016 г. на сумму 16 099 159,71 руб.; Акт № 58-15 от 05.04.2016 г. на сумму 13 352 518,12 руб.; Акт № 66-15 от 05.04.2016 г. на сумму 29 397 089,72 руб.; Акт № 67-15 от 05.04.2016 г. на сумму 10 596 325,61 руб.; Акт №68-15 от 05.04.2016 г. на сумму 17 926 435,64 руб.; Акт № 70-15 от 05.04.2016 г. на сумму 25 271 052,26 руб.; Акт № 71-15 от 05.04.2016 г. на сумму 28 173 497,55 руб.; Акт № 72-15 от 05.04.2016 г. на сумму 28 561 292,67 руб.; Акт №62-14 от 18.12.2014 г. на сумму 21 849 912,76 руб.; Акт №5-15 от 19.06.2015 г. на сумму 34 372 719,46 руб.; Акт №97-17 от 15.12.2017 г. на сумму 26 653 933,63 руб.; Акт №98-17 от 15.12.2017 г. на сумму 17 807 694,29 руб.; Акт № 26-16 от 20.09.2016 г. на сумму 10 850 271,10 руб.; Акт № 27-16 от 20.09.2016 г. на сумму 8 050 145,98 руб.; Акт № 28-16 от 20.09.2016 г. на сумму 6 156 409,82 руб.; Акт №99-17 от 15.12.2017 г. на сумму 3 239 139,35 руб.; Акт№ 111-17 от 15.09.2017 г. на сумму 3 236 711,85 руб.; Акт№ 112-17 от 15.09.2017 г. на сумму 3 869 339,66 руб.; Акт№ 100-17 от 15.12.2017 г. на сумму 10 915 360,14 руб.; Акт№ 101-17 от 15.12.2017 г. на сумму 8 381 480,23 руб.; Акт№ 102-17 от 15.12.2017 г. на сумму 1 479 440,05 руб.; Акт№ 103-17 от 15.12.2017 г. на сумму 3 172 676,56 руб.; Акт№ 104-17 от 15.12.2017 г. на сумму 8 944 991,71 руб.; Акт№ 105-17 от 15.12.2017 г. на сумму 15 320 768,83 руб.; Акт№ 106-17 от 15.12.2017 г. на сумму 4 812 604,63 руб.; Акт№ 107-17 от 15.12.2017 г. на сумму 3 173 876,15 руб.; Акт№ 108-17 от 15.12.2017 г. на сумму 2 853 513,94 руб.; Акт № 29-16 от 20.09.2016 г. на сумму 9 833 491,51 руб.; Акт№ 109-17 от 15.12.2017 г. на сумму 12 497 807,28 руб.; Акт № 110-17 от 15.12.2017 г. на сумму 16 064 293,74 руб.; Акт № 37-16 от 02.09.2016 г. на сумму 20 691 909,23 руб.; Акт № 38-16 от 05.09.2016 г. на сумму 17 951 145,05 руб.;

Общая стоимость выполненных и принятых работ: 561 341 770,74 руб.

Письмом № 21/02-01-18560 от 25.07.2018 г. ФГУП «ГВСУ № 14» направило в адрес АО «31 ГПИСС» предложение расторгнуть Договор. Вместе с тем, представленное Ответчиком соглашение о расторжении Договора не учитывало, что Истец на дату получения указанного соглашения фактически выполнил работы в значительно большем объеме, нежели принято Ответчиком по вышеперечисленным актам приемки выполненных работ. Письмом № 192/3485 от 17.08.2018 г. АО «31 ГПИСС» предложило учесть стоимость выполненных работ по Договору в соглашении о его расторжении.

С учетом того, что Ответчик утратил интерес к исполнению Договора, Истец направил всю документацию, разработанную к моменту получения предложения расторгнуть Договор. Документация передана письмами за исх. №№: 192/199дсп от 17.08.2018 г., 192/200дсп от 17.08.2018 г., 192/3477 от 17.08.2018 г., 192/3486 от 17.08.2018 г.

Письмом № 192/192дсп от 17.08.2018 г. в адрес Подрядчика были направлены отчетно-финансовые документы для приемки и оплаты выполненных работ, в том числе акты приемки выполненных работ по 3 и 4 этапам работ: Акт № 60-18 от 10.08.2018 г. на сумму 26 473 635,12 руб.; Акт№ 28-18 от 10.08.2018 г. на сумму 36 975 461,66 руб.; Акт №29-18 от 10.08.2018 г. на сумму 18 939 551,06 руб.; Акт №30-18 от 10.08.2018 г. на сумму 37 040 395,88 руб.; Акт№ 31-18 от 10.08.2018 г. на сумму 30 179 956,12 руб.; Акт№ 31-18 от 10.08.2018 г. на сумму 23 726 993,84 руб.; Акт№ 32-18 от 10.08.2018 г. на сумму 26 237 405,02 руб.; Акт№ 33-18 от 10.08.2018 г. на сумму 26 116 524,64 руб.; Акт№ 34-18 от 10.08.2018 г. на сумму 28 518 936,20 руб.; Акт №35-18 от 10.08.2018 г. на сумму 30 211 386,60 руб.; Акт№ 61-18 от 10.08.2018 г. на сумму 13 989 560,80 руб.; Акт №62-18 от 10.08.2018 г. на сумму 29 377 013,32 руб.; Акт №63-18 от 10.08.2018 г. на сумму 18 918 950,62 руб.; Акт №64-18 от 10.08.2018 г. на сумму 9 281 443,40 руб.; Акт № 65-18 от 10.08.2018 г. на сумму 7 883 748,74 руб.; Акт №66-18 от 10.08.2018 г. на сумму 9 946 207,02 руб.; Акт № 67-18 от 10.08.2018 г. на сумму 10 941 709,30 руб.; Акт№ 36-18 от 10.08.2018 г. на сумму 19 499 787,92 руб.; Акт №37-18 от 10.08.2018 г. на сумму 22 743 531,22 руб.; Акт №38-18 от 10.08.2018 г. на сумму 16 311 026,72 руб.; Акт № 68-18 от 10.08.2018 г. на сумму 10 226 224,56 руб.; Акт № 69-18 от 10.08.2018 г. на сумму 5 447 162,02 руб.; Акт № 70-18 от 10.08.2018 г. на сумму 11 213 042,04 руб.; Акт№ 71-18 от 10.08.2018 г. на сумму 11 330 640,84 руб.; Акт №72-18 от 10.08.2018 г. на сумму 3 699 683,50 руб.; Акт № 73-18 от 10.08.2018 г. на сумму 9 783 177,04 руб.; Акт№ 74-18 от 10.08.2018 г. на сумму 11 362 149,20 руб.; Акт №75-18 от 10.08.2018 г. на сумму 8 400 322,06 руб.; Акт № 76-18 от 10.08.2018 г. на сумму 15 932 853,24 руб.; Акт № 77-18 от 10.08.2018 г. на сумму 7 947 724,28 руб.; Акт №78-18 от 10.08.2018 г. на сумму 3 340 480,88 руб.; Акт № 79-18 от 10.08.2018 г. на сумму 4 350 173,84 руб.; Акт № 80-18 от 10.08.2018 г. на сумму 7 749 607,52 руб.; Акт № 81-18 от 10.08.2018 г. на сумму 9 807 236,06 руб.; Акт № 82-18 от 10.08.2018 г. на сумму 9 143 087,22 руб.; Акт № 83-18 от 10.08.2018 г. на сумму 9 982 489,66 руб.; Акт № 84-18 от 10.08.2018 г. на сумму 5 850 934,42 руб.; Акт № 85-18 от 10.08.2018 г. на сумму 5 184 124,68 руб.; Акт № 86-18 от 10.08.2018 г. на сумму 6 750 067,28 руб.; Акт № 87-18 от 10.08.2018 г. на сумму 7 501 903,10 руб.; Акт № 88-18 от 10.08.2018 г. на сумму 9 507 382,72 руб.; Акт № 89-18 от 10.08.2018 г. на сумму 5 825 361,46 руб.; Акт № 90-18 от 10.08.2018 г. на сумму 8 520 597,10 руб.; Акт № 97-18 от 10.08.2018 г. на сумму 2 013 915,44 руб.; Акт № 98-18 от 10.08.2018 г. на сумму 2 670 292,80 руб.; Акт № 99-18 от 10.08.2018 г. на сумму 3 965 184,68 руб.; Акт № 100-18 от 10.08.2018 г. на сумму 15 479 278,94 руб.; Акт № 101-18 от 10.08.2018 г. на сумму 4 461 585,90 руб.; Акт № 102-18 от 10.08.2018 г. на сумму 3 609 570,44 руб.; Акт № 103-18 от 10.08.2018 г. на сумму 4 788 647,68 руб.; Акт № 104-18 от 10.08.2018 г. на сумму 2 187 447,42 руб.; Акт № 105-18 от 10.08.2018 г. на сумму 850 135,72 руб.; Акт № 106-18 от 10.08.2018 г. на сумму 7 305 841,38 руб.; Акт № 107-18 от 10.08.2018 г. на сумму 15 460 546,44 руб.; Акт № 108-18 от 10.08.2018 г. на сумму 6 155 259,96 руб.; Акт № 109-18 от 10.08.2018 г. на сумму 5 205 368,22 руб.; Акт № 110-18 от 10.08.2018 г. на сумму 2 867 394,10 руб.; Акт № 111-18 от 10.08.2018 г. на сумму 7 128 063,76 руб.; Акт № 112-18 от 10.08.2018 г. на сумму 6 956 430,40 руб.; Акт № 113-18 от 10.08.2018 г. на сумму 12 734 275,62 руб.; Акт № 114-18 от 10.08.2018 г. на сумму 8 022 693,74 руб.; Акт № 115-18 от 10.08.2018 г. на сумму 2 817 447,06 руб.; Акт № 116-18 от 10.08.2018 г. на сумму 2 577 299,36 руб.; Акт № 117-18 от 10.08.2018 г. на сумму 2 101 703,90 руб.; Акт № 118-18 от 10.08.2018 г. на сумму 2 182 953,73 руб.; Акт № 119-18 от 10.08.2018 г. на сумму 9 578 548,52 руб.; Акт № 120-18 от 10.08.2018 г. на сумму 1 692 543,62 руб.; Акт № 121-18 от 10.08.2018 г. на сумму 1 740 459,88 руб.; Акт № 122-18 от 10.08.2018 г. на сумму 2 253 581,70 руб.; Акт № 123-18 от 10.08.2018 г. на сумму 3 682 123,92 руб.; Акт № 124-18 от 10.08.2018 г. на сумму 3 600 635,48 руб.; Акт № 125-18 от 10.08.2018 г. на сумму 1 353 594,52 руб.; Акт № 126-18 от 10.08.2018 г. на сумму 2 088 034,78 руб.; Акт № 127-18 от 10.08.2018 г. на сумму 1 423 647,58 руб.; Акт № 128-18 от 10.08.2018 г. на сумму 4 792 428,40 руб.; Акт № 129-18 от 10.08.2018 г. на сумму 3 825 351,14 руб.; Акт № 130-18 от 10.08.2018 г. на сумму 2 472 495,30 руб.; Акт № 131-18 от 10.08.2018 г. на сумму 4 483 229,46 руб.; Акт № 132-18 от 10.08.2018 г. на сумму 3 386 343,94 руб.; Акт № 133-18 от 10.08.2018 г. на сумму 3 859 584,12 руб.; Акт № 134-18 от 10.08.2018 г. на сумму 2 314 325,74 руб.; Акт № 135-18 от 10.08.2018 г. на сумму 13 293 470,54 руб.; Акт № 136-18 от 10.08.2018 г. на сумму 10 811 830,24 руб.; Акт № 137-18 от 10.08.2018 г. на сумму 5 354 647,66 руб.; Акт № 138-18 от 10.08.2018 г. на сумму 1 872 959,72 руб.; Акт № 139-18 от 10.08.2018 г. на сумму 2 379 670,60 руб.; Акт № 140-18 от 10.08.2018 г. на сумму 2 453 926,82 руб.; Акт № 141-18 от 10.08.2018 г. на сумму 4 310 663,90 руб.; Акт № 142-18 от 10.08.2018 г. на сумму 8 232 318,38 руб.; Акт № 143-18 от 10.08.2018 г. на сумму 5 984 439,62 руб.; Акт № 144-18 от 10.08.2018 г. на сумму 8 557 593,64 руб.; Акт № 145-18 от 10.08.2018 г. на сумму 8 572 264,58 руб.; Акт № 146-18 от 10.08.2018 г. на сумму 4 283 784,68 руб.; Акт № 147-18 от 10.08.2018 г. на сумму 4 451 328,16 руб.; Акт № 148-18 от 10.08.2018 г. на сумму 8 429 101,08 руб.; Акт № 149-18 от 10.08.2018 г. на сумму 4 708 439,54 руб.; Акт № 150-18 от 10.08.2018 г. на сумму 6 494 351,84 руб.; Акт № 151-18 от 10.08.2018 г. на сумму 2 378 940,18 руб.

Согласно п. 9.1.1 Договора Подрядчик, получивший от Субподрядчика Документацию, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента ее получения приступает к приемке выполненных Работ. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Результата работ проверяет комплектность Документации и ее соответствие Техническому заданию.

В соответствии с п. 8.2.13 Договора в случае отсутствия в течение 10 (десяти) рабочих дней замечаний со стороны Подрядчика по переданной ему Документации, Документация считается принятой Подрядчиком без замечаний и подлежит оплате.

Замечания от Подрядчика в установленный Договором срок в адрес Истца не поступали, в связи с чем, акты о приемке выполненных работ считаются подписанными в одностороннем порядке 04.09.2018 г. в силу п. 4 ст. 753 ГК РФ и п. 9.1.1 Договора.

Вместе с тем, уже за пределами срока рассмотрения документации Подрядчик, сославшись на некомплектность представленной документации, отказался принять и оплатить работы, а также учесть их стоимость в соглашении о расторжении Договора (исх. № 21/02-09-23177 от 07.09.2018 г.).

Суд считает, что указанный мотив для отказа в принятии работ носит формальный характер, поскольку противоречит условиям Договора и законодательству, так как выполнение работ не было завершено по инициативе самого Ответчика, о чем Истец сообщил исх. № 192/3989 от 20.09.2018 г.

Письмом № 192/4847 от 14.11.2018 г. АО «31 ГПИСС» выразило готовность завершить выполнение работ в полном объеме при условии предоставления гарантий оплаты и направило запрос о необходимости их завершения с учетом инициативы Подрядчика по расторжению Договора. Письмом №21/04-06-03-33824 от 18.12.2018 г. Подрядчик указал на отсутствие необходимости завершения работ, в связи с чем, результаты работ подлежат приемке и оплате в том объеме, в каком они были выполнены по состоянию на дату получения предложения о расторжении Договора.

09 января 2019 г. в адрес АО «31 ГПИСС» поступило обращение Подрядчика за исх. № 21/02-09-35139 от 27.12.2018 г., касающееся методики расчета стоимости исполнительных смет по пяти участкам, поле чего документация была скорректирована и направлена в адрес Ответчика. Учитывая, что стоимость исполнительных смет была пересчитана, отчетно-финансовые документы на указанные участки, в том числе акты приемки выполненных работ были повторно направлены в адрес Ответчика исх. № 192/12дсп от 21.01.2019 г. (вх. № 1148-дсп от 21.01.2019 г.).

Акт № 28-18 от 10.08.2018 г. на сумму 34 928 035,40 руб.; Акт №61-18 от 10.08.2018 г. на сумму 11 405 313,06 руб.; Акт №36-18 от 10.08.2018 г.на сумму 16 569 131,81 руб.; Акт № 37-18 от 10.08.2018 г. на сумму 19 089 674,20 руб.; Акт№ 38-18 от 10.08.2018 г. на сумму 16 016 281,40 руб. Общая стоимость выполненных работ: 98 008 435,87 руб.

С учетом корректировки стоимости выполненных работ по 5-ти элементарным участкам III этапа, общая стоимость выполненных работ по III и IV этапам составила 885 100 652,26 руб.

Таким образом, общая стоимость работ, переданных Подрядчику по всем этапам, составляет 1 446 442 423,00 руб., следовательно, с учетом произведенного Подрядчиком авансового платежа сумма задолженности за выполненные Субподрядчиком работы составляет: 1 446 442 423,00 - 757 424 534,00 - 689 017 889,00 руб.

Согласно п. 4.3 Договора оплата выполненных Субподрядчиком работ производится Подрядчиком в течение 25 (двадцати пяти) банковских дней с момента подписания Акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ по каждому этапу в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору), оригинала счета, оформленного Субподрядчиком на основании первичной учетной документации, счета-фактуры и накладной на переданную документацию.

Учитывая, что акты о приемке выполненных работ (за исключением скорректированных актов по 5-ти элементарным участкам) считаются подписанными в одностороннем порядке 04.09.2018 г., а по 5-ти участкам 04.02.2019 г., то оплата выполненных работ должна была быть произведена Ответчиком не позднее 09.10.2018 г. и 11.03.2019 г. соответственно.

Соблюдая условия п. 12.3 Договора, в связи с отсутствием оплаты выполненных работ, Субподрядчик направил в адрес Подрядчика претензию за исх. № 192/5719 от 26.12.2018 г. с требованием оплатить результаты выполненных работ, которые были оставлены Подрядчиком без ответа.

В силу пункта 1  статьи 702 Гражданского кодекса  Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (Подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчик) определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 709 ГК РФ, в случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком. От Заказчика по договорам (Ответчика) все сметы подписаны уполномоченным лицом.

В силу ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия Заказчика досрочно.

Согласно п. 1 ст. 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Основанием для возникновения обязательства по оплате выполненных подрядчиком работ является сдача их результата Заказчику (статьи 711 и 746 ГК РФ). Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующие в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (статья 9 АПК РФ).

Доводы ответчика, изложенные в отзыве, признаны судом необоснованными, истцом представлены достаточные доказательства надлежащего выполнения работ и передаче актов ответчику. При этом, доводы касательно направления в адрес истца претензий, относительно выполнения работ, являются документально не подтвержденными, так как ответчиком не представлено в материалы дела доказательств направления указанных претензий в адрес истца.

Ссылка  ответчика на п. 4.7 Договора,  в соответствии с которым  окончательный расчет  по Договору производится  в течении 30  банковских дней  с момента подписания  сторонами итогового акта приемки выполненных работ, следует рассматривать в совокупности с п. 4.6 Договора. 

В соответствии с п. 4.6 Договора, оплата выполненных субподрядчиком работ  производится подрядчиком  в порядке,  установленном настоящим Договором, до предела,  не превышающего  95 %  от цены договора. Оставшаяся часть  договора будет выплачена  субподрядчику при окончательном расчете. 

Учитывая, что требование истца документально подтверждено, и ответчик не представил доказательств надлежащего исполнения принятых обязательств, исковое требование признано обоснованным и подлежащим удовлетворению  в заявленном размере.

Расходы по госпошлине по иску суд относит на ответчика, в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 8, 12, 307, 310, 314, 330, 702, 709, 711, 720, 746, 753 ГК РФ,  ст. ст. 65, 102, 110, 121-123, 156, 167-171, 180, 319   АПК  РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ФГУП «ГВСУ № 14» (ОГРН 1035009568439) в пользу АО «31 ГПИСС» (ОГРН 1097746425370) 689 017 889 руб. задолженности, 200 000 руб. госпошлины. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.

СУДЬЯ                                                                       И.Э. Щербакова