Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-27402/2017

25 июня 2018 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  14 июня 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  25 июня 2018 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Панюшкиным Н.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДЕКАР" (адрес:  Россия 195267, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул УШИНСКОГО 5/2/ПОМ. 6Н, ОГРН:  1037808032778);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "ДЕДАЛ-СТРОЙ" (адрес:  Россия 187110, г КИРИШИ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл КИРИШСКИЙ р-н, пр-кт ГЕРОЕВ 11/ОФИС 420, ОГРН:  1104708000297);

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕР" (адрес:  Россия 197046, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул МАЛАЯ ПОСАДСКАЯ 17/А/21-Н, КОМНАТА 1А, ОГРН:  1089847193985)

о взыскании 600 000 руб. 00 коп.

при участии

- от истца: ФИО1 по доверенности от 11.05.18,

- от ответчика: ФИО2 по доверенности от 17.05.17, 

установил:

24.04.17 ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДЕКАР" предъявило иск к ООО "ДЕДАЛ-СТРОЙ" и после уточнения исковых требований й в порядке ст. 49 АПК РФ просит взыскать 7 000 000 руб. 00 коп., составляющих 1 750 000 руб. 00 коп. штрафа и 1 750 000 руб. пеней по договору №19/01/2015-01 от 19.01.15, 1 750 000 руб. 00 коп. штрафа и 1 750 000 руб. пеней по договору уступки права требования от 20.03.17,

Ответчик иск отклонил.

Определением от 12.12.17 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора привлечено, ООО "ПАРТНЕР". Третье лицо отзыв не предоставило.

22.02.17 ООО "ДЕДАЛ-СТРОЙ" предъявило иск к ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДЕКАР" о взыскании 95 840 руб. 30 коп. задолженности по оплате работ по двухсторонним актам сдачи-приемки работ по договору №19/01/2015-01 от 19.01.15 и 8 865 040 руб. 28 коп. задолженности по оплате работ по односторонним актам КС-2, КС-3 по тому же договору. Делу присвоен номер А56-34841/2017.

Определением от 05.10.17 оба дела объединены в одно производство под №А56-27402/2017.

Судом установлено:

Между сторонами был заключен договор №19/01/2015-01 от 19.01.15 на выполнение работ по строительству мостового перехода через реку Пчевжа на территории Будогощского городского поселения Киришского района Ленинградской области и автодороги на подходах к нему. 

С учетом дополнительного соглашения стоимость работ составляет 45 619 625 руб. 76 коп. 

Срок окончания работ – 13.11.15 года.

Указанный договор заключен ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДЕКАР" во исполнение муниципального контракта №15-р от 10.12.14, заключённого с муниципальным заказчиком – МКУ «Управление проектно-строительных работ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области».

Спор между муниципальным заказчиком и генеральным подрядчиком – ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДЕКАР" рассмотрен в рамках дела №А56-50206/2016.

Вступившим в законную силу решением суда от 15.11.16 по делу №А56-50206/2016 установлено, что все работы по контракту, как основные, так и дополнительные согласованы, выполнены и переданы муниципальному заказчику.

С МКУ «Управление проектно-строительных работ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области» взыскано в пользу ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДЕКАР" 2 925 786 руб. 07 коп. долга и 37 628 руб. 93 коп. расходов по государственной пошлине.

Фактически работы на объекте выполнялись субподрядчиком – ООО "ДЕДАЛ-СТРОЙ" по заключенному с ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДЕКАР" договору №№19/01/2015-01 от 19.01.15.

Данных о том, что на объекте работали иные субподрядчики, в материалах дела не имеется.

Задолженность в размере 95 840 руб. 30 коп. подтверждена подписанными сторонами актами формы КС-2, КС-3 и подлежит взысканию с генподрядчика в пользу субподрядчика на основании ст. 711 ГК РФ.

Задолженность в размере 8 865 040 руб. 28 коп. по актам, которые не подписаны генподрядчиком, также подлежит взысканию в пользу субподрядчика, поскольку мотивированных возражений не заявлено, общий журнал производства работ в деле имеется, следовательно, работы считаются принятыми на основании ст. 753 ГК РФ. Кроме того, все работы по объекту переданы муниципальному заказчику и оплата последним с генподрядчиком произведена.

Объект введен в эксплуатацию 16.12.16.

Правовых оснований для удовлетворения исковых требований ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДЕКАР" к ООО "ДЕДАЛ-СТРОЙ" не имеется.

Срок выполнения работ по муниципальному контракту неоднократно переносился в связи с отсутствием подъездных путей для прохода балковозов.

Генподрядчик своевременно оплату не производил даже по принятым работам и подписанным актам, что подтверждается обоснованными исковыми требованиями ООО "ДЕДАЛ-СТРОЙ" к ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДЕКАР" по присоединенному делу.

Договор расторгнут 06.02.16 уведомлением субподрядчика от 27.01.16, поэтому неустойка за нарушение срока выполнения работ не может начисляться по 20.03.17.

Вины в нарушении сроков окончания работ в действиях субподрядчика не имеется, поэтому пени взысканию не подлежат.

Штраф по п.12.4.1 договора не может быть взыскан, так как он не применяется к просрочке исполнения обязательств, о чем прямо указано в данном пункте договора.

 20.03.17 между ООО "ПАРТНЕР". – третьим лицом и ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДЕКАР" был заключен договор уступки права требования (цессии) на сумму 18 614 337 руб. 90 коп. по договору №3-01/15 от 29.01.15.

Документов в обоснование действительности переданного права требования по договору уступки в материалах дела не имеется.

Третье лицо мотивированного отзыва не представило.

Учитывая изложенное, исковые требования ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДЕКАР", основанные на договоре цессии суд считает не доказанными и не подлежащими удовлетворению.

В связи с увеличением исковых требований с ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДЕКАР" подлежит взысканию в доход федерального бюджета 43 000 руб. 00 коп. государственной пошлины.

В связи с излишне уплаченной государственной пошлиной ООО "ДЕДАЛ-СТРОЙ" подлежит возврату 38 652 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Руководствуясь статьей 309, 310, 330, 711, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДЕКАР" отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДЕКАР" в доход федерального бюджета 43 000 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДЕКАР" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ДЕДАЛ-СТРОЙ" 8 960 880 руб. 58 коп. задолженности и 67 804 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине

Выдать исполнительные листы в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 Выдать обществу с ограниченной ответственностью "ДЕДАЛ-СТРОЙ" справку на возврат государственной пошлин в размере 38 652 руб. 00 коп. по платежному поручению №490 от 22.03.17.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.